РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-160692/23-110-1312

г. Москва

25 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 декабря 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью   "ДОМСЕРВИС" (142060, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО ГОРОД, 1-Я ВОКЗАЛЬНАЯ (БАРЫБИНО МКР) 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" (190031, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н ОФИС 33, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 3 707 428,68 руб.,

 

при участии:

от истца –ФИО3 по дов.  от  20.01.2023,

от ответчика- не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью   "ДОМСЕРВИС" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" о взыскании 3 657 428,68 руб. задолженности по договорам №919-ЮЭС/22-СП от 27.04.2022, №926-ЮЭС/22-СП от 29.04.2022, №960-ЮЭС/22-СП от 25.05.2022, №1000-ЮЭС/22-СП от 06.06.2022, №1041-ЮЭС/22-СП от 29.07.2022.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Домсервис» (далее - Субподрядчик, Истец) и ООО «Конценрт «Ленпромстрой» (далее -Подрядчик, Ответчик) в период с 27.04.2023 по 06.06.2023 был заключен ряд Договоров строительного субподряда.

Так, по условиям Договора строительного подряда № 919-ЮЭС/22-СП от 27.04.2022 г^п. 1.1. Договора: Ответчик поручает, а Истец принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Ответчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-74252(929272)), ПС №491 «Прудная», рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское Ю8-22-302-78788(963186) по адресу: МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино с выполнением следующих работ:

выполнение изыскательных работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком (Заказчиком является ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 2.1. Договора строительного подряда № 919-ЮЭС/22-СП от 27.04.2022 г. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет в текущих ценах с учетом договорного коэффициента К=0,95: 751 131, 57 руб., кроме того НДС 20% 150 226,31 руб. Всего с НДС 901 357, 88 руб.

Согласно п. 2.4.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором, при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по неуфицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Оплата выполненных проектно-изыскательных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Акты о приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 подписаны Сторонами 25.09.2022, следовательно, срок оплаты наступил 05.10.2022 г. По состоянию на 20.06.2023 оплата по настоящему Договору была произведена частично остаток задолженности составляет 884 088, 85руб.

Так, по условиям Договора строительного подряда № 926-ЮЭС/22-СП от 29.04.2022 г. п. 1.1. Договора: Ответчик поручает, а Истец принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Ответчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС № 491 «Прудная», рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Барыбино д Ю8-22-302-74252(929272) по адресу: МО, г.о. Домодедово, Барыбино д с выполнением следующих работ:

выполнение изыскательных работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком (Заказчиком является ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации.,

В соответствии с п. 2.1. Договора строительного подряда № 926-ЮЭС/22-СП от 29.04.2022 г. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет в текущих ценах с учетом договорного коэффициента К=0,95: 543 046,13 руб., кроме того НДС 20% 108 609,23 руб. Всего с НДС 651 655,36 руб.

Согласно п. 2.4.1. Оплата _ выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором, при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по неуфицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Оплата выполненных проектно-изыскательных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи1 результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Акты о приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 подписаны Сторонами 25.09.2022, следовательно, срок оплаты наступил 05.10.2022 г. По состоянию на 13.07.2023 оплата по настоящему Договору была произведена частично остаток задолженности составляет 651 653, 26 руб.

Так, по условиям Договора строительного подряда № 960-ЮЭС/22-СП от 25.05.2022 г. п. 1.1. Договора: Ответчик поручает, а Истец принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Ответчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ РУ-0,4-= кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-66710(627768)), ПС №491 «Прудная», рубильник, в т.ч. ПИР, МО, 

<

...>) по адресу: МО, 

<

...> с выполнением следующих работ:

выполнение изыскательных работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком (Заказчиком является ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 2.1. Договора строительного подряда № 960-ЮЭС/22-СП от 25.05.2022 г. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет в текущих ценах с учетом договорного коэффициента К=0,95:1 011 260,58 руб., кроме того НДС 20% 202 252,12 руб. Всего с НДС 1 213 512,70 руб.

Согласно п. 2.4.1, оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором, при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по неуфицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Оплата выполненных проектно-изыскательных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Акты о приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 подписаны Сторонами 26.12.2022, следовательно, срок оплаты наступил 11.01.2023 г. По состоянию на 13.07.2023 оплата по настоящему Договору была произведена частично остаток задолженности составляет 1 213 510, 43 руб.

Так, по условиям Договора строительного подряда № 1000-ЮЭС/22-СП от 06.06.2022 г. п. 1.1. Договора: Ответчик поручает, а Истец принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Ответчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-39333(306789)), ПС №491 «Прудная», рубильник, в т.ч. ПИР, МО, 

<

...>) по адресу: МО, 

<

...> с выполнением следующих работ:

выполнение изыскательных работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком (Заказчиком является ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 2.1. Договора строительного подряда № 1000-ЮЭС/22-СП от 06.06.2022 г. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет в текущих ценах с учетом договорного коэффициента К=0,95: 582 799, 57 руб., кроме того НДС 20% 116 559,91 руб. Всего с НДС 699 359,48 руб.

Согласно п. 2.4.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором, при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по неуфицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Оплата выполненных проектно-изыскательных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Акты о приемки выполненных работ "по форме КС-2 и КС-3 подписаны Сторонами 25.09.2022, следовательно, срок оплаты наступил 05.10.2022 г. По состоянию на 13.07.2023 оплата по настоящему Договору была произведена частично остаток задолженности составляет 410 927,16 руб.

Так, по условиям Договора строительного подряда № 1041-ЮЭС/22-СП от 29.07.2022 г. п. 1.1. Договора: Ответчик поручает, а Истец принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Ответчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-21 -302-71448(691657)), ПС №266 «Бор», рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское Ю8-22-302-93291(175185) по адресу: МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское с выполнением следующих работ:

выполнение изыскательных работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;

выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком (Заказчиком является ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 2.1. Договора Строительного подряда № Ю41-ЮЭС/22-СП от 29.07.2022 г. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет в текущих ценах с учетом договорного коэффициента К=0,95: 480 866, 55 руб., кроме того НДС 20% 96 173,31 руб. Всего с НДС 577 039, 86 руб.

Согласно п. 2.4.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором, при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по неуфицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Оплата выполненных проектно-изыскательных работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, предусмотренных Договором при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Акты о приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 подписаны Сторонами 26.12.2022, следовательно, срок оплаты наступил 11.01.2023 г. По состоянию на 13.07.2023 оплата по настоящему Договору была произведена частично остаток задолженности составляет 497 248, 98 руб.

В силу ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Итого задолженность по всем договорам строительного подряда у Ответчика перед Истцом составляет 3 657 428, 68 (Три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать восемь рублей) 68 копеек, что подтверждается подписанным Сторонами без замечаний Актом сверки.

В-соответствии со ст.711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно

В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. №51).

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 106 АПК РФ, к  судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Вместе с тем суд не находит оснований для возмещения расходов истца на оплату услуг представителя,  поскольку им не представлено доказательств их фактического понесения. При этом истец не лишен возможности обратиться  с соответствующим заявлением после вынесения судебного акта по существу  в порядке ст. 112  АПК РФ.

Во взыскании судебных расходов  отказать.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью   "ДОМСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>) 3 657 428 руб.  68  коп. задолженности, 41 537 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Во взыскании издержек отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

ФИО1