именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-83645/19-35-742

г. Москва

28 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2019 года

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: Панфиловой Г.Е. 

членов суда: единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску ПАО «МОЭСК»

к ответчику АО «Региональная энергетическая компания» 

о расторжении договора от 17.02.2014г. № И-14-302-59(939587)

с участием:

от истца- Мизерная С.Н. по доверенности 77АВ № 9664183 от 26.11.2018; 

от ответчика - ФИО2 по доверенности № б/н от 05.09.2018.

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МОЭСК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «Региональная энергетическая компания» о расторжении договора № ИА-14-302-59(939587) от 17.02.2014 об осуществлении технологического присоединения дополнительной мощности энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Ответчик иск не признал.

Изучив материалы дела, суд считает, что требования Истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

17 февраля 2014 года между ПАО «МОЭСК» (исполнитель, сетевая организация) и АО «Региональная энергетическая компания» (заявитель, заказчик) заключён договор № ИА-14-302-59(939587) о присоединении энергопринимающих устройств заявителя - жилых домов ЗАО «СУ № 155», расположенных по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, мкр. Южный, корп. 23а, 236, 24, - к электрической сети ПАО «МОЭСК».

Технические характеристики энергопринимающих устройств:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 1 151,9 кВт;

- категория надёжности: II (вторая).

Общий размер платы за технологическое присоединение по Договору ТП определен п. 3.1. Договора и составляет 717 679,78 руб. (в том числе НДС). Порядок и сроки внесения Заказчиком платы за технологическое присоединение определены в приложении 2 к настоящему Договору.

Обязательства, предусмотренные пп. 3.1, 3.2 и приложением 2 к Договору ТП, по внесению платы за технологическое присоединение Заказчиком исполнены.

Техническими условиями № 34-08/1954-952793 от 22.01.2014 г., являющимися неотъемлемой частью договора, определён перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределению обязанностей между сторонами.

В п.2.1.1 договора стороны согласовали, что обязуются выполнить мероприятия, необходимые для присоединения энергопринимающих устройств в течение 24 месяцев с даты заключения договора (т.е. до 17.02.2016 г.).

Однако до настоящего момента мероприятия со стороны заказчика исполнены не были.

Срок действия технических условий № 34- 08/1954-952793 составляет 3 года, т.е. до 17.02.2017 г. (п. 12.5 технических условий) и на сегодняшний день этот срок истёк.

В соответствии с п. 27 Правил технологического присоединения при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий.

Однако по истечении срока действия технических условий № 34-08/1954-952793 ответчик за продлением срока их действия не обращался. Уведомление о выполнении технических условий не поступало.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон или по решению суда.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Неисполнение со стороны АО «Региональная энергетическая компания» в своей части мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями № 34-08/1954-952793, является существенным нарушением договора технологического присоединения № ИА-14-302-59(939587).

В отзыве на иск Ответчик утверждает о невозможности исполнения АО «РЭК» (Ответчиком) своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № ИА-14-302-59 (939587) от 17.02.2014.

14.02.2019 г. в адрес заказчика Истцом было направлено соглашение о расторжении договора с сопроводительным письмом от 13.02.2019 г. № МОЭСК/203/406, что подтверждается квитанцией Почты России и описью вложений в ценное письмо.

Ответ от АО «Региональная энергетическая компания» Истцом получен не был.

В соответствии с п. 1. ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 123, 150, 151, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 177 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор № ИА-14-302-59(939587) от 17.02.2014 об осуществлении технологического присоединения дополнительной мощности энергопринимающих устройств к электрическим сетям, заключенный между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Региональная энергетическая компания».

Взыскать с АО «Региональная энергетическая компания» в пользу ПАО «МОЭСК» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца с момента изготовления решения в полном виде.

Судья                                                                        Панфилова Г.Е.