30_3449588  

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-11156/2022

город Мурманск

10 января 2023 года

Руководствуясь статьями 167 – 170, 174, 176 АПК РФ, суд 

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Мурмандорремстрой» в  течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить недостатки благоустройства дворовой территории  многоквартирного дома в 

<

...>, в том числе,  

устранить смещение 8,8 погонных метра бортового камня БР 100.20.8 и 2,5 п.м.  бортового камня БР 100.30.15;  

выполнить обратную засыпку 4,7 м3 грунта в пустоты, образовавшиеся при  демонтаже ограждения и бордюра;  

восстановить 30 п.м. асфальтобетонного покрытия в местах примыкания к обочине; 

устранить поверхностную коррозию металлических конструкций 4 лавок и 4 урн  посредством их очистки от ржавчины, покрытия грунтом, окрашивания;  

устранить люфт крепления 21 п.м. металлического ограждения к поверхности  посредством надлежащего бетонирования опор ограждения;  

выполнить надлежащее крепление 10 стоек металлоконструкции контейнерной  площадки к бетонному основанию;  

устранить дефект закрытия задних и боковых стенок контейнерной площадки  посредством установки 8 стенок;  

устранить поверхностную коррозию металлической конструкции контейнерной  площадки путем ее очистки от ржавчины, покрытия грунтом, окрашивания.  

В случае неисполнения судебного акта в установленный срок взыскать с ООО  

«МДРС» в пользу МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» 50000 рублей судебной неустойки. 

Взыскать с ООО «МДРС» в федеральный бюджет 6000 рублей государственной  

пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца после  

его принятия. 

Судья В.В. Власов