Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А72-5209/2025

г. Ульяновск

15 июля 2025г.

Резолютивная часть решения оглашена 08 июля 2025г.

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2025г.

Арбитражный суд в составе председательствующего  Слепенковой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сорокиной М.Е.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Проектстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "АльфаТрансСтрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 3 171 970 руб. 90 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, паспорт, доверенность, диплом (веб-конференция)

от ответчика – не явился, уведомлен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Проектстрой" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АльфаТрансСтрой" о взыскании основного долга в размере 3 171 970 руб. 90 коп.

Определением суда от 06.05.2025 исковое заявление принято к производству.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. 

Дело в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассматривается в его отсутствие.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,   суд приходит к следующему. 

Как усматривается из материалов дела, 19.06.2023 между ООО «ПроектСтрой» (истец, Субподрядчик) и ООО «Альфатрансстрой» (ответчик, Подрядчик) заключен договор субподряда №31/2 от 19.06.2023.

Данный договор заключен в целях исполнения муниципального контракта № 31 от 26.05.2023 года по ремонту автомобильных дорог города Ульяновска, заключенного между Подрядчиком и Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, именуемого в дальнейшем «Заказчик» на основании результатов электронного аукциона (Протокол № ИЭОКЗ от 15 мая 2023 г., ИКЗ 233732508910073250100100100014211244).

Согласно радела 1 договора, Подрядчик поручает, а Субподрядчик, принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильных дорог города Ульяновска, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Работы выполняются в соответствии с условиями договора и приложениями к нему: Расчетом цены (Приложение №1), Локальными сметами (Приложение № 2) (далее также - Сметная документация), сводными ведомостями объемов работ (Приложение № 3), Схемами участков ремонта (Приложение № 4), Типовым перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 5), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.       

Место выполнения работ: город Ульяновск, объекты в соответствии с адресным перечнем объектов ремонта (Приложение № 8 к настоящему договору).

Срок выполнения работ устанавливается: с даты заключения настоящего договора до 15.10.2023 года.  

Информация о сроках исполнения договора (сроки определены с учётом положений ст. 94 Закона №44-ФЗ, письма Минфина России от 12.05.2022 № 24-06-07/43394 и включают в себя, в том числе приёмку товара, работы, услуги, а также оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги):

Дата начала исполнения договора: с даты заключения договора.

Дата окончания исполнения договора: 01.07.2024 г.

Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №7).

Сроки завершения работ, определенные Графиком выполнения работ (Приложение №7), могут изменяться по соглашению Сторон в пределах сроков, указанных в абзаце 1 настоящего пункта Договора.     

Согласно пп. 2.1-2.2 договора, цена договора определена согласно расчёту цены (Приложение №1), Локальным сметам (Приложение № 2) и составляет 149 911 996 рублей 80 копеек, в том числе НДС 20 % - 24- 985 332 рубля 80 копеек.

Цена договора установлена в российских рублях, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 настоящего договора.

В цену договора включены все расходы на используемые материалы, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательствам Российской Федерации, транспортные/ командировочные расходы, иные обязательные платежи, которые Субподрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего договора.           

Согласно п. 2.6 договора, оплата выполненных работ по настоящему договору производится в течение не более 7 (семи) рабочих дней после подписания Подрядчиком документов о приемке выполненных работ и перечисления Подрядчику денежных средств от Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в безналичной форме.

Согласно акту о приемке выполненных работ №7 от 28.12.2023, справке о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 28.12.2023 им выполнены работы на сумму 5 171 970 руб. 90 коп.

Платежным поручением №65 от 15.01.2025 ответчик произвел частичную оплату задолженности в размере 2 000 000,00 рублей.

Оставшаяся сумма в установленные договором сроки ответчиком не была произведена.

В связи с чем истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность.

Данное требование ответчиком оставлено без исполнения. 

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса  РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно ч.1 ст. 708 Гражданского Кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно ч.3 ст. 708 Гражданского Кодекса РФ указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Мотивированный отказ от подписания акта ответчиком не заявлен, передача результата работ надлежащими доказательствами не оспорена. 

По сведениям истца, задолженность ответчика составляет 3 171 970 руб. 90 коп.   

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании  вышеизложенного, исковые требования в размере 3 171 970 руб. 90 коп. законны, обоснованны и подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ следует возложить  на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АльфаТрансСтрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 3 171 970 руб. 90 коп.-основной долг, 120 159 руб.- госпошлину.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Проектстрой" из федерального бюджета госпошлину в размере 13 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения путем подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                       О.А. Слепенкова