Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-20662/2021

г. Хабаровск

13 апреля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 08.04.2022 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного  заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Стройресурс ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681005, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Востокстроймеханизация-22» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 680031, 

<

...>)

о взыскании 96 932 506 руб. 41 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2 по доверенности от 26.04.2021 г. (после перерыва),

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс ДВ»  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Востокстроймеханизация-22» долга в размере 96 932 506 руб. 41 коп.

В судебном заседании 06.04.2022 г. в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 08.04.2022 г. до 11 час. 30 мин. и до 15 часов 30 минут.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства по существу, в судебное заседание не явился, представил заявление о признании иска в заявленном размере.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено по существу в отсутствие ответчика.

Представитель истца поддержал исковые требования  по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 10.02.2020 г. между истцом (субсубподрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен договор № 3 на выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объекте железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Строительство второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур Дальневосточной железной дороги».

В соответствии с условиями настоящего договора субподрядчик поручает, а субсубподрядчик принимает на себя  подряд на выполнение комплекса работ по строительству объекта, включающего строительно-монтажные работы (работы) на объекте железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Строительство второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур Дальневосточной железной дороги» в пределах ПК 690+00-ПК 719+00 (объект).

Согласно пункту 2.1 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2020 г.) ориентировочная стоимость работ, подлежащих выполнению субподрядчиком по настоящему договору оформлена в виде Ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет – 134 364 614 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 3.2 договора, субподрядчик ежемесячно осуществляет оплату выполненных по настоящему договору работ подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены в следующем порядке:

- по работам, сданным субсубподрядчиком по актам и принятым субподрядчиком до 20-го числа (включительно) отчетного месяца, оплата осуществляется в течение 65 календарных дней принятия работ субподрядчиком,

- по работам, сданным субсубподярдчиком по актам и принятым субподрядчиком после 20-го числа отчетного месяца, оплата осуществляется в течение 75 календарных дней после принятия работ субподрядчиком.

Оплата и выполненных работ (в том числе поставленного оборудования) производится  до 95 % от стоимости выполненных работ с учетом ранее выплаченного аванса. Оплата оставшихся 5% (гарантийного удержания) от стоимости выполненных работ производится субподрядчиком в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора.

В силу пункта 3.4 договора, окончательный расчет за выполненные и сданные работы  (в том числе поставленного оборудования) по настоящему договору производится субподрядчиком после полного завершения работ по настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке объекта, возмещения нанесенного ущерба субподрядчику и (или) третьим лицам с зачетом ранее перечисленных средств не позднее 75 календарных дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС 14) с приложением к нему реестров счетов-фактур, актов о приемке смонтированного оборудования, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором документов.

Пунктом 6.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2020 г.)  установлены сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание – декабрь 2020 г.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ № 1 от 29.02.2020 г., № 2 от 29.02.2020 г., № 3 от 31.03.2020 г., № 4 от 31.03.2020 г., № 5 от 31.03.2020 г., № 6 от 30.04.2020 г., № 7 от 30.04.2020 г., № 8 от 31.05.2020 г., № 9 от 30.10.2020 г., № 10 от 30.10.2020 г., № 11 от 30.10.2020 г., № 12 от 30.10.2020 г., № 13 от 20.07.2020 г., № 14 от 31.08.2020 г., № 15 от 31.08.2020 г., № 16 от 31.08.2020 г., № 17 от 30.09.2020 г., № 18 от 30.09.2020 г., № 19 от 30.09.2020 г., № 20 от 31.10.2020 г., № 21 от 31.10.2020 г., № 22 от 31.10.2020 г., № 23 от 31.10.2020 г., № 24 от 30.11.2020 г., № 25 от 30.11.2020 г., подписанными сторонами без замечаний и возражений, истцом работы выполнены, а ответчиком приняты на сумму 128 495 177 руб. 08 коп.

Ответчик произвел частичную оплату за выполненные работы по данному договору, в результате  возник долг 42 075 749 руб. 90 коп.

Кроме того, 02.11.2020 г. между истцом (субсубподрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен договор № 7 на выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объекте железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Реконструкция станции ФИО3 Дальневосточной железной дороги».

В соответствии с условиями настоящего договора субподрядчик поручает, а субсубподрядчик принимает на себя  подряд на выполнение комплекса работ по строительству объекта, включающего строительно-монтажные работы (работы) на объекте железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД»: «Реконструкция станции ФИО3 Дальневосточной железной дороги» (объект).

В соответствии с пунктом 3.2 договора, субподрядчик ежемесячно осуществляет оплату выполненных по настоящему договору работ подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены в следующем порядке:

- по работам, сданным субсубподрядчиком по актам и принятым субподрядчиком до 20-го числа (включительно) отчетного месяца, оплата осуществляется в течение 65 календарных дней принятия работ субподрядчиком,

- по работам, сданным субсубподрядчиком по актам и принятым субподрядчиком после 20-го числа отчетного месяца, оплата осуществляется в течение 75 календарных дней после принятия работ субподрядчиком.

Оплата и выполненных работ (в том числе поставленного оборудования) производится  до 95 % от стоимости выполненных работ с учетом ранее выплаченного аванса. Оплата оставшихся 5% (гарантийного удержания) от стоимости выполненных работ производится субподрядчиком в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора.

В силу пункта 3.4 договора, окончательный расчет за выполненные и сданные работы  (в том числе поставленного оборудования) по настоящему договору производится субподрядчиком после полного завершения работ по настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке объекта, возмещения нанесенного ущерба субподрядчику и (или) третьим лицам с зачетом ранее перечисленных средств не позднее 75 календарных дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС 14) с приложением к нему реестров счетов-фактур, актов о приемке смонтированного оборудования, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором документов.

Пунктом 6.1 договора установлены сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание – декабрь 2021 г.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ № 1 от 31.03.2021 г., № 2 от 30.06.2021 г., № 3 от 30.06.2021 г., № 4 от 31.07.2021 г., № 5 от 31.07.2021 г., № 6 от 31.07.2021 г., № 7 от 31.07.2021 г., № 8 от 31.08.2021 г., № 9 от 30.08.2021 г., №10 от 31.08.2021 г., № 11 от 31.08.2021 г., № 12 от 31.08.2021 г., № 13 от 31.06.2021 г., № 14 от 31.10.2021 г., № 15 от 31.10.2021 г., № 16 от 31.10.2021 г., № 17 от 31.10.2021 г., № 18 от 31.10.2021 г., подписанными сторонами без замечаний и возражений, истцом работы выполнены, а ответчиком приняты на сумму 67 221 756 руб. 51 коп.

Ответчик произвел частичную оплату за выполненные работы по данному договору, в результате  возник долг 54821756руб. 51 коп.

Помимо этого, 30.04.2020 г. истец выполнил по заказу ответчика транспортные услуги по доставке трубы Q=1000 мм., 800 мм. на объект «Строительство второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур Дальневосточной железной дороги»» на сумму 35 000 руб. 00 коп.

Оплата выполненных работ и транспортных услуг ответчиком в полном объеме не произведена, в результате  сложилась задолженность в размере 96 932 506 руб. 41 коп.

Истец вручил ответчику претензию № 1-43/1 от 01.12.2021 г. с требованием об уплате долга.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает иск подлежащим удовлетворению.

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о подряде и нормами главы 39 ГК РФ о возмездном оказании услуг, а также положениями статей 309, 310 ГК РФ, предусматривающих исполнение обязательств надлежащим образом.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Материалами дела подтверждается выполнение истцом и принятие ответчиком работ, а также факт оказания транспортных услуг.

Доказательств исполнения обязательств по оплате выполненных истцом работ и оказанных услуг в полном объеме ответчик не представил, в материалы дела представил заявление о признании иска в полном объеме.

При таких обстоятельствах, требование о взыскании долга в размере 96 932 506 руб. 41 коп. подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Востокстроймеханизация-22» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройресурс ДВ» долг в сумме 96 932 506 руб. 41 коп., а также расходы по госпошлине в сумме  200 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

     Судья            С.И. Дюкова