﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2020 года

Дело №

А56-60915/2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Васильевой Е.С.,                   Лущаева С.В.,

при участии от некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Лопатина С.В. (доверенность от 11.07.2019 № 229),

рассмотрев 03.06.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Миро Групп» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.08.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2019 по делу № А56-60915/2019,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Миро Групп», адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 103, корп. 3, лит. В, пом. 311, оф. 2, ОГРН 1107847189999, ИНН 7841427964 (далее - Общество), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», адрес: 188653, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, населенный пункт военный городок Агалатово, д. 161,                  ОГРН 1134700002007, ИНН 4703471025 (далее - Фонд), о признании недействительными приложений № 3 (График выполнения работ) и № 3.1 (Календарный план выполнения работ) к договору от 03.05.2018 № 2018-98 (далее - договор).

Решением суда первой инстанции от 27.08.2019, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 04.12.2019, в удовлетворении заявленных требований Обществу отказано.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение от 27.08.2019 и постановление от 04.12.2019 и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению подателя жалобы, суды приняли обжалуемые судебные акты по неполно исследованным доказательствам,  имеющим существенное значение для правильного разрешения спора. Истец указывает, что согласованный в приложениях № 3 и № 3.1 к договору срок проведения экспертизы проектно-сметной документации в одну неделю не соответствует требованиям действующего законодательства. Общество полагает, что установление таких коротких сроков проведения государственной экспертизы может быть осуществлено только субъектом Российской Федерации, а в данном случае нормативно-правовые акты субъекта о недельном сроке проведения экспертизы в материалах дела отсутствуют. 

В судебном заседании представитель Фонда возражал против удовлетворения кассационной жалобы. 

Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте слушания дела, своих представителей в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчик) и Фондом (заказчик) 03.05.2018 заключен договор, согласно которому подрядчик обязался выполнить комплекс работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области по адресам, указанным в адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ (приложение № 2).

Стоимость работ согласована сторонами в пункте 2.1 договора в размере           30 316 616 руб. 37 коп., в том числе 18% НДС (4 624 568 руб. 60 коп.).

Сроки выполнения работ определены в пункте 3.2 договора: начало – с даты заключения договора; окончание – в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 3) в течение 11 недель с даты заключения договора, то есть не позднее 01.08.2018.

Пунктом 4.2.1.3 договора предусмотрено, что подрядчик обязан самостоятельно от собственного имени и за свой счет вступить в договорные отношения с экспертной организацией для проведения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости работ.

Согласно пункту 1.2 Графика выполнения работ (приложение № 3) срок проведения экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада составляет одну неделю. 

Во исполнение условий договора Общество 23.05.2018 заключило с обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» (далее – Экспертный центр) договор № МЭЦ-ПД/888-н1/05/1 на проведение экспертизы разработанной проектной документации и достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. Срок проведения экспертизы составил 5 рабочих дней.

В письме от 29.05.2018 № 73 Экспертный центр сообщил, что проведение экспертизы невозможно ввиду того, что проведение такой проверки нормами действующего законодательства возложено на органы исполнительной власти и государственные учреждения, к которым Экспертный центр не относится. 

Полагая, что установленный в приложениях № 3 (График выполнения работ) и № 3.1 (Календарный план выполнения работ) к договору срок проведения экспертизы проектно-сметной документации в одну неделю не соответствует требованиям действующего законодательства, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о признании указанных приложений к договору недействительными.

Суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели правовых оснований для удовлетворения заявленного Обществом требования и признания указанных приложений к договору недействительными.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, проверив правильность применения судебными инстанциями норм материального и процессуального права, считает принятые по делу судебные акты не подлежащими отмене по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В статье 168 ГК РФ предусмотрено, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

По смыслу указанной нормы права основанием для признания сделки недействительной в порядке статьи 168 ГК РФ является установление обстоятельств несоответствия сделки закону или иному правовому акту и нарушения совершенной сделкой законных прав и интересов лица, обращающегося с иском. 

Как разъяснено пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», в соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

Пунктом 1 статьи 760 ГК РФ определена обязанность подрядчика, наряду с выполнением работ  в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором, согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

При этом в силу общих положений о подряде начальный и конечный сроки выполнения работы, а по согласованию  между сторонами - сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), указываются в договоре подряда (пункт 1 статьи 708), а следовательно указанная норма носит диспозитивный характер.

В рассматриваемом случае стороны по собственному усмотрению, исходя из принципа свободы договора (статья 421 ГК РФ), действуя своей волей и в своем интересе (пункт 2 статьи 1 ГК РФ), определили сроки выполнения работ, а также их этапов в разделе 3 договора в соответствии с приложениями № 3 и № 3.1 к договору.

Как верно отметили судебные инстанции, подавая заявку на участие в торгах на право заключения договора, а также, заключая сам договор, Общество было осведомлено об условиях его исполнения, в том числе, в части сроков выполнения отдельных этапов работ, при этом каких-либо возражений по поводу обусловленных сроков не заявляло. Более того, Общество обратилось с заявлением в суд о признании недействительными приложений № 3 и № 3.1 к договору, только после получения от Фонда претензии о ненадлежащем исполнении подрядчиком условий спорного договора.

Ссылка Общества на то, что указанные приложения к договору в части сроков проведения экспертизы не соответствуют  пунктам 19 и 20 (1) Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (далее – Порядок), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 (в редакции от 13.12.2017, действующей в спорный период), была исследована судами и получила их правовую оценку.

Как правильно указали суды, пунктом 19 Порядка установлен максимальный предел срока проведения проверки сметной стоимости (не более 30 рабочих дней), но не минимальный. В качестве исключения в данном пункте указано, что в случае если проверка сметной стоимости осуществляется одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации, то такая проверка осуществляется в пределах срока проведения государственной экспертизы.

Из материалов дела видно, что предусмотренный пунктом 19 Положения максимальный срок проверки сметной стоимости (30 рабочих дней) при заключении спорного договора с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью, не нарушен.

При указанных обстоятельствах суды правомерно не усмотрели оснований  для признания приложений № 3 и № 3.1 к договору не соответствующими закону или иному правовому акту и нарушающими законные права и интересов Общества применительно к положениям статей 166 и 168  ГК РФ.

Доводы Общества, изложенные в жалобе, не содержат фактов, которые не проверены и не учтены судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела и имели бы значение для вынесения судебных актов по существу, влияли на их обоснованность и законность, либо опровергали выводы судов.

Учитывая, что дело рассмотрено судебными инстанциями полно и всесторонне с правильным применением норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых решения и постановления и удовлетворения кассационной жалобы Общества.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.08.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2019 по делу № А56-60915/2019 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Миро Групп» - без удовлетворения.

 

Председательствующий

Л.И. Корабухина

Судьи

Е.С. Васильева

С.В. Лущаев