Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-387/2024

г. Хабаровск

14 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2024 года

Мотивированное решение изготовлено 14 марта 2024 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Руденко Р.А., с участием секретаря судебного заседания ФИО1, ведущей протокол судебного заседания с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел в заседании суда дело по заявлению Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю от 25.12.2023г. № 98 по делу № 027/04/9.21-1589/2023 о назначении административного наказания по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 600 000 руб.

В судебное заседание явились:

от АО «ДРСК» - ФИО2, представитель по доверенности от 03.12.2022г. № 21;

от Хабаровского УФАС России - ФИО3, представитель по доверенности от 11.03.2024г. № ТТ/3405/24.

 

Суд установил: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее - АО «ДРСК», Общество) обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю (далее - Хабаровское УФАС России) от 25.12.2023г. № 98 по делу № 027/04/9.21-1589/2023 о назначении административного наказания по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 600 000 руб.

В судебном заседании представитель АО «ДРСК» заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении и дополнениях к нему, просит суд снизить размер штрафа, ввиду тяжелого материального положения Общества, ответил на вопросы суда.

В судебном заседании представитель Хабаровского УФАС России с заявленными требованиями не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на заявление, дал пояснения.

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

16.10.2023г. в Хабаровское УФАС России поступило заявление гр. ФИО4 (вх. 16414-ЭП/23 от 16.10.2023) на действия (бездействие) АО «ДРСК» в части нарушения срока исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор, Договор технологического присоединения).

 

Как следует из заявления, между гр. ФИО4 и АО «ДРСК» заключен Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств гр. ФИО4, расположенных по адресу: 

<

...> кадастровый номер 27:17:0329204:1513.

Пунктом 6.1 Технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям № ТПр 2/23 от 23.01.2023г. (далее - Технические условия) установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев с даты оплаты счета на технологическое присоединение.

Оплата счета произведена 24.01.2023г.

Договор технологического присоединения считается заключенным с 24.01.2023г.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 24.07.2023г.

Согласно пункту 9 Технических условий для присоединения к электрическим сетям в обязанности сетевой организации входит следующие технические мероприятия:

Реконструкция ТП-2141 с силовым трансформатором мощностью 40 кВД на трансформатор мощностью не менее 250 кВА.

Реконструкция сети с установкой коммутационного аппарата.

Организация коммерческого учета электрической энергии в соответствии требованиями, установленными Основными положениями функционирования розни рынков электрической энергии.

Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактическую (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройств заявителя электрической энергии (мощности).

В установленный договором срок технологическое присоединение не осуществлено.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 06.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. № 861 утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила № 861).

В соответствии с пунктом 1 Правил № 861, Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее энергопринимающие устройства), к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 2 Правил № 861 действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В силу пункта 3 Правил № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 6 Правил № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с пунктом 7 Правил № 861, настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель),которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 Правил № 861;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическомуприсоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственногоэнергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственногоэнергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетомположений пунктов 18 (1) - 18 (4) Правил не требуется;

 

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединенияобъектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения поформе согласно приложению № 1, а также акта согласования технологической и(или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14 (2) Правил).

Пунктом 14 Правил № 861 определена категория заявителей - физические лица, обратившиеся в сетевую организацию в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 16 Правил № 861 договор должен содержать, в том числе, следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению,который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В силу пункта 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и ихсогласование с системным оператором;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласнообязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах егоземельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий,включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики;

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией техническихусловий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.

Кроме того, в соответствии с пунктом 103 Правил № 861 договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12 (1), 13(2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Пунктом 104 Правил № 861 определено, что наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

Как указано ранее, между гр. ФИО4 и АО «ДРСК» заключен Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств гр. ФИО4, расположенных по адресу: 

<

...> кадастровый номер 27:17:0329204:1513.

Пунктом 6.1 Технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям № ТПр 2/23 от 23.01.2023г. (далее - Технические условия) установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев с даты оплаты счета на технологическое присоединение.

Оплата счета произведена 24.01.2023г.

Договор технологического присоединения считается заключенным с 24.01.2023г.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 24.07.2023г.

В установленный договором срок технологическое присоединение не осуществлено.

По результатам рассмотрения обращения гр. ФИО4, приложенных документов и сведений, предоставленных АО «ДРСК», Хабаровским УФАС России установлено бездействие АО «ДРСК» по выполнению обязанностей, определенных пунктом 9 Технических условий, пунктом 6.1 Технических условий, Хабаровским УФАС России было установлено нарушение срока технологического присоединения объекта гр. ФИО4, определенного пунктами 7, 16 Правил № 861.

Частью 1.1 статьи 23.2 Федерального закона от 06.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлено, что деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии осуществляется в условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с законодательством о естественных монополиях, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Согласно положениям частей 1, 2 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

 

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за нарушение Правил (порядка технологического присоединения) для субъектов естественной монополии, оказывающих услуги по передаче электрической энергии.

Таким образом, АО «ДРСК» является субъектом естественной монополии, на которого распространяются положения части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлено, что нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Хабаровским УФАС России установлено, что в отношении АО «ДРСК» за совершение однородного административного правонарушения возбуждалось, рассматривалось дело 027/04/9.21-1660/2022 об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, по которому в дальнейшем было вынесено постановление № 1 от 10.01.2023г. о наложении штрафа в размере 600 000 руб.

Постановление № 1 о наложении штрафа по делу № 027/04/9.21-1660/2022 об административном правонарушении от 10.01.2023г. не обжаловалось и вступило в законную силу 31.01.2023г., оплачено 10.02.2023г.

Согласно ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного административного правонарушения - совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

В связи с чем, по состоянию на дату совершения административного правонарушения 25.07.2023г. АО «ДРСК» считалось подвергнутым административному наказанию по ст. 9.21 КоАП РФ.

 

На основании изложенного, должностным  лицом Хабаровского УФАС России сделан вывод, что в действиях (бездействии) АО «ДРСК» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению объекта, нарушающих установленный Правилами порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, усматривается событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.

О месте и времени составления протокола об административном правонарушении 12.12.2023г. в 14 часов 30 минут, АО «ДРСК» было извещено уведомлением от 07.12.2023г. № НК/12327/23, которое получено Обществом 07.11.2023г. под вх. № 1/4/9862.

12.12.2023г. должностным лицом Хабаровского УФАС России ФИО5 в отношении АО «ДРСК» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии представителя АО «ДРСК» ФИО6, действующей на основании доверенности от 03.12.2022г. № 24 с полномочиями на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, вручен ей под роспись 12.12.2023г.

О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении 25.12.2023г. в 15 часов 00 минут, АО «ДРСК» было извещено определением от 14.12.2023г. № НК/12620/23, которое получено Обществом 14.12.2023г. под вх. № 1/4/10101.

25.12.2023г. заместителем руководителя Хабаровского УФАС России ФИО7 в отношении АО «ДРСК» было вынесено постановление о от 25.12.2023г. № 98 по делу № 027/04/9.21-1589/2023 о назначении административного наказания по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 600 000 руб.

При рассмотрении дела об административном правонарушении присутствовал представитель АО «ДРСК» ФИО6, действующая на основании доверенности от 03.12.2022г. № 24.

Не согласившись с указанным постановлением, АО «ДРСК» обратилось в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании его законности.

АО «ДРСК» не оспаривая событие правонарушения, нарушение срока на технологическое присоединение объекта гр. ФИО4 к электрическим сетям, просит суд снизить размер административного штрафа до 300 000 руб. с учетом трудного финансового положения Общества.

Представитель Хабаровского УФАС России считает обжалуемое постановление законным и обоснованным.

Заслушав в судебном заседании пояснения представителей сторон, изучив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как указано ранее, между гр. ФИО4 и АО «ДРСК» заключен Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств гр. ФИО4, расположенных по адресу: 

<

...> кадастровый номер 27:17:0329204:1513.

Пунктом 6.1 Технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям № ТПр 2/23 от 23.01.2023г. (далее - Технические условия) установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев с даты оплаты счета на технологическое присоединение.

Оплата счета произведена 24.01.2023г.

Договор технологического присоединения считается заключенным с 24.01.2023г.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 24.07.2023г.

В установленный договором срок технологическое присоединение не осуществлено.

Судом установлено, что АО «ДРСК» нарушило сроки на технологическое присоединение объекта гр. ФИО4 к электрическим сетям.

АО «ДРСК» подключение объекта гр. ФИО4 к электрическим сетям на момент рассмотрения дела в суде не осуществлено, то есть срок подключения объекта нарушен более чем на семь месяцев.

Указанное обстоятельство АО «ДРСК» не оспаривается.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в бездействии АО «ДРСК» по выполнению обязанностей, определенных пунктом 9 Технических условий, в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих гр. ФИО4, Хабаровским УФАС России обоснованно установлено нарушение порядка (процедуры) технологического присоединения, определенного пунктами 7, 16 Правил № 861, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, поскольку ранее АО «ДРСК» уже привлекалось к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ постановлением № 1 о наложении штрафа по делу № 027/04/9.21-1660/2022 от 10.01.2023г., которое оплачено 10.02.2023г.

Обстоятельства административного правонарушения, совершенного Обществом, подтверждаются материалами дела, Обществом не оспаривается. 

Суд считает, что административным органом доказана также и вина Общества в совершении административного правонарушения.

В части 1 ст. 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Согласно пункту 16.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» от 02.06.2004г. № 10 в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). 

Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

При рассмотрении дела суду не представлено доказательств, что Общество не могло, будучи осмотрительным, исполнить требования действующего законодательства.

Следовательно, вина АО «ДРСК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 9.21 КоАП РФ административным органом установлена и доказана.

Нарушений Хабаровским УФАС России порядка проведения проверки судом не установлено.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» предусмотрено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Малозначительность административного правонарушения является категорией оценочной, критерии оценки КоАП РФ не установлены и определяются судом в каждом конкретном случае.

Постановлением Пленума ВАС РФ от 20.11.2008г. № 60 «О внесении дополнений в некоторые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях» квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

В рассматриваемом случае АО «ДРСК» не предприняло мер для выполнения требований действующего законодательства. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям выражается в пренебрежительном отношении Общества к выполнению своих публично-правовых обязанностей.

Состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ является формальным, ответственность за его совершение применяется вне зависимости от наступления ущерба или иных вредных последствий.

В результате бездействий АО «ДРСК» были нарушены права потребителя ФИО4 на технологическое присоединение к сетям, что не может быть признано малозначительным.

Судом установлено, что АО «ДРСК» неоднократно привлекалось к административной ответственности по факту совершения правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ. 

Так за период с 2021 года по 2022 год по результатам рассмотрения 13 раз. С января 2023 года по 28.11.2023г вынесено 36 постановлений о привлечении АО «ДРСК» к административной ответственности.

Указанное подтверждается материалами дела, а также  решением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.10.2023г. по делу А73-13587/2023, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2023г. № 06АП-6079/2023.

 

Указанное свидетельствует о пренебрежительном отношении Общества к выполнению своих публично-правовых обязанностей.

С учетом положений ст. 3.4, 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение.

Нарушений порядка привлечения Общества к административной ответственности судом не установлено.

Установленный статьей 4.5  КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности не пропущен.

АО «ДРСК» факт правонарушения признало, указывает на принятие мер к устранению выявленного правонарушения, просит суд снизить размер административного штрафа с учетом материального положения Общества.

Доводами АО «ДРСК» об основных причинах не исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих гр. ФИО4, являются: недостаточность финансирования и нестабильная экономическая ситуация в стране, а также значительное увеличение спроса на технологическое присоединение, и как следствие рост объемов выполняемых сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, что в условиях ограниченного числа действующих подрядных организаций, а также поставщиков необходимых материалов и оборудования (в том числе приборов коммерческого учета электрической энергии), повлекло возникновение задержки в реализации мероприятий по строительству электрических сетей, а также, сложившаяся в последние годы экономическая ситуация в стране не позволила в полной мере реализовать производственные программы в планируемые сроки и в полном объеме.

Однако при рассмотрении дела в суде, АО «ДРСК» доказательства в обоснование своих доводов о невозможности подключения ФИО4 к электрическим сетям в установленный срок, доказательства трудного материального положения Общества суду не представлено.

Вышеуказанные доводы судом не принимается по следующим основаниям.

АО «ДРСК», являясь сетевой организацией, субъектом естественной монополии при заключении договора подряда у АО «ДРСК» была обязанность обеспечить техническую возможность процедуры технологического присоединения для удовлетворения спроса лиц, обратившихся в сетевую организацию для заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Вышеуказанные обстоятельства не являются чрезвычайными, которые невозможно предвидеть, и АО «ДРСК», являясь сетевой организацией, профессиональным участником соответствующего товарного рынка, субъектом естественной монополии со значительным и многолетним опытом деятельности в области технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, должно было учесть возможные риски, возникающие при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения. Вследствие затягивания и несвоевременного принятия мер по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих ФИО4 были нарушены его права.

Судом установлено, что АО «ДРСК» подключение объекта гр. ФИО4 к электрическим сетям на момент рассмотрения дела в суде не осуществлено, то есть срок подключения объекта нарушен более чем на семь месяцев.

 

 

Согласно отчета о финансовых результатах АО «ДРСК» за 2022г., чистая прибыль АО «ДРСК» в 2022г. составила 258 729 000 руб.

Судом при рассмотрении дела установлено, что согласно бухгалтерскому балансу за 2022г. активы Общества в денежном выражении составляли 55 643 830 000 руб.

Согласно отчету о финансовых результатах АО «ДРСК» за 3 квартал 2023г. убыток от деятельности Общества составил 281 220 000 руб.

Судом при рассмотрении дела установлено, что согласно бухгалтерскому балансу за 2023г. активы Общества в денежном выражении составляли 69 733 295 000 руб.

Согласно отчету о финансовых результатах АО «ДРСК» за 2023г. убыток от деятельности Общества составил 717 242 000 руб.

Однако при этом, согласно информации размещенной на официальном сайте Общества, в соответствии с отчетом о движении денежных средств за 2023г., на конец года на счетах Общества имелся остаток денежных средств в размере 3 757 429 000 руб. 

В 2022 году остаток денежных средств на счетах общества составлял 2 930 758 000 руб.

Согласно информации размещенной на официальном сайте АО «ДРСК», уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2023г. составляет 9 959 501 868 руб. 44 коп.

С учетом изложенного АО «ДРСК» доказательств затруднительного финансового положения Общества суду не представлено.

Согласно статье 3.1 КоАП РФ - административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Поэтому при наличии формальных признаков состава правонарушения подлежит оценке вопрос о целесообразности меры воздействия, применяемой к правонарушителю.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно общим правилам назначения административного наказания, основанным на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ).

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 3 статьи 4.1 КоАП РФ).

Тем не менее применительно к административным штрафам, минимальные размеры которых сопряжены со значительными денежными затратами, установленное в ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ общее правило назначения наказания может - при определенных обстоятельствах - противоречить целям административной ответственности и приводить к чрезмерному ограничению конституционных прав и свобод.

В связи с этим, размер административного штрафа, назначаемого юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, минимальный размер административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего предела, предусмотренного для юридических лиц соответствующей административной санкцией, на основе требований Конституции Российской Федерации.

При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

Указанная позиция изложена в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014г. № 4-П.

Согласно ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ - Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ - при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Согласно ч. 3.2. ст. 4.1. КоАП РФ - при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3.3. ст. 4.1. КоАП РФ - при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Из оспариваемого постановления следует, что Общество привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 600 000 руб., что является минимальным размером штрафной санкции.

Как указано ранее, АО «ДРСК» неоднократно привлекалось к административной ответственности по факту совершения правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ, так за период с 2021 года по 2022 год по результатам рассмотрения 13 раз. С января 2023 года по 28.11.2023г вынесено 36 постановлений о привлечении АО «ДРСК» к административной ответственности.

 

Судом установлено, что АО «ДРСК» подключение объекта гр. ФИО4 к электрическим сетям на момент рассмотрения дела в суде не осуществлено, то есть срок подключения объекта нарушен более чем на семь месяцев.

Указанное свидетельствует о пренебрежительном отношении Общества к выполнению своих публично-правовых обязанностей.

При рассмотрении дела судом не установлено исключительных обстоятельств совершения правонарушения, доказательств трудного финансового положения Общества, позволяющих применить к правонарушителю санкцию ниже низшего предела.

Размер штрафа соответствует требованиям КоАП РФ, обоснованно назначен в минимальном размере санкции части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и составил 600 000 руб.

При этом суд учитывает длительность неисполнения Обществом обязанности по технологическому присоединению объекта гр. ФИО4 к электрическим сетям.

Нарушений порядка и сроков привлечения Общества к административной ответственности, смягчающих вину обстоятельств по результатам рассмотрения материалов административного производства судом не установлено.

Учитывая изложенное, заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 207-211 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 30.7 КоАП РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленных требований Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю от 25.12.2023г. № 98 по делу № 027/04/9.21-1589/2023 о назначении административного наказания по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 600 000 руб. - оказать.

Решение вступает в законную силу по истечении десятидневного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в Арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд, принявший решение – Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                                       Р.А. Руденко