Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99811/2019

15 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  04 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  15 февраля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Хорошева Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЛЕНЭНЕРГО" (Россия 196247, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пл КОНСТИТУЦИИ 1                                            ОГРН:  1027809170300);

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НСК - СТРОЙПРОЕКТ" (Россия 197022, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ПРОФЕССОРА ПОПОВА 37/В/318ОГРН:  1137847293430)

о взыскании  неустойки.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.11.2019;

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 11.08.2019

установил:

публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «НСК-СтройПроект» с требованиями:

о взыскании 1 400 814, 09 руб. задолженности  по оплате технологического присоединения по договору;

о взыскании 59 356, 53 руб. задолженности  по оплате технологического присоединения по договору;

о взыскании 756 795, 75 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.01.2019 по 26.03.2019;

о взыскании   738 988, 79 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 1 в период  с 09.04.2017 по 30.06.2017;

о взыскании  338 332, 22 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 2 в период с 24.05.2017 по 30.06.2017;

о взыскании 1 264 294, 08 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 3 в период с 21.09.2017 по 09.02.2018;

о взыскании 1 228 680, 16 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 4 за период с  14.04.2019 по 29.08.2019;

о взыскании неустойки за просрочку внесению 5 платежа за период с 30.08.2019 по день фактической уплаты этих средств;

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятия по внесению платежа в сумме 59 356, 53 руб. за технологическое присоединение в размере 1 228 680, 16 руб. за период с 14.04.2019 по 29.08.2019;

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятия по технологическому присоединению по оплате задолженности в размере 59 356, 53 руб. за период с 30.08.2019 по день фактической оплаты, но не превышающую размер за год просрочки.

Определением от 11.09.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в упрощенном производстве.

Определением от 05.11.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебное заседание 04.02.2020 явились стороны.

Истец заявил об уточнении иска:

- о взыскании 756 795, 75 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.01.2019 по 26.03.2019;

о взыскании   738 988, 79 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 1 в период  с 09.04.2017 по 30.06.2017;

о взыскании  338 332, 22 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 2 в период с 24.05.2017 по 30.06.2017;

о взыскании 1 264 294, 08 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 3 в период с 21.09.2017 по 09.02.2018;

о взыскании 1 299 908 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 4 за период с  14.04.2019 по 06.09.2019;

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятия по внесению платежа в сумме 59 356, 53 руб. за технологическое присоединение в размере 1 299 908  руб. за период с 14.04.2019 по 06.09.2019.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ уточнение иска принято судом.

Ответчик заявил о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. Истец возражал против снижения размера неустойки.

Судом принят отказ от иска в части. Прекращено производство по делу А56-99811/2019 по иску ПАО «Ленэнерго» к ООО «НСК-СтройПроект» в части взыскания  с ответчика в пользу истца задолженности по оплате технологического присоединения по договору в размере 1 400 814, 09 руб. и в размере 59 356, 53 руб. и в части взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по оплате задолженности за период с 30.08.2019 по день фактической оплаты, но не превышающую размер за год просрочки, о чем вынесено отдельное определение.

Как следует из материалов дела, Между ПАО «Ленэнерго» (далее - Истец, Сетевая организация) и ООО «НСК-СтройПроект» (далее - Ответчик, Заявитель) заключен Договор от 24.03.2017 № ОД-25513-16/37230-Э-16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор) энергопринимающего устройства Заявителя: «многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, за школой, кадастровый номер: 47:14:0502018:27.

Согласно п. 1 Договора Заявитель обязан оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с п. 10, п. 11 Договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 3 561 391, 77 руб., в т.ч. НДС 20 % - 593 565, 30 руб. и уплачивается в следующем порядке:

а)10% платы за технологическое присоединение в сумме 350203,52руб., включая НДС, вносятся в течение 15 дней со дня заключения Договора;

б)30% платы за технологическое присоединение в сумме 1050610,57руб., включая НДС, вносятся в течение 60 дней со дня заключения Договора;

в)20% платы за технологическое присоединение в сумме 700407,06руб., включая НДС, вносятся в течение 180 дней со дня заключения Договора;

г)30% платы за технологическое присоединение в сумме 1050610,57руб., включая НДС, вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д)10% платы за технологическое присоединение в сумме 350203,52 руб., включая НДС, вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Плата за технологическое присоединение внесена Заявителем несвоевременно и не в полном размере.

В соответствии с п. 5 договора, в редакции дополнительного соглашения от 23.03.2018, срок выполнения мероприятий по техприсоединению до 31.12.2018.

Сетевая организация выполнила взятые на себя обязательства, о чем письмом от 18.12.2018 уведомила заявителя.

Уведомление направлено в сетевую организацию 25.03.2019.

27.03.2019 подписан акт о выполнении технических условий № 10093.

29.03.2019 подписан акт об осуществлении техприсоединения № 11163723000-ОД-25513-16/37230-Э-16-16432.

Учитывая условия Договора, Сетевая организация выполнила взятые на себя обязательства, однако обязательства со стороны Заявителем исполнены с нарушением сроков, предусмотренных Договором.

В связи с неисполнением обязательств по Договору, в целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, в адрес ответчика направлены претензии от 07.06.2017, от 13.10.2017, от 26.04.2019, в которых Заявителю предлагалось в добровольном, досудебном порядке исполнить свои обязательства и перечислить на расчетный счет ПАО «Ленэнерго» сумму задолженности и рассчитанные неустойку за неисполнения обязательств.

В связи с тем, что непогашение задолженности Ответчиком нарушает законные права и интересы Истца, ПАО «Ленэнерго» обращается в суд в целях защиты своих прав.

Согласно статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительству (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно абзацу 5 части 1 статьи 21 названного закона порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством об электроэнергетике. Во исполнение положений вышеназванной статьи постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила № 861).

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средства вследствие их неправомерного удержания, иной просрочки в их уплате, подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

Сетевой организацией были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта Заявителя, в связи с чем, в адрес Ответчика направлено соответствующее уведомление от 18.12.2018 № ЛЭ/16-30/925.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения Договора (пункт 5 Договора). Дополнительным соглашением от 23.03.2018 к Договору установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 31.12.2018.

           Пунктом 16 Правил № 861 и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,25 процента ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Размер неустойки, рассчитанный за период с 01.01.2019 по 26.03.2019, составляет 756 795, 75 руб.

Заявитель, заключая Договор, взял на себя обязательства, предусмотренные" абзацем 5 пункта 8 Договора, а именно: надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Внесение платежей Заявителем не поставлено в зависимость от наличия оказания услуг исполнителем, а определены периоды, по истечении которых Заявитель обязан оплатить определенную договором сумму.

Абз. 11 п. 11 договора установлено, что первый платеж – 10 % платы за техприсоединение в сумме 350 203, 52 руб. вносится в течение 15 дней со дня заключения договора.

Договор заключен 24.03.2017, соответственно платеж был внесен не позднее 08.04.2017, фактически внесен 30.06.2017. (09.04.2017-30.06.2017).

Абз. 2 п. 11 договора установлено, что второй платеж – 30 % платы за техприсоединение в сумме 1 050 610, 57 руб. вносится в течение 60 дней со дня заключения договора.

Договор заключен 24.03.2017, соответственно платеж был внесен не позднее 23.05.2017, фактически внесен 30.06.2017. (24.05.2017-30.06.2017).

Абз. 3 п. 11 договора установлено, что третий платеж – 20 % платы за техприсоединение в сумме 700 407, 06 руб. вносится в течение 180 дней со дня заключения договора.

Договор заключен 24.03.2017, соответственно платеж был внесен не позднее 20.09.2017, фактически внесен 09.02.2018 (21.09.2017-09.02.2018).

Абзацем 4 пункта 11 Договора установлено, что четвертый платеж - 30 % платы за технологическое присоединение в сумме 1 050 610,57 руб., в том числе НДС 18%, вносится в течение 15 дней со дня фактического присоединения и пятый платеж - 10% платы за технологическое присоединение в сумме 350 203,52 руб., включая НДС, вносится Заявителем в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

29.03.2019 сторонами подписан Акт об осуществлении технологического присоединения № 11163723000-ОД-25513-16/37230-Э-16-16432, следовательно, 29.03.2019 считается датой фактического присоединения. Соответственно, датой окончания обязательства по внесению четвертого платежа следует считать 13.04.2019 (29.03.2019+15 дней), а пятого платежа -08.04.2019 (29.03.2019+10 дней).

Ответчик исполнил обязательства по оплате 4 и 5 платежа только 06.09.2019, таким образом, количество дней просрочки четвертого платежа составляет 146 дней (с 14.04.2019 по 06.09.2019), пятого платежа - 151 дня (с 09.04.2019 по 06.09.2019).

28.03.2019 между Сторонами заключено Дополнительное соглашение, по условиям которого пункт 11 Договора дополнен абзацем следующего содержания: «В отношении платежей по Договору, осуществленных Заявителем в период до 31.12.2018 включительно, разница между НДС, исчисленным по ставке 18% в отношении оплаченной в указанный выше период суммы и НДС по ставке 20%, подлежащим начислению на сумму, оплаченную в указанный выше период, подлежит перечислению Заявителем на расчетный счет ПАО «Ленэнерго» не позднее 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения».

29.03.2019 сторонами подписан Акт об осуществлении технологического присоединения № 11163723000-ОД-25513-16/37230-Э-16-16432, следовательно, не позднее 13.04.2019 (29.03.2019+15 дней) Заявитель обязан был внести сумму в размере 59 356,53 руб. (3 561 391,77 руб. с НДС 20% -3 502 035,24 руб. с НДС 18%), которая, согласно вышеуказанному Дополнительному соглашению относится к платежам за технологическое присоединение. Данная сумма внесена только 06.09.2019.

Ответчиком заявлено о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Ходатайство ответчика о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ подлежит отклонению, поскольку ответчик в порядке ч. 1 ст. 65 АПК РФ, разъяснений Пленума ВАС, содержащихся в постановлении от 22.12.2011 № 81 «о некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации доказал наличие оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иные доводы ответчика, изложенные в отзыве, арбитражным судом также отклонены. 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

При предъявлении иска оплачена государственная пошлина в федеральный бюджет  в сумме  64 446 руб. по платежному поручению № 11043 от 30.08.2019г.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика, с учетом того, что долг по прекращенным требованиям оплачен ответчиком после предъявления иска.

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «НСК СтройПроект» в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

  756 795, 75 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.01.2019 по 26.03.2019;

738 988, 79 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 1 в период  с 09.04.2017 по 30.06.2017;

338 332, 22 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 2 в период с 24.05.2017 по 30.06.2017;

1 264 294, 08 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 3 в период с 21.09.2017 по 09.02.2018;

1 299 908 руб. неустойки за просрочку внесения платежа № 4 за период с  14.04.2019 по 06.09.2019;

неустойку за нарушение срока выполнения мероприятия по внесению платежа в сумме 59 356, 53 руб. за технологическое присоединение в размере 1 299 908  руб. за период с 14.04.2019 по 06.09.2019;

58 792 руб. судебных расходов по госпошлине.

Возвратить ПАО «Ленэнерго» из федерального бюджета 5 654 руб. госпошлины, уплаченной по п/п от 30.08.2019 № 11043.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                                  Хорошева Н.В.