РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 15 апреля 2025 года по делу А33-17151/2022 Красноярск  

15 апреля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Транспортная строительная компания» (ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту от 09.06.2021 № 0319300012721000001, на выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования «Гордость» нашего поселка - улица Комсомольская» по адресу: 

<

...> (благоустройство) а именно:  

- восстановить проектную геометрию бордюра на пешеходном переходе со стороны магазина «МИГ» - в экспертном заключении № 2;  

- восстановить проектную геометрию бордюра возле жилого дома ул. Комсомольская,3- в экспертном заключении дефект № 4;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение по ул. Комсомольская (от магазина «МИГ» до ул. Мира) - в экспертном заключении дефект № 5;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение. Восстановить проектную геометрию бетонных бордюр возле жилого дома ул. Комсомольская, 1 - в экспертном заключении дефект № 7;  

- восстановить проектную геометрию бетонных бордюр на перекрёстке ул. Комсомольской и ул. Мира - в экспертном заключении дефект № 8;  

- заменить разрушенные бордюры, восстановить проектную геометрию и бетонную подушку бордюра по ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Партизанская) - в экспертном заключении дефект № 9;  

- заменить разрушенные бордюры, восстановить проектную геометрию и бетонную подушку бордюра перекресток ул. Комсомольская и ул. Партизанская - в экспертном заключении дефект № 10;  

- заменить разрушенные бордюры, восстановить проектную геометрию и бетонную подушку бордюра перекресток ул. Поселковая (от ул. Партизанской до ул. Рассвет) - в экспертном заключении дефект № 11;  

- восстановить проектную геометрию бордюра на съезде к жилому дому ул. Поселковая, 1 - в экспертном заключении дефект № 12;  

- заменить разрушенные бордюры, восстановить проектную геометрию и бетонную подушку бордюра в районе ул. Поселковая, 5- в экспертном заключении дефект № 13;  

- восстановить примыкание бордюра к съезду дома по ул. Поселковая, 5-1 - в экспертном заключении дефект № 14;  

- восстановить проектную геометрию бордюра и восстановить бетонную подушку бордюра на четной стороне ул. Поселковая (от ул. Юбилейная до ул. Молодежная) - в экспертном заключении дефект № 16;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение на четной стороне ул. Поселковая (от ул. Юбилейная до ул. Молодежная) - в экспертном заключении дефект № 20;  

- восстановить примыкание бордюра на перекрестке ул. Поселковая и ул. Молодежная - в экспертном заключении № 22;  

- восстановить примыкание бордюра перекресток ул. Поселковая и ул. Новая - в экспертном заключении № 25;  

- переустановить бетонный бордюр от ул. Поселковая, 12 до ул. Новая - в экспертном заключении дефект № 26;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение. Восстановить проектную геометрию бетонного бордюра, повреждённые бордюры заменить по ул. Комсомольская (от ул. Новая до ул. Садовая) - в экспертном заключении дефект № 27;  

- восстановить примыкание бордюра на перекрестке уд. Комсомольская и ул. Садовая - в экспертном заключении дефект № 28;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение на территории сквера - в экспертном заключении дефект № 29;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение. Восстановить проектную геометрию бетонного бордюра, повреждённые бордюры заменить по ул. Комсомольская (от ул. Садовая до административного здания) - в экспертном заключении дефект № 30;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение. Переустановить бетонный бордюр в проектное положение на ул. Комсомольская д.7 - в экспертном заключении дефект № 33;  

- восстановить проектную геометрию бордюра на «островке безопасности» ул. Комсомольская - в экспертном заключении дефект № 34;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение. В районе остановки закрепить откос на разворотном круге, городской автобусной остановке - в экспертном заключении под № 36;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение от разворотного круга до административного здания - в экспертном заключении дефект № 37;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение, убрать строительный мусор на съезде к школе, тротуар возле школы - в экспертном заключении дефект № 38;  

- восстановить проектную геометрию пластикового бордюра, установить крепления в проектное положение на участке от разворотной площадки у школы до ул. Комсомольская (возле магазина Первый) - в экспертном заключении дефект № 39;  

- переложить участок тротуарной плитки от магазина «Миг» до качелей гнездо. Восстановить проектную геометрию тротуара змейка и примыкание схода на тропинку до рощи на детской площадке - в экспертном заключении дефект № 40.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транспортная строительная компания» в пользу администрации Преображенского сельсовета 999 987,10 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по муниципальному контракту.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транспортная строительная компания» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 29 000 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.Ю. Сергеева