АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-3310/2018

16 октября 2018 года

город Симферополь

   

Резолютивная часть решения оглашена  09.10.2018.

Полный текст решения изготовлен  16.10.2018.

Арбитражный суд Республики Крым  в составе судьи  Гайворонского В.И.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Индустрия Развития» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» Симферопольского района Республики Крым, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора Администрация Симферопольского района о взыскании, 

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности б/н от 09.02.2018;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности №12 от 30.07.2018;

от третьего лица (Администрация Симферопольского района) – ФИО4, представитель по доверенности №01-92/30 от 09.01.2018;

Обстоятельства дела: согласно искового заявления истец просит взыскать с ответчика 859 000,00 руб. задолженности по Муниципальному контракту № 18 от 23.12.2016, неустойку (пеню) в размере 108 642,03 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 16.10.2018 (резолютивная часть объявлена 09.10.2018) принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Индустрия Развития» от исковых требований в части взыскания неустойки (пени) в размере 108 642,03 руб., производство по делу в этой части прекращено.

Исковые требования обосновываются ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком по контракту, в части оплаты оказанных услуг. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не предоставил. 

В судебном заседании, которое состоялось 02.10.2018, объявлен перерыв по 09.10.2018.

Рассмотрев материалы дела суд, -

УСТАНОВИЛ:

23.12.2016 между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» Симферопольского района Республики Крым (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Индустрия развития» (Подрядчик) заключен Муниципальный контракт № 18 на выполнение работ для муниципальных нужд, Дополнительное соглашение №1 от 26.12.2016 к Муниципальному контракту № 18 от 23.12.2016  (далее - Контракт, Муниципальный контракт №18).

В соответствии с п. 1.1. Муниципального контракта №18 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на проведение работ по объекту: «Реконструкция инженерных коммуникаций и благоустройство ДУЗ Сказка в с. Пожарское Симферопольского района (1 этап)» (корректировка), в соответствии с Ведомостями объемов работ строительства, Сводным сметным расчетом стоимости строительства, Календарным планом выполнения работ, являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Контрактом.

26.12.2016 между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» Симферопольского района Республики Крым (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Индустрия развития» (Подрядчик) заключено Дополнительное соглашение №1 от

26.12.2016 к Муниципальному контракту №18 от 23.12.2016 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция инженерных коммуникаций и благоустройство ДУЗ Сказка в с. Пожарское Симферопольского района (I этап)» (корректировка).

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 26.12.2016 Стороны предусматривают увеличение (с учетом положений Бюджетного законодательства Российской Федерации) цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ на сумму 859 000,00 руб., в том числе НДС 18%.

Таким образом, цена Муниципального контракта №18 составляет 21 209 000,00 руб. в том числе НДС 18%.

Согласно п. 6.7. Муниципального контракта №18 приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3).

ООО «Индустрия развития» взятые на себя обязательства согласно Муниципальному контракту №18, Дополнительное соглашение №1 от 26.12.2016 г. выполнило в полном объеме.

Во всяком случае, ответчик указанные обстоятельства не оспаривает.

Дополнительные работы в сумме 859 000,00 руб., приняты Заказчиком без замечаний, о чем свидетельствуют подписанные Заказчиком 10.07.2017, Справка № 10 о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акт №1 о приемки выполненных работ (Форма № КС-2).

Таким образом, задолженность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» Симферопольского района Республики Крым составляет в сумме 859 000,00 руб., в том числе НДС 18%.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается - ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ).

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Ответчиком не представлено доказательств оплаты выполненных работ.

Более того, ответчиком не заявлено возражений относительно искового заявления, а также не оплачена основная задолженность.    

В соответствии с частью 3-1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Таким образом, исковые требования являются законными и подлежат удовлетворению.

Согласно частью 1 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается  ответчиком  истцу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» с. Пожарское» Симферопольского района Республики Крым (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Индустрия Развития» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 859 000,00 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 20 180,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                      

         Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                            В.И. Гайворонский