47/2018-204899(1) 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-41038/2017

г. Новосибирск

29 октября 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Цыбиной А.В., при веде- нии протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по иску товарищества собственников недвижимости «Дружба» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

к акционерному обществу «Строительный трест № 43» (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск-Гидроизоляция», г.  Новосибирск,  

об обязании произвести ремонт помещений, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

обязать акционерное общество «Строительный трест № 43» (ОГРН 

<

***>) в  течение месяца с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить  недостатки выполненных работ на подземной автостоянке с надземными техническими  конструкциями и помещениями, расположенной по адресу: 

<

...>, согласно строительным нормам и правилам, а именно произвести  следующие работы:  

- восстановить участки нарушенной гидроизоляции и надлежащий уклон кровли, для  чего полностью демонтировать значительную часть кровельного ковра и восстановить  должные уклоны. Для организации минимально необходимого уклона 1,5 % следует  выполнить дополнительную разуклонку керамзитом. Рулонный ковёр завести на стены  так же с наклейкой дополнительного слоя. При выполнении работ устранить трещину  защитного слоя, неровности гидроизоляционного ковра, приводящие к застою воды,  механические и морозные повреждения гидроизоляционного ковра, после чего плиты  закрыть отделочными материалами;  

- устранить нарушения в узле сопряжения кровли и гаража с  вертикальными кирпичными стенами вентшахт, входов и пандусов, в связи с чем  демонтировать отмостку вдоль строений, защитный слой, арматурную сетку (где она  имеется), очистить поверхность и наклеить слой изоляции на стену и кровлю,  восстановить разобранные конструкции кровли;  

- устранить нарушения гидроизоляции участка наружных поверхностей стен и  нарушение водоотвода от стены гаража по оси 1 в осях Е-Ж, в связи с чем восстановить  поверхностный водоотвод на прилегающем участке, гидроизоляцию стены и выполнить  отсутствующую отмостку;  

- восстановить разрушенные участки окраски в нижней части стен и примыкания к  полу на высоту 15-20 см по осям 5/В-Д, 5/В-Ж, Е/1-8, Д/7-8, 8/Д-Е, Д/4-5, 9/Д-Е, Ж/8-9  общей площадью 26,5 м2;  

- восстановить гидроизоляцию стыка в перекрытии автомобильного спуска в  подземную стоянку.  

На случай не исполнения акционерным обществом «Строительный трест № 43»  (ОГРН 

<

***>) обязательства по устранению недостатков в установленный судом  срок, взыскать с акционерного общества «Строительный трест № 43» (ОГРН  

<

***>) в пользу товарищества собственников недвижимости «Дружба» (ОГРН  

<

***>) 1 577 946 рублей 51 копейку, составляющих стоимость работ по  устранению недостатков.  

Отказать в удовлетворении исковых требований в остальной части. 

Взыскать с акционерного общества «Строительный трест № 43» (ОГРН  

<

***>) в пользу товарищества собственников недвижимости «Дружба» (ОГРН  

<

***>) 65 000 рублей 00 копеек судебных расходов по оплате экспертизы, 50 000  рублей 00 копеек судебных издержек по оплате юридических услуг и 6 000 рублей 00  копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску, а всего 121 000  рублей 00 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апел- ляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбит- 

ражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новоси- бирской области.  

Судья А.В. Цыбина