АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

27 октября 2023 года

Дело № А33-33976/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 27 октября 2023 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КАТЭКстройкомплекс" (ИНН 2459010007, ОГРН 1022401742296, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью "Экспресс логистика транс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании гарантийного удержания,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- акционерного общества "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 31.03.2023, личность удостоверена паспортом, 

при ведении протокола судебного заседания ФИО2,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКстройкомплекс" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Экспресс логистика транс" (далее – ответчик) о взыскании 3 863 976 руб. 73 коп.. гарантийного удержания по договору субподряда №20/02-20СП от 20.02.2020.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 09.01.2023 возбуждено производство по делу.

13.03.2023 в материалы дела через систему КАД "Мой Арбитр" от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО «КСК» (субподярдчик) и ООО «Экспресс Логистика Трасс» (подрядчик) заключен Договор субподряда № 20/02-20СП от 20.02.2020 (далее-Договор), согласно которому Истец обязуется выполнить Работы по строительству объектов «Нефтегазосборный трубопровод «вр. куст№ 52-вр. куст№51», Нефтегазосборный трубопровод «вр. куст№51 -гр. УПН-2»и разработке грунта в карьере № 18, а Ответчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. Конечным Заказчиком по Договору является Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

Согласно пункту 4.1. Договора, оплата выполненных Работ производится Ответчиком не ранее 15 (пятнадцати), но не позднее 90 (девяносто) календарных дней после предоставления Истцом оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 Договора и подписания в соответствии со ст. 6 Договора Актов сдачи приемки, но не позднее З(трех) дней с момента поступления денежных средств за выполненные работы на счет Ответчика по Договору № 3175720/0148 ОТ 18.02.2020.

В пункте 4.3. Договора согласовано, что, Подрядчик производит гарантийные удержания в размере 5% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2. Договора.

Пунктом 6.1.1. Договора предусмотрено, что приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам Работ по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно пункту 23.2.1. Договора (гарантийные удержания), Ответчик (Подрядчик) резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Истцом (Субподрядчиком) самостоятельно, до окончания строительства Объекта.

В соответствии с пунктом 23.2.2. Договора, зарезервированная сумма выплачивается Истцу не ранее 15 (пятнадцати), но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) и возврата МТР Ответчика в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Исходя из пункта 28.6. Договора, все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче Результатов Работ, претензии и т.п.) могут быть направлены другой Стороне в виде письма по электронной почте на адрес Подрядчика info-cNpresslotn'stik (mail.ni и адрес Субподрядчика ksk37957@mail.ru , с обязательным направлением подлинных экземпляров в течении 5 (пяти) календарных дней заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде по электронной почте указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов.

 Истец выполнил для ответчика работы, последним работы приняты в полном объеме по объекту строительства п«Нефтегазосборный трубопровод «вр. куст № 52 - вр. куст № 51», По объекту строительства «Нефтегазосборнын трубопровод «вр. куст № 51 - гр. УПН-2» на сумму 107 744 313 руб. 86 коп. с учетом НДС.

Сумма гарантийных удержаний в соответствии с п. 23.2.1. составила 5 387 215,69  руб. 

Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) Ответчиком и Конечным Заказчиком по Договору АО «Востсибнефтегаз» подписан.

Материально-технические ресурсы возвращены Истцом Ответчику в полном объеме.

Поскольку Ответчик обязательство по выплате гарантийных удержаний не выполнил, истец обратился с претензией исх. 622 от 24.05.2022, которую. ответчик оставил без удовлетворения.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

В материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому по данным ответчика размер задолженности составляет 3 863 976 руб. 73 коп., истцом не учтены акт взаимозачета №4 от 30.06.2022 на сумм 1 504 439 руб. 46 коп., а также платеж на сумму 18 799 руб. 50 коп. по платёжному поручению №207018 от 09.06.2022.

Истцом исковые требования уточнены до указанной суммы.

В материалы дела поступили пояснения третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора акционерного общества "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", согласно которым указывает: 

- между акционерным обществом «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в качестве заказчика (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс Логистика Транс» в качестве подрядчика (далее - Подрядчик) заключен договор от 18.02.2020 №3175720/0148Д (далее - Договор).

- В соответствии со ст.23.2 договора Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно, до окончания строительства Объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных Работ исключается стоимость МТР поставки Заказчика/1 ретьего лица, указанного Заказчиком, в порядке указанном в Приложении №6.

Зарезервированная сумма выплачивается Подрядчику не ранее 15 (пятнадцати), но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями п.23.1 Договора и возврате МТР Заказчика в соответствии с Приложением №6.

В рамках выполнения обязательств по договору Заказчиком была выплачена Подрядчику сумма гарантийного удержания 5 387 215.72 руб., что подтверждается следующими платежными поручениями № 895, 896, 897. 898. 899. 900. 901. 933. 934, 935. 936. 937. 938, 939. 940, 941, 942. 943, 944, 945, 946, 947, 948. 949, 950, 951, 952, 953. 954. 955. 956. 957 от 05.05.2022.

Стороны просили суд отложить судебные заседания.

Судом по ходатайству истца и ответчика  судебные заседания откладывались 08.06.2023, 10.08.2023, 11.09.2023  в связи с возможностью урегулирования спора мирным путем. В судебном заседании 23.10.2023 истец пояснил, что мировое соглашение сторонами не подписано, настаивал на удовлетворении иска.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сложившиеся между сторонами отношения  регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с частью 1 статьи 740  Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (часть 1 статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Кодекса, согласно которой если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Как следует из материалов настоящего дела между акционерным обществом «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в качестве заказчика (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс Логистика Транс» в качестве подрядчика (подрядчик) заключен договор от 18.02.2020 №3175720/0148Д (договор).

Между ООО «КСК» (субподрядчик) и ООО «Экспресс Логистика Трасс» (подрядчик) заключен Договор субподряда № 20/02-20СП от 20.02.2020 (договор), согласно которому Истец обязуется выполнить Работы по строительству объектов «Нефтегазосборный трубопровод «вр. куст№ 52-вр. куст№51», Нефтегазосборный трубопровод «вр. куст№51 -гр. УПН-2»и разработке грунта в карьере № 18, а Ответчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. Конечным Заказчиком по Договору является Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что по объекту строительства «Нефтегазосборный трубопровод «вр. куст № 52 - вр. куст № 51», что подтверждается:

1) Актом о приемке выполненных работ (далее-КС-2) № 1 от 31.03.2020 на сумму 430 969,90 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)№ 1 от 31.03.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 517 163 рубля 88 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000038 от 31.03.2020.

2) КС-2 № 1 от 30.04.2020 на сумму 386 459,66 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.04.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 463 751 (четыреста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 59 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000069 от 30.04.2020.

3) КС-2 № 2 от 30.04.2020 на сумму 800 696,82 рублей,

- КС-2 № 3 от 30.04.2020 на сумму 122 924,25 рубля,

- КС-2 № 4 от 30.04.2020 на сумму 1 677 666,88 рублей,

- КС-2 № 5 от 30.04.2020 на сумму 2 198 007,64 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 30.04.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 5 759 154 рубля 71 копенка в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000070 от 30.04.2020.

4) КС-2 № 6 от 31.05.2020 на сумму 4 232 295,50 рублей,

- КС-2 № 7 от 31.05.2020 на сумму 4 597 612,33 рублей,

- КС-2 № 8 от 31.05.2020 на сумму 53 827,80 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 31.05.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 10 660 482 рубля 76 копеек, в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000084 от 31.05.2020

5) КС-2 № 2 от 31.05.2020 на сумму 9 868,70 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 31.05.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 11 842 рубля 44 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000085 от 31.05.2020.

6) КС-2 №9 от 30.06.2020 на сумму 1 312 317,01 рублей,

- КС-2 № 10 от 30.06.2020 на сумму 3 092 970,31 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 4 от 30.06.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 5 286 344 78 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000110 от 30.06.2020.

7) КС-2 № 11 от 31.07.2020 на сумму 34 922,44 рубля,

- КС-2 № 12 от 31.07.2020 на сумму 4 006,94 рублей,

- КС-2 № 13 от 31.07.2020 на сумму 306 357,10 рублей,

- КС-2 № 14 от 31.07.2020 на сумму 2 107 451,67 рубль,

- КС-2 № 15 от 31.07.2020 на сумму 437 597,57 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 5 от 31.07.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 3 468 402  рубля 86 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000135 от 31.07.2020.

8) КС-2 № 16 от 31.08.2020 на сумму 320 445,32 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 31.08.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 384 534 рубля 38 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000161 от 31.08.2020.

9) КС-2 № 17 от 31.10.2020 на сумму 179 103,26 рубля,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 7 от 31.10.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 214 923  рубля 91 копейка в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000236 от 31.10.2020.

10) КС-2 № 18 от 31.12.2020 на сумму 2 753 323,11 рубля,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 31.12.2020 на общую сумм) выполненных работ в размере 3 303 987 рублен 73 копенки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000279 от 31.12.2020.

11) КС-2 № 19 от 28.02.2021 на сумму 283 042,65 рубля,

- КС-2 № 20 от 28.02.2021 на сумму 493 400.54 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 9 от 28.02.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 931 731 (девятьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 83 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000047 от 28.02.2021.

12) КС-2 № 21 от 31.03.2021 на сумму 563 290,45 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 10 от 31.03.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 675 948 (шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь) рублен 54 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000081 от 31.03.2021.

13) КС-2 № 22 от 30.04.2021 на сумму 2 343 442,06 рубля,

- КС-2 № 23 от 30.04.2021 на сумму 154 480,52 рублей,

- КС-2 № 24 от 30.04.2021 на сумму 135 947,04 рублей, -КС-2 № 25 от 30.04.2021 на сумму 8 949,03 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 11 от 30.04.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 3 171 382  рубля 38 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000124 от 30.04.2021.

14) КС-2 № 26 от 31.05.2021 на сумму 288 323,56 рубля,

- КС-2 № 27 от 31.05.2021 на сумму 52 524,12 рубля,

- КС-2 № 28 от 31.05.2021 на сумму 507 443,42 рубля,

- КС-2 № 29 от 31.05.2021 на сумму 112 746,23 рублей,

- КС-2 № 30 от 31.05.2021 на сумму 84 720,88 рублей, -КС-2 №31 от 31.05.2021 на сумму 106 852,82 рубля,

- КС-2 № 32 от 31.05.2021 на сумму 95 086,12 рублей,

- КС-2 № 33 от 31.05.2021 на сумму 62 838,62 рублей,

- КС-2 № 34 от 31.05.2021 на сумму 70 749,74 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 12 от 31.05.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 1 657 542 рубля 61 копейка в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура №0000174 от 31.05.2021.

15) КС-2 № 35 от 30.06.2021 на сумму 1 545 717,97 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 13 от 30.06.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 1 854 861 рубль 56 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000217 от 30.06.2021.

16) КС-2 №36 от 31.08.2021 на сумму 1 232 932,37 рубля, -КС-2 №37 от 31.08.2021 на сумму 127 464,03 рубля, -КС-2 №38 от 31.08.2021 на сумму 163 600,73 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 14 от 31.08.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 1 828 796 рублей 56 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000289 от 31.08.2021.

17) КС-2 № 39 от 25.10.2021 на сумму 24 988,73 рублей,

- КС-2 № 40 от 25.10.2021 на сумму 69 808,19 рублей, 

- КС-2 №41 от 25.10.2021 на сумму 142 384,28 рубля,

- КС-2 № 42 от 25.10.2021 на сумму 5 895,03 рублей,

- КС-2 № 43 от 25.10.2021 на сумму 312 615,33 рублей,

- КС-2 № 44 от 25.10.2021 на сумму 88 719,98 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 15 от 25.10.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 773 269 рублей 82 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000341 от 25.10.2021.

По объекту строительства «Нефтегазосборнын трубопровод «вр. куст № 51 - гр. УПН-2», что подтверждается:

1) КС-2 № 1 от 31.03.2020 на сумму 2 679 656.69 рублей,

- КС-2 № 2 от 31.03.2020 на сумму 1 794 778,14 рублей,

- КС-2 № 3 от 31.03.2020 на сумму 663 973,45 рубля,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.03.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 6 166 089  рублен 82 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000037 от 31.03.2020.

2) КС-2 № 4 от 30.04.2020 на сумму 179 389,72 рублей,

- КС-2 № 5 от 30.04.2020 на сумму 371 513,98 рублей, -КС-2 № 6 от 30.04.2020 на сумму 139 592.50 рубля, -КС-2 № 7 от 30.04.2020 на сумму 12 961 482,20 рубля, -КС-2 № 8 от 30.04.2020 на сумму 6 184 496,35 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 30.04.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 23 803 769 рублей 70 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000068 от 30.04.2020.

3) КС-2 № 9 от 31.05.2020 на сумму 7 214 729,86 рублей,

- КС-2 № 10 от 31.05.2020 на сумму 2 248 466,04 рублей,

- КС-2 № 11 от 31.05.2020 на сумму 241 440,42 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 31.05.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 11 645 563 рубля 58 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000086 от 31.05.2020.

4) КС-2 № 12 от 30.06.2020 на сумму 4 191 056,17 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 31.05.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 5 029 267 (пять миллионов двадцать девять тысяч двести шестьдесят семь) рублен 40 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000111 от 30.06.2020.

5) КС-2 № 1 от 30.06.2020 на сумму 14 424,32 рубля,

- КС-2 № 2 от 30.06.2020 на сумму 388 556,04 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 30.06.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 483 576 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублен 43 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000112 от 30.06.2020.

6) КС-2 № 13 от 31.07.2020 на сумму 68 082,97 рубля,

- КС-2 № 14 от 31.07.2020 на сумму 186 360,87 рублей,

- КС-2 № 15 от 31.07.2020 на сумму 1 865 671,37 рубль,

- КС-2 № 16 от 31.07.2020 на сумму 1 730 023,28 рубля,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 5 от 31.07.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 4 620 166 рублей 19 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура 0000134 от 31.07.2020.

7) КС-2 № 17 от 31.10.2020 на сумму 319 250,76 рублей,

- КС-2 № 18 от 31.10.2020 на сумму 1 727 712,83 рублей

-Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 31.10.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 2 456 356 рублей 31 копейка в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000237 от 31.10.2020

8) КС-2 № 19 от 31.12.2020 на сумму 279 105,00 рублей,

- КС-2 № 20 от 31.12.2020 на сумму 1 747 727,37 рублей, -КС-2 №21 от31.12.2020 на сумму 1 158 470,28 рублей,

- КС-2 № 22 от 31.12.2020 на сумму 142 686,04 рублей,

- КС-2 № 23 от 31.12.2020 на сумму 2 056 704,09 рубля, -КС-2 № 24 от 31.12.2020 на сумму 296 738,17 рублей, -КС-2 № 25 от 31.12.2020 на сумму 273 325,00 рублей, -КС-2 № 26 от 31.12.2020 на сумму 3 847,66 рублей,

- КС-2 № 27 от 31.12.2020 на сумму 172 622,67 рубля, 

- КС-2 № 28 от 31.12.2020 на сумму 262 271,26 рубль, 

- КС-2 № 29 от 31.12.2020 на сумму 367 468,48 рублей, 

- КС-2 № 30 от 31.12.2020 на сумму 515 843,52 рубля, 

- КС-2 №31 от 31.12.2020 на сумму 106 791,54 рубль, 

- КС-2 № 32 от 31.12.2020 на сумму 2 300,43 рублей, 

- КС-2 № 33 от 31.12.2020 на сумму 997,51 рублей,

- КС-2 № 34 от 31.12.2020 на сумму 80 660,52 рублей,

- КС-2 № 35 от 31.12.2020 на сумму 3 691,68 рубль, 

- КС-2 № 36 от 31.12.2020 на сумму 3 018,80 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 7 от 31.12.2020 на общую сумму выполненных работ в размере 8 969 124 рубля 14 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000321 от 31.12.2020.

9) КС-2 № 37 от 28.02.2021 на сумму 478 121,06 рубль,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 28.02.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 573 745  рублей 27 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000046 от 28.02.2021.

10) КС-2 № 39 от 30.06.2021 на сумму 344 818,82 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 9 от 30.06.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 413 782 (четыреста тринадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 58 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000213 от 30.06.2021.

11) КС-2 № 3 от 25.10.2021 на сумму 48 457,06 рублей,

- КС-2 №4 от 25.10.2021 на сумму 13 534,62 рубля,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 25.10.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 74 390 (семьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 02 копейки в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000339 от 25.10.2021.

12) КС-2 №40 от 25.10.2021 на сумму 141 628,11 рублей, -КС-2 №41 от 25.10.2021 на сумму 173 122,14 рубля, -КС-2 №42 от 25.10.2021 на сумму 124 846,50 рублей,

- КС-2 № 43 от 25.10.2021 на сумму 19 752,16 рубля,

- КС-2 № 44 от 25.10.2021 на сумму 24 988,83 рублей,

- КС-2 № 45 от 25.10.2021 на сумму 493 014,05 рублей,

- КС-2 № 46 от 25.10.2021 на сумму 514 810,95 рублей,

- КС-2 № 47 от 25.10.2021 на сумму 70 033,72 рубля,

- КС-2 № 48 от 25.10.2021 на сумму 558 103,61 рубля,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 10 от 25.10.2021 на общую сумму выполненных работ в размере 2 544 360 рублей 08 копеек в т.ч. НДС 20%, Счет-фактура № 0000340 от 25.10.2021.

А всего выполнено Истцом и принято Ответчиком Работ на сумму 107 744 313 руб. 86 коп. с учетом НДС.

Выполнение и принятие работ на указанную сумму ответчиком признается и не оспаривается.

Сторонами в договоре субподряда предусмотрено условие о гарантийном удержании, так согласно пункту 23.2.1. договора (гарантийные удержания), Ответчик (Подрядчик) резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость Материально-технических ресурсов, приобретаемых Истцом (Субподрядчиком) самостоятельно, до окончания строительства Объекта.

Согласно пункту 23.2.2. Договора, зарезервированная сумма выплачивается Истцу не ранее 15 (пятнадцати), но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) и возврата МТР Ответчика в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) Ответчиком и Конечным Заказчиком по Договору АО «Востсибнефтегаз» подписан.

Также как следует из представленных пояснений третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора АО «Востсибнефтегаз» в рамках выполнения обязательств по договору Заказчиком была выплачена Подрядчику сумма гарантийного удержания 5 387 215.72 руб., что подтверждается следующими платежными поручениями № 895, 896, 897. 898. 899. 900. 901. 933. 934, 935. 936. 937. 938, 939. 940, 941, 942. 943, 944, 945, 946, 947, 948. 949, 950, 951, 952, 953. 954. 955. 956. 957 от 05.05.2022.

Таким образом, обязанность по оплате гарантийного удержания субподрядчику считается для подрядчика наступившей. Сумма гарантийного удержания составляет в соответствии с пункта 23.2.1 договора составляет 5 387 215 руб. 69 коп., доказательств выплаты гарантийного удержания в материалы дела не представлено, факт невнесения оплаты оспаривается ответчиком лишь в нижеследующем.

Ответчиком указано, что сумма составляет 3 863 976 руб. 73 коп., с учетом акта взаимозачета №4 от 30.06.2022 на сумму 1 504 439 руб. 46 коп., а также платежа на сумму 18 799 руб. 50 коп. по платёжному поручению №207018 от 09.06.2022.

Указанные пояснения истцом учтены в добровольном порядке и исковые требования уточнены до суммы, которая ответчиком не оспаривается - 3 863 976 руб. 73 коп. (истцом в материалы дела представлен подписанный и скреплённый печатями сторон акт взаимозачета №4 от 30.06.2022 на сумму 1 504 439 руб. 46 коп., платёжное поручение №207018 от 09.06.2022 на сумму 18 799 руб. 50 коп.).

С учетом изложенного, судом не усматривается спора межу сторонами относительно размера не выплаченного гарантийного удержания. 

Ссылки ответчика на корректировку объёма выполненных работ заказчика судом отклоняются, поскольку подписанные акты ответчиком в материалы дела не представлены. Таким образом, доказательства, свидетельствующие о состоявшееся корректировке отсутствуют.

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально неподтвержденной позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из содержания и смысла положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторона процесса вправе и обязана представить в подтверждение своих требований или возражений определенные доказательства, которые могут быть признаны судом минимально достаточными для подтверждения обстоятельств, на которые ссылается такая сторона, при отсутствии их опровержения другой стороной спора. Нежелание второй стороны представить доказательства, подтверждающие ее возражения и опровергающие доводы первой стороны, представившей доказательства, должно быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12, от 13.05.2014 N 1446/14, определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2014 N 309-ЭС14-923, от 09.10.2015 N 305-КГ15-5805).

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Верховный Суд Российской Федерации в Определении N 305-ЭС15-12239 (5) от 26.11.2018 указал, что в силу части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно было быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает противоположная сторона.

На основании изложенного, с учетом позиции ответчика Арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о взыскании 3 863 976 руб. 73 коп. основного долга, исковые требования истца удовлетворяются ответчиком в полном объеме.

Государственная пошлина по настоящему иску с учетом уточнения исковых требований составляет 42 320 руб. Истцом при обращении в Арбитражный суд уплачена государственная пошлина в размере 49 936 руб. по платежному поручению №4505 от 15.12.2022. С учетом результатов рассмотрения настоящего спора (уточенные исковые требования удовлетворены судом в полном объеме), а также положения абзаца 1 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы истца по уплате государственной пошлины в части 42 320 подлежат отнесению на ответчика, а также истцу из федерального бюджета надлежит возвратить 7 616 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 15.12.2022 № 4505.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Экспресс логистика транс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КАТЭКстройкомплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 3 863 976 руб. 73 коп. основного долга,  а также 42 320 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "КАТЭКстройкомплекс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 7 616 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 15.12.2022 № 4505.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.А. Красовская