Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Южно-Сахалинск  26.07.2021г. Дело № А59-5184/2020  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Г. Х. Пономаревой,  

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по  исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия  «Росморпорт» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к акционерному обществу «Корсаковский морской торговый порт» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании выполнить ремонтные работы, при участии в заседании: 

от истца – ФИО2, доверенность от 09.12.2019, диплом № 1993 от 22.06.2011,  от ответчика – ФИО3, доверенность от 19.10.2020, диплом 26.01.2006  

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от иска в части требований об обязании акционерного  общества «Корсаковский морской торговый порт» выполнить следующие работы:  

- установить деформационные марки для наблюдения за креном сооружения  геодезическими методами на причале № 1, расположенном по адресу: 

<

...> водная акватория;  

- установить деформационные марки для наблюдения за креном сооружения  

геодезическими методами на причале № 2, расположенном по адресу: Сахалинская  

область, 

<

...> водная акватория;  

- установить деформационные марки для наблюдения за креном сооружения  

геодезическими методами на причале № 3, расположенном по адресу: Сахалинская  

область, 

<

...> водная акватория,  

 Обязать акционерное общество «Корсаковский морской торговый порт»  

выполнить на объектах Южного погрузрайона, расположенных по адресу: Сахалинская  

область, 

<

...>, водная акватория следующие ремонтные  

работы: На причале № 1: 

- устранить дефекты кранового пути в срок до 31.12.2024 года.  На причале № 2:  

- выполнить работы по восстановлению надстройки и массивов 5-го курса в  

срок до 31.12.2023 года; 

- устранить дефекты кранового пути - колея 28 м в срок до 31.12.2021 года,  

колея 15 м в срок до 31.12.2023 года; 

- выполнить ремонт покрытия прикордонной зоны между колесоотбойным  

брусом и прикордонным крановым рельсом в срок до 31.12.2023 года. 

На причале № 3: 

- выполнить работы по восстановлению железобетонной надстройки и  

массивов 4-го и 5-го курсов в соответствии с разработанной документацией Арх. № 0272 в  

срок до 31.12.2022 года; 

- устранить дефекты кранового пути в срок до 31.12.2022 года;  - выполнить ремонт покрытия причала в срок до 31.12.2022 года.  

На причале № 4: 

- выполнить работы по восстановлению железобетонной надстройки и  

массивов 4-го курса в соответствии с разработанной документацией арх. № 0272 в срок до  

31.12.2021 года; 

- устранить дефекты кранового пути в срок до 31.12.2021 года;  

- установить на причале деформационные марки для наблюдения за креном  

сооружения геодезическими методами в срок до 31.12.2021 года; 

- выполнить ремонт покрытия в срок до 31.12.2021 года.  Выполнить ремонт автодорожного моста в том числе:  

- антикоррозионная защита металлических элементов моста (в том числе  

пролетных строений) в срок до 30.12.2021 года; - ремонт опор моста в срок до 31.12.2022 года; - ремонт плит проезжей части в срок до 31.12.2023 года; 

- ремонт съемных элементов деформационных швов в срок до 31.12.2023  года;  

- замена асфальтобетонного покрытия, восстановление гидроизоляции,  

восстановление водоотвода в срок до 31.12.2024 года; - устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах в срок до 31.12.2024 года; 

- ремонт железобетонных парапетов в срок до 31.12.2023 года;  - ремонт или восстановление перильного ограждения в срок до 31.12.2025  

года. Принять признание иска. 

Обязать акционерное общество «Корсаковский морской торговый порт»  

выполнить на объектах Северного погрузрайона, расположенных по адресу: Сахалинская  

область, 

<

...>, бухта лососей следующие ремонтные  

работы: На причале № 4: 

- устранить разрушения лицевой стенки в подводной зоне в срок до  

31.12.2025 года; 

- устранить дефекты кранового пути в срок до 31.12.2025 года;  На причале № 5:  

- устранить грунтопроницаемость шва между массивами-гигантами № 1,2 в  

срок до 31.12.2025 года; 

- устранить разрушения лицевой стенки в подводной зоне глубиной более  

200 мм в срок до 31.12.2025 года; 

- устранить дефекты кранового пути в срок до 31.12.2025 года.  

В случае неисполнения акционерным обществом «Корсаковский морской торговый  

порт» решения суда по настоящему делу в установленные для каждого объекта сроки,  

присудить в пользу федерального государственного унитарного предприятия  

«Росморпорт» судебную неустойку по в размере 1/365 годовой арендной платы объекта  

за каждый день неисполнения судебного акта по день фактического исполнения  

судебного акта. 

Взыскать с акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт» в  пользу федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт»  государственную пошлину в размере 1 800 руб.  

Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию  «Росморпорт» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 200 руб.,  уплаченную по платежному поручению от 15.10.2020 № 03494.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления полного текста решения), путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Г.Х. Пономарева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.08.2020 3:16:54

Кому выдана Пономарева Гульнар Хусаиновна