39/2019-123094(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-8095/2019

город Саратов

05 июля 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи О.В. Никульниковой  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 189» Октябрьского района г. Саратова (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ЛТФ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г.Саратов,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора – администрация  Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», г. Саратов, администрация муниципального  образования «Город Саратов», г. Саратов, комитет по финансам администрации муниципального образования  «Город Саратов», г. Саратов,  

об обязании в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки  выполненной работы по муниципальному контракту № 0360300029118000085-64471 от 10.08.2018 г.  

при участии в судебном заседании представителей: 

 от истца – ФИО2 заведующая (приказ), ФИО3 по доверенности от 06.05.2019 г.  от администрации Октябрьского района – ФИО3 по доверенности № 01-03-30/758 от 26.03.2019 г.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛТФ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

г.Саратов в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки  

(дефекты) выполненных работ по муниципальному контракту № 0360300029118000085-64471 от 10.08.2018 г.,  

выполнив следующие виды и объемы работ: 

1. Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - 631,6 кв.м, в том числе:  1.1. Снятие материала покрытия.  

1.2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки. 1.3. Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (40 мм) - 631,6 кв.м. 

2. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (40 мм) - 631,6 м2, в том  

числе: 2.1. Подготовка готового основания. 2.2. Устройство выравнивающих стяжек. 

3. Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами -1 м³, в том числе:  3.1 Отбивка штукатурки на откосах и "перемычках, пробивка штраб. ?  3.2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.  

3.3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.  3.4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.  

4. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных  

свесов - 93,8 м, в том числе: 4.1. Разборка покрытия. 4.2. Заготовка картин и кляммер. 

4.3. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов.  4.4. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.  

5. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной  

грунтовкой с ее приготовлением -631,6 кв.м, в том числе: 

5.1. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой  

5.2. Приготовление грунтовки. 

6. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя - 631,6 кв.м, в том числе:  6.1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя  

газопламенными горелками. 

7. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм  

без фартуков - 26,4 м2, в том числе: 7.1. Устройство цементного бортика. 

7.2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам  

и парапетам. 8. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 8.1. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную - 50,401 т. 

8.2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на  

расстояние: 1 класс груза до 10 км - 50,401 т. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛТФ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

г. Саратов в пользу муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 189»  

Октябрьского района г. Саратова (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате  

госпошлины в размере 6000 руб. и строительно-технической экспертизы в размере 35000 руб. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  

отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном порядке в Двенадцатый  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в  

Арбитражный суд Поволжского округа, в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную  

силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Судья арбитражного суда Саратовской области Никульникова О.В.