АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Владимир                                                              Дело № А11-8245/2017 

29.01.2018

Резолютивная часть решения объявлена 22.01.2018

Полный текст решения изготовлен 29.01.2018

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи                     Щавлёвой А.Л. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (600026, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Владимирский асфальтобетонный завод" (121552, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению гарантийных обязательств,

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 13.03.2017 № 36-01/1071 (сроком действия 1 год);

от ответчика – не явился, надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного разбирательства,

установил, что истец – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (далее – Управление) обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью "Владимирский асфальтобетонный завод" (далее – ООО "Владимирский асфальтобетонный завод") об обязании                            ООО "Владимирский асфальтобетонный завод" в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства: 

- по контракту № 115 от 17.09.2015, а именно: заделать выбоины, трещины, просадки, разрушения кромок общей площадью 12 кв.м на автомобильной дороге по ул. Школьный проезд от дома 1 по Школьному проезду до дома 5а по ул. Ноябрьская путем фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII;

-  по контракту № 124 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной дороге по ул. Диктора Левитана от дома 33 по ул. Офицерской до дома 31 по ул. Диктора Левитана заделать выбоины общей площадью 4 кв.м путем фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII; на автомобильной дороге по ФИО3 тупику заделать выбоины, разрушения кромок общей площадью 10 кв.м путем  фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII.    

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил суд обязать ООО "Владимирский асфальтобетонный завод" в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства: 

- по контракту № 115 от 17.09.2015, а именно: заделать выбоины, трещины, просадки, разрушения кромок общей площадью 12 кв.м на автомобильной дороге по ул. Школьный проезд от дома 1 по Школьному проезду до дома 5а по ул. Ноябрьская путем фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII;

-  по контракту № 124 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной дороге по ФИО3 тупику заделать выбоины, разрушения кромок общей площадью 10 кв.м путем  фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII;

- по контракту № 125 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной дороге по ул. Диктора Левитана от дома 33 по ул. Офицерской до дома 31 по ул. Диктора Левитана заделать выбоины общей площадью 4 кв.м путем фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII.    

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Поскольку данное уточнение не противоречит законам и другим нормативным правовым актам, не нарушает права других лиц, оно принимается судом.   

Ответчик отзыв по существу заявленных требований не представил.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, представителей не направил, что в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил.

        17.09.2015 между Управлением (заказчик) и ООО "Владимирский асфальтобетонный завод" (подрядчик) заключен контракт на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира № 115, согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог в городе Владимире в 2015 году в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ в рамках, оговоренных контрактов, принять их результат и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные пунктом 1.1 контракта на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (пункт 1.2 контракта).

В силу пункта 1.4 контракта место выполнения работ:

- автомобильная дорога по Суздальскому проспекту, напротив                     д. 21"б" по Суздальскому проспекту;

- автомобильная дорога по Школьному проезду от д. 1 по Школьному проезду до д. 5 "а" по ул. Ноябрьская;

- автомобильная дорога по ул. Ново-Ямская от д. 54 до 

<

...>.

Согласно пункту 2.5.1 контракта работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.    

Предусмотренные настоящим контрактом работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 3 к контракту), условиями контракта и сметной документацией (приложение № 5 к контракту) (пункт 2.5.3 контракта).

Гарантийный срок работ – 3 года с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (пункт 2.10.1 контракта).

Цена настоящего контракта составляет 1 537 506 руб. 18 коп., в том числе НДС 234 534 руб. 84 коп. и является твердой на весь срок исполнения настоящего контракта в соответствии с протоколом твердой цены, который является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к контратаку) (пункт 3.1 контракта).

Оплата работ по настоящему контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика платежным поручением (пункт 3.3 контракта).

Расчет по контракту за выполненные работы осуществляется пообъектно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат") (пункт 3.4 контракта).  

Пунктом 4.1 контракта предусмотрено, что срок выполнения работ по настоящему контракту определяется в соответствии  с календарным графиком производства работ (приложение № 2 к контракту).

В силу пункта 5.3 контракта приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в сроки, определенные пунктом 5.5 настоящего контракта.

Согласно пункту 5.7 контракта заказчик проводит приемку выполненных работ в течение 10 рабочих дней со дня следующего за днем подачи отчетной документации и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"), а при отступлений от контракта, ухудшающих результаты выполненных работ, или иных недостатков выдает замечания в виде официального письма или акта с перечнем выявленных недостатков подрядчику в порядке, установленном пунктом 5.8 контракта.        

В соответствии с пунктом 5.8 контракта подрядчик направляет уполномоченное лицо, представляющее его интересы, и получает на 10 (десятый) день рассмотрения поданной отчетной документации, замечания по отчетной документации, либо иную другую информацию нарочно. Замечания, либо иную другую информацию, можно получить ранее по согласованию с заказчиком. В случае неявки уполномоченного лица, представляющего интересы подрядчика, срок приемки работ по рассмотрению отчетной документации продлевается до момента явки уполномоченного лица.

В силу пункта 11.1 контракта  настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Пунктом 12.1 контракта предусмотрено, что все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.  

В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области (пункт 12.2 контракта).

В соответствии с приложением № 2 к контракту срок выполнения работ по контракту – 14 календарных дней с момента заключения контракта.

Во исполнение условий договора работы были выполнены ответчиком и сданы заказчику.

31.12.2015 между Управлением (заказчик) и ООО "Владимирский асфальтобетонный завод" (подрядчик) заключено дополнительное соглашение № 1 о расторжении контракта от 17.09.2015 № 115.

Согласно пункту 1 соглашения стороны пришли к соглашению о расторжении контракта от 17.09.2015 № 115, определив, что обязательства по контракту выполнены подрядчиком на сумму 1 469 487 руб. 97 коп.

Пунктом 2 соглашения определено, что гарантийный срок на результат выполненных работ стороны оставляют в соответствии с пунктом 2.10.1 контракта от 17.09.2015 № 115.

В силу пункта 3 соглашения настоящее соглашение является неотъемлемой частью контракта от 17.09.2015 № 115 и вступает в законную силу с момента подписания.

10.03.2017 комиссией в составе представителей истца и ответчика проведен осмотр объекта – Школьный проезд, от д. 1 по Школьному проезду до 

<

...> о чем составлен акт. 

Комиссией были выявлены недостатки в проделанной работе, а именно: выбоины, трещины, просадки, разрушения кромок общей площадью 12 кв.м и определены необходимые мероприятия по их устранению: фрезерование, подгрунтовка, укладка асфальтобетонной смеси БII в срок до 07.05.2017. 

22.09.2015  между Управлением (заказчик) и ООО "Владимирский асфальтобетонный завод" (подрядчик) заключен контракт на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира № 124, согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог в городе Владимире в 2015 году в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ в рамках, оговоренных контрактов, принять их результат и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные пунктом 1.1 контракта на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (пункт 1.2 контракта).

В силу пункта 1.4 контракта место выполнения работ:

- автомобильная дорога по ул. МОПРа от 

<

...> до                 д. 20"Б" по ул. Красноармейская (ремонт тротуара);

- автомобильная дорога по проспекту Ленина в районе 

<

...> "а", 

<

...> (ремонт тротуара);

- автомобильная дорога по ул. Чайковского напротив 

<

...> (ремонт тротуара);

- автомобильная дорога по ул. Пичугина от проспекта Ленина до                  ул. Разина (ремонт тротуара);

- автомобильная дорога по ФИО3 тупику.

Согласно пункту 2.5.1 контракта работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.    

Предусмотренные настоящим контрактом работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 3 к контракту), условиями контракта и сметной документацией (приложение № 5 к контракту) (пункт 2.5.3 контракта).

Гарантийный срок работ – 3 года с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (пункт 2.10.1 контракта).

Цена настоящего контракта составляет 2 225 807 руб. 04 коп., в том числе НДС 339 529 руб. 89 коп. и является твердой на весь срок исполнения настоящего контракта в соответствии с протоколом твердой цены, который является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к контратаку) (пункт 3.1 контракта).

Оплата работ по настоящему контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика платежным поручением (пункт 3.3 контракта).

Расчет по контракту за выполненные работы осуществляется пообъектно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат") (пункт 3.4 контракта).  

Пунктом 4.1 контракта предусмотрено, что срок выполнения работ по настоящему контракту определяется в соответствии  с календарным графиком производства работ (приложение № 2 к контракту).

В силу пункта 5.3 контракта приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в сроки, определенные пунктом 5.5 настоящего контракта.

Согласно пункту 5.7 контракта заказчик проводит приемку выполненных работ в течение 10 рабочих дней со дня следующего за днем подачи отчетной документации и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"), а при отступлений от контракта, ухудшающих результаты выполненных работ, или иных недостатков выдает замечания в виде официального письма или акта с перечнем выявленных недостатков подрядчику в порядке, установленном пунктом 5.8 контракта.        

В соответствии с пунктом 5.8 контракта подрядчик направляет уполномоченное лицо, представляющее его интересы, и получает на 10 (десятый) день рассмотрения поданной отчетной документации, замечания по отчетной документации, либо иную другую информацию нарочно. Замечания, либо иную другую информацию, можно получить ранее по согласованию с заказчиком. В случае неявки уполномоченного лица, представляющего интересы подрядчика, срок приемки работ по рассмотрению отчетной документации продлевается до момента явки уполномоченного лица.

В силу пункта 11.1 контракта  настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Пунктом 12.1 контракта предусмотрено, что все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.  

В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области (пункт 12.2 контракта).

В соответствии с приложением № 2 к контракту срок выполнения работ по контракту – 21 календарный день с момента заключения контракта.  

Во исполнение условий договора работы были выполнены ответчиком и сданы заказчику.

10.03.2017 комиссией в составе представителей истца и ответчика проведен осмотр объекта – автомобильная дорога по ФИО3 тупику, о чем составлен акт. 

Комиссией были выявлены недостатки в проделанной работе, а именно: выбоины, разрушения кромок общей площадью 10 кв.м и определены необходимые мероприятия по их устранению: фрезерование, подгрунтовка, укладка асфальтобетонной смеси БII в срок до 07.05.2017. 

22.09.2015  между Управлением (заказчик) и ООО "Владимирский асфальтобетонный завод" (подрядчик) заключен контракт на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира № 125, согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог в городе Владимире в 2015 году в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ в рамках, оговоренных контрактов, принять их результат и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные пунктом 1.1 контракта на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (пункт 1.2 контракта).

В силу пункта 1.4 контракта место выполнения работ:

- автомобильная дорога по ул. Левино поле, от д. 2 до д. 12;

- автомобильная дорога по ул. Диктора Левитана, от 

<

...> до 

<

...>;

- автомобильная дорога по ул. Диктора Левитана, от д. 41 до д. 53 (ремонт тротуара);

- автомобильная дорога по Дальнему проезду, от ул. Красная до 

<

...>.

Согласно пункту 2.5.1 контракта работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.    

Предусмотренные настоящим контрактом работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 3 к контракту), условиями контракта и сметной документацией (приложение № 5 к контракту) (пункт 2.5.3 контракта).

Гарантийный срок работ – 3 года с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) (пункт 2.10.1 контракта).

Цена настоящего контракта составляет 1 842 357 руб. 92 коп., в том числе НДС 281 037 руб. 65 коп. и является твердой на весь срок исполнения настоящего контракта в соответствии с протоколом твердой цены, который является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к контратаку) (пункт 3.1 контракта).

Оплата работ по настоящему контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика платежным поручением (пункт 3.3 контракта).

Расчет по контракту за выполненные работы осуществляется пообъектно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат") (пункт 3.4 контракта).  

Пунктом 4.1 контракта предусмотрено, что срок выполнения работ по настоящему контракту определяется в соответствии  с календарным графиком производства работ (приложение № 2 к контракту).

В силу пункта 5.3 контракта приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в сроки, определенные пунктом 5.5 настоящего контракта.

Согласно пункту 5.7 контракта заказчик проводит приемку выполненных работ в течение 10 рабочих дней со дня следующего за днем подачи отчетной документации и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 "Акт о приемке выполненных работ") и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"), а при отступлений от контракта, ухудшающих результаты выполненных работ, или иных недостатков выдает замечания в виде официального письма или акта с перечнем выявленных недостатков подрядчику в порядке, установленном пунктом 5.8 контракта.        

В соответствии с пунктом 5.8 контракта подрядчик направляет уполномоченное лицо, представляющее его интересы, и получает на 10 (десятый) день рассмотрения поданной отчетной документации, замечания по отчетной документации, либо иную другую информацию нарочно. Замечания, либо иную другую информацию, можно получить ранее по согласованию с заказчиком. В случае неявки уполномоченного лица, представляющего интересы подрядчика, срок приемки работ по рассмотрению отчетной документации продлевается до момента явки уполномоченного лица.

В силу пункта 11.1 контракта  настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Пунктом 12.1 контракта предусмотрено, что все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.  

В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области (пункт 12.2 контракта).

В соответствии с приложением № 2 к контракту срок выполнения работ по контракту – 21 календарный день с момента заключения контракта.  

Во исполнение условий договора работы были выполнены ответчиком и сданы заказчику.

10.03.2017 комиссией в составе представителей истца и ответчика проведен осмотр объекта – ул. Диктора Левитана, от 

<

...> до 

<

...> о чем составлен акт. 

Комиссией были выявлены недостатки в проделанной работе, а именно: выбоины общей площадью 4 кв.м и определены необходимые мероприятия по их устранению: фрезерование, подгрунтовка, укладка асфальтобетонной смеси БII в срок до 07.05.2017. 

Как указал истец, ответчик в установленный срок не выполнил работы по устранению недостатков.

Истец претензией от 07.06.2017 № 36-01/2752 предлагал ответчику исполнить свои гарантийные обязательства по контрактам и объектам путем устранения выявленных недостатков в срок до 30.06.2017.     

Невыполнение подрядчиком гарантийных обязательств по контрактам от 17.09.2015 № 115, от 22.09.2015 № 124, от 22.09.2015 № 125 послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с соответствующими исковыми требованиями.

Проанализировав материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными, исходя из нижеследующего.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность заказчика, уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По условиям заключенных между сторонами контрактов от 17.09.2015 № 115, от 22.09.2015 № 124, от 22.09.2015 № 125  подрядчик гарантировал качество выполненных работ 3 года с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе актов осмотра объекта от 10.03.2017, претензии истца от 07.06.2017 подтверждается, что в пределах гарантийного срока заказчиком выявлены недостатки, исключающие возможность нормальной и безопасной эксплуатации объектов (автомобильных дорог).

В силу части 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Исходя из вышеприведенной нормы материального права, бремя предоставления доказательств того, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые подрядчик не отвечает, в рассматриваемом случае относится на ответчика.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражное судопроизводство осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем, свидетельств того, что обнаруженные в пределах гарантийного срока недостатки работ обусловлены причинами, независящими от подрядчика, в деле не имеется; ответчиком таких доказательств не представлено.

Иск подлежит удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика и взыскиваются с него непосредственно в доход федерального бюджета, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд                                                       

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира, г. Владимир удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Владимирский асфальтобетонный завод", г. Москва в течение пятнадцати дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства:

- по контракту № 115 от 17.09.2015, а именно: заделать выбоины, трещины, просадки, разрушения кромок общей площадью 12 кв.м на автомобильной дороге по ул. Школьный проезд от дома 1 по Школьному проезду до дома 5а по ул. Ноябрьская путем фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII;

-  по контракту № 124 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной дороге по ФИО3 тупику заделать выбоины, разрушения кромок общей площадью 10 кв.м путем  фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII;

- по контракту № 125 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной дороге по ул. Диктора Левитана от дома 33 по ул. Офицерской до дома 31 по ул. Диктора Левитана заделать выбоины общей площадью 4 кв.м путем фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII.    

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Владимирский асфальтобетонный завод", г. Москва в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

 

      Судья

        А.Л. Щавлёва