10458_5092739  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-22257/18

02 октября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская  больница» г. Азова (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Неватех» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об устранении  недостатков работ  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Неватех» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) до 30 января 2019 года своими силами и за свой счет  устранить выявленные дефекты, а именно:  

 Отслоение окраски с видимыми следами коррозии ограждения территорий МБУЗ  ЦГБ г. Азова по адресам:  

<

...> (согласно приложению № 2 акта выявленных недостатков   № 4 от 25.09.2018) - секции - 233 шт.; столбы - 236 шт.; ворота - 7 шт., калитки – 3 шт.  

<

...> (согласно приложению № 1 акта выявленных недостатков   № 4 от 25.09.2018) - секции - 313 шт.; столбы - 316 шт.; ворота - 8 шт.; калитки -3 шт.  

<

...> (согласно приложению № 3 акта выявленных  недостатков № 4 от 25.09.2018) - секции - 170 шт.; столбы -155 шт.; ворота - 3 шт., калитки  - 1 шт.  

Трещины и шелушение фундаментов металлических опор ограждения территорий  МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресам:  

<

...> (согласно приложению № 5 акта выявленных  недостатков № 4 от 25.09.2018) - 56 фундаментов;  

<

...> (согласно приложению № 4 акта выявленных недостатков   № 4 от 25.09.2018) - 244 фундамента;  

<

...> (согласно приложению № 6 акта выявленных  недостатков № 4 от 25.09.2018) - 17 фундамента.  

Перекос створок металлических ворот и калиток на территории МБУЗ ЦГБ г. Азова  по адресам:  

<

...> (согласно приложению № 8 акта выявленных  недостатков № 4 от 25.09.2018) - 2 ворот;  

<

...> (согласно приложению № 7 акта выявленных недостатков   № 4 от 25.09.2018)-2 ворот;  

<

...> (согласно приложению № 9 акта выявленных  недостатков № 4 от 25.09.2018) - 1 ворота.  

Не работающие ограничители закрывания (открывания) ворот и калитки, по адресу  

<

...> (Не срабатывает фиксация в закрытом положении ворот и  калитки по адресу): Автоматические ворота - 1шт. Автоматическая калитка - 1шт.  

Не работающие шлагбаумы по адресу: 

<

...>.   Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Неватех» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по  иску.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья М.А. Новожилова