Арбитражный суд Московской области

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-39151/21

30 июля 2021 г.

г. Москва

резолютивная часть решения объявлена 27.07.2021 г.

полный текст решения изготовлен 30.07.2021 г.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.В. Коваля 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СТРОЙСИТИ» (ИНН: 

<

***>) к ООО «ГИДРОСТРОЙ» (ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности по договору №П18/2019 от 20.12.2019 г. в виде неотработанного аванса в размере 45 595 412 руб. 69 коп.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - ООО «РКТ-инжиниринг»,

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 08.06.2021г.

от ответчика – не явка извещен

от третьего лица – ФИО3 по доверенности от 26.04.2021г.

установил:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №П18/2019 от 20.12.2019 г. в виде неотработанного аванса в размере 45 595 412 руб. 69 коп. и 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы искового заявления в полном объеме.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал доводы искового заявления, дал свои пояснения по обстоятельствам спорных правоотношений.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-124, 153, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ООО «СтройСити» по договору генерального подряда, заключенного с ООО «ИР Девелопмент» осуществляет строительство жилого многоквартирного дома корпус №18 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, в районе мкр. Новая Деревня, г.Пушкино.

К выполнению работ по устройству и вводу в эксплуатацию внутренних инженерных сетей объекта истец привлек ООО «РКТ-инжиниринг», заключив с третьим лицом договор подряда №74/12-19-СБ/Пушкино от 23.12.2019г., в редакции четырех дополнительных соглашений.

В   свою   очередь   ООО   «РКТ-инжиниринг»   для   выполнения названных работ привлекло ответчика – ООО «ГИДРОСТРОЙ», заключив с ним договор подряда от 20.12.2019г. № П18/2019.

05 октября 2020г. между ООО «СтройСити» и ООО «РКТ-инжиниринг» было заключено соглашение о расторжении договора подряда №74/12-19-СБ/Пушкино от 23.12.2019г.

Также 05 октября 2020г. между ООО «СтройСити», ООО «РКТ-инжиниринг» и ООО «ГидроСтрой» было заключение соглашение об уступке прав (цессии), переводе долга и замене стороны в обязательстве по договору подряда №П18/2019 от 20.12.2019г., согласно которому начиная с 05.10.2020г. по договору №П18/2019 от 20.12.2019г.  действующего совместно с  8  дополнительными соглашениями, вместо ООО «РКТ-инжиниринг» подрядчиком для ООО «ГидроСтрой» стало ООО «СтройСити».

Стороны зафиксировали, что на дату заключения соглашения об уступке ООО «РКТ-инжиниринг» прежний подрядчик задолженности по оплате выполненных ООО «ГидроСтрой» работ не имел, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов, а соответственно ООО «СтройСити» как новый подрядчик по договору №П18/2019 от 2019г. обязался оплачивать работы, выполненные ООО «ГидроСтрой» после 05.10.2020г.

Общая цена договора подряда № П 18/2019 от 20.12.2019г. составляет 177 665 097 руб. 32 коп., в том числе НДС и была согласована между ООО «СтройСити» и ООО «ГидроСтрой» в дополнительном соглашении №7 от 27.11.2020г.

Договором подряда №П18/2019 от 20.12.2019г. также были согласованы условия, наличие которых необходимо для проведения взаимных расчетов по договору, в том числе: 

- согласно пункту 2.1 договора работы субподрядчиком - ООО «ГидроСтрой»  выполняются из собственных материалов;

- согласно пункту 5.1 договора и условиям дополнительного соглашения №8 от  16.12.2020г.подрядчик - ООО «СтройСити» вправе выплачивать авансовые платежи;

- согласно пункту 5.5.1. договора для обеспечения добросовестного исполнения субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору в течение сроков производства работ формируется сумма гарантийного удержания, размер которой составляет 5% от стоимости работ по договору, включая стоимость материалов и оборудования. В общей сложности сумма гарантийного удержания составила - 4 959 466, 84 руб. в том числе НДС;

- согласно пункту 5.6. договора оплата выполненных и принятых подрядчиком работ осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, справок выполненных работ и затрат по форме КС-3 (за исключением условия п. 6.6.1. договора), с удержанием гарантийного удержания и ранее выплаченного аванса в размере пропорционально выполненным работам;

- согласно пункту 5.5.3 договорав случае расторжения договора подрядчиком     по причине невыполнения/ненадлежащего выполнения обязательств субподрядчиком, сумма гарантийного удержания удерживается подрядчиком в качестве штрафной неустойки в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением подрядчика о произведенном удержании. Уведомление об удержании гарантийной суммы было направлено в адрес ООО «ГидроСтрой» 19.02.2021г. письмом №И-02.20201-340.

Судом установлено, что письмом (уведомлением) № И-02.2021-340 от 19.02.2021г. истец 25.02.2021г. расторгнул с ответчиком договор подряда с связи с неоднократными нарушениями ответчиком сроков выполнения работ.

В связи с расторжением договора в период с 24.02.2021г. по 03.03.2021г. между сторонами был составлен акт фиксации фактически выполненного ООО «ГидроСтрой» объема работ по договору № П 18/2019 от 20.19.2019г.

Согласно вышеуказанному акту, подписанному двумя сторонами, установлено, что дополнительных объемов работ, которые бы подлежали оплате, помимо тех объемов работ, которые до этого были приняты и оплачены, у ООО «ГидроСтрой» не имеется.

Таким образом, между сторонами отсутствует спор относительно объемов выполненных ответчиком и принятых работ.

Как следует из материалов дела, всего за период с 20.12.2019г. - даты заключения договора и до 25 февраля 2021г. - даты расторжения договора ответчиком были выполнены работы на общую сумму 99 189 336 руб. 49 коп., что подтверждается следующими актами КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3:

- КС-3 № 1 от 30.01.2020г. и КС-2 №1 от 30.01.2020 г. на сумму 2 059 390,91 руб.;

- КС-3 № 1 от 29.02.2020г. и КС-2 № 1 от 29.02.2020 г. на сумму 130 918,95 руб.;

- КС-3 № 2 от 15.02.2020г. и КС-2 № 2 от 15.02.2020 г. на сумму 3 130 105,40 руб.;

- КС-3 № 3 от 29.02.2020г. и КС-2 № 3 от 29.02.2020 г. на сумму 882 926,00 руб.;

- КС-3 № 4 от 31.03.2020г. на сумму 2 726 339,12 руб., КС-2 № 4.1. от 31.03.2020г. на сумму 2 444 728,43 руб. и КС-2 № 4.2. от 31.03.2020г. на сумму 281 610,69 руб.;

- КС-3 № 5 от 31.03.2020г. и КС-2 № 5 от 31.03.2020 г. на сумму 238 707,12 руб.;

- КС-3 № 6 от 15.04.2020г. на сумму 2 992 622,30 руб., КС-2 № 6.1. от 15.04.2020 г.    на сумму 211 826,60 руб., и КС-2 № 6.2. от 15.04.2020 на сумму 2 780 795,70 руб.;

- КС-3 №7 от 15.04.2020г. и КС-2 №7.1 от 15.04.2020г. на сумму 338 719,00 руб.;

- КС-3 №8 от 31.05.2020г. на сумму 6 844 820,28 руб. КС-2 № 8.1. от 31.05.2020г. на сумму 3 916 958,81 руб. и  КС-2 № 8.2. от 31.05.2020 г на сумму 2 927 861,47 руб.;

- КС-3 № 9 от 15.06.2020г. на сумму 7 782 130,40 руб., КС-2 №9.1. от 15.06.2020г.     на сумму 3 737 545,02 руб., КС-2 № 9.2. от 15.06.2020г. на сумму 4 044 585,38 руб.;

- КС-3 № 10 от 01.07.2020г. на сумму 159 261,40 руб., КС-2 № 10.1. от 01.07.2020г.   на сумму 2 842 311,87 руб., КС-2 № 10.2 от 01.07.2020г. на сумму 2 906 461,53 руб. и КС-2 №10.3. от 01.07.2020г. на сумму 410 488,00 руб.;

- КС-3 № 11 от 15.07.2020г. на сумму 4 311 774,90 руб., КС-2 № 11.1 от 15.07.2020г. на сумму 1 496 844,16 руб. и КС-2 № 11.2. от 15.07.2020г. на сумму 2 616930,74 руб.;

- КС-3 № 12 от 31.07.2020г. на сумму 7 200 974,63 руб., КС-2 №12.1 от 31.07.2020г. на сумму 1 613 001,05 руб. и КС-2 №12.2. от 31.07.2020г. на сумму 5 587 973, 58 руб.;

- КС-3 № 13 от 15.08.2020г на сумму 2 792 852,77 руб., КС-2 №13.1. от 15.08.2020г.  на сумму 1 671 666,41 руб. и КС-2 №13.2. от 15.08.2020г. на сумму 1 121 186.36 руб.; 

- КС-3 № 14 от 31.08.2020г. на сумму 2 067 814,16 руб., КС-2 № 14.1 от 31.08.2020г. на сумму 770 778,51 руб., КС-2 № 14.2 от 31.08.2020г. на сумму 1 382 280,48 руб. и КС-2 № 14.3 от 31.08.2020г. на сумму 85 244,82 руб.;

- КС-3 №15 от 30.09.2020г. на сумму 3 682 459,48 руб., КС-2 № 15.1. от 30.09.2020г. на сумму 896 793,04 руб., КС-2 № 15.2. от 30.09.2020г. на сумму 2 546 518,99 руб. и КС-2 № 15.3. от 30.09.2020г. на сумму 239 147,45 руб.;

- КС-3 №16 от 31.10.2020г. и КС-2 № 16 от 31.10.2020г. на сумму 3 435 521,29 руб.;

- КС-3 №17 от 31.11.2020г. и КС-2 №17 от 31.11.2020 на сумму 20 787 318,87 руб.;

- КС-3 №18 от 15.12.2020г. и КС-2 № 18 от 15.12.2020г. на сумму 14 148 426.23 руб.

Из данного объема работ на общую сумму 99 189 336, 49 руб.: 

- 53 143 816. 81 руб. - это объем работ за период с 20.12.2019г. - даты заключения договора по 05.10.2020г. - дату заключения соглашения об уступке прав (цессии) по актам и справкам составленным по форме КС-2, КС-3 №№с 1 по 15-ю, которые принимались и оплачивались ООО «РКТ-Инжиниринг». Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020г. по 05.10.2020г. ООО «РКТ-инжиниринг» задолженности по оплате работ не имеет.

- 46 045 519.67 руб. - объем работ за период с 05.10.2020г. - даты заключения соглашения об уступке прав (цессии) по 25.02.2021г. - дату расторжения договора по актам и справкам составленным по форме КС-2, КС-3 за №№ с 16 по 18-ю принимались и оплачивались ООО «СтройСити».

По состоянию на 25.02.2021г. - дату расторжения договора подряда общая сумма перечисленного аванса в адрес ООО «ГидроСтрой» составила 68 405 941, 69 руб., в том числе НДС, из которых:

- 27 278 171. 76 руб. - сумма незакрытого работами (незачтенного) аванса, перечисленная предыдущим подрядчиком (ООО «РКТ-инжиниринг») и подтверждённая ООО «ГидроСтрой» в Соглашении об уступке прав (цессии) от 05.10.2020г. и Акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020г. по 05.10.2020г. между ООО «РКТ-инжиниринг» и ООО «ГидроСтрой»;

- 41 127 769. 93 руб. - сумма аванса, перечисленная ООО «СтройСити» (как новым подрядчиком) и подтвержденная платежными поручениями №№: 5662 от 28.12.2020г. на сумму 10 000 000,00 руб., № 4418 от 19.10.2020г. на сумму 10 158 851,03 руб., № 4694 от 06.11.2020г. на сумму 7 000 000,00 руб., № 4865 от 13.11.2020г. на сумму 7 772 595, 48 руб.; № 5026 от 23.11.2020г. на сумму 4 154 559, 24 руб.; № 4843 от 13.11.2020г. на сумму 2 041 764,18 руб.

За период  с  05.10.2020г. - с даты  заключения  соглашения  об  уступке по  25.02.2021г. – дату расторжения договора ООО «ГидроСтрой» выполнило работы на общую сумму 46 045 519,67 руб. . что подтверждается актами и справкам составленными по форме КС-2, КС-3 за №№: 16 от 01.10.2020г. на сумму 3 435 521,29 руб., №17 от 30.11.2020г. на сумму 20 787 318,87 руб., №  18 от 15.12.2020г. на сумму 14 148 426 руб. 23 коп.

Из стоимости выполненных работ равной 46 045 519, 67 руб. за период с 05.10.2020г. -с даты заключения соглашения об уступке по 25.02.2021г. - дату расторжения договора в соответствии с условиями договора были удержаны следующие суммы:

- 2 302 275,98  руб.  -  сумма гарантийного удержания,  предусмотренная  п.5.5.1, 5.5.3 договора;

- 22 810 529,00 руб.- сумма удержания ранее выплаченного аванса, согласно п. 5.6. договора.

Таким образом, к оплате за выполненные ООО «ГидроСтрой» работы подлежала сумма в размере 20 932 714,69 руб. в том числе НДС (46 045 519,67 руб. -2 302 275,98 руб.- 22 810 529,00 руб. = 20 932 714,69 руб.), оплата которой была произведена ООО «СтройСити», что подтверждается платёжными поручениями №№:5543 от 18.12.2020г. на сумму 12 222 943,50 руб., № 5820 от 31.12.2020г. на сумму 3 709 771, 19 руб., № 5669 от 29.12.2020г. на сумму 5 000 000 руб.

Из вышеуказанного следует, что сумма не закрытого работами (неотработанного) аванса составляет 45 595 412 руб. 69 коп., в том числе НДС (68 405 941,69 руб. (выплаченный аванс) - 22 810 529,00 руб. (зачтенный аванс) = 45 595 412,69 руб. сумма неотработанного аванса).

Ответчиком факт наличия и сумма задолженности в виде неотработанного аванса не оспорен, каких-либо разногласий по объемам выполненных работ и перечисленных авансов  не заявлено. Письменный мотивированный отзыв в суд ответчиком также не представлен.

В соответствии с пунктом 12.4 договора при выявлении со стороны субподрядчика непогашенного аванса субподрядчик возвращает подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования сумму непогашенного аванса на расчетный счет подрядчика.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса (п.1).

На основании изложенного суд, изучив и оценив в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, считает заявленное требование о взыскании 45 595 412 руб. 69 коп. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса подлежащим удовлетворению, как законное, подтвержденное материалами дела и основанное на нормах действующего законодательства.

Судебные расходы относятся на ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110,167-170, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «ГИДРОСТРОЙ» в пользу ООО «СТРОЙСИТИ» сумму неотработанного аванса в размере 45 595 412 руб. 69 коп. и 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                                                          А.В. Коваль