48_10108250  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-21109/20

08 октября 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного  унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз» к акционерному  обществу «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» об обязании  привести результат работ в соответствие с договором, взыскании неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать акционерное обществ «Научно-исследовательский институт полимерных  материалов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.12.2020 г. привести  результат СЧ НИР в соответствие с условиями и принятыми на себя обязательствами по  Договору № 17705596339160001891/06027 от 10.01.2017 согласно плану-графику работ по  завершению монтажа и сдачи в эксплуатацию производства централитов I, II на АО  «Соликамский завод «Урал» от 18.12.2019:  

- общестроительные работы: устройство потолков 450 м2; кладка внутренних  перегородок 180 м2, установка наружных дверей 6 шт; пробивка проемов под установку  витражей 60 м2; установка витражей 160 м2; отделка стен 1250 м2; фундаменты под  оборудование 20 м3; площадка и переходы 10 м2; бетонирование полов 82 м3;  

- технологическое оборудование: расстановка технологического оборудования 30 шт;  монтаж технологических трубопроводов 40 ед; монтаж силового электроборудования 3,9 км;  монтаж АСУ ТП 6 ед;  

- проведение индивидуальных испытаний; - комплексные испытания оборудования; - проведение пуско-наладочных работ; 

-наработка опытных партий с подтверждением качества централита I и  централита II.  

Взыскать с акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных  материалов» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия  «Федеральный центр двойных технологий «Союз» неустойку в размере 5171783 рублей 92  

копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 44965 рублей 33  копейки, а всего 5216749 рублей 25 копеек.  

В иске в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская