Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-12394/2020

г. Хабаровск

01 декабря 2020 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 24 ноября 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи Трещевой В.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в заседании суда дело по иску Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 117630, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Финко» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 426011, 

<

...> Октября, д. 24, офис 62)

о взыскании 16 508 800 руб. 00 коп. 

при участии в судебном заседании:

от истца - представитель по доверенности № 11-20 от 17.02.2020 Холодок Н.В.,

от ответчика – представитель по доверенности № 01-0120-Д от 09.01.2020 ФИО2,  

У С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – истец, ПАО «ФСК ЕЭС») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Финко» (далее – ответчик, ООО «Финко») о взыскании 16 508 800 руб. 00 коп., состоящих из неустойки в размере 16 408 800 руб. 00 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору № 579959 от 23.09.2019г. за период с 01.11.2019г. по 15.07.2020г. и штрафа в размере 100 000 руб. 00 коп. за не предоставление в срок календарно-сетевого графика третьего уровня в формате Excel.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.  

Ответчик, согласно предоставленному отзыву, просил суд применить статью 333 ГК РФ и снизить размер неустойки в виду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства до 953 313 руб. 84 коп., предоставил контррасчет неустойки.

Представитель истца представил возражения на отзыв ответчика. 

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела,  выслушав представителей сторон, установил следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» является сетевой организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), владеет на праве собственности объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляет следующие виды деятельности: услуги по передаче и распределению электрической энергии и по присоединению к электрическим сетям (пункт 3.2 устава ПАО «ФСК ЕЭС»).

ПАО «ФСК ЕЭС» относится к стратегическим акционерным обществам, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации (Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»).

На основании инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 -2024 гг., утвержденной Приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@ (ФИП 3332749, код АСПБ S080022552), по результатам закупочной процедуры, 23.09.2019 г. между ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - заказчик) и ООО «Финко» (далее — подрядчик) заключен договор №579959 на выполнение работ по инвестиционному проекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ Амурская -Белогорск/т с отпайками ПС Белогорск, ПС Свободный; ВЛ 220 кВ Белогорск/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная; ВЛ 220 кВ Амурская -Благовещенская №2; ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара №1; ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №1; ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №2; ВЛ 220 кВ Архара - Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан/т; ВЛ 220 кВ Юктали -Хани с отпайкой на ПС Олекма; ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС -Призейская; ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС -Амурская №2; КВЛ 220 кВ Сковородино - Тында №1; ВЛ 220 кВ Магадагачи - Гонжа/т; ВЛ 220 кВ Амурская -Шимановск/т с отпайкой на ПС Ледяная/т; КВЛ 220 кВ Тында - Дипкун; ВЛ 220 кВ Амурская - Ледяная; КВЛ 220 кВ Тында - Хорогочи; ВЛ 220 кВ Завитая - Варваровка; ВЛ 220 кВ НПС-24 - Чалганы/т с отпайкой на ПС Сиваки/т; ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1; ВЛ 220 кВ Амурская - Благовещенская №1; В Л 220 кВ Благовещенская - Айгунь I, II цепь; В Л 220 кВ Хани - Чара; ВЛ 220 кВ Лопча - Юктали; ВЛ 220 кВ Хорогочи - Лопча; ВЛ 220 кВ Дипкун - Тутаул; ВЛ 220 кВ Амурская - Новокиевка; ВЛ 220 кВ Амурская - ФИО3/т I и II цепь; ВЛ 220 кВ Шимановск - Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная/т; ВЛ 220 кВ Мухинская/т - Шимановск; ВЛ 220 кВ Мухинская/т -Шимановск/т; ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская/т с отпайкой на ПС Сиваки/т; ВЛ 220 кВ Мухинская/т - НПС-24; ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая I цепь с отпайкой на ПС Энергия; ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая II цепь с отпайкой на ПС Энергия; ВЛ 220 кВ Ключевая - Сулус/т; ВЛ 220 кВ Сулус/т -Магдагачи; ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан/т; ВЛ 220 кВ Гонжа/т - Сковородино с отпайкой на ПС Талдан/т, ВЛ 220 кВ Ульручьи/т - Сковородино; ВЛ 220 кВ Сковородино - Сковородино/т I и II цепь; ВЛ 220 кВ Короли/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная; ВЛ 220 кВ Завитая - Завитая/т I и II цепь; ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара №2; ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи; ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи; ВЛ 110(220) кВ Благовещенская - Хэйхэ; В Л 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цепь с отпайкой на ПС Створ; ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь; ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 №1 с отпайкой на ПС НПС-16; ВЛ 220 кВ Архара - Ядрино/т с отпайкой на ПС Тарманчукан/т; ВЛ 220 кВ Томмот - Майя 1,2, в части приведения ширины просеки к нормативному состоянию МЭС Востока (2729,3 га)» (далее - договор).

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик обязался выполнить комплекс работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и закупочной документации в соответствии с календарным графиком выполнения работ и стоимости и Заданием на проектирование (Приложение 1, 6 к договору), сдать результат выполненных работ заказчику в соответствии с пунктом 2.2 договора, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.

Цена Договора составляет не более 31 800 000 руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством РФ (пункт 4.1 Договора).

В силу пункта 3.1 договора выполнение отдельных работ, входящих в комплекс работ по договору, осуществляется подрядчиком в сроки, указанные в календарном графике выполнения работ и стоимости (Приложение 1 к договору), согласно которому работы по инженерным изысканиям, проектная документация и закупочная документация должны быть выполнены 31.10.2019 г., срок полного завершения работ по договору также определен - 31.10.2019г.

В соответствии с пунктом 6.1.16 договора, подрядчик обязался в течение 20 дней после заключения договора предоставить заказчику детализированный календарно-сетевой график (далее - календарно-сетевой график третьего уровня) в формате Excel, т.е. в срок до 14.10.2020г.

Согласно пункту 11.2.1 договора, за нарушение сроков окончания работ по договору, в том числе по причине некачественного выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 11.2.7 договора, в случае непредставления в двадцатидневный срок после подписания договора календарно-сетевого графика третьего уровня в формате Excel, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 100 000 руб. 00 коп. за каждый зафиксированный случай.

В предусмотренный договором срок подрядчиком работы выполнены не были, календарно-сетевой график третьего уровня не предоставлен, в связи с чем, в адрес подрядчика направлена претензия за исх. от 18.06.2020 №МЗ/6/293 об оплате пени за нарушение сроков окончания работ по Договору, штрафа за не предоставление в срок календарно-сетевого графика третьего уровня в формате Excel.

В ответе на претензию за исх. 29.06.2020 №858 (вх. МЗ/1/547 от 02.07.2020) (приложение 4 к иску) ООО «Финко» не признало предъявленные требования, ввиду необходимости предоставления результатов аэрофотосъемки для контрольного просмотра в Штаб Восточного военного округа, срок которого составляет от 2-х до 3-х месяцев, а также необходимости получения разрешений перед использованием воздушного пространства, что по мнению подрядчика увеличивает сроки выполнения работ.

Однако документов, подтверждающих наличие заявленных обстоятельств от контрольных органов, подрядчиком не предоставлены.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Учитывая представленные доказательства, суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 740 (пункта 1) Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (статья 708 ГК РФ).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Пунктом 11.2.1 договора предусмотрено, что за нарушение сроков окончания работ по договору, в том числе по причине некачественного выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки.

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки заявлено правомерно.

Согласно предоставленному истцом расчету, размер неустойки составляет 16 408 800 руб. 00 коп. за период с 01.11.2019г. по 15.07.2020г. (258 дн.).

Расчет неустойки проверен судом, признан верным.

Ответчик ходатайствовал об уменьшении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В пункте 71 Постановления Пленума Верховного суда Российской федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение денежных обязательств» разъяснено, что, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (пункт 73 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (пункт 74 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).

Пунктом 75 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7 предусмотрено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.97 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

Снижение размера неустойки в каждом конкретном случае является одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. При этом возможность ее уменьшения суд оценивает в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств возникшего спора, при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.

Ответчик заявил о несоразмерности заявленной к взысканию истцом  неустойки, представил контррасчет неустойки, исходя из однократной ключевой ставки ЦБ РФ, согласно которому размер неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору составил 953 313 руб. 84 коп.

Установив, что истцу не причинены убытки в результате нарушения ответчиком промежуточных сроков выполнения работ, принимая во внимание чрезмерно высокий процент неустойки (73,2% годовых при действующей ключевой ставке 4,25% годовых), а так же отсутствие со стороны истца доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) в обоснование возражения против заявления об уменьшении размера неустойки, как указано в пункте 74 Постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7, суд полагает взыскиваемую неустойку несоразмерной и считает возможным снизить ее размер до 1 906 627 руб. 68 коп., исходя из действующей двукратной учетной ставки ЦБ РФ.

При этом, суд не принял предоставленный истцом контрасчет неустойки, исчисленной исходя из двукратной учетной ставки ЦБ РФ, существовавший в период просрочки, со ссылкой на пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81, поскольку в силу указанного пункта судам рекомендовано применять указанную ставку при просрочке денежного обязательства.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11.2.7 договора, в случае непредставления в двадцатидневный срок после подписания договора календарно-сетевого графика третьего уровня в формате Excel, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 100 000 руб. 00 коп. за каждый зафиксированный случай.

В предусмотренный договором срок подрядчиком календарно-сетевой график третьего уровня не предоставлен, в связи с чем, начислен штрафа за не предоставление в срок календарно-сетевого графика третьего уровня в формате Excel в размере 100 000 руб. 00 коп.

Оснований для освобождения покупателя от ответственности в силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки и штрафа в сумме 16 508 800 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению в размере 2 006 627 руб. 68 коп. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

На основании изложенного, судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 105 544 руб. 00 коп. по платежному поручению № 136436 от 29.07.2020г. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению с ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Финко» в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неустойку в размере 2 006 627 руб. 68 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Финко» в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» судебные расходы в виде уплаченной истцом госпошлины в сумме 105 544 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                         В.Н. Трещева