Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-61540/2018

20 декабря 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  20 декабря 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (адрес:  Россия 190000, 

<

...>, лит. А, ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>; Дата присвоения ОГРН 11.12.2002; Дата регистрации до 1 июля 2002 года 09.07.1993);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Инфрахит Монтаж" (адрес:  Россия 194352, 

<

...>, лит. Д, пом. 51; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата регистрации: 22.10.2007);

третье лицо: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  (адрес:  Россия 190000, Санкт-Петербург, пер Антоненко 4, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

 

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 15.02.2018;

- от ответчика: не явился, извещен;

- от третьего лица: не явился, извещен; 

 

установил:

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (далее – ГУП «ТЭК СПБ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением (уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "ИнфраХит Монтаж" (далее – ООО "ИнфраХит Монтаж") о взыскании 4 857 842 руб. 73 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 17.09.2015 № 42/ТС/2015.

Определением от 28.09.2018 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (далее – Комитет).

В судебном заседании ГУП «ТЭК СПБ» в порядке ст. 49 АПК РФ заявило ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просило взыскать с ООО "ИнфраХит Монтаж" 5 052 354 руб. 55 коп. неустойки за период с 01.12.2017 по 18.04.2018.

Уточнение размера исковых требований принято арбитражным судом.

ООО "ИнфраХит Монтаж" и Комитет на основании п.2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ считаются извещенными о времени и месте судебного разбирательства. При ненадлежащей организации получения корреспонденции по адресу нахождения, лицо несет риск отрицательных последствий, связанных с несвоевременным получением либо неполучением поступающих по указанному адресу судебных актов и извещений.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между ГУП «ТЭК СПБ» (далее - Заказчик) и ООО "ИнфраХит Монтаж" (далее - Подрядчик) 17.09.2015 заключен контракт №42/ТС/2015, в соответствии с которым ООО "ИнфраХит Монтаж" обязалось выполнить работы по реконструкции тепловых сетей в квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова с вводом в кВ. 120/3 и 117/119.

Согласно п.3.1 Контракта цена контракта составляет 104 336 863 руб. 08 коп.

В соответствии с пунктами 2.1.1 Контракта начало выполнения работ - с момента получения Подрядчиком уведомления о допуске к работам по Объекту (далее - Уведомление) в соответствии с п. 4.2.3 Контракта.

Для получения указанного Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта документы, указанные в пунктах 4.2.1, 4.2.2 Контракта, которые Заказчик проверяет в течение 3 рабочих дней и, в течение 3 рабочих дней по результатам проверки направляет Подрядчику необходимое Уведомление о допуске к работам.

Следовательно, срок начала выполнения работ по пункту 1 Календарного выполнения работ приходится на дату не позднее 02.10.2015.

Согласно п. 2.1.2 Контракта, работы должны быть выполнены не позднее 30.11.2017.

Следовательно, период исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту с 02.10.2015 по 30.11.2017 составляет 790 дней.

В соответствии с пунктом 2.2 Контракта промежуточные сроки выполнения работ определяются на основании Календарного плана выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков, предусмотренных Календарным планом выполнения работ.

В нарушение условий Контракта, Подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ. В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ по Контракту, Истцом в адрес Ответчика было направлено Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 18.04.2018 № 10-18/14375. На момент направления настоящего уведомления работы по Контракту не выполнены.

В   соответствии   с пунктом 8.4 Контракта, если  Подрядчик не приступил к    исполнению     Контракта в установленные сроки, либо     выполняет    работу с   нарушением   промежуточных сроков (периодов) выполнения работ, установленных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2), либо Подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ по Контракту, Подрядчик обязан уплатить в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере, определенном в соответствии с пунктом 8.10 Контракта.

Согласно п. 8.10 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и определяется по формуле:

Пеня = (цена Контракта - стоимость выполненных Подрядчиком обязательств) * размер ставки.

Размер ставки = размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К * количество дней просрочки.

Коэффициент К = количество дней просрочки / срок исполнения обязательств по Контракту (количество дней) * 100%.

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К. равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Пеня рассчитываются в порядке, указанном в п. 8.10 контракта, но не может быть менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

На момент расторжения Контракта Подрядчик выполнил работы на сумму 55 782 712 рублей 87 копеек.

Таким образом, за нарушение Подрядчиком конечного срока выполнения всех работ по Контракту Подрядчик обязан уплатить пени за период с 01.12.2017 по 18.04.2018  в размере 5 052 354 руб. 55 коп.

Расчёт пеней проверен судом и признан обоснованным.

С учётом положений ст.ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ, условий контракта иск подлежит удовлетворению в полном объёме. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инфрахит монтаж" в пользу Государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" 5 025 354 руб. 55 коп. неустойки, 2 000 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Инфрахит монтаж" в доход федерального бюджета 46 127 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.