АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

29.09.2017Дело № А62-4897/2016

Резолютивная часть решения объявлена 28.09.2017

Полный текст решения изготовлен  29.09.2017

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи         Яковенковой В. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Юнитек»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании убытков, 

при участии: 

от истца - не явились, извещены надлежащим образом, 

от ответчика -  не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение «Строитель» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Юнитек» о взыскании убытков с размере 1 329 196, 03 рубля, связанных с ненадлежащим выполнением работ по муниципальному контракту от 10.06.2013 № 26/2013-МКУ.

В обоснование исковых требований истец указал следующее. 

Между МКУ «Строитель» (заказчик)  и                                                                                  ООО СК «Юнитек»  (подрядчик)  был заключен муниципальный контракт от 10.06.2013 № 19/2013-МКУ  на проведение ремонтно-реставрационных работ (фасады)  объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я половина ХIХ в.»,  

<

...> (далее – контракт). 

Согласно пунктам  2.1, 2.2 контракта цена контракта составляет 1 873 306, 00 рубля и включает  стоимость строительных материалов, а также затраты на непредвиденные расходы, все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги и пошлины, транспортные расходы, расходы на потребленную электроэнергию, прочие расходы, связанные с выполнением работ по контракту. Цена контракта определяется на весь срок выполнения работ и объем, не подлежит корректировке в связи с инфляцией и может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  контрактом объемов работ и иных условий исполнения.   

В рамках вышеуказанного контракта подрядчиком выполнены работы на общую сумму 1 873 306, 00 рубля, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ формы КС-2 от 09.10.2013 №№  1,  2,  от  02.12.2013 № 3, от 19.12.2013 №№ 4-6 и соответствующими справками о стоимости выполненных работ формы КС-3.  

Согласно пункту 7.1 контракта  на выполненные работы устанавливается гарантийный срок  - 5 (пять) лет с даты подписания   сторонами акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. 

После приемки работ  в течение гарантийного срока заказчиком на фасадах здания были выявлены дефекты, а именно: трещины на площади 535, 18 кв.м.; шелушения на площади 163, 92 кв.м.; отслоение штукатурки  на площади 9, 28 кв.м.; нарушение окрасочного покрытия металлических элементов и фасадов здания на площади 708, 38 кв.м., разрушение асфальтно-бетонного покрытия отмостки на площади 68, 4 кв.м., дефекты водосточных труб 12 п.м., о чем составлена  дефектная ведомость от 02.03.2016. Перечень реставрационных работ, которые необходимо выполнить для устранения данных  дефектов, приведен в приложении 1 к дефектной ведомости от 02.03.2016.

  Претензией от 09.03.2016 № 204/16 истец предъявил ответчику требование об устранении выявленных дефектов, которая осталась без удовлетворения.

Повторной претензией от 06.05.2016 № 441/16 истец вновь предъявил требование об  устранении выявленных дефектов в течение 45 дней с момента получения претензии.

Согласно сведениям, содержащимся на сайте ФГУП «Почта России», данная претензия получена ответчиком 17.05.2016. Таким образом, установленный претензией от 06.05.2016 № 441/16 срок для устранения выявленных дефектов истек 01.07.2016. Однако ответ на претензию ответчик не направил и к выполнению работ не приступил.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым исковым заявлением. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что в результате проведенного им осмотра 01.12.2016 отдельные дефекты, указанные в дефектной ведомости от 02.03.2016, отсутствуют. Кроме того, в этой ведомости также указаны виды работ, которые не выполнялись подрядчиком.

В ходе судебного разбирательства по делу была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. 

Согласно заключению эксперта, поступившему в суд 01.06.2017,   стоимость ремонта фасада (реставрационные работы) составляет                      1 646 511 рублей. 

В связи с этим истец представил заявление об уточнении исковых требований, согласно которому он просит взыскать с ответчика убытки в размере 1 646 511  рублей. 

Указанное уточненное исковое заявление принято судом к рассмотрению,   так  как это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Ответчиком отзыв на уточненное исковое заявление не представлен. 

Представители истца и ответчика, надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте судебного заседания по делу,  в судебное заседание не явились.  В связи с этим в соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в  их отсутствии. 

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в   материалах дела документы, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

Согласно положениям статей 708, 709 ГК РФ в договоре подряда указываются сроки выполнения работ и цена договора.  

В соответствии с частью 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно части 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие,  предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Статьей 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Согласно положениям статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 

В соответствии с положениями статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).  Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно пункту 1 статьи 724 ГК РФ если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 

Пунктом 3 данной статьи предусмотрено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В статье 756 ГК РФ предусмотрено, что при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

Согласно пункту 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.   Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Заказчик  вправе требовать от подрядчика возмещения  убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда,  в случаях, предусмотренных статьями 715 и 723 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Согласно пункту 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В пункте 2 данной статьи указано, что убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Согласно пункту 3 статьи 393 ГК РФ если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). 

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.  

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

В силу положений статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне. Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ  предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Статьей 71 АПК РФ установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

 Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно положениям статей  8, 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон  и  состязательности.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, и в  силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства  как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны.

Пунктами 4.2.1, 6.8, 7.1  контракта  предусмотрено, что  подрядчик обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией; устранить выявленные  в пределах гарантийного срока дефекты. 

После приемки работ  в течение гарантийного срока заказчиком на фасадах здания были выявлены дефекты, а именно: трещины на площади 535, 18 кв.м.; шелушения на площади 163, 92 кв.м.; отслоение штукатурки  на площади 9, 28 кв.м.; нарушение окрасочного покрытия металлических элементов и фасадов здания на площади 708, 38 кв.м., разрушение асфальтно-бетонного покрытия отмостки 68, 4 кв.м., дефекты водосточных труб 12 п.м., о чем составлена  дефектная ведомость от 02.03.2016.  Перечень реставрационных работ, которые необходимо выполнить для устранения данных  дефектов, приведен в приложении 1 к дефектной ведомости от 02.03.2016.

  Претензией от 09.03.2016 № 204/16 истец предъявил ответчику требование об устранении выявленных дефектов, которая осталась без удовлетворения.

Повторной претензией от 06.05.2016 № 441/16 истец вновь предъявил требование об  устранении выявленных дефектов в течение 45 дней с момента получения претензии.

Согласно сведениям, содержащимся на сайте ФГУП «Почта России», данная претензия получена ответчиком 17.05.2016. Таким образом, установленный претензией от 06.05.2016 № 441/16 срок для устранения выявленных дефектов истек 01.07.2016. Однако ответ на претензию ответчик не направил и к выполнению работ не приступил.

Как следует из материалов дела, в ходе рассмотрения дела между сторонами возник спор относительно качества выполненных подрядчиком работ  и установления причин  возникновения недостатков выполненных работ. 

В связи с этим истцом заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы.  

Определением суда от 26.12.2016 по ходатайству истца назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «ОКСИЯ»  ФИО2.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 1) соответствует ли качество работ, выполненных ООО СК «Юнитек» по муниципальному контракту  от 10.06.2013 № 26/2013-МКУ  по проведению ремонтно-реставрационных работ (фасада)  объекта культурного наследия  регионального значения «Дом жилой, 2-я половина ХIХ века»,  

<

...>,  действующим техническим нормам и правилам, предъявляемым к данному виду работ? 2)  )  если при выполнении указанных работ допущены недостатки (в частности недостатки, указанные в дефектной ведомости от 02.03.2016), то необходимо указать какие это недостатки, причины их возникновения (являются ли они следствием ненадлежащего выполнения работ  по муниципальному контракту от 10.06.2013 или нет), их объемы  и определить стоимость их устранения. 

 По результатам судебной экспертизы  в суд 01.06.2017 представлено экспертное заключение, в котором  экспертом на поставленные судом вопросы сделаны  следующие выводы: 1) качество выполненных                            ООО СК «Юнитек» ремонтно-реставрационных работ не соответствует требованиям технических норм и правил, предъявляемым к данному виду работ и рекомендациям проектной документации; 2) обнаружены следующие недостатки: усадочные трещины на штукатурке фасадов; недостаточное сцепление (слабая адгезия) наносимых отделочных слоев с основанием; шелушение окрасочных слоев; отсутствие поручня балконных ограждений; нарушение плоскости отштукатуренных поверхностей торцевого фасада. Причинами возникновения указанных недостатков явилось нарушение положений нормативных документов, рекомендаций проектной документации, применение строительных материалов, непригодных для конкретных условий. Объемы работ по устранению недостатков определены в приложении № 4, по ним составлены локальные сметные расчеты. Стоимость работ по устранению недостатков согласно локальной смете составляет 1 646 511 рубля (л.д. 12-59, том 2). 

Определением суда от 15.06.2017 суд предложил истцу и ответчику представить пояснения по заключению эксперта. 

От истца и ответчика пояснений и возражений по заключению эксперта не поступило. 

Представитель истца в  судебных  заседаниях  25.07.2017, 07.09.2017  пояснял, что с выводами, сделанными экспертом, истец согласен, вопросов к эксперту у истца не имеется. 

Судом оценено поступившие в суд 01.06.2017 заключение эксперта и установлено, что    заключение экспертизы соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ, содержит подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы. 

Ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертизы по делу от истца и ответчика не поступало.

При таких обстоятельствах с учетом выводов, изложенных в экспертном заключении, поступившем в суд 01.06.2017,  суд приходит к выводу о том, что работы по  муниципальному контракту  от 10.06.2013        № 26/2013-МКУ выполнены ООО СК «Юнитек» ненадлежащего качества. Причинами возникновения недостатков, обнаруженных истцом в течение гарантийного срока и указанных  в  дефектной ведомости от 02.03.2016, а также в последующем в заключении   эксперта,  явилось нарушение подрядчиком положений нормативных документов, рекомендаций проектной документации, применение строительных материалов, непригодных для конкретных условий.

Таким образом, поскольку ответчиком не представлено доказательств, исключающих его ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, а также учитывая, что ответчик, несмотря на неоднократные уведомления истца о необходимости устранения выявленных недостатков, отказался от безвозмездного устранения недостатков, истец обоснованно предъявил требование о взыскании с подрядчика убытков.  

При этом установленные истцом сроки для устранения недостатков, указанные в претензиях от  09.03.2016 и от 06.05.2016,  полученных ответчиком, являлись разумными и достаточными для устранения недостатков, однако подрядчиком не предприняты никакие меры по устранению выявленных недостатков, в том числе и в ходе судебного разбирательства по делу. 

Согласно заключению эксперта стоимость работ, необходимых для устранения недостатков, составляет 1 646 511 рублей  (локальная смета № 1). При этом при расчете эксперт исходил из сметной стоимости работ на дату заключения муниципального контракта, рассчитанной в ценах 4 квартала  2012 года.

Таким образом, взысканию подлежат убытки  в размере 1 646 511 рублей.

Учитывая вышеизложенное,  требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Согласно положениям статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно положениям статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (статья 10 АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.

Согласно части 1 статьи 333.41 Налогового кодекса РФ отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса.

Как следует из материалов дела, на основании ходатайства истца при подаче искового заявления в арбитражный суд ему была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу.

Таким образом, по результатам рассмотрения настоящего дела исходя из размера удовлетворенных требований 1 646 511, 00 рубля с ответчика   в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная  пошлина в сумме 29 465, 00 рубля.  

Как следует из материалов дела, на основании определения суда от  26.12.2016 по ходатайству истца назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Истцом   на депозитный счет Арбитражного суда Смоленской области в обеспечение оплаты экспертизы   внесены денежные средства в размере  40 000 рублей.

По результатам рассмотрения дела понесенные истцом  судебные расходы по оплате экспертизы в  размере 40 000 рублей подлежат взысканию с ответчика  в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Юнитек»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу муниципального казенного учреждения «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) убытки в сумме 1 646 511, 00 рубля, а также в возмещение судебных расходов 40 000, 00 рубля. 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Юнитек»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 29 465, 00 рубля. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья             В. В. Яковенкова