209/2019-49272(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-8277/2017

20 августа 2019 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  товарищества собственников жилья «Виноградова 23» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>)  

к Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>):  - об обязании в течение 60 дней с даты вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>;  

- о возложении на ответчика обязанности в течение 30 дней с даты вступления решения  суда в законную силу разработать проектное решение для выполнения работ, указанных в  пунктах 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10 искового заявления;  

- а также о продлении гарантийного срока на результат работ по капитальному ремонту  крыши многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, исключив из него период времени, исчисляемый с даты принятия  искового заявления к производству Арбитражным судом Ивановской области и до даты  фактического выполнения ответчиком заявленных истцом требований,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ТСЖ «Виноградова 23» удовлетворить частично. 

Обязать НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Ивановской области» в течение 60 дней с даты вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, а именно:  

1) по всей площади кровли выполнить устройство контробрешетки с установкой  диффузионной пленки под контробрешеткой. Для выполнения указанных работ  осуществить полный демонтаж существующего кровельного материала, вместо которого  установить новый кровельный материал, соответствующий строительным нормам,  правилам и государственным стандартам (СП 17.13330, ГОСТ 24045-2010). Работы по  

устройству контробрешетки с установкой диффузионной пленки выполнить в соответствии  с разработанным в установленном порядке проектным решением;  

2) произвести ремонтно-восстановительные работы конструктивных элементов  (наружных и внутренних стен, чердачного перекрытия, помещений 3-го этажа здания (в том  числе квартиры № 8), а также фасада здания, устранив следы воздействия влаги в виде следов  систематических промочек, биокоррозии с образованием грибка и плесени на поверхности  стен и потолка, шелушение, трещины, разрушение и обрушение защитного штукатурного и  отделочного покрытия;  

3) увеличить толщину утеплителя чердачных перекрытий из минераловатных плит  или иным с аналогичной теплопроводностью, не менее чем до 130 мм на всей площади  перекрытия (775 кв.м.) общим объемом 23 куб.м.;  

4) увеличить толщину утеплителя трубопроводов условным диаметром не менее чем:  Ду50 до 46 мм, Ду40 до 44 мм, Ду25 до 39 мм, Ду20 до 37мм, Ду15 до 38 мм. общим  объемом 240 п.м. Указанные работы выполнить в соответствии с разработанным в  установленном порядке проектным решением;  

5) выполнить соединение верхних полок соседних листов профнастила при помощи  саморезов 5,5 х 19 мм с уплотнительной шайбой, установленных с шагом не более 500 мм;  

6) уплотнить прилегание металлических фартуков к вентиляционным трубам путем  постановки дополнительных саморезов и оштукатуривания нижней поверхности выемок  вентиляционных труб;  

7) выполнить примыкание выпусков фановых труб с подъемом кровли (фартуков,  гильз и т.п.) с должной гидроизоляцией. Указанные работы выполнить в соответствии с  разработанным в установленном порядке проектным решением;  

8) выполнить устройство дополнительных слуховых окон: как минимум двух на скате  крыши, обращенном в сторону ул. Ивана Виноградова, и по одному на скатах под  поперечными наружными стенами. В слуховые окна установить жалюзийные решетки из  расчета, что суммарная площадь всех решеток в свету (включая существующие) должна  составлять не менее 2,7 кв.м. Указанные работы выполнить в соответствии с  разработанным в установленном порядке проектным решением;  

9) выполнить устройство соединений картин карнизного свеса по всей длине стыка  лежачим фальцем с герметизирующими прокладками;  

10) выполнить крепление устройств снегозадержания с плотным обжатием  уплотняющих прокладок.  

Обязать НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Ивановской области» в течение 30 дней с даты вступления решения суда в  законную силу разработать в установленном порядке проектное решение для выполнения  работ, указанных в подпунктах 1, 4, 7, 8 резолютивной части решения.  

В удовлетворении искового заявления ТСЖ «Виноградова 23» в остальной части  отказать.  

Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» в пользу ТСЖ «Виноградова 23» расходы по оплаты  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

2. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд  (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии  со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276  Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом  

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса  «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 25.02.2019 16:47:17

Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна