АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

(резолютивная часть)

г. Томск                                                                                                             Дело № А67-1891/2021

17.05.2021

Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Д. А. Соколова, 

рассмотрев материалы дела № А67-1891/2021

по исковому заявлению Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью «Технологии строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 13 540,29 руб. пени, начисленных за период с 16.11.2019 по 23.06.2020; получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по государственной экспертизе проектной документации; получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности сметной стоимости строительства, разработки рабочего проекта в течение 62 рабочих дней со дня вынесения решения судом; сдаче УФСИН России по Томской области результаты исполнения контракта в течение 30 дней после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» принять, рассмотреть дело с учетом заявленного уточнения во вновь заявленном размере, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технологии строительства» в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области 13 540,29 руб. неустойки в виде пени за просрочку выполнения работ по государственному контракту № 19191320101272003651000100/127/19 на выполнение проектно-изыскательских работ для нужд уголовно-исполнительной системы от 07.06.2019, начисленных с 16.11.2019 по 23.06.2020.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технологии строительства»   исполнить государственный контракт от 07.06.2019 № 19191320101272003651000100/127/19 в части

- получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по государственной экспертизе проектной документации; 

- получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности сметной стоимости строительства, разработки рабочего проекта в течение 62 рабочих дней со дня вынесения решения судом; 

- сдаче УФСИН России по Томской области результаты исполнения контракта в течение 30 дней после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технологии строительства» в доход федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции (Седьмой арбитражный апелляционный суд) в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья                        Д. А. Соколов