Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск

19.09.2022                                             Дело № А72-19514/2021

Резолютивная часть решения объявлена 15.09.2022

Решение в полном объеме изготовлено  19.09.2022

Арбитражный суд Ульяновской области в составе  судьи Страдымовой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Муниципального учреждения Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Ульяновская область 

к обществу с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Ульяновская область 

об обязании устранить недостатки выполненных работ 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное учреждение финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

без участия лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом по правилам ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: http://ulyanovsk.arbitr.ru,

установил:

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гелиос» об обязании устранить недостатки выполненных работ. 

Определением от 16.02.2022 исковое заявление принято к производству. 

Определением от 09.06.2022 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципальное учреждение финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район». 

Лица, участвующие в деле, не обеспечили явку представителей в судебное заседание.

При данных обстоятельствах спор в судебном заседании рассматривается в отсутствие указанных лиц в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся материалам.

Как усматривается из материалов дела, между Муниципальным учреждением Администрацией муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос» (Подрядчик) 19.08.2020 был заключен государственный контракт № 22-2020 на оборудование контейнерных площадок в муниципальном образовании "Подкуровское сельское поселение" Тереньгульского района Ульяновской области.

В соответствии с п. 1.1. договора № 22-2020 подрядчик принимает на себя обязательства  по оборудованию контейнерных площадок, а заказчик обязуется принять и  оплатить выполненные работы.

Подрядчик обязуется выполнить работы  в соответствии с условиями договора и приложениями к нему: Локальной сметой № ЛС-02-01 (приложение №1), ведомостью объемов работ (дефектная ведомость) (приложения № 2), Локальной сметой № ЛС-02- 02 (приложение №1), ведомостью объемов работ (дефектная ведомость) (приложения № 2), Локальной сметой № ЛС-02-03 (приложение №1), ведомостью объемов работ (дефектная ведомость) (приложения № 2), Локальной сметой № ЛС-02-04 (приложение №1), ведомостью объемов работ (дефектная ведомость) (приложения № 2), Локальной сметой № ЛС-02-05 (приложение №1), ведомостью объемов работ (дефектная ведомость) (приложения № 2), Локальной сметой № ЛС-02-06 (приложение №1), ведомостью объемов работ (дефектная ведомость) (приложения №2) (п. 1.2. договора).

Цена договора составляет 346 464 руб. 65 коп. (п. 2.1. договора), оплата должна быть произведена в срок не более чем в течении 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке (п. 2.6. договора).

Заказчик в течении 5 календарных дней после представления подрядчиком акта приемки выполненных работ  и справки о стоимости выполненных работ и затрат осуществляет  приемку и оформление результатов приемки предъявленных подрядчиком работ (п.  8.3.договора).

Пункт 8.4. договора предусматривает, что в случае несоответствия результатов работы условиям договора, подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет  в установленный заказчиком срок. Устранение  недостатков, порядок и сроки их устранения фиксируются с участием подрядчика двухсторонним актом обнаружения недостатков/дефектов.

Гарантийный срок составляет 3 года. Выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с законодательством  Российской Федерации, требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ (п.9.1. договора).

Работы были приняты истцом 11.11.2020, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ от 11.11.2020 № АКТ-370, № АКТ-371, № АКТ-372, № АКТ-373, № АКТ-374, № АКТ-375, подписанными заказчиком и подрядчиком.

В соответствии со справками о стоимости выполненных работ и затрат от 11.11.2020 № ФЗ-274, № ФЗ-275, № ФЗ-278, № ФЗ-279 стоимость работ составила 346 464 руб. 65 коп.

Истец полностью оплатил стоимость товара, что подтверждается платежным поручением № 689 от 25.11.2020, платежным поручением № 690 от 25.11.2020, платежным поручением № 691 от 25.11.2020, платежным поручением № 692 от 25.11.2020, платежным поручением № 693 от 25.11.2020, платежным поручением № 694 от 25.11.2020.

В ходе проверки фактического выполнения работ установлено, что при проведении работ по обустройству площадок накопления ТКО в МО «Подкуровское сельское поселение» подрядчиком использовались материалы, отличающиеся от материалов, определенных договором, часть работ подрядчиком не выполнена, что установлено Актом о выявленных недостатках результата выполненных работ от  18.06.2021.

Истец направил ответчику письмо 02.04.2021 № 100, с просьбой прибыть в МО «Подкуровское сельское поселение» 

<

...>, в течении 10 календарных дней после получения письма для составления акта осмотра всех установленных площадок, в связи с нарушением подрядчиком договора оказания услуг № 22-2020 от 19.08.2020 года.

ООО "Гелиос" на письмо не ответило, на составление акта ответчик, либо представитель ответчика, не явились, о чем свидетельствует запись в акте осмотра о выявленных недостатках от 18.06.2021 № 176.

25.06.2021 в  адрес ответчика был направлен Акт о выявленных недостатках от 18.06.2021 № 176,  ответчик за письмом в почтовое отделение связи не явился, о чем свидетельствует уведомление о неполучении от 02.08.2021, письмо вернулось в Администрацию МО «Подкуровское сельское поселение» 04.08.2021.

01.07.2021 истец направил ответчику претензию от 25.06.2021 № 187, содержащую требование об устранении выявленных недостатков (о замене товара, поставленного и установленного, с неустранимыми недостатками), в срок до 1 августа 2021 года. Ответчик за письмом в почтовое отделение связи не явился, письмо вернулось в Администрацию МО «Подкуровское сельское поселение» 06.08.2021.

Так как ответчик ответ на претензию не представил, недостатки не устранил, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик явку в суд не обеспечил, отзыв на исковое заявление не представил.

Судом было определено сторонам провести 22.06.2022 в 10:00 час. совместный осмотр недостатков выполненных работ, представить результаты осмотра спорных работ с указанием несоответствий со ссылкой на пункты локальных смет.

В материалы дела истцом представлен акт осмотра недостатков выполненных работ от 22.08.2022, в соответствии с которым установлены следующие недостатки:

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...>  виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> на против дома 26 виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 54 виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> Победы, 11 виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> на въезде 2 шт.  виды работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008;

<

...> работ: отдельные  конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. по смете 0,054 (40х40х3 мм.), по факту: 0,027 (40х40х1,5 мм.), расхождение 0,27; монтаж прогонов (прожилин) при шаге до 12 м. при высоте здания до  25 м., по смете : 0,034, по факту: 0,026, расхождение 0,008.

С учетом  результата осмотра, истец уточнил исковые требования и просит суд обязать ООО "Гелиос" устранить недостатки. установленные Актом от 22.08.2022.

На осмотр недостатков и составление акта представитель ответчика явку не обеспечил (уведомление о составлении акта № 246 было направлено 17.08.2022  директору ООО "Гелиос" ФИО2

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что  исковые требования с учетом уточнений следует удовлетворить. При этом суд исходит из следующего. 

На основании пункта 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда.

Статьи 737, 723 ГК РФ устанавливают право заказчика в случае, когда работа выполнена подрядчиком с недостатками, в течении гарантийного срока потребовать безвозмездного устранения недостатков.

В соответствии со статьёй 722 Гражданского кодекса РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Вышеуказанные недостатки выявлены в период гарантийного срока, в связи с чем, истец просит обязать ответчика устранить недостатки в судебном порядке.

В соответствии  с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Поскольку  материалами дела установлено, что работы выполнены ответчиком некачественно, с нарушением требований нормативных документов, возражения ответчика по существу заявленных исковых требований отсутствуют, исковые требования подлежат удовлетворению. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 15.08.2018 по делу №А72-18976/2017, Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 17.05.2019 по делу №А72-13115/2018 

Следует обязать общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных работ по обустройству контейнерных площадок накопления ТКО, установить профильные трубы 40х40х3 мм., прогоны (прожилины) выполнить профильной трубой 40х20х2 мм., в соответствии с условиями договора№22-2020 от 19.08.2020 и локальными сметами, в Ульяновской области, Тереньгульсткий район по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> на против дома 26, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> Победы, д. 11, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>,  

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...> на въезде 2 шт., 

<

...>.

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует возложить на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса РФ

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных работ по обустройству контейнерных площадок накопления ТКО, установить профильные трубы 40х40х3 мм., прогоны (прожилины) выполнить профильной трубой 40х20х2 мм., в соответствии с условиями договора и локальной сметой, в Тереньгульском районе Ульяновской области по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> на против дома 26, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> Победы, д. 11, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>,  

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...> на въезде 2 шт., 

<

...>.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп. – государственную пошлину. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст. ст. 257-260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                                  М.В. Страдымова