АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-13136/2019

г. Белгород

24 марта 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2020 года

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Танделовой З. М., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи помощником судьи Карнауховой И.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску   ООО "БСТ" (ИНН 3123445686, ОГРН1183123030177) 

к ООО "Лидерметаллстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 872 294,90 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО1 - по доверенности от 23.12.2019г.;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

ООО "БСТ" (истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ иском к ООО "Лидерметаллстрой" (ответчик)  о взыскании задолженности по договору подряда № 1920187376242554164000000/БЛ02-07 от 01.07.2019 в размере 701 721,37 руб., пени за период с 26.07.2019 по 27.02.2020 в размере 170 573,54 руб., продолжать начисление до момента фактической оплаты суммы задолженности, расходов по оплате государственной пошлины в размере 21 488 руб.

В суде иск поддержан.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. В соответствии со статьёй 123 АПК РФ уведомлен судом надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, что в порядке ст. 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в нем доказательствам. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителя истца, исследовав представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, 01 июля 2019 г между ООО «ЛМС» (заказчик) и ООО «БСТ» (подрядчик) был заключен договор подряда №192018737624200416400000/БЛ02-07 (договора) по условиям которого заказчик поручил, а подрядчик принял на себя  обязательства по выполнению комплекса земляных работ  на объекте: «Обустройство  военного городка № 306 войсковой части 25624 по адресу: Белгородская область, Белгород 22 (шифр объекта 624-12)», включая работы, определенно не упомянутые, но производственно необходимые на объекте (п. 1.1, 1.2 договора).

Пунктом 2.3 договора установлено, что ориентировочная сумма договора составляет 1 050 000 руб. 

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, получения рабочих чертежей подрядчиком, передачи заказчиком строительной площадки по акту с указанием всех имеющихся коммуникаций и их согласованием на производство работ, и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных условиями договора (п. 4.1 договора).

Оплата фактически выполненных работ производится заказчиком в течении 10 календарных дней с момента подписания форм КС-2, КС-3 (п. 3.2.4 договора).

Акт выполненных работ и справка о стоимости работ были подписаны и скреплены печатями обществ без замечаний.

Всего подрядчиком выполнены работы по договору подряда на общую сумму 801 721,37 руб., заказчиком выполненные работы  оплачены частично.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о погашении  задолженности, которая оставлена последним без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Задолженность за выполненные работы на день судебного заседания составляет 701 721,37 руб.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

В силу статей 309, 310 указанного Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Исходя из смысла приведенных норм материального права, существенными условиями договора подряда являются его предмет и сроки выполнения работ.

В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со ст. 753 ГK РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно п. п. 2, 3 ст. 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В соответствии с п. 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком, в сроки и в порядке, которые установлены договором строительного подряда.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В нарушение указанной нормы доказательств оплаты товара ответчик суду не представил.

Сведений опровергающих доводы истца ответчик не представил. Заявлений о фальсификации доказательств не заявил.

В соответствии со ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно  частям  1,  2  статьи  71  АПК  РФ  арбитражный  суд  оценивает доказательства по своему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и  непосредственном  исследовании  имеющихся  в  деле доказательств.  Арбитражный  суд  оценивает  относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При  изложенных  обстоятельствах,  требования  истца  о  взыскании  с ответчика  суммы  задолженности по оплате стоимости выполненных работ по договору подряда № 1920187376242554164000000/БЛ02-07 от 01.07.2019  в сумме 701 721,37 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки по договору подряда № 1920187376242554164000000/БЛ02-07 от 01.07.2019   в размере 170 573,54 руб. за период с 26.07.2019 по 27.02.2020.

Гражданское законодательство предусматривает ответственность лица, не исполнившего либо ненадлежащим образом исполнившего свои обязательства. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п.1 ст. 330 ГКРФ).

Размер неустойки может устанавливаться сторонами обязательства, как в твердой сумме неисполненного обязательства, так и в процентах к сумме  неисполненного обязательства, при этом соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Согласно п. 7.5. договора в случае нарушения сроков оплаты работ, заказчик обязан заплатить подрядчику пеню в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более всей суммы несвоевременно оплаченных работ.

Исходя из принципа свободы договора, закрепленного ст. 421 ГК РФ, стороны заключили договор генерального подряда, подписали его уполномоченными лицами и скрепили печатями, и согласовали в нем ответственность заказчика за просрочку оплаты выполненных работ в размере 0,1% от стоимости неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Таким образом, размер неустойки был согласован с ответчиком, он знал о том, какие последствия могут наступить для него в случае просрочки оплаты выполненных работ,  и не оплатил принятые работы в полном объеме.

В соответствии с  пунктом 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно расчету истца, не оспоренного ответчиком, неустойка за неисполнение договорных обязательств составляет 170 573,54 руб.  

Представленный истцом расчет неустойки произведен в соответствии с условиями договоров и требованиями действующего законодательства, судом   проверен и признан правильным.

С учетом изложенного, суд считает требование истца об уплате договорной неустойки заявленным  обоснованно.

В силу  положений ст. 330 ГК РФ неустойка носит компенсационный характер и она должна быть соразмерна последствиям нарушения обязательств. 

Ответчик не заявил ходатайства об уменьшении размера неустойки, ввиду несоразмерности, расчет неустойки не оспорил. 

Истец аргументировал соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства условиями договора и длительным периодом задолженности. Суд учитывает, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны предусмотрели размер неустойки. Доказательств несоразмерности неустойки последствиям неисполнения обязательства суду не представлено.

В силу п. 65 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016г., истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При таких обстоятельствах, суд считает обоснованным исходить из имеющихся в деле доказательств и взыскать с ответчика 170 573,54  руб. договорной неустойки, а также пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки  за период с 28.02.2020 по день фактической уплаты суммы основного долга.

При таких условиях, иск подлежит удовлетворению полностью.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

С учетом изложенного, государственная пошлина, уплаченная истцом при предъявлении иска, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск ООО "БСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> удовлетворить.

Взыскать с ООО "ЛМС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "БСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору подряда № 1920187376242554164000000/БЛ02-07 от 01.07.2019 в размере 701 721,37 руб., пени за период с 26.07.2019 по 27.02.2020 в размере 170 573,54 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 488 руб.

Взыскать с ООО "ЛМС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "БСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени, которые начислять на сумму долга 701 721,37 руб., начиная с 28.02.2020, исходя из 0,1% по день фактической выплаты денежных средств.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

З.М. Танделова