9/2022-299138(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15  

http://www.samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-13869/2022

29 сентября 2022 года

г. Самара

 

Резолютивная часть решения

 объявлена 29 сентября 2022 года  

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Михайловой М.В. 

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания  – ФИО1, после перерыва помощником судьи – Колесниковой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании 22 сентября 2022 года, 29 сентября 2022 года дело по  иску Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд  капитального ремонта"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Белстрой" об обязании 

при участии в заседании 

от истца – ФИО2, доверенность от 18.10.2021, диплом,  от ответчика – ФИО3, доверенность от 21.06.2022, диплом,  

 Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Белстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) выполнить гарантийные обязательства по договору № ЭКР208- 16/16 от 26.09.2016 путем устранения недостатков выполненного капитального ремонта  крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>,  в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:  

- выполнить полную замену обрешетки для обеспечения несущей способности. На  карнизном свесе, в коньковом узле и в местах устройств ендов обрешетку выполнить  сплошной. Сечение досок обрешетки должно обеспечивать несущую способность кровли;  

- выполнить огнебиозащиту по всей площади кровли;  

- выполнить ремонт подкровельной гидроизоляции по всей площади кровли для ее  приведения в соответствие с требованиями нормативной литературы;  

- выполнить устройство контробрешетки в соответствии с требованиями  нормативной литературы;  

- выполнить замену карнизного свеса по всему периметру кровли с устройством  надлежащих фальцевых соединений и их герметизацией, с заменой настенных желобов и  надлежащим соединением желобов в соответствии с требованиями нормативно-технической литературы;  

- выполнить полную замену лотков ендов кровли по всем скатам с устройством  надлежащих фальцевых соединений;  

- установить в местах примыкания покрытия кровли из профилированного листа  гребенки и уплотнители по форме поперечного сечения профлиста;  

- выполнить замену покрытия кровли из профилированного листа с надлежащим  примыканием и герметизацией стыков к выступающим на кровлю элементам (вентшахты,  стены, слуховые окна), с установкой гребенок и уплотнителей по форме поперечного  сечения профлиста в коньковой и карнизной части кровли, в примыканиях к ендовам и  вентиляционным шахтам;  

- установить снегозадерживающие устройства по кровле по всему периметру; 

- выполнить крепление ограждения кровли по всему периметру с добавлением  уплотнительных прокладок.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Белстрой"(ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Некоммерческой организации "Региональный  оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" (ИНН 

<

***>,  ОГРН1136300002365) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный  суд Самарской области.  

Судья / М.В. Михайлова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 3:14:58

Кому выдана Михайлова Мария Владимировна