Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

13. 12. 2019 года.                                            Дело № А40-209405/19-43-1788

Резолютивная часть решения объявлена 03. 12. 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 13. 12. 2019 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " РУС СТРОЙ ШАВАШ " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Еврокапитал " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 889 779 руб. 20 коп. – долга, неустойки,

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – не явился.

Изучив, имеющиеся в деле, документы, арбитражный суд                                          

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск  заявлен о взыскании 2 889 779 руб. 20 коп. – долга, неустойки, на основании статей 39, 310, 702, 711, 746, 753 ГК РФ. 

Истец не направил представителя в судебное заседание, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление; документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; представителя в судебное заседание не направил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва ответчика и представителей истца и  ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между ООО «РУС СТРОЙ ШАВАШ» (Истец, Подрядчик) и ООО «ЕВРОКАПИТАЛ» (Ответчик, Заказчик) заключены:

1. Договор от 03.07.2018 № 03/07/18 и дополнительное соглашение к нему от 30.08.2018 (Договор 1), в соответствии с пунктом 1.1 которого Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить работы по укладке тротуарной плитки, (далее - «Подрядные работы») на Объекте Заказчика: «Административное здание» по адресу: 

<

...>, в соответствии с Законодательством РФ, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Стоимость Договора 1 была установлена пунктом 4.1. Договора 1 и составляла 1 800 000 рублей 00 копеек, которая была изменена путем подписания дополнительного соглашения от 30.08.2018 к Договору 1 и составляет 2 420 650 рублей 00 копеек.

В силу пункта 5.3. Договора 1 Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от Подрядчика Актов о приемке выполненных работ и справки либо утверждает выполненный объем Работ и возвращает Акты Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ. Если Заказчик не предоставит Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предоставления, Работы будут считаться принятыми Заказчиком и должны быть оплачены Подрядчику.

2. Договор от 27.07.2018 № 27/07/18 (Договор 2), в соответствии с пунктом 1.1 которого Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить Комплекс работ по установке алюминиевых конструкций, (далее - «Подрядные работы») на Объекте Заказчика: «Административное здание» по адресу: 

<

...>, в соответствии с Законодательством РФ, Технической документацией, условиями Договора и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В силу пункта 4.2. Договора 2 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 80 % от общей суммы договора 1 248 337,60 руб., в том числе НДС 18% - 190 424,38 руб., в течение 5-ти дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата оставшейся стоимости работ производится исходя из объема работ, выполненных подрядчиком в течение соответствующего отчетного периода, в течении 10 дней с даты подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

Надлежащим образом выполненные Подрядчиком весь комплекс работ по Договору 1 и Договору 2 приняты Заказчиком в соответствии с разделом 5 Договора 1 и разделом 5 Договора 2.

Однако Заказчиком не в полном объеме выполнены взятые на себя обязательств по оплате выполненных и принятых работ.

Объем выполненных Подрядчиком комплекса работ по Договору 1 и Договору 2 подтверждены соответствующими актами выполненных работ (КС-2) и справками остоимости выполненных работ (КС-3).

Заказчиком не произведена оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору 1 на сумму 1 466 650,00 рублей и по Договору № 2 на сумму 1 160 422,00 рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности составляет 2 627 072 рубля 00 копеек, что подтверждается подписанным между Заказчиком и Подрядчиком актом сверки взаимных расчетом от 31.12.2018.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в сумме 2 627 072 руб. 00 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В силу пункта 6.1 Договора 1 и пункта 6.1. Договора 2, Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: - за задержку расчетов за выполненные Подрядные работы - неустойку в размере 0,1% от стоимости подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от подлежащей уплате суммы.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 262 707 руб. 20 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на Ответчика, в  соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Еврокапитал " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " РУС СТРОЙ ШАВАШ " (ОГРН 

<

***>) 2 889 779 руб. 20 коп., в том числе: 2 627 072 руб. 00 коп. – долга, 262 707 руб. 20 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 37 449 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов