АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А24-1626/2019

г. Петропавловск-Камчатский

01 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 01 июля 2019 года.

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Ищук Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Теплоресурс" (ИНН 4101140587, ОГРН 1104101005799)

к 

обществу с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского" (ИНН 4101122429, ОГРН 1084101001203)

третье лицо 

временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Теплоресурс" ФИО2 

о взыскании 840 430,93 руб.,

при участии:

от истца:

не явился, 

от ответчика:

не явился, 

от третьего лица:

не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» (далее – ООО «Теплоресурс», истец, место нахождения: 683002, Камчатский край, 

<

...>) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского» (далее – ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского», ответчик, место нахождения: 683024, 

<

...>) о взыскании 840 430,93 руб. задолженности по договорам от 30.12.2013 № 336/АВР-14, от 30.12.2013 № 337/СС-ТО/14.

Требования заявлены истцом со ссылкой на статьи 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по названным договорам.

Определением от 10.04.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца, привлечен временный управляющий ООО «Теплоресурс»  ФИО2

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседаний надлежащим образом в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), однако явку своих представителей в суд не обеспечили.

Судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, на основании части 1 статьи 136 АПК РФ.

От ответчика в суд поступил отзыв на иск, в котором ответчик требования истца в размере 840 430,93 руб. не оспаривал.

От третьего лица поступило мнение на иск, согласно которому третье лицо полагало иск подлежащим удовлетворению.

Исследовав материалы дела, и оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как установлено судом следует из материалов дела, 30.12.2013 между ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского» (заказчик) и ООО «Теплоресурс» (подрядчик) заключен договор № 336/АВР-14, согласно которому истец принял на себя обязательства по восстановлению целостности и работоспособности внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома в целях обеспечения нормального предоставления гражданам-потребителям коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), а также восстановлению иного общего имущества многоквартирного жилого дома, обеспечивающее соблюдение требований надежности и безопасности.  

Стоимость и порядок оплаты работ согласованы сторонами в разделе 5 договора.

В рамках указанного договора в ноябре 2018 года истец выполнил для ответчика работы на общую сумму 111 993,16 руб., о чем сторонами подписаны соответствующие акты. Ответчик оказанные услуги не оплатил.

30.12.2013 между ответчиком (заказчик) и истцом (исполнитель) заключен договор № 337/СС-ТО/14, согласно которому истец принял на себя обязательства по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории, техническому обслуживанию мест общего пользования (общестроительные работы), техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома, мытью окон и распространению (доставке) платежных квитанций.

Стоимость и порядок оплаты работ согласованы сторонами в разделе 4 договора.

В рамках указанного договора в декабре 2018 года истец выполнил для ответчика работы на общую сумму 728 437,77 руб., о чем сторонами подписаны соответствующие акты. Ответчик оказанные услуги не оплатил.

Общая сумма долга по оплате выполненных истцом работ составила 840 430,93 руб.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 15.01.2019 № 03, в которой просил оплатить образовавшуюся задолженность.  

Поскольку в добровольном порядке задолженность ответчиком не оплачена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив вышеназванные договоры, суд приходит к выводу, что они заключены в соответствии с требованиями закона и между сторонами возникли отношения по подряду, регулируемые главой 37 ГК РФ, а также общими нормами об обязательственных отношениях и договорах ГК РФ.

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьями 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов в период времени, в течение которого они должны быть исполнены.

Представленными в материалы дела актами, подписанными сторонами без замечаний, подтверждается факт выполнения истцом работ по спорным договорам и их принятие ответчиком, что свидетельствует о возникновении у ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» обязательств по оплате вышеуказанных работ.

Ответчик наличие долга в размере 840 430,93 руб. за заявленный период по вышеуказанным договорам и обстоятельства его возникновения не оспаривал, доказательств оплаты работ на указанную сумму в порядке статьи 65 АПК РФ суду не предоставил. Расчет долга судом проверен и признан верным.

Поскольку до настоящего времени сумма задолженности ответчиком не погашена, суд приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Государственная пошлина по делу составляет  19 809 руб., относится на ответчика и подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета, поскольку истцу при обращении с иском в арбитражный суд была предоставлена отсрочка по ее уплате.

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Теплоресурс" 840 430,93 руб. долга.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-Камчатского" в доход федерального бюджета 19 809 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                         Ю.В. Ищук