АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-7204/2022

г. Астрахань

18 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена 16 ноября 2022 года;

Решение в полном объеме изготовлено 18 ноября 2022 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Баскаковой И.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "Сервисная компания Интра" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  "ВолгаГазРемонт" (ОГРН 

<

***>, ИНН о взыскании задолженности  по  договору  субподряда № 16КР-02059/3 от 15.10.2021г. в размере 3 063 971 руб. 06 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 61 279 руб. 42 коп. за  период с 01.02.2022г. по 31.03.2022г.; по  договору субподряда № 10Тои ТР-02059/4 от 15.11.2021г. в сумме 52 704 706 руб. 74 коп.  и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 054 094 руб. 13 коп. за период с 01.02.2022г. по 31.03.2022г., 

при участии:

от истца- не явился, извещен 

от ответчика-  ФИО2 – представитель по доверенности от 10.01.2022 № 1-ВГР, копия диплома, 

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания Интра" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью  "ВолгаГазРемонт" о взыскании задолженности  по  договору  субподряда № 16КР-02059/3 от 15.10.2021г. в размере 3 063 971 руб. 06 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 61 279 руб. 42 коп. за  период с 01.02.2022г. по 31.03.2022г.; задолженности по  договору субподряда № 10Тои ТР-02059/4 от 15.11.2021г. в сумме  52 704 706 руб. 74 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме  1 054 094 руб. 13 коп. за период с 01.02.2022г. по 31.03.2022г.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В адрес суда 08.11.2022 вх. № 84396 от представителя истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддерживает, просит удовлетворить.

Судебное заседание согласно ст.156 Арбитражного процессуального проводится в отсутствии представителя истца. 

Представитель ответчика изложил доводы отзыва на исковое заявление, наличие задолженности не оспаривается. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 15 октября 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью  "Сервисная компания Интра" (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "ВолгаГазРемонт" (Заказчик) заключен договор субподряда № 16КР-02059/3, согласно условиям которого, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить своими силами и средствами работы по Объектам ООО «Газпром переработка», указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, на основании основного договора. Заказчик обязуется принимать работы, фактически выполненные Исполнителем по договору, в соответствии с Проектной документацией, включая сметную часть, и оплачивать их стоимость Исполнителю на условиях настоящего договора. Работы, фактически выполненные Исполнителем по договору, в соответствии с Проектной документацией, включая сметную часть и оплачивать их стоимость Исполнителю на условиях настоящего договора.

Работы по настоящему договору должны быть исполнены только силами Исполнителя. Привлечение третьих лиц к исполнению работ по настоящему договору не допускается.

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что сроки выполнения работ определяются сводным графиком № 1 на планово-предупредительный ремонт технологических установок, цехов, трубопроводов Астраханского ГПЗ и должны быть завершены не позднее 31.12.2021 года. При необходимости промежуточные сроки определяются оформленным сторонами календарным план-графиком выполнения работ. Датой исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. 

В соответствии с п. 3.1.договора, цена работ, предусмотренных к выполнению п. 1.1 настоящего договора, является приблизительной и составляет 2 270 965 руб., окончательная цена работ определяется Сметной документацией. 

Согласно пункту 3.3 договора, изменение сроков, состава, содержания Работ и Цены Работ возможно на основании дополнительного соглашения к Договору, подписываемого Сторонами.

Пунктом 9.1 договора предусмотрено, что оплата за выполненные Исполнителем работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 календарных дней, после подписания сторонами актов (КС-2) и справок (КС-3).

В соответствии с пунктом 11.13 договора, ответственность Заказчика по настоящему договору за просрочку исполнения обязательств составляет не более 2% (двух процентов) от суммы просроченного обязательства.

Кроме того, 15 ноября 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью  "Сервисная компания Интра" (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "ВолгаГазРемонт" (Заказчик) заключен договор субподряда № 10ТОиТР-02059/4, согласно условиям которого, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить своими силами и средствами работы по Объектам ООО «Газпром переработка», указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, на основании основного договора. Заказчик обязуется принимать работы, фактически выполненные Исполнителем по договору, в соответствии с Проектной документацией, включая сметную часть, и оплачивать их стоимость Исполнителю на условиях настоящего договора. Работы, фактически выполненные Исполнителем по договору, в соответствии с Проектной документацией, включая сметную часть и оплачивать их стоимость Исполнителю на условиях настоящего договора.

Работы по настоящему договору должны быть исполнены только силами Исполнителя. Привлечение третьих лиц к исполнению работ по настоящему договору не допускается.

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что сроки выполнения работ определяются сводным графиком № 1 на планово-предупредительный ремонт технологических установок, цехов, трубопроводов Астраханского ГПЗ и должны быть завершены не позднее 31.12.2021 года. При необходимости промежуточные сроки определяются оформленным сторонами календарным план-графиком выполнения работ. Датой исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ считается дата подписания акта сдачи-приемки работ. 

В соответствии с п. 3.1.договора, цена работ, предусмотренных к выполнению п. 1.1 настоящего договора, является приблизительной и составляет 34 828 785 руб. 21 коп., окончательная цена работ определяется Сметной документацией. 

Согласно пункту 3.3 договора, изменение сроков, состава, содержания Работ и Цены Работ возможно на основании дополнительного соглашения к Договору, подписываемого Сторонами.

Пунктом 9.1 договора предусмотрено, что оплата за выполненные Исполнителем работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 календарных дней, после подписания сторонами актов (КС-2) и справок (КС-3).

В соответствии с пунктом 11.13 договора, ответственность Заказчика по настоящему договору за просрочку исполнения обязательств составляет не более 2% (двух процентов) от суммы просроченного обязательства.

Из содержания искового заявления и представленных в материалы дела документов следует, что в соответствии с условиями заключенных договоров, Подрядчик выполнил работы, оговоренные в договорах.

Ответчик, в свою очередь, в нарушение договорных обязательств, оплату выполненных работ в полном объеме не произвел, что повлекло за собой образование задолженности перед истцом по договору  субподряда № 16КР-02059/3 от 15.10.2021г. в размере 3 063 971 руб. 06 коп., по  договору субподряда № 10Тои ТР-02059/4 от 15.11.2021г. в сумме 52 704 706 руб. 74 коп. 

Досудебный порядок соблюден истцом согласно претензии от 27.06.2022 исх. № 542.

Оплата ответчиком на сумму задолженности не произведена.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, вытекающие из договора, должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Надлежащим доказательством факта выполнения и приемки выполненных подрядных  работ является акт сдачи-приемки выполненных  работ.  

В материалы дела представлены акты приемки-сдачи выполненных работ, подписанные сторонами без замечаний и возражений. 

Претензии по срокам и качеству выполненных истцом работ со стороны ответчика не поступали, доказательств обратного ответчиком в дело не представлено.

Подписание ответчиком актов приемки выполненных истцом работ свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании ими воспользоваться. 

Истцом также представлены подписанные акты сверки по указанным договорам, согласно которых ответчик подтверждает наличие задолженности перед истцом в заявленном размере. 

Ответчик представил отзыв, а также указал в судебном заседании, что не оспаривает размер задолженности. 

В связи с чем, суд приходит к выводу, что материалами арбитражного дела подтверждается, что Подрядчик выполнил работы, предусмотренные  договором. Ответчик принял работы без замечаний. 

Данный факт суд расценивает как подтверждение заказчиком взятых на себя обязательств по оплате выполненной исполнителем работы.

Ответчик доказательства оплаты указанной суммы не представил.

В соответствии с частью 3¹ статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не  оспорены или несогласие  с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Принимая во внимание изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию по договору  субподряда № 16КР-02059/3 от 15.10.2021г. основной долг в сумме 3 063 971 руб. 06 коп., по  договору субподряда № 10Тои ТР-02059/4 от 15.11.2021г. основной долг в сумме 52 704 706 руб. 74 коп. 

Кроме взыскания суммы основного долга, истец заявил требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по  договору  субподряда № 16КР-02059/3 от 15.10.2021г. в сумме 61 279 руб. 42 коп.; по  договору субподряда № 10Тои ТР-02059/4 от 15.11.2021г. в сумме 1 054 094 руб. 13 коп.

Согласно части 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

 Проверив расчет процентов,  суд  считает  его  верным, и требования о взыскании процентов подлежим  удовлетворению  в  полном объеме.

В соответствии с пунктом 1  статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "ВолгаГазРемонт" (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Сервисная компания Интра" (ИНН 

<

***>) по  договору  субподряда № 16КР-02059/3 от 15.10.2021г. основной долг в сумме 3 063 971 руб. 06 коп., проценты в сумме 61 279 руб. 42 коп.; по  договору субподряда № 10Тои ТР-02059/4 от 15.11.2021г. основной долг в сумме 52 704 706 руб. 74 коп.,   проценты в сумме 1 054 094 руб. 13 коп., всего 56 884 051 руб. 35 коп., а также 200 000 руб. – в возмещение расходов по госпошлине

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья

И.Ю. Баскакова