Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-11811/2018

09 июля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  09 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташов А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (адрес:  Россия 197758, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-77" (адрес: Россия 123022, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

 

о взыскании, 

 

при участии:

- от истца: ФИО2 (доверенность от 09.01.2018)

- от ответчика: не явился, извещен,  

 

установил:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-77" (далее – Общество) о взыскании о взыскании 282 744 руб. 23 коп. неустойки по контракту от 20.11.2015 № 0372100048815000476-0006270-02.

Общество на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель Учреждения исковые требования поддержала в полном объёме.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд установил следующее.

Между Учреждением (заказчик) и Обществом (исполнитель) заключен контракт № 0372100048815000476-0006270-02 от 20.11.2015 на выполнение работ по капительному ремонту лифта с заменой оборудования.

Цена контракта составляет 12 416 713 руб. 93 коп., в том числе НДС – 18 % 1 894 075 руб. 01 коп. (п. 4.1 контракта).

Согласно п. 3.2 контракта выполнение работ осуществляется подрядчиком с момента передачи объекта подрядчику для выполнения работ по акту приема-передачи объекта в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение № 3 к контракту), то есть в течение 4 месяцев.

По акту приема-передачи объект передан Обществу 25.11.2015. Однако работы выполнены и сданы заказчику в полном объёме 13.05.2016, что подтверждается представленными в дело доказательствами.

Поскольку работы выполнены Обществом с нарушением срока, предусмотренного контрактом, Учреждение начислило 282 744 руб. 23 коп. неустойки за 45 дней просрочки и исходя из стоимости невыполненных в срок работ  на основании п. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 (далее - Правила N 1063) (в редакции, действовавшей в спорный период).

Согласно пункту 6 Правил N 1063 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

Обоснованность начисления неустойки подтверждена материалами дела.

Вместе с тем при расчёте неустойки с учётом положений п. 6 Правил № 1063 подлежит применению ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 %, действующая на момент принятия решения.

При таких обстоятельствах размер неустойки составит 169 646 руб. 53 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 169 646 руб. 53 коп. неустойки, 5 193 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.