АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-663/2021

г. Чебоксары

09 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Передвижная механизированная колонна № 8" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 429900, 

<

...>

к бюджетному общеобразовательному учреждению Чувашской Республики "Чувашский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени Героя Советского союза ФИО1" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428031, 

<

...>

о взыскании 1 111 796 руб. 30 коп.,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 11.01.2021 (сроком до 31.12.2021), 

установил:

акционерное общество "Передвижная механизированная колонна № 8" обратилось в арбитражный суд с иском к бюджетному общеобразовательному учреждению Чувашской Республики "Чувашский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени Героя Советского союза А.В. Кочетова" о взыскании 1111796 руб. 30 коп., в том числе 1042806 руб. 97 коп. долга, 68990 руб. 30 коп. пени за период с 24.10.2019 по 01.02.2021 и далее по день фактической оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по строительству "Республиканская кадетская школа в г. Чебоксары Чувашской Республики (II этап строительства)" согласно государственному контракту от 22.07.2019 №3212903817019000010.

Представитель истца в заседании суда исковые требования поддержала.

Ответчик не явился. В отзыве от 26.03.2021 указал, что заказчик произвел оплату выполненных истцом работ на общую сумму 18868902 руб. 60 коп. Оплата по акту о приемке выполненных работ №12 от 23.09.2019 на сумму 1042806 руб. на данный момент ответчиком не осуществлена. В соответствии с актом сверки взаимных расчетов на 18.03.2021 имеется задолженность ответчика перед истцом в размере 1042806 руб. 

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

22.07.2019 бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики "Чувашский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени Героя Советского союза ФИО1" (заказчик) и  акционерное общество "Передвижная механизированная колонна № 8" (подрядчик) заключили государственный контракт №3212903817019000010, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства по строительству «Республиканская кадетская школа в г. Чебоксары Чувашской Республики (II этап строительства)», согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему контракту), Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к настоящему контракту) и Сводном сметном расчете (Приложение №3 к настоящему контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Объем и содержание работ определены проектной документацией и контрактом. Срок начала работ, срок окончания работ (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ и иных предусмотренных контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее - График выполнения работ) (Приложение №2 к контракту) (пункты 1.3, 2.1, 2.2 контракта).

Цена настоящего контракта составляет 19911708  руб. 60 коп. (пункт 3.1).

Согласно пункту 3.6 контракта заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ формы №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3, на основании счёта-фактуры (счёта) представленного Подрядчиком, за вычетом пеней, штрафов. Авансирование не предусмотрено.

Объект признается построенным со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта сторонами и при наличии заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (пункт 6.14 контракта).

Как следует из материалов дела, по государственному контракту от 22.07.2019 №3212903817019000010 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 №№1-5 от 12.08.2019, №№6-11 от 20.09.2019, №12 от 23.09.2019 на общую сумму 19911708 руб. 60 коп.

23.09.2019 сторонами подписан акт приемки объекта капитального строительства (л.д. 60).

Ссылаясь на неоплату работ, выполненных согласно акту №12 от 23.09.2019 на сумму 1042806 руб., истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Факт выполнения истцом работ и их принятия без каких-либо замечаний к качеству со стороны ответчика документально подтвержден. 

В соответствии с подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 14.10.2020 и отзывом от 26.03.2021 ответчик наличие задолженности в сумме 1042806 руб. не оспаривает. 

Доказательства оплаты работ, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик суду не представил.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании долга в размере 1042806 руб. подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании 68990 руб. 30 коп. пени за период с 24.10.2019 по 01.02.2021 и далее по день фактической оплаты долга.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Пунктом 5.2 договора установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Представленный истцом расчет пеней судом проверен и признан обоснованным в заявленном размере. Ответчиком данный расчет не оспорен, контррасчет не представлен.

Установив ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ, суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в сумме 83059 руб. 50 коп. за период с 24.10.2019 по 06.04.2021 (день вынесения решения суда).

По смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства. В этой связи суд считает правомерным требование истца о взыскании с ответчика неустойки по день фактической оплаты долга. 

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении в суд, подлежат возмещению ответчиком по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики "Чувашский кадетский корпус Приволжского Федерального округа имени Героя Советского союза ФИО1" в пользу акционерного общества "Передвижная механизированная колонна № 8" 1`042`806 (Один миллион сорок две тысячи восемьсот шесть) руб. 97 коп. долга, 83`059 (Восемьдесят три тысячи пятьдесят девять) руб. 50 коп. пени за период с 24.10.2019 по 06.04.2021, 24`118 (Двадцать четыре тысячи сто восемнадцать) руб. расходов по государственной пошлине; с 07.04.2021 начисление пени производить по день фактической оплаты долга в сумме 1`042`806 (Один миллион сорок две тысячи восемьсот шесть) руб. 97 коп. исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты пеней, от неуплаченной в срок суммы.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова