АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-38959/2019

16 сентября 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2019 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.В. Комлевой, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Красная горка" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 4 453 949 руб. 07 коп.,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 01.08.2019 № 403/2019, Кузнец А., представитель по доверенности от 01.11.2018 № 493/2018,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 12.08.2019.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 4 453 949 руб. 07 коп. задолженности по оплате услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению по первому этапу в рамках типового договора  об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям от 17.09.2013 № 2362.

Истец поддерживает исковые требования в полном объеме.

Ответчик отзыв на иск не представил, устно пояснил суду, что не оспаривает наличие задолженности в заявленном истцом размере; просит отложить судебное заседания в связи с возможностью мирного урегулирования спора. 

Истец возражает против отложения судебного заседания.

Ходатайство ответчика, с учетом мнения истца, судом рассмотрено и отклонено. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения истца и ответчика, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 17.09.2013 между истцом (сетевая организация) и ООО «Новые технологии» (заявитель) заключен договор № 2362 об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям № 2362 (далее – договор от 17.09.2013 № 2362), согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя мощностью 350 кВт для электроснабжения жилого дома, принадлежащего заявителю, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. Жилой дом расположен на земельном участке по адресу: 

<

...>. Класс напряжения электрических сетей - 0,4 кВ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 и абзацем 5 пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» деятельность по технологическому присоединению является оказанием услуги.

 В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 5. договора от 17.09.2013 № 2362, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

В соответствии с п. 10 договора от 17.09.2013 № 2362 размер платы за технологическое присоединение определяется тарифом в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012г. №229-ПК и составляет 8 620 947 руб. 65 коп., в том числе НДС - 1 315 059 руб. 81 коп.

В соответствии с п. 11. договора от 17.09.2013 № 2362, внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10 процентов платы вносятся заявителем в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 процентов платы - в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы - в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учёта, акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10 процентов платы вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

10.03.2015 сторонами подписано дополнительное соглашение к договору, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 31.10.2016, срок действия технических условий - до 10.03.2017.

21.08.2015 между ООО «Новые технологии» (первоначальный заявитель) и ООО «Красная горка» (новый заявитель) заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве.

В соответствии с указанным соглашением, с 21.08.2015 первоначальный заявитель уступает, а новый заявитель принимает на себя в полном объеме права требования, принадлежащие первоначальному заявителю, также принимает на себя обязательства первоначального заявителя, в том числе обязательства по оплате сетевой организации суммы, предусмотренной п. 10 договора в размере 8 620 947 руб.  65 коп. (п. 1.4. соглашения).

19.07.2016 сторонами подписано дополнительное соглашение, согласно которому мероприятия по технологическому присоединению должны быть осуществлены сторонами в срок до 30.11.2017; технические условия действительны в срок до 30.11.2017.

28.09.2016 между ответчиком и истцом подписано дополнительное соглашение к договору, которым стороны утвердили новые технические условия - №82-46/5915-1, являющиеся неотъемлемой частью договора со сроком действия до 30.11.2017.

Также пунктом 3. указанного соглашения 2 истец и ответчик дополнили пункт 10. договора абзацами следующего содержания:

- стороны согласовали, что осуществление технологического присоединения производится поэтапно в соответствии с техническими условиями №82-46/5915-1:

- стоимость 1 (первого) этапа составляет 8 535 043, 84 руб. и включает в себя выполнение мероприятий, относящихся в соответствии с техническими условиями к объему работ со стороны Сетевой организации по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а также выполнение организационно-технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям в объеме максимальной мощности по первому этапу согласно техническим условиям №82-46/5915-1;

- стоимость 2 (второго) этапа составляет 85 903 руб. 81 коп. и включает в себя выполнение организационно-технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика к электрическим сетям в объёме максимальной мощности по второму этапу согласно техническим условиям №82-46/5915-1.

Пунктом 4. соглашения № 2 стороны изменили п. 11 договора от 17.09.2013 № 2362 и изложили его в следующей редакции:

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 8 535 043 руб. 84 коп., в т. ч. НДС - 1 301 955 руб. 84 коп. осуществляется заявителем в срок до 01.04.2017. В случае, если к моменту подписания соглашения заявителем произведена оплата, она подлежит зачислению в счет оплаты за услуги по 1 этапу;

- 85 903 руб. 81 коп., в т. ч. НДС 13 103 руб. 97 коп. - в течение 10 рабочих дней с момента подписания сетевой организацией акта о выполнении ТУ и акта оказания услуг по 2 этапу.

Заявитель обязуется при осуществлении платежей по договору от 17.09.2013 № 2362 в платежном поручении указывать в назначении платежа в счет какого этапа производится оплата.

Пунктом 5. Соглашения № 2 в договор от 17.09.2013 № 2362 включен п. 12.1 следующего содержания: стороны согласовали, что сетевая организация оформляет акт оказания услуг по каждому этапу и направляет его на подписание заявителю. Заявитель в течение 5 дней с момента получения акта подписывает и направляет его в сетевую организацию. При отсутствии подписанного заявителем акта он считается принятым.

28.09.2016 сторонами подписан акт об оказании услуг № 157657 по техприсоединению по первому этапу.

Первоначальным заявителем ООО «Новые технологии» в 2014 осуществлена оплата по договору: платежным поручением № 17 от 30.01.2014 на сумме 318 000 руб., платежным поручением № 18 от 04.02.2014 на сумму 300 000 руб., платежным поручением № 37 от 18.02.2014 на сумму 244 094 руб. 77 коп.

Новым заявителем ООО «Красная горка» произведены оплаты в 2017: платежным поручением № 15 от 18.05.2017 на сумму 70 000 руб., платежным поручением № 17 от 05.06.2017 на сумму 50 000 руб.

В 2018 произведены оплаты ООО «Красная горка» платежными поручениями № 13 от 21.03.2018  на сумму 100 000 руб.00 коп., № 9 от 15.03.2018 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 17 от 04.04.2018 на сумму 499 000 руб. 00 коп., № 23 от 04.05.2018 на сумму 300 000 руб. 00 коп., № 39 от 07.06.2018 на сумму 300 000 руб.00 коп., № 44 от 18.07.2018 на сумму 300 000 руб.00 коп., № 47 от 10.08.2018 на сумму 300 000 руб. 00 коп., № 49 от 10.09.2018 на сумму 300 000 руб. 00 коп., № 53 от 05.10.2018 на сумму 300 000 руб. 00 коп., № 55 от 06.11.2018 на сумму 300 000 руб.00 коп., № 58 от 26.12.2018 на сумму 300 000 руб. 00 коп.

Таким образом, по договору в пользу сетевой организации всего оплачено 4 081 094 руб. 77 коп., что является частичным исполнением обязательств по договору по оплате первого этапа, установленного до 01.04.2017.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 

Ответчик свои обязательства по оплате услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению по первому этапу в рамках договора от 17.09.2013 № 2362, не исполнил, доказательств оплаты задолженности в сумме 4 453 949 руб. 07 коп. суду не представил. 

Следует также отметить, что факт осуществления истцом мероприятий по техприсоединению по первому этапу и наличие задолженности в указанном размере ответчиком не оспаривается.

Таким образом, поскольку размер задолженности подтвержден материалами дела и ответчиком не оспорен (ч. 3.1 ст. 70, ч. 1 ст. 65 АПК РФ), истец правомерно в силу ст. 309, 310, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявил требование о взыскании с ответчика 4 453 949 руб. 07 коп. основного долга. 

При таких обстоятельствах, требование истца подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 45 270 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Красная горка" в пользу открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" 4 453 949 руб. 07 коп. основного долга, а также 45 270 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

Судья О.В. Комлева