﻿/

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-15330/2021

г.Нижний Новгород                                                                                   30 ноября 2021 года

Резолютивная часть объявлена                                                               23 ноября 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Куприяновой Александры Александровны (шифр 48-322),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мартыновой Ю.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску индивидуального предпринимателя Абрамян Дианы Тельмановны (ОГРНИП 317527500076250, ИНН 526098335720)

к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603) 

об обязании исполнить обязательство и о взыскании неустойки,

при участии: 

от истца: не явился, от ответчика: не явился,

установил:

индивидуальный предприниматель Абрамян Диана Тельмановна обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" об обязании ответчика исполнить обязательства, предусмотренные разделом Х технических условий №21/25-32-390 приложение к договору от 25.12.2019 №521044478, а именно: 

 

- запроектировать и построить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-100 до границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Магистральная, стр.136Е с кадастровым номером 52:26:0010026:38;

	- выполнить реконструкцию ЛЭП-610 ПС «Федяково» в части монтажа ответвительной арматуры;

	- запроектировать и построить КЛ-6кВ от ЛЭП-610 ПС «Федяково» до новой ТП-6/0,4кВ;

	- запроектировать и построить однотрансформаторную КТП-6/0,4 кВ тупикового типа с силовым трансформатором 160 кВА;

	- запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Магистральная, стр.136Е с кадастровым номером 52:26:0010026:38;

о взыскании с ответчика 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с даты вступления решения суда в законную силу и до момента фактического исполнения.  

	Заявлением от 09.11.2021 истец в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнил исковые требования и просит обязать ответчика исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 10.1-10.2 технических условий №21/25-32-390 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478, а именно:

- выполнить реконструкцию ТП-100 в части установки автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ. Тип и номинал автоматического выключателя определить проектом;

- запроектировать и построить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-100 до границ участка ИП Абрамян Д.Т. с кадастровым номером 52:26:0010026:38 (кабельная линия, в траншее, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 240 мм2, протяженностью 0,38 км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании;

взыскать с ответчика 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с даты вступления решения суда в законную силу и до момента фактического исполнения.  

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Отзывом на иск просит снизить размер неустойки до 1 000 руб. за каждый день неисполнения обязательства. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие сторон.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялись перерывы до 22.11.2021 до 15-45, до 23.11.2021 до 16-40. После перерыва судебное заседание продолжено в прежнем составе суда.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Между истцом (заявитель) и ответчиком (сетевая организация) подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных договором характеристик.

Объектом технологического присоединения является нежилое здание, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, д.Афонино, ул.Магистральная, стр.136Е с кадастровым номером 52:26:0010026:38.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 технических условий для присоединения к электрической сети №21/25-32-390 предусмотрен перечень мероприятий, подлежащих выполнению сетевой организацией, а именно: 

- выполнить реконструкцию ТП-100 в части установки автоматического выключателя в РУ-0,4кВ. Тип и номинал автоматического выключателя определить проектом;

- запроектировать и построить КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-100 до границ участка ИП Абрамян Д.Т. (кабельная линия, в траншее, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 240 мм2, протяженностью 0,38 км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании;

- выполнить реконструкцию ЛЭП-610 ПС Федяково в части монтажа ответвительной арматуры. Объем реконструкции определить проектом;

	- запроектировать и построить КЛ-6 кВ от ЛЭП-610 ПС «Федяково» до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 0,26 км:

	1) кабельная линия, в траншее, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 95 мм2, протяженностью 0,21 км.

	2) кабельная линия, методом ГНБ, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 95 мм2, протяженностью 0,05 км.

	- запроектировать и построить однотрансформаторную КТП-6/0,4 кВ тупикового типа с силовым трансформатором 160 кВА. Тип и мощность трансформатора определить проектом;

- запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ до границ участка ИП Абрамян Д.Т. (воздушная линия на железобетонных опорах с алюминиевым изолированным проводом сечением 95 мм2, протяженностью 0.04 км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании;

- мероприятия по реализации технических условий исполнить до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ИП Абрамян Д.Т.

07.09.2021 сторонами заключено дополнительное соглашение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478.

Согласно условиям дополнительного соглашения обязательство по технологическому присоединению выполняется в два этапа: по 1 этапу до 01.10.2021; по 2 этапу до 25.12.2021.

В соответствии с приложением №1 к дополнительному соглашению от 07.09.2021 №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478 пункт 10 технических условий на присоединение энергопринимающих устройств ИП Абрамян Д.Т. к электрическим сетям ПАО "Россети Центр и Приволжье" (филиал "Нижновэнерго") №21/25-32-390 изложен в следующей редакции:

Сетевая организация осуществляет, в том числе по 1 этапу:

- выполнить реконструкцию ТП-100 в части установки автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ. Тип и номинал автоматического выключателя определить проектом;

- запроектировать и построить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-100 до границ участка ИП Абрамян Д.Т. с кадастровым номером 52:26:0010026:38 (кабельная линия, в траншее, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 240 мм2, протяженностью 0,38 км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании.

В согласованный дополнительным соглашением от 07.09.2021 №1 срок ответчик свое обязательство по 1 этапу не исполнил.

Указанные фактические обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований ─ в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса РФ, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения. Такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее - Правила №861).

Согласно статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ, пункту 6 Правил №861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическому присоединению.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ, пункты 16, 17 Правил №861).

Поскольку ответчик в установленный дополнительным соглашением от 07.09.2021 №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478 срок (до 01.10.2021) свои обязательства по договору не исполнил, требование об обязании ответчика выполнить обязательства, предусмотренные пунктами 10.1-10.2 технических условий №21/25-32-390 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №52104447 подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд считает целесообразным указать в решении суда срок совершения действий – в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу. 

Одновременно истец заявил требование о взыскании 5 000 руб. неустойки за неисполнение судебного акта за каждый день просрочки, начиная с даты вступления судебного решения по настоящему делу в законную силу и до момента фактического исполнения.

Согласно статье 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7) на основании части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Как разъяснено в пункте 31 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7).

Суд, с учетом срока, предоставленного ответчику на исполнение судебного акта, учитывая ходатайство ответчика о снижении неустойки, полагает разумным установить судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с даты истечения установленного судом срока для исполнения судебного акта. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и взыскиваются в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

обязать публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603) в течении 30 дней со дня вступления решения в законную силу исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 10.1-10.2 технических условий №21/25-32-390 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478 в редакции дополнительного соглашения от 07.09.2021 №1, а именно:

- выполнить реконструкцию ТП-100 в части установки автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ. Тип и номинал автоматического выключателя определить проектом;

- запроектировать и построить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-100 до границ участка ИП Абрамян Д.Т. с кадастровым номером 52:26:0010026:38 (кабельная линия, в траншее, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 240 мм2, протяженностью 0,38 км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок в части исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 10.1-10.2 технических условий №21/25-32-390 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.12.2019 №521044478 в редакции дополнительного соглашения от 07.09.2021 №1  взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603) в пользу индивидуального предпринимателя Абрамян Дианы Тельмановны (ОГРНИП 317527500076250, ИНН 526098335720) 1 000 руб. неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства до дня фактического исполнения решения суда.

	Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603) в пользу индивидуального предпринимателя Абрамян Дианы Тельмановны (ОГРНИП 317527500076250, ИНН 526098335720) 6 000 руб. расходов по государственной пошлине. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.

Судья                                                                                                                     А.А.Куприянова