АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-15316/18

г. Уфа

24 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.09.2020

Полный текст решения изготовлен 24.09.2020

 

         Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания   секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании   по  делу по иску

         Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякский психоневрологический интернат (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к закрытому акционерному обществу "БашТеплоВент" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

- о взыскании штрафов и неустоек   

по встречному исковому заявлению

закрытого акционерного общества "БашТеплоВент" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякский психоневрологический интернат (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 848 719 руб. 84 коп.

 

         при участии в судебном заседании:

         стороны не явились, извещены в порядке ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет.

 

         Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякский психоневрологический интернат /далее - истец, ГБСУСОССЗН Буздякский ПНИ/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу "БашТеплоВент"  /далее – ответчик, ЗАО "БашТеплоВент"/ о взыскании штрафа по договору № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. в размере 183 879 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, пени в размере 226 754 руб. 24 коп. за просрочку исполнения  обязательств, об обязании:

         Подрядчика выполнить пуско-наладочные работы на установленное им оборудование, в соответствии с п. 2.4. Договора, а именно: Проведение пуско-наладочных работ по оборудованию и системам автоматизации, установленным Подрядчиком, с проверкой их действия, регулированием, выверкой и опробированием без определения характеристик и фактического режима работы вентиляторов и его  частей и сопоставления полученных результатов с каталожными, без наладки систем  вентиляции на проектные расходы воздуха и комплексного опробирования систем, без наладки систем на санитарно-гигиенические и (или) технологические  требования к воздушной среде (приведения параметров воздушной среды в помещениях в соответствие с требованиями действующих санитарных и технологических норм);

         об обязании Подрядчика представить исполнительную документацию в полном объеме и в соответствии с фактически выполненным объемом работ, а именно:

1)      Сертификаты соответствия качества на следующий примененный материал:

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.5 мм. диаметром до 200 мм;

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.5 мм. периметром до 600 мм:

-        Воздуховоды из листовой слали толщиной: 0.5 мм. периметром до 1000 мм: 

-        Воздуховоды из листовой слали толщиной: 0.7 мм. периметром 1000 мм:

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.7 мм. периметром от 1 100 до 1600 мм;

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.7 мм. периметром от 1700 до 4000 мм;

-        Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-5Ф":

-        Трубы диаметром: до 32мм:

-        Грубы диаметром: до 50 мм;

-        Грубы диаметром: до 80 мм.

2)      Сертификаты соответствия качества на следующее установленное оборудование:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2. размером 150x150 мм;

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1. размером 150x100 мм;

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм;

-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной слали марки РН. размером: 700x1000 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной слали марки РН. размером: 500x800 мм;

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PН. размером: 700x400 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН. размером: 500x300 мм:

-        Вентиля гор VR 70-40//40-4D 35895,73/1,18/5,24= 5805.36:

-        Вентилятор VR 70-40//40-6D 49848.64/1.18/5.24= 8061.94:

-        Воздухонагреватель водяной трехрядный WH 70-40, R2 13680.75/1,18/5,24=2212.56;

-        Вставка кассетная фильтрирующая DFC 70-40 1446.06/1,18/5.24=233,86; -Фильтр кассетный I КС 70-40 29S1.49/1.18/5.24 482.19;

-        Заслонка регулирующая CНR 70-40 4606.29/1.18/5.24=744.96:

-        Рекуператор канальный пластинчатый RЕС 7040 44880.83/1.18/5,24= 7258.51:

-        Шумоглушитель NK 80-50 9752.82 1.18 5.24 1577.30:

-        Заслонка регулирующая CHR 70-39 4606.29 1.18 5.24 744.96;

-        Вентилятор VR 50-30/25-4D 22032.19/1.18/5.24 =3563.23;

-        Клапан обратный 500x300 КПО Арктика 201 5.00 1.1 8/5.24 325.88;

-        Вентилятор KVR 160/1 4423.5 1.18/5,24 715.40;

-        Вентилятор KVR 100 3294,27/1.18/5,24 532.77:

-        Вентилятор осевой FE050-4E 29649,66/1,18/5,24= 4795.19;

-        Вентилятор бытовой Венте 1050.00/1.1 8 5.24 1 69.81:

-        Заслонка воздушная с ручным управлением 500x500 4771/1.18/5.24 771.60;

-        Смесительный узел SMEX 80-6.3 35400.17/1.18/5.24 5725.21: 

-        Датчик наружной температуры STN-3 990.41 1.18/5,24=160,17;

-        Датчик перепада давления 500 Ра DRD-5E с контактором 1671,02/1.18/5,24=270,25;

-        Датчик температуры волы погружной VSP-3 2037.14/1,18/5,24= 329.46:

-        Датчик температуры канальный STK-.3 2037.14/1.18/5.24 329.46;

-        Блок управления БШ CR1-W.3R3R:

-        Комплект частотного преобразователя РС-051 Р2К2(2.2 кВт.5.3 Л.380 B)№132F0022 1 1 828.57/1.1 S 5.24 1913.01:

-        Привод воздушной заслонки GDB 331.11. KF 5060.001.1 8/5.24 818.34;

-        Привод воздушной заслонки (GMA 321.1/4N 11 270.00/1.18/5.24=1822.68;

-        Термостат КР 61(0601.126466)6 м 4750.21/1.18/5.24=768,24;

-        Устройство дистанционного управления RTF-3 4276.13/1.18/5.24=691.57;

-        Блок управления СHU CR1-W3R0:

-        Комплект частотного преобразователя FC-051 РЗК0(3 кВт.7.2 A.380B)№132F0024 16433,27/1.18 5.24 2657.72:

-        Привод воздушной заслонки ОМА 321.1/4N 1 1371.964.18'5.24= = 18.39.17:

-        Термостат КР 61 (060L 126466)6 м 4750.21/1.18/5.24 768.24:

-        Защитное реле STDT 16 №38201 1 7097.15/1.18/5.24 1 147.81:

-        Регулятор скорости RTY-1.5 2213.76/1,18 5.24 358.02;

-        Регулятор скорости SRI-I)   -2.0-Г;

-        Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП. размером 600x600 мм;

-        Воздуховоды типа; ALIJDUCТ (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм:

-        Вставка гибкая FH 70-40 1 173.9] 1.18 5.24 189.85:

-        Вставка гибкая FH 50-30 995.18 1.18 5.24 160.94:

-        Вентилятор KVR 200/1 5235.89 1.18/5,24=846.79:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2. размером 500x300 мм:

-        Клипса для крепежа гофротрубы. диаметром: 16 мм:

-        Коробка ответви тельная КОР-73УЗ;

-        Щиты распределительные навесные: ЩРН-36. размер корпуса 480х.300х 125 мм:

         3)Паспорта на следующее установленное оборудование:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2. размером 150x150 мм:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм:

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой слали: прямоугольные периметром до 1000 мм;

-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм;

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РЫ. размером: 700x1000 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН. размером: 500x800 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PН. размером: 700x400 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН. размером: 500x300 мм:

-        Вентилятор VR 70-40//40-6D 49848.64/1.18/5.24= 8061.94:

-        Вставка кассетная фильтрируюшая DFC 70-40 1446.06/1,18/5.24=233,86;

-        Фильтр кассетный FRC 70-40 2981.49/1.18/5.24= 482.19;

-        Заслонка регулирующая CHR 70-40 4606.29 1.18 5.24=744.96:

-        Шумоглушитель NK 80-50 9752.82/1.18/5.24=1577.30;

-        Заслонка регулирующая CHR 70-39 4606,29/1,18/5.24=744,96;

-        Клапан обратный 500x300 К110 Арктика 2015.00 1.1 8'5.24 325.88;

-        Вентилятор осевой FE050-4E 29649.66/1.18/5.24 471)5.19:

-        Заслонка воздушная с ручным - правлением 500x500 4771 1.18 5.24 771.60; 

-        Датчик наружной температуры STN-3 990,41 1.18 5.24=160.17; 

-        Датчик перепада давления 500 Ра DRD-5B с контактором 1671.02/1.18/5.24=270.25:

-        Датчик температуры волы погружной YSP-3 2037.14 1.18'5.24=329.46;

-        Датчик температуры канальный STK-3 2037.14 1.1 8 5.24 = 329.46:

-        Блок управления БШ CR1-W.3R3R: (предоставлена только копия)

-        Комплект частотного преобразователя FC-051 Р2К2(2,2 кВт.5.3 А.380 B)№132F0022 11828.57/1.18/5.24 1913.01;

-        Привод воздушной заслонки (GDВ 331.1F/KF 5060.004.1 8/5.24 =818.34: 

-        Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4К 1 1270.00/1,18/5.24=1822.68;

-        Термостат КР 61(0601126466)6 м 4750.21/1,18/5.24 768.24:

-        Устройство дистанционного управления RTF-3 4276.13 1.18 5.24=691.57:

-        Блок управления CHU CR1-W3R0;

-        Комплект частотного преобразователя РС-051РЗК0(3 кВт.7,2 А.380В)№ 132F0024 16433.27 1.18 5.24 2657.72;

-        Привод воздушной заслонки С J МЛ 321.1 4N 1 1371.96/1,18 5.24 1839.17: 

-        Термостат КР 61(0601,126466)6 м 4750.21/1.18/5.24 768.24:

-        Защитное реле SI 1)1 16 №38201 I 7097.1 5'1.1 8 5.24  1 147.81:

-        Регулятор скорости RTY-1.5 2213.76/1,18 5.24 .358.02;

-        Регулятор скорости SRE-D   - 2.0-Т:

-        Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП. размером 600x600 мм:

-        Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм;

-        Вставка гибкая FH 70-40 1 17.3.91 1.18 5.24 189.85:

-        Вставка гибкая FH 50-30 995.18/1.18/5.24 160.94:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500x300 мм:

-        Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм;

-        Коробка ответвительная КОР-73УЗ;

-        Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480x300x125 мм:

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 ЗР 16А, (3P 20а) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 ЗР 10А. ( 3P 6А) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 IP 10А, (1P 6А ) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С;

-        Контакторы электромагнитные: переменного тока КМ221 1-00 М4; 

-        Шумоглушитель NK 50-30 5958.92/1.18/5.24=963.72:

4) Сертификаты пожарной безопасности:

-        Клапаны oгнезадерживающие с ручной регулировкой периметром до 1600 мм;

-        Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 150x150 мм:

-        Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: KПС-1 М (90) размером 300x300 мм;

-        Клапаны перекидные периметром до 1000 мм:

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм:

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм;

-        Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-5Ф";

-        Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и  газовыделением. напряжением 1.0 кВ марки: BВГнг-FRL.S5x6. 5x2.5. 5x5.5. 3x1.5 (3x0.75):

-        Коробка oтветвительная КОР-73УЗ:

-        Кабель для системы сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полип плена белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2x0.5:

-        Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающею ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16. 25. 20 мм:

-        Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт шкаф. Блок управления ACW CR1-3R1R/S1:

-        Щит распределительный навесной: ЩРН-36:

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР16А. (ЗР 20А) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР10А. характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР10А, (ЗР 6А) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 1Р10А. (IP 6А) характеристика С:

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР40А, характеристика С;

-        Контакторы электромагнитные: переменного тока КМ221 1-00М4;

-        Защитное реле STDT1 6№382011:

-        Комплект частотного о преобразователя FC-051 Р2К2 (2.2 кВт. 5.ЗА.380В) № 132 F0022;

-        Комплект частотного преобразователя FC-051P2K0 (4 кВт. 9А.380В) № 132 F0026;

-        Устройство дистанционного управления RTF-.3:

-        Блок управления ACW CR1-3R0:

-        Комплект частотного преобразователя FC-051P3K0 (3 кВт. 7.2А.380В)№ 132 F0024;

-        Защитное реле STDT 16 № 38201 1:

-        Регулятор мощности однофазный R-ET7.5KTG № 302054:

-        Регулятор скорости RTY-1.5; RTY-2.5;

-        Вентилятор VR 50-30/25-4D).

         От истца поступило  уточнение от 16.10.2019 г. (т. 4, л. д. 33-35) в части взыскания штрафа и пени, согласно которому истец просил взыскать с ответчика штраф по договору № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. в размере 167 879 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, пени в размере 179 341 руб. 89 коп. за просрочку исполнения  обязательств, штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств в размере 16 000 руб.

         Судом уточнение в этой части принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено с учетом уточненных исковых требований.

         Закрытое акционерное общество "БашТеплоВент" /далее – истец по встречному иску, ЗАО "БашТеплоВент"/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с встречным исковым заявлением к Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякский психоневрологический интернат /далее – ответчик по встречному иску, ГБСУСОССЗН Буздякский ПНИ/ о взыскании стоимости выполненных работ в размере 848 719 руб. 84 коп.

         Определением суда от 21.11.2018 г. встречное исковое заявление принято к производству совместно первоначальным иском.

От ответчика поступил отзыв, в котором общество, указало, что истец в установленный срок мотивированный отказ от принятия выполненных работ не заявил, считает, что истец действует недобросовестно, не оплачивая выполненные работы, ходатайствовал о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

От истца поступил отзыв на встречный иск и дополнения к нему, в которых учреждение указало, что мотивированный отказ был направлен ответчику, что им работы полностью выполнены не были (не передана исполнительная документация в полном объеме), работы ответчиком не сданы, истцом не приняты.

Представители сторон,  надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу,  в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте, дело рассмотрено в отсутствие сторон в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства и материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Между истцом (далее – заказчик) и ответчиком (далее – подрядчик) заключен гражданско-правовой договор № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. (т. 1, л. д. 47-54), по условиям которого  Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы вентиляции здания ГБСУСОССЗН Буздякский ПНИ, расположенного по адресу: 452719, РБ, 

<

...> горная, 12(далее - Объект), в объеме и соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Договору, с учетом положений, установленных в пунктах №1,2 Раздела №1 Технического задания документации электронного аукциона, по результатам которого заключен настоящий Договор) и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить установленную настоящим Договором цену.

В силу п. 2.1. договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. цена Договора, составляет 1 678 790 (Один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18%, что составляет - 256 086 (Двести пятьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей 61 копейка.

Согласно п. 2.5 договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г.  по предложению Заказчика объем работ, предусмотренный договором, может увеличиваться или уменьшаться не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора.

В соответствии с п. 2.6.         договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. расчет по Договору производится Заказчиком после полного выполнения работ и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3) в течение 30 дней.

Исходя из п. 3.1. договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. срок (период) выполнения работ по Договору: с момента заключении договора до 20.12.2017. Допускается досрочное выполнение работ.

На основании п. 3.2.    договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г.  датой окончания выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком актов выполненных Работ формы КС-2. КС-3 и иных документов, предъявляемых при приемке Работ Подрядчиком.

Суд считает, что в рассматриваемом случае отношения между истцом и ответчиком возникли из контракта, правовому регулированию которого посвящены нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 44-ФЗ).

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1 Федерального закона N 44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг, заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона.

Статьей 763 ГК РФ предусмотрено, что по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии со статьей 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (пункт 1). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4). В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний (пункт 5). Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт 6).

Статьей 94 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта (часть 1). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей (часть 2). 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом (часть 3). 

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек (часть 6). 

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.          В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения (часть 7).

В п. 9.1.       договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. предусмотрено, что сдача выполненных работ происходит по факту выполнения 100% объема работ и оформляется соответствующими актами приемки выполненных работ КС-2. Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работах КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат КС-3 с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта КС-2. справки КС-3 подписывает их либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

В подтверждения выполнения работ представил односторонне подписанные документы на сумму 848 719 руб. 84 коп.: справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 09.02.2017 г., акт о приемки выполненных работ № 1от 10.01.2018 г., № 2 от 09.02.2018 г.(т. 2, л. д. 18-26).

Указанные документы были направлены истцу письмом № 41 от 09.02.2018 г. (л. д. 46).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" статья 753 ГК РФ, предусматривающая возможность составления одностороннего акта, защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

При наличии сведений о предъявлении истцом работ к приемке ответчиком, доказыванию подлежит наличие или отсутствие у заказчика оснований для подписания актов.

Истом был составлен отказ в приеме работ № 300 от 25.12.2017 г. (т. 1, л. д. 73-74), однако, надлежащих доказательств направления его ответчику представлено не было.

Истец направил в адрес ответчика отказ в принятии работ от 09.02.2018 г. № 26 (т. 1, л. д. 9-10), получен ответчиком 09.02.2018 г., в котором указал, что ответчиком не была передана исполнительная документация, выявлены несоответствия в указанных в документациях работах и фактически выполненных, что направленный ответчиком представитель не смог осуществить замер объемов выполненных работ. 

Истцом также был составлен повторный отказ в принятии работ от 27.03.2018 г. № 50, получен ответчиком 06.04.2018 г. (т. 1, л. д. 102-103), в котором указано, что ответчиком были выполнены несогласованные с ответчиком и не предусмотренные проектной документацией, указаны недостатки выполненных работ.

По утверждению истца, ЗАО "БашТеплоВент" выполнены работы не в полном объеме, предоставлен неполный пакет исполнительной документации, представленные сертификаты не соответствуют установленному оборудованию и примененным материалами, нет актов на скрытые работы.

По утверждению ответчика работы, предусмотренные договором, выполнены им в полном объеме.

Истцом было заявлено ходатайство о назначении по делу строительно-технической экспертизы.

В связи с этим определением суда от 29 ноября 2018 года назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено эксперту Группа компаний "Специалист" ФИО2.

2. На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1) Соответствуют ли виды и объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 09.02.2017 объему и    видам    фактически выполненных закрытым акционерным обществом "БашТеплоВент"  работ по договору №0101200009517002902_71310 на капитальный ремонт системы вентиляции здания ГБУСУСОССЗН Буздякский ПНИ, расположенного по адресу:452719, 

<

...>?

 2)Какова стоимость фактически  выполненных работ по договору №0101200009517002902_71310 на капитальный ремонт системы вентиляции здания ГБУСУСОССЗН Буздякский ПНИ, расположенного по адресу:452719, 

<

...>?

3) Соответствует ли качество фактически выполненных работ    договору   №0101200009517002902_71310 на капитальный ремонт системы вентиляции здания ГБУСУСОССЗН Буздякский ПНИ, расположенного по адресу:452719, 

<

...> №0101200009517002902_71310 от 24.10.2017г., проектно-сметной документации,  СНИПам,  ГОСТам и иным обычно предъявленным требованиям к такого рода работам? 

Если нет, то установить недостатки выполненных  работ, а также их характер (устранимые, неустранимые) и стоимость их устранения.  

4) Соответствует ли состав и содержание исполнительной документации в том числе предоставленные подрядчиком документы и сертификаты на использованные материалы и оборудование  требованиям, установленным  договором  №0101200009517002902_71310 и иным нормативно установленным требованиям? В чем выражены установленные несоответствия?

В Арбитражный суд Республики Башкортостан 25.12.2018 поступило заявление ООО «Специалист» о невозможности проведения экспертизы в связи с уходом эксперта ФИО2 в административный отпуск на неопределенный срок.

Определением суда от 04 февраля 2019 года произведена замена экспертной организации ООО "СПЕЦИАЛИСТ" на ООО "РегионЭксперт", поручено проведение экспертизы эксперту ФИО3.

20.06.2019 г. поступило заключение от экспертной организации ООО "РегионЭксперт" № 003/2019-16.4-16.5 от 29.03.2019 г. (т. 3, л. д. 118-191).

Экспертиза проведена во исполнение определения суда, эксперт до начала производства исследований предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ.

Заключение эксперта по настоящему делу получено судом в соответствии с законом, на основании определения о назначении судебной экспертизы по делу, при этом правовой статус заключений судебной экспертизы определен законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и, в силу статьи 71, 64, 86 Арбитражного процессуального кодекса РФ, подлежит оценке судом, наравне с другими представленными доказательствами.

На судебном заседании 09.12.2019 г. представитель экспертной организации ООО "РегионЭксперт" ФИО4 пояснил суду, что экспертизу проводил эксперт ФИО3 совместно со своим помощником  ФИО5, расчеты по экспертизе поводились самим ФИО3, что подтверждается протоколом и аудиопротоколом от 09.12.2019 г. (т. 4, л. д. 64-65).

Суд определил, что  заключение № 003/2019-16.4-16.5 от 29.03.2019 г. не может быть принято судом, так как экспертиза была проведена не установленным и не уполномоченным лицом, наряду с назначенным экспертом, следовательно, не соответствует требованиям ст. 82,83,86  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, выводы, сделанные в экспертном заключении № 003/2019-16.4-16.5 от 29.03.2019 г. не могут быть положены в основу решения по настоящему делу, а заключение рассматриваться в качестве надлежащего доказательства по делу.

 Определением суда от 08.07.2020 г. и от 17.08.2020 г. сторонам предложено рассмотреть вопрос о назначении повторной судебной экспертизы.

Сторонами соответствующее ходатайство заявлено не было.

Суд критически относится к отказам в принятии работ истца от 09.02.2018 г. № 26, от 27.03.2018 г. № 50 и № 300 от 25.12.2017 г., считает их необоснованными, ввиду следующего.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт приемки работ может быть признан судом недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В п. 9.1.     договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. предусмотрено, что сдача выполненных работ происходит по факту выполнения 100% объема работ и оформляется соответствующими актами приемки выполненных работ КС-2. Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работах КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат КС-3 с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта КС-2. справки КС-3 подписывает их либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

Сторонами совместный акт осмотра объекта с указанием фактически выполненных работ, недостатков выполненных работ составлен не был.

Указание в отказе от 09.02.2018 г. № 26 на то обстоятельство, что представитель ответчика не смог произвести замеры несостоятельно, так как замеры мог провести истец самостоятельно при участии представителя ответчика. 

П. 9.6 договора  № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. предусмотрено проведение экспертизы заказчиком выполненных подрядчиком работ.

Акт результатов экспертизы № 2(т. 1, л. д. 71-72), № 3 (т. 1, л. д. 81-82), № 4 (т. 1, л. д. 88-89), представленный истцом, составлен без участия привлеченных независимых экспертов, директором и сотрудниками истца, представитель ответчика при составлении данных актов участия не принимал.

В связи с чем, указанные акты судом, в качестве надлежащего доказательства, не могут быть приняты.

  Таким образом, суд считает, что  отказ истца от приятия работ документально не мотивирован, надлежащих доказательств невыполнения ответчиком работ представлено не было, следовательно, в качестве надлежащего отказа от принятия работ не может быть принят.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" статья 753 ГК РФ, предусматривающая возможность составления одностороннего акта, защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

При наличии сведений о предъявлении истцом работ к приемке ответчиком, доказыванию подлежит наличие или отсутствие у заказчика оснований для подписания актов.

На основании вышеизложенного, суд считает, что выполненные ответчиком работы подлежат оплате истцом, встречные исковые требования  ЗАО «БашТеплоВент»   о взыскании стоимости выполненных работ по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 09.02.2017 г., актам о приемки выполненных работ № 1от 10.01.2018 г., № 2 от 09.02.2018 г. в размере  848 719 руб. 84 коп. подлежат удовлетворению.

Истцом было заявлено требование об обязании Подрядчика выполнить пуско-наладочные работы на установленное им оборудование, в соответствии с п. 2.4. Договора, а именно: Проведение пуско-наладочных работ по оборудованию и системам автоматизации, установленным Подрядчиком, с проверкой их действия, регулированием, выверкой и опробированием без определения характеристик и фактического режима работы вентиляторов и его  частей и сопоставления полученных результатов с каталожными, без наладки систем  вентиляции на проектные расходы воздуха и комплексного опробирования систем, без наладки систем на санитарно-гигиенические и (или) технологические  требования к воздушной среде (приведения параметров воздушной среды в помещениях в соответствие с требованиями действующих санитарных и технологических норм).

Из представленных в материалы дела документов, невозможно сделать вывод о том, что пуско-наладочные работы не проводились и были ли они предусмотрены локально-сметным расчетом.

Сторонами во исполнение определений суда от 08.07.2020 г. и от 17.08.2020 г. ходатайство о проведении повторной экспертизы заявлено не было, таким образом, без применения специальных познаний (проведения экспертизы по делу), суд не может сделать вывод о том: были проведены лм проведены пуско-наладочные работы и были ли они предусмотрены локально-сметным расчетом.

Истцом заявлены требования о взыскании  пени в размере 179 341 руб. 89 коп. за просрочку исполнения  обязательств.

Судом установлено, что работы были выполнены ответчиком и сданы, 11.12.2017 г. по первоначально оформленным актам о приемке выполненных работ от 11.12.2017 г. (т. 2, л. д. 47-52), в соответствии со сроком указанным в договоре № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г.

Таким образом, ответчиком  работы были выполнены в срок, требования истца о взыскании пени за просрочку исполнения  обязательств признаны судом необоснованными.

Истцом также заявлены требования о взыскании штрафа по договору № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. в размере 167 879 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по п. 10.3.2 договора, штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по 10.4 договора в размере 16 000 руб.: а именно:

 1.     непредставление исполнительной документации; журнала выполненных работ;

2.      не извещение Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ;

3.      не уведомление о завершении работ и необходимости их принятия.

4.      подрядчиком были осуществлены несогласованные с Заказчиком отхождения от сметной документации при прокладке воздуховодов и установке противопожарных клапанов в комнатах 22 и 23;

5.      не выполнены пуско-наладочные работы на оборудование, установленное Подрядчиком согласно п. 2.4. Договора.

6.      в венткамере над кухней кронштейны воздуховодов вентустановок В2, ВЗ и ПВ1 не отрегулированы. Также необходимо установить дополнительные кронштейны для погашения вибрации, которая может привести к разрыву гибких вставок.

7.      повсеместно кабельная разводка электропитания оборудования, в том числе противопожарных клапанов, выполнена с нарушениями правил ПУЭ издания 7, СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 50571.15-97. Необходимо закрепить кабельную разводку по стенам, потолку, в кабель каналах, стянуть хомутами, гофру довести до устройств, распределительные коробки закрепить.

8.      силовые шкафы ПВ1и П2 в обоих венткамерах собраны неверно: автоматические выключатели потребителей подключаются после контактора, а контактор после вводного автомата. Контактор управляется сигналом от охранно-пожарной сигнализации (ОПС) при помощи промежуточного реле УК-ВК. Следовательно, не запитаны блоки (шкафы) управления приточными установками.

9.      противопожарные клапаны подключены проводом КСПВ2х0,5, что недопустимо. Электропитание клапана - 220V. Должно подключаться кабелем BBrHr-FRLS3 (0,75). Электропитание на клапаны подает пускатель, который управляется тем же сигналом от ОПС от того же промежуточного реле УК-ВК.

10.    отсутствуют регуляторы R-ET 7.5 в количестве 2 шт.

11.    в венткамере над лестничной площадкой не смонтирован по месту датчик температуры воздуха STN-3.

12.    не установлены устройства дистанционного управления RTF-3 установок ПВ1 и П2.

13.    не подведен сигнальный провод от ОПС до силовых шкафов в венткамерах.

14.    отсутствует выключатель вентилятора Венте 125М.

15.    установлены блоки управления отличающиеся от предусмотренных в проекте: БШС R1-W-3R3R-1; СНИ CR1-W3RO.

16.    не представлены разрешительные документы на установку противопожарного оборудования, а именно противопожарных клапанов (п. 5.2.2.1. договора) и сертификаты на соответствие противопожарным требованиям этого оборудования.

Однако, п.  10.4 договора № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. не конкретизировано, за какие нарушение возможно взыскания штрафа в размере 1000 руб. за каждый  факт нарушения или неисполнения обязательств по договору.

Кроме того, истцом заявлено дважды требование о взыскании  штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по договору.

Истцом факт выполнения работ ответчиком с недостатками, надлежащим образом не доказан. 

Истец просил обязать передать ответчика исполнительную документацию, а именно:

1)      Сертификаты соответствия качества на следующий примененный материал:

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.5 мм. диаметром до 200 мм;

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.5 мм. периметром до 600 мм:

-        Воздуховоды из листовой слали толщиной: 0.5 мм. периметром до 1000 мм: 

-        Воздуховоды из листовой слали толщиной: 0.7 мм. периметром 1000 мм:

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.7 мм. периметром от 1 100 до 1600 мм;

-        Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0.7 мм. периметром от 1700 до 4000 мм;

-        Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-5Ф":

-        Трубы диаметром: до 32мм:

-        Грубы диаметром: до 50 мм;

-        Грубы диаметром: до 80 мм.

2)      Сертификаты соответствия качества на следующее установленное оборудование:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2. размером 150x150 мм;

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1. размером 150x100 мм;

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм;

-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной слали марки РН. размером: 700x1000 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной слали марки РН. размером: 500x800 мм;

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PН. размером: 700x400 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН. размером: 500x300 мм:

-        Вентиля гор VR 70-40//40-4D 35895,73/1,18/5,24= 5805.36:

-        Вентилятор VR 70-40//40-6D 49848.64/1.18/5.24= 8061.94:

-        Воздухонагреватель водяной трехрядный WH 70-40, R2 13680.75/1,18/5,24=2212.56;

-        Вставка кассетная фильтрирующая DFC 70-40 1446.06/1,18/5.24=233,86; -Фильтр кассетный I КС 70-40 29S1.49/1.18/5.24 482.19;

-        Заслонка регулирующая CНR 70-40 4606.29/1.18/5.24=744.96:

-        Рекуператор канальный пластинчатый RЕС 7040 44880.83/1.18/5,24= 7258.51:

-        Шумоглушитель NK 80-50 9752.82 1.18 5.24 1577.30:

-        Заслонка регулирующая CHR 70-39 4606.29 1.18 5.24 744.96;

-        Вентилятор VR 50-30/25-4D 22032.19/1.18/5.24 =3563.23;

-        Клапан обратный 500x300 КПО Арктика 201 5.00 1.1 8/5.24 325.88;

-        Вентилятор KVR 160/1 4423.5 1.18/5,24 715.40;

-        Вентилятор KVR 100 3294,27/1.18/5,24 532.77:

-        Вентилятор осевой FE050-4E 29649,66/1,18/5,24= 4795.19;

-        Вентилятор бытовой Венте 1050.00/1.1 8 5.24 1 69.81:

-        Заслонка воздушная с ручным управлением 500x500 4771/1.18/5.24 771.60;

-        Смесительный узел SMEX 80-6.3 35400.17/1.18/5.24 5725.21: 

-        Датчик наружной температуры STN-3 990.41 1.18/5,24=160,17;

-        Датчик перепада давления 500 Ра DRD-5E с контактором 1671,02/1.18/5,24=270,25;

-        Датчик температуры волы погружной VSP-3 2037.14/1,18/5,24= 329.46:

-        Датчик температуры канальный STK-.3 2037.14/1.18/5.24 329.46;

-        Блок управления БШ CR1-W.3R3R:

-        Комплект частотного преобразователя РС-051 Р2К2(2.2 кВт.5.3 Л.380 B)№132F0022 1 1 828.57/1.1 S 5.24 1913.01:

-        Привод воздушной заслонки GDB 331.11. KF 5060.001.1 8/5.24 818.34;

-        Привод воздушной заслонки (GMA 321.1/4N 11 270.00/1.18/5.24=1822.68;

-        Термостат КР 61(0601.126466)6 м 4750.21/1.18/5.24=768,24;

-        Устройство дистанционного управления RTF-3 4276.13/1.18/5.24=691.57;

-        Блок управления СHU CR1-W3R0:

-        Комплект частотного преобразователя FC-051 РЗК0(3 кВт.7.2 A.380B)№132F0024 16433,27/1.18 5.24 2657.72:

-        Привод воздушной заслонки ОМА 321.1/4N 1 1371.964.18'5.24= = 18.39.17:

-        Термостат КР 61 (060L 126466)6 м 4750.21/1.18/5.24 768.24:

-        Защитное реле STDT 16 №38201 1 7097.15/1.18/5.24 1 147.81:

-        Регулятор скорости RTY-1.5 2213.76/1,18 5.24 358.02;

-        Регулятор скорости SRI-I)   -2.0-Г;

-        Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП. размером 600x600 мм;

-        Воздуховоды типа; ALIJDUCТ (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм:

-        Вставка гибкая FH 70-40 1 173.9] 1.18 5.24 189.85:

-        Вставка гибкая FH 50-30 995.18 1.18 5.24 160.94:

-        Вентилятор KVR 200/1 5235.89 1.18/5,24=846.79:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2. размером 500x300 мм:

-        Клипса для крепежа гофротрубы. диаметром: 16 мм:

-        Коробка ответви тельная КОР-73УЗ;

-        Щиты распределительные навесные: ЩРН-36. размер корпуса 480х.300х 125 мм:

         3)Паспорта на следующее установленное оборудование:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2. размером 150x150 мм:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм:

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой слали: прямоугольные периметром до 1000 мм;

-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм;

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РЫ. размером: 700x1000 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН. размером: 500x800 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PН. размером: 700x400 мм:

-        Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН. размером: 500x300 мм:

-        Вентилятор VR 70-40//40-6D 49848.64/1.18/5.24= 8061.94:

-        Вставка кассетная фильтрируюшая DFC 70-40 1446.06/1,18/5.24=233,86;

-        Фильтр кассетный FRC 70-40 2981.49/1.18/5.24= 482.19;

-        Заслонка регулирующая CHR 70-40 4606.29 1.18 5.24=744.96:

-        Шумоглушитель NK 80-50 9752.82/1.18/5.24=1577.30;

-        Заслонка регулирующая CHR 70-39 4606,29/1,18/5.24=744,96;

-        Клапан обратный 500x300 К110 Арктика 2015.00 1.1 8'5.24 325.88;

-        Вентилятор осевой FE050-4E 29649.66/1.18/5.24 471)5.19:

-        Заслонка воздушная с ручным - правлением 500x500 4771 1.18 5.24 771.60; 

-        Датчик наружной температуры STN-3 990,41 1.18 5.24=160.17; 

-        Датчик перепада давления 500 Ра DRD-5B с контактором 1671.02/1.18/5.24=270.25:

-        Датчик температуры волы погружной YSP-3 2037.14 1.18'5.24=329.46;

-        Датчик температуры канальный STK-3 2037.14 1.1 8 5.24 = 329.46:

-        Блок управления БШ CR1-W.3R3R: (предоставлена только копия)

-        Комплект частотного преобразователя FC-051 Р2К2(2,2 кВт.5.3 А.380 B)№132F0022 11828.57/1.18/5.24 1913.01;

-        Привод воздушной заслонки (GDВ 331.1F/KF 5060.004.1 8/5.24 =818.34: 

-        Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4К 1 1270.00/1,18/5.24=1822.68;

-        Термостат КР 61(0601126466)6 м 4750.21/1,18/5.24 768.24:

-        Устройство дистанционного управления RTF-3 4276.13 1.18 5.24=691.57:

-        Блок управления CHU CR1-W3R0;

-        Комплект частотного преобразователя РС-051РЗК0(3 кВт.7,2 А.380В)№ 132F0024 16433.27 1.18 5.24 2657.72;

-        Привод воздушной заслонки С J МЛ 321.1 4N 1 1371.96/1,18 5.24 1839.17: 

-        Термостат КР 61(0601,126466)6 м 4750.21/1.18/5.24 768.24:

-        Защитное реле SI 1)1 16 №38201 I 7097.1 5'1.1 8 5.24  1 147.81:

-        Регулятор скорости RTY-1.5 2213.76/1,18 5.24 .358.02;

-        Регулятор скорости SRE-D   - 2.0-Т:

-        Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП. размером 600x600 мм:

-        Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм;

-        Вставка гибкая FH 70-40 1 17.3.91 1.18 5.24 189.85:

-        Вставка гибкая FH 50-30 995.18/1.18/5.24 160.94:

-        Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500x300 мм:

-        Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм;

-        Коробка ответвительная КОР-73УЗ;

-        Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480x300x125 мм:

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 ЗР 16А, (3P 20а) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 ЗР 10А. ( 3P 6А) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 IP 10А, (1P 6А ) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С;

-        Контакторы электромагнитные: переменного тока КМ221 1-00 М4; 

-        Шумоглушитель NK 50-30 5958.92/1.18/5.24=963.72:

4) Сертификаты пожарной безопасности:

-        Клапаны oгнезадерживающие с ручной регулировкой периметром до 1600 мм;

-        Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 150x150 мм:

-        Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: KПС-1 М (90) размером 300x300 мм;

-        Клапаны перекидные периметром до 1000 мм:

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм:

-        Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм;

-        Материал базальтовый огнезащитный рулонный, марка: "МБОР-5Ф";

-        Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и  газовыделением. напряжением 1.0 кВ марки: BВГнг-FRL.S5x6. 5x2.5. 5x5.5. 3x1.5 (3x0.75):

-        Коробка oтветвительная КОР-73УЗ:

-        Кабель для системы сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полип плена белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2x0.5:

-        Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающею ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16. 25. 20 мм:

-        Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт шкаф. Блок управления ACW CR1-3R1R/S1:

-        Щит распределительный навесной: ЩРН-36:

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР16А. (ЗР 20А) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР10А. характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР10А, (ЗР 6А) характеристика С;

-        Выключатели автоматические: «IЕК» ВА47-29 1Р10А. (IP 6А) характеристика С:

-        Выключатели автоматические: «IEК» ВА47-29 ЗР40А, характеристика С;

-        Контакторы электромагнитные: переменного тока КМ221 1-00М4;

-        Защитное реле STDT1 6№382011:

-        Комплект частотного о преобразователя FC-051 Р2К2 (2.2 кВт. 5.ЗА.380В) № 132 F0022;

-        Комплект частотного преобразователя FC-051P2K0 (4 кВт. 9А.380В) № 132 F0026;

-        Устройство дистанционного управления RTF-.3:

-        Блок управления ACW CR1-3R0:

-        Комплект частотного преобразователя FC-051P3K0 (3 кВт. 7.2А.380В)№ 132 F0024;

-        Защитное реле STDT 16 № 38201 1:

-        Регулятор мощности однофазный R-ET7.5KTG № 302054:

-        Регулятор скорости RTY-1.5; RTY-2.5;

-        Вентилятор VR 50-30/25-4D).

В соответствии с п. 9.1 договора № 0101200009517002902_71310 от 24.10.2017 г. Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работах КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат КС-3 с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах, однако, состав исполнительной  документации и сроки передачи договором не конкретизированы.

Ответчиком были переданы истцу журналы производства работ и  другая исполнительная документация, а также паспорта совместно с актами выполненных работ, следовательно, ответчиком требование о передаче исполнительной документации было исполнено.

Кроме того, в отзыве ответчик указал, что им после завершения монтажных работ, была произведена проверка работоспособности оборудования.

Истцом, факт того, что оборудование работоспособно не опровергнут, доказательств того, что оборудованием им фактически с 2018 г. не используется, представлено не было.

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании штрафов, пени, об  обязании выполнить пуско-наладочные работы, передать исполнительную документацию не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякский психоневрологический интернат (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) отказать. 

Встречные исковые требования Закрытого акционерного общества "БашТеплоВент" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить.

Взыскать с Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Буздякский психоневрологический интернат в пользу  Закрытого акционерного общества «БашТеплоВент»  стоимость выполненных работ в размере  848 719 руб. 84 коп., судебные расходы по государственной пошлине 19 974 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Исполнительный лист будет выдан после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                 И.Р. Юсеева