АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-2525/2016

г. Магадан

28 мая 2018 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи А.М. Марчевской, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  685000, 

<

...> Магаданки, д. 15)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Мостостроительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 129110, 

<

...>, этаж 1, пом. 1А, офис 2)  

об обязании устранить строительный брак 

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора, Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>), областного государственного казенного учреждения  здравоохранения «Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>), Магаданского областного государственного автономного  профессионального образовательного учреждения «Магаданский промышленный  техникум» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>), ФИО2, ФИО3  

при участии в заседании: 

от истца - Е.С. Данько, главный специалист по правовой работе отдела, доверенность от  09 января 2018 г. без номера;  

от ответчика (ООО «Мостостроительная компания») - О.А. Созкесен, представитель,  доверенность от 26 апреля 2018 г. № 11;  

от третьих лиц: 

ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы – ФИО5,  представитель, доверенность от 19 января 2018 г. без номера;  

от Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области – ФИО6, представитель, доверенность от 10 января 2018 г. № 2/123-4;  

ФИО3, паспорт; от остальных третьих лиц – не явились; 

Руководствуясь статьями 41, 49, 110, 159, 167-170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить ходатайство истца, Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области об уточнении исковых  требований в части увеличения срока устранения ответчиком строительных недостатков  до двух месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.  

2. Обязать ответчика, общество с ограниченной ответственностью  «Мостостроительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в срок, не  превышающий двух месяцев со дня, следующего за днём вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу осуществить комплекс мероприятий для  восстановления температурного режима в квартирах № 20 и № 24 дома № 19 по ул.  Гагарина в г. Магадане, а именно:  

- осуществить демонтаж оконных блоков с заменой стеклопакетов на  соответствующие СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, Актуализированная  редакция СНиП 23-02-2003 и Техническим требованиям к государственному контракту №  12-3-2012, строка 8 Окна, а именно на стеклопакеты Двухкамерные расширенные 44 мм с i  – стеклом посередине;  

- установить в сан. узлах и ванных комнатах указанных квартир на стенах,  прилегающих к улице, электрических либо от горячей воды (по выбору собственников  квартир и проживающих в них лиц) полотенцесушителей;  

- в квартире № 20 нарастить под окнами приборы отопления до 12 секций и  поставить на кухне и в комнате у торцевых стен дополнительные приборы отопления по  10 секций;  

- в квартире № 24 поставить на кухне и в комнате у торцевых стен дополнительные  приборы отопления по 10 секций;  

- утеплить минерал ватными плитами ЛАЙТ БАТТС ROCKWOOL или эквивалент  плотностью не менее 100 кг/м3 толщиной 100 мм стену кухни, примыкающую к улице  (кв. № 24), стены, примыкающие к улице в сан.узлах и в ванных комнатах (кв. № 20 и №  24), колонны по торцевым стенам (кв. № 20 и № 24);  

- утеплить торцевую стену напротив квартир № 20 и № 24 дома № 19 по ул.  Гагарина в г. Магадане.  

Выдать исполнительный лист истцу после вступления решения в законную силу. 

3. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью  «Мостостроительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход  федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 6000 рублей 00  копеек, о чём выдать исполнительный лист налоговому органу после вступления решения  в законную силу.  

4. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью  «Мостостроительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу  истца, Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), сумму судебных  издержек (расходы на проведение судебной строительно-технической экспертизы) в  размере 39 180 рублей 00 копеек, о чём выдать исполнительный лист истцу после  вступления решения в законную силу.  

5. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

6. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного  округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было  предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.М. Марчевская