﻿АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА  

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075 http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  № Ф09-6698/21 

Екатеринбург 

28 сентября 2021 г. Дело № А47-4352/2020  

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2021 г.  Постановление изготовлено в полном объеме 28 сентября 2021 г.  

Арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Столярова А. А., судей Полуяктова А. С., Суспициной Л. А. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Еврострой» на решение Арбитражного суда  Оренбургской области от 05.03.2021 по делу № А47-4352/2020 и постановление  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2021 по тому же  делу.  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения  кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично,  путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на  сайте Арбитражного суда Уральского округа.  

До начала судебного заседания суда кассационной инстанции 

от Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Сорочинского городского округа Оренбургской области в электронном виде  поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.  Ходатайство судом кассационной инстанции рассмотрено и удовлетворено на  основании статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

В судебном заседании посредством онлайн-заседания принял участие  представитель общества «Еврострой» – Кочеткова А.А. (доверенность от  01.04.2021).  

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Сорочинского городского округа Оренбургской области обратилось в  Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью «Еврострой» об обязании исполнить  гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 20.07.2018  

 № Ф.2018.347486, а именно: устранить дефекты асфальтобетонного покрытия  на общей площади 305,96 кв. м в «Парке имени 70 лет Великой Победы»,  

расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул.  Ворошилова, 15 «П», а именно:  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров в  спортивной зоне (ориентир - футбольное поле и площадка для волейбола):  трещины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и  тротуара проходящего вокруг футбольного поля; трещины, выкрашивание,  просадки по краям (на примыкании с бордюрным камням) асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки проходящей мимо площадки для волейбола, на  общей площади 130,34 кв. м на участках NN 1, 2, 3, 4, 5 (согласно номеров,  указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 1 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 3,8мx0,3м, площадью 1,14 кв. м;  

- на участке № 2 устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия  тротуара на участке размером 8мx1,5м, площадью 12 кв. м;  

- на участке № 3 устранить трещины, выкрашивание, выщербление  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером 5мx3м, площадью  15 кв. м;  

- на участке № 3 устранить разрушение асфальтобетонного покрытия  тротуара (трещины, выкрашивание) на участке размером 19мx0,2м, площадью  3,8 кв. м;  

- на участке № 5 устранить трещины, просадки, неровности,  выкрашивание асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  32,8мx3м, площадью 98,4 кв. м. - устранить дефекты асфальтобетонного  покрытия дорожек и тротуаров в зоне активного отдыха (ориентир -  конструкция «Мяч» и спортивная площадка): выкрашивание  асфальтобетонного покрытия дорожки, проходящей мимо конструкции «Мяч»;  трещины, выкрашивание, просадки по краям (на примыкании с бордюрным  камнем) асфальтобетонного покрытия дорожки разделяющей спортивную зону  и зону активного отдыха; трещины, выкрашивание, просадки по краям  асфальтобетонного покрытия тротуаров, соединяющих спортивную площадку с  пешеходными дорожками, на общей площади 134,29 кв. м на участках № 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13 (согласно номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 6 устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия  посередине пешеходной дорожки на участке размером 24 мx3,7 м, площадью  88,8 кв. м;  

- на участке № 7 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки с правой стороны на участке размером  38мx0,4м, площадью 15,2 кв. м;  

- на участке № 8 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки с левой стороны на участке размером 14мx0,4м,  площадью 5,6 кв. м;  

- на участке № 9 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx1,5м, площадью 10,05 кв. м;  

- на участке № 10 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 5,6мx1,5м, площадью 8,4 кв. м;  

- на участке № 11 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx0,3м, площадью 2,01 кв. м;  

- на участке № 12 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,6мx0,3м, площадью 1,98 кв. м;  

- на участке № 13 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара под скамейкой на участке размером 7,5мx0,3м, площадью  2,25 кв. м;  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия тротуаров в  прогулочной зоне (ориентир - конструкция «Звезда»): трещины, просадка по  краям (на примыкании с бордюрным камнем), выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара, проходящего мимо конструкции  «Звезда», на общей площади 41,33 кв. м на участках № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21 (согласно номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 14 устранить провал (проседание асфальтобетонного  покрытия) тротуара на участке размером 1мx2м, площадью 2 кв. м;  

- на участке № 15 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия по правому краю тротуара на участке размером 9,2мx0,25 м,  площадью 2,3 кв. м;  

- на участке № 16 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 3,7мx2м, площадью 7,4 кв. м;  

- на участке № 17 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 26мx0,3м, площадью 7,8 кв. м;  

- на участке № 18 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx2м, площадью 13,4 кв. м;  

- на участке № 19 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 2,7мx0,3м, площадью 0,81 кв. м;  

- на участке № 20 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 9,6мx0,3м, площадью 2,88 кв. м;  

- на участке № 21 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 23,7мx0,2м, площадью 4,74 кв. м, а  также о взыскании неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение  обязательств по муниципальному контракту от 20.07.2018 № Ф.2018.347486 в  сумме 549 557 руб. 70 коп. и судебной неустойки в размере 3 000 рублей за  каждый день просрочки исполнения ответчиком вступившего в законную силу  решения суда (с учетом уточнений).  

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 05.03.2021  исковые требования удовлетворены. Кроме того, судом отражено, что в случае  несвоевременного исполнения судебного акта по делу № А47-4352/2020 в части  устранения ответчиком дефектов работ, взыскать с ответчика в пользу истца  компенсацию за ожидание соответствующего исполнения в виде твердой  денежной суммы в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с  01.10.2021 до его фактического исполнения. С ответчика в доход федерального  бюджета взыскана государственная пошлина в размере 19 991 руб.  

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от  09.06.2021 решение суда оставлено без изменения.  

К судебному заседанию суда кассационной инстанции до рассмотрения  кассационной жалобы по существу от представителей сторон поступили  ходатайства об утверждении мирового соглашения и представлен текст  мирового соглашения следующего содержания:  

1. Ответчик признает исковые требования Истца в части заявленных  требований об обязании безвозмездно устранить недостатки (дефекты) работ и  исполнить свои гарантийные обязательства по муниципальному контракту от  20.07.2018 № Ф.2018.347486 и обязуется:  

безвозмездно устранить недостатки (дефекты) работ и исполнить свои  гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 20.07.2018  

 № Ф.2018.347486 в «Парке имени 70 лет Великой Победы», расположенном по  адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 15П, в срок не  позднее 31 мая 2022 года (в связи с наступлением осеннее-зимнего периода), а  именно:  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров в  спортивной зоне (ориентир - футбольное поле и площадка для волейбола):  трещины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и  тротуара проходящего вокруг футбольного поля; трещины, выкрашивание,  просадки по краям (на примыкании с бордюрным камням) асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки проходящей мимо площадки для волейбола, на  общей площади 130,34 кв. м на участках № № 1, 2, 3, 4, 5 (согласно номеров,  указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 1 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 3,8мx0,3м, площадью 1,14 кв. м;  

- на участке № 2 устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия  тротуара на участке размером 8мx1,5м, площадью 12 кв. м;  

- на участке № 3 устранить трещины, выкрашивание, выщербление  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером 5мx3м, площадью  15 кв. м;  

- на участке № 3 устранить разрушение асфальтобетонного покрытия  тротуара (трещины, выкрашивание) на участке размером 19мx0,2м, площадью  3,8 кв. м;  

- на участке № 5 устранить трещины, просадки, неровности,  выкрашивание асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  32,8мx3м, площадью 98,4 кв. м.  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров в  зоне активного отдыха (ориентир - конструкция «Мяч» и спортивная  площадка): выкрашивание асфальтобетонного покрытия дорожки, проходящей  мимо конструкции «Мяч»; трещины, выкрашивание, просадки по краям (на  примыкании с бордюрным камнем) асфальтобетонного покрытия дорожки  разделяющей спортивную зону и зону активного отдыха; трещины,  выкрашивание, просадки по краям асфальтобетонного покрытия тротуаров,  соединяющих спортивную площадку с пешеходными дорожками, на общей  площади 134,29 кв. м на участках № № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (согласно  номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 6 устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия  посередине пешеходной дорожки на участке размером 24 мx3,7 м, площадью  88,8 кв. м;  

- на участке № 7 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки с правой стороны на участке размером  38мx0,4м, площадью 15,2 кв. м;  

- на участке № 8 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки с левой стороны на участке размером 14мx0,4м,  площадью 5,6 кв. м;  

- на участке № 9 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx1,5м, площадью 10,05 кв. м;  

- на участке № 10 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 5,6мx1,5м, площадью 8,4 кв. м;  

- на участке № 11 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx0,3м, площадью 2,01 кв. м;  

- на участке № 12 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,6мx0,3м, площадью 1,98 кв. м;  

- на участке № 13 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара под скамейкой на участке размером 7,5мx0,3м, площадью  2,25 кв. м;  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия тротуаров в  прогулочной зоне (ориентир - конструкция «Звезда»): трещины, просадка по  краям (на примыкании с бордюрным камнем), выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара, проходящего мимо конструкции  «Звезда», на общей площади 41,33 кв. м на участках № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21 (согласно номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 14 устранить провал (проседание асфальтобетонного  покрытия) тротуара на участке размером 1мx2м, площадью 2 кв. м;  

- на участке № 15 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия по правому краю тротуара на участке размером 9,2мx0,25 м,  площадью 2,3 кв. м;  

- на участке № 16 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 3,7мx2м, площадью 7,4 кв. м;  

- на участке № 17 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 26мx0,3м, площадью 7,8 кв. м;  

- на участке № 18 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx2м, площадью 13,4 кв. м;  

- на участке № 19 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 2,7мx0,3м, площадью 0,81 кв. м;  

- на участке № 20 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 9,6мx0,3м, площадью 2,88 кв. м;  

- на участке № 21 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 23,7мx0,2м, площадью 4,74 кв. м.  

2. В случае не исполнения в срок до 31 мая 2022 г. пункта 1 настоящего  мирового соглашения, общество с ограниченной ответственностью  

«Еврострой» уплачивает в пользу Управления жилищно-коммунального  хозяйства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской  области штраф в размере 549 557 руб. 70 коп. в срок до 15 июня 2022 г.  

3. В случае не исполнения в срок до 31 мая 2021 г. пункта 1 настоящего  мирового соглашения в части устранения обществом с ограниченной  ответственностью «Еврострой» дефектов работ, общество с ограниченной  ответственностью «Еврострой» уплачивает в пользу Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Оренбургской области компенсацию за ожидание соответствующего  исполнения в виде твердой денежной суммы в размере 3000 руб. за каждый  день просрочки, начиная с 01.06.2022 г. до его фактического исполнения.  

4. Обязательства Ответчика, вытекающие из настоящего мирового  соглашения и установленные в пункте 1, считаются надлежащим образом  исполненными после подписания Истцом акта приемки выполненных работ (в  произвольной форме) по безвозмездному устранению недостатков по  Контракту. В случае обнаружения некачественно выполненных работ или  некачественных материалов по безвозмездному устранению недостатков по  Контракту, Ответчик обязуется устранить недостатки в срок, указанный  Истцом.  

5. Расходы на оплату услуг представителей сторон, а также иные  расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг  другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их  понесла.  

6. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое  соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и  в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. В случае нарушения одной  из Сторон принятых по настоящему соглашению обязательств, другая Сторона  вправе на основании ч. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд с  ходатайством о выдаче ей исполнительного листа. В этом случае настоящее  мировое соглашение подлежит принудительному исполнению.  

7. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах по одному для  каждой из сторон и для Арбитражного суда Уральского округа.  

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения  Арбитражным судом Уральского округа.  

9. Заключение настоящего соглашения не противоречит закону и не  нарушает права и законные интересы других лиц.  

10. На основании ст. 139, 140, 141, 150 АПК РФ Стороны просят суд  утвердить настоящее Мировое соглашение и прекратить производство по делу   № А47-4352/2020 на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.  

11. Последствия заключения мирового соглашения и прекращения  производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам понятны.  

Суд кассационной инстанции, рассмотрев ходатайство об утверждении  мирового соглашения, считает его подлежащим удовлетворению.  

Согласно части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в  порядке, предусмотренном главой 15 указанного Кодекса.  

В соответствии с частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив  мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том  числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.  

В силу статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой  стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, по любому  делу, если иное не предусмотрено названным Кодексом и иным федеральным  законом. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы  других лиц и противоречить закону.  

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если это  противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц  

(ч. 6 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Аналогичные правила содержатся также в части 5 статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать  согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках  исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.  В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о  рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о  полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении  судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.  

Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут  самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными и  процессуальными правами, они свободны в согласовании любых условий  мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не  нарушающих права и законные интересы других лиц.  

Как видно из представленного мирового соглашения, оно подписано от  имени Управления главным специалистом-юристом контрактной службы  администрации Сорочинского городского округа Лукиной Ю.Л. по  доверенности от 24.12.2020 № 18-01-16/1300, от имени общества «Еврострой» -  директором Гусейновым И.А.О., действующим на основании Устава.  

Условия представленного суду мирового соглашения, оформленного в  соответствии с требованиями, установленными статьей 140 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречат  действующему законодательству, не нарушают права и законные интересы  других лиц. Полномочия лиц, подписавших его, подтверждены  представленными в материалы дела документами (доверенности с правом  заключения мирового соглашения).  

При подписании мирового соглашения стороны подтвердили, что  последствия прекращения производства по делу, установленные  

частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, сторонам известны и понятны.  

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает  возможным утвердить мировое соглашение между сторонами настоящего спора  на вышеуказанных условиях.  

В силу пункта 6 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной  жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить решение  суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции  полностью и прекратить производство по делу полностью или в части.  

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по  делу в случае утверждения мирового соглашения.  

Таким образом, решение Арбитражного суда Оренбургской области от  05.03.2021 по делу № А47-4352/2020 и постановление Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда от 09.06.2021 по тому же делу подлежит  отмене, производство по делу – прекращению.  

В пункте 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации содержится императивное правило о возвращении  истцу из федерального бюджета части уплаченной им государственной  пошлины в размерах, установленных федеральными законами о налогах и  сборах.  

В соответствии с положениями статьи 333.40 Налогового кодекса РФ при  заключении мирового соглашения на стадии рассмотрения дела судом  кассационной инстанции возврату истцу подлежит 30 % суммы уплаченной им  государственной пошлины.  

С учетом изложенного, судебные расходы подлежат распределению,  исходя из условий мирового соглашения и положений абзаца 2 пункта 3 части  1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь ст.ст. 49, 139-141, 150, 286-289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

П О С Т А Н О В И Л:

утвердить мировое соглашение от 23.09.2021, заключенное между обществом с  ограниченной ответственностью «Еврострой» в лице директора Гусейнова  Имана Аббас Оглы, действующего на основании Устава с одной стороны и  Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации  Сорочинского городского округа Оренбургской области в лице Лукиной Ю.Л.,  действующей на основании доверенности от 24.12.2020 № 18-01-16/1300, с  другой стороны, в следующей редакции:  

1. Ответчик признает исковые требования Истца в части заявленных  требований об обязании безвозмездно устранить недостатки (дефекты) работ и  

исполнить свои гарантийные обязательства по муниципальному контракту от  20.07.2018 № Ф.2018.347486 и обязуется:  

безвозмездно устранить недостатки (дефекты) работ и исполнить свои  гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 20.07.2018 №  Ф.2018.347486 в «Парке имени 70 лет Великой Победы», расположенном по  адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 15П, в срок не  позднее 31 мая 2022 года (в связи с наступлением осеннее-зимнего периода), а  именно:  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров в  спортивной зоне (ориентир - футбольное поле и площадка для волейбола):  трещины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и  тротуара проходящего вокруг футбольного поля; трещины, выкрашивание,  просадки по краям (на примыкании с бордюрным камням) асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки проходящей мимо площадки для волейбола, на  общей площади 130,34 кв. м на участках NN 1, 2, 3, 4, 5 (согласно номеров,  указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 1 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 3,8мx0,3м, площадью 1,14 кв. м;  

- на участке № 2 устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия  тротуара на участке размером 8мx1,5м, площадью 12 кв. м;  

- на участке № 3 устранить трещины, выкрашивание, выщербление  асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером 5мx3м, площадью  15 кв. м;  

- на участке № 3 устранить разрушение асфальтобетонного покрытия  тротуара (трещины, выкрашивание) на участке размером 19мx0,2м, площадью  3,8 кв. м;  

- на участке № 5 устранить трещины, просадки, неровности,  выкрашивание асфальтобетонного покрытия тротуара на участке размером  32,8мx3м, площадью 98,4 кв. м. - устранить дефекты асфальтобетонного  покрытия дорожек и тротуаров в зоне активного отдыха (ориентир -  конструкция «Мяч» и спортивная площадка): выкрашивание  асфальтобетонного покрытия дорожки, проходящей мимо конструкции «Мяч»;  трещины, выкрашивание, просадки по краям (на примыкании с бордюрным  камнем) асфальтобетонного покрытия дорожки разделяющей спортивную зону  и зону активного отдыха; трещины, выкрашивание, просадки по краям  асфальтобетонного покрытия тротуаров, соединяющих спортивную площадку с  пешеходными дорожками, на общей площади 134,29 кв. м на участках № 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13 (согласно номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 6 устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия  посередине пешеходной дорожки на участке размером 24 мx3,7 м, площадью  88,8 кв. м;  

- на участке № 7 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки с правой стороны на участке размером  38мx0,4м, площадью 15,2 кв. м;  

- на участке № 8 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия пешеходной дорожки с левой стороны на участке размером 14мx0,4м,  площадью 5,6 кв. м;  

- на участке № 9 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx1,5м, площадью 10,05 кв. м;  

- на участке № 10 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 5,6мx1,5м, площадью 8,4 кв. м;  

- на участке № 11 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx0,3м, площадью 2,01 кв. м;  

- на участке № 12 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,6мx0,3м, площадью 1,98 кв. м;  

- на участке № 13 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара под скамейкой на участке размером 7,5мx0,3м, площадью  2,25 кв. м;  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия тротуаров в  прогулочной зоне (ориентир - конструкция «Звезда»): трещины, просадка по  краям (на примыкании с бордюрным камнем), выкрашивание  асфальтобетонного покрытия тротуара, проходящего мимо конструкции  «Звезда», на общей площади 41,33 кв. м на участках № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21 (согласно номеров, указанных в карте дефектов), в том числе:  

- на участке № 14 устранить провал (проседание асфальтобетонного  покрытия) тротуара на участке размером 1мx2м, площадью 2 кв. м;  

- на участке № 15 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия по правому краю тротуара на участке размером 9,2мx0,25 м,  площадью 2,3 кв. м;  

- на участке № 16 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 3,7мx2м, площадью 7,4 кв. м;  

- на участке № 17 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 26мx0,3м, площадью 7,8 кв. м;  

- на участке № 18 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 6,7мx2м, площадью 13,4 кв. м;  

- на участке № 19 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 2,7мx0,3м, площадью 0,81 кв. м;  

- на участке № 20 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 9,6мx0,3м, площадью 2,88 кв. м;  

- на участке № 21 устранить трещины, выкрашивание асфальтобетонного  покрытия тротуара на участке размером 23,7мx0,2м, площадью 4,74 кв. м.  

2. В случае не исполнения в срок до 31 мая 2022 г. пункта 1 настоящего  мирового соглашения, общество с ограниченной ответственностью  «Еврострой» уплачивает в пользу Управления жилищно-коммунального  хозяйства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской  области штраф в размере 549 557 руб. 70 коп. в срок до 15 июня 2022 г.  

3. В случае не исполнения в срок до 31 мая 2021 г. пункта 1 настоящего  мирового соглашения в части устранения обществом с ограниченной  ответственностью «Еврострой» дефектов работ, общество с ограниченной  

ответственностью «Еврострой» уплачивает в пользу Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Оренбургской области компенсацию за ожидание соответствующего  исполнения в виде твердой денежной суммы в размере 3000 руб. за каждый  день просрочки, начиная с 01.06.2022 г. до его фактического исполнения.  

4. Обязательства Ответчика, вытекающие из настоящего мирового  соглашения и установленные в пункте 1, считаются надлежащим образом  исполненными после подписания Истцом акта приемки выполненных работ (в  произвольной форме) по безвозмездному устранению недостатков по  Контракту. В случае обнаружения некачественно выполненных работ или  некачественных материалов по безвозмездному устранению недостатков по  Контракту, Ответчик обязуется устранить недостатки в срок, указанный  Истцом.  

5. Расходы на оплату услуг представителей сторон, а также иные  расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг  другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их  понесла.  

6. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое  соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и  в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. В случае нарушения одной  из Сторон принятых по настоящему соглашению обязательств, другая Сторона  вправе на основании ч. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд с  ходатайством о выдаче ей исполнительного листа. В этом случае настоящее  мировое соглашение подлежит принудительному исполнению.  

7. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах по одному для  каждой из сторон и для Арбитражного суда Уральского округа.  

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения  Арбитражным судом Уральского округа.  

9. Заключение настоящего соглашения не противоречит закону и не  нарушает права и законные интересы других лиц.  

10. На основании ст. 139, 140, 141, 150 АПК РФ Стороны просят суд  утвердить настоящее Мировое соглашение и прекратить производство по делу   № А47-4352/2020 на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.  

11. Последствия заключения мирового соглашения и прекращения  производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам понятны.  

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 05.03.2021 по делу   № А47-4352/2020 и постановление Восемнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 09.06.2021 по тому же делу отменить.  

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Еврострой» из  федерального бюджета 900 руб. государственной пошлины, уплаченной  по платежному поручению от 29.07.2021 № 300 на сумму 3 000 руб.  

Постановление об утверждении мирового соглашения подлежит  немедленному исполнению и может быть обжаловано в Судебную коллегию  

Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Председательствующий А.А. Столяров 

Судьи А.С. Полуяктов 

 Л.А. Суспицина