Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва 

24.08.2017г.                                                                        Дело №  А40-55028/17-110-519                                                                                                                                   

         Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2017 года 

         Полный текст решения изготовлен 24.08.2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» (ОГРН 

<

***>, 111033, г. Москва, Верх. Золоторожский пер., д. 5, стр. 3) к обществу с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) о взыскании 726 571 руб. 95 коп.

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 17.04.2017 №120,

от ответчика - ФИО3 по дов. от  25.05.2017 №1,

УСТАНОВИЛ:

государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» обратилось в Арбитражный суд с иском к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» о взыскании неустойки в размере 726 571 руб. 95 коп. по государственному контракту №0373200557915000176-0385738-01 от 24.06.2015г.

Ответчик  иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 24.06.2015г. между Государственным бюджетным учреждением города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Славянская Строительная Компания» (далее - Подрядчик) был заключен государственный контракт №0373200557915000176-0385738-01 (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1 Контракта, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по ремонту с заменой конструкций деформационных швов эстакады автодорожной «Кубинка-Боженко», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных надлежащим образом работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Цена Контракта определена на основании результатов проведения аукциона в электронной форме и в соответствии с расчетом цены Контракта (Приложение №2 к настоящему Контракту) и составляет 48 927 403 руб. 80 коп.

Согласно п.3.1 Контракта срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме установлен с момента заключения Контракта и осуществляется не позднее 25.11.2015г.

В соответствии с п. 5.1.1 Контракта, Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Согласно п. 5.4.1 Подрядчик обязан выполнить работы надлежащим образом и представить Заказчику комплект отчетной документации и Акт о приемке выполненных работ КС-2 и справку о стоимости выполненных работ КС-3 по итогам выполнения работ, в сроки, предусмотренные Контрактом.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно п. 6.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов), которая будет удерживаться из суммы, подлежащей оплате по Контракту.

Пени рассчитывается в соответствии с условиями п. 6.3.1 заключенного между сторонами Контракта.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором.

Поскольку ответчик обязательства не исполнил, с него подлежит взысканию неустойка.

Согласно представленному расчету за период с 26.11.2015г. по 14.12.2015г. размере пени составляет 726 571 руб. 95 коп.

Суд, изучив представленный расчет истца о взыскании пени, считает, что расчет произведен не верно, поскольку истцом при произведении расчета не был учтен п. 3.1 Контракта согласно которому выполнение работ осуществляется в течении 164 (ста шестидесяти четырех) дней с момента заключения договора.

Контракт между сторонами был заключен 24.06.2015г., таким образом, 164-й день 05.12.2015г. (суббота).

А с учетом положений ст. 193 ГК РФ сроком завершения работ и представления Ответчику всей необходимой документации является дата – 07.12.2015г.  

Таким образом, правомерным периодом начисления неустойки является 08.12.2015г. по 14.12.2015г., в связи с чем требование о взыскании пени подлежит удовлетворению частично - в размере 242 190 руб. 65 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.  

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» в пользу Государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» 242 190 руб. 65  коп. неустойки, 5 844 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко