Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                     Дело № А32-19216/2017

08.08.2017 г.                                                                                                             

Резолютивная часть решения оглашена 31.07.2017 г.

Решение в полном объеме изготовлено 08.08.2017 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе  судьи Кондратова К.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет МВД»,  г. Краснодар (ОГРН 

<

***>) к ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>) о взыскании убытков и задолженности в размере 778 440,14 руб. и обязании выполнить работы.

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 27.12.2016г.

от ответчика: не явился,  уведомлен.

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет МВД»,  г. Краснодар (ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>)  о взыскании убытков задолженности в размере 778 440,14 руб. и обязании выполнить работы.

Ответчик в судебное заседание прибыл, отзыв на исковое заявление заблаговременно суду не представил, сумму уточненных требований по существу не оспорил. Согласно части 4 ст. 131 АПК РФ, в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

Копия определения о возбуждении производства по делу была направлена по месту регистрации ответчика.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Поскольку стороны не возражали против перехода в судебное разбирательство, суд с на основании ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции. 

Суд, проведя предварительное судебное заседание и судебное заседание в соответствии со ст.ст. 135-137 АПК РФ, исследовав материалы дела, изучив все представленные сторонами документальные доказательства и оценив их в совокупности, в порядке ст.ст. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 81 АПК РФ, пришел к следующему выводу.

Как видно из материалов дела, 29 июня 2015 года между федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерании» и обществом    с    ограниченной    ответственностью    «Строительная    компания «ПромСтройМонтаж», был заключен Государственный контракт на выполнение подрядных работ № 0318100007015000130-0007272-012.

Согласно п. 1.1. Контракта, Подрядчик взял на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта, Строительными нормами и правилами3 и сметной документацией, утверждаемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью Контракта, календарным графиком производства работ, своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту помещений 3-го этажа здания литер «А», расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 10а4 и своевременно сдать результаты работ Заказчику. А Заказчик взял на себя обязательства принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

Цена Контракта составила 2 632 708 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот восемь) рублей 60 копеек.

Сметная документация, разработанная в качестве неотъемлемой части Контракта, была доведена до сведения Ответчика еще на этапе проведения конкурсного отбора подрядчика, согласно требованиям действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Согласно п. 6.2.4. Контракта, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета Контракта.

Пункт 6.2.6. Контракта предусматривает право Подрядчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

На основании п. 6.2.10. Контракта Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Пункт 6.2.13. Контракта обязывает Подрядчика с момента начала работ и до их завершения вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12 января 2007 № 7, и фиксировать в нем все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

Как пояснил истец, в ходе выполнения Контракта от Ответчика не поступало никаких замечаний и предложений, касающихся условий надлежащего выполнениями ими, предусмотренных Контрактом работ.

31.07.2015   и 30.08.2015 выполненные Ответчиком работы поэтапно были приняты Истцом, о чем были составлены соответствующие Акты приема-передачи выполненных работ. На основании данных Актов Истец произвел оплату выполненных работ в полном объеме.

На момент приема-передачи работ стороны Контракта претензий друг к другу не имели.

Истец пояснил в судебном заседании, что в последствие в ходе эксплуатации помещений, в которых Ответчиком был произведен капитальный ремонт, стали выявляться дефекты, которые могли быть связаны с некачественным выполнением последним работ, предусмотренных контрактом.

Пункт 6.2.2. Контракта определяет, что Подрядчик обязуется обеспечить производство работ, применение материалов, монтируемых конструкций, оборудования в полном соответствии с технической документацией, СНиП, ГОСТ в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ; качество выполнения всех работ в соответствии с сметной документацией, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами; своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

Согласно п. 9.3. Контракта, Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков).

15.08.2016   на объекте - помещения 3-го этажа здания литер «А», расположенных по адресу: 

<

...>, комиссия в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика, составила Акт о выявленных дефектах. Акт был подписан представителями обеих сторон.

Дефекты, зафиксированные в Акте, свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных Ответчиком ранее работ и применении материалов, качество которых не соответствует установленным законодательством требованиям, а также делают непригодным данные помещения к дальнейшей эксплуатации и требуют устранения в кратчайшие сроки.

В адрес Ответчика 20.10.2016 (исх. № 319), 25.11.2016 (исх. № 699), 09.02.2017 (исх. № 240) были направлены претензии об устранении недостатков выполненных работ и о добровольном возмещении убытков.

До настоящего времени ответов на претензии в университет не поступало, работы по устранению выявленных недостатков Ответчиком по состоянию на 10 мая 2017 г. не выполнены.

Указанные обстоятельства для истца послужили основанием обращения с исковым заявлением о понуждении к исполнению соответствующей обязанности в натуре в Арбитражный суд Краснодарского края. 

Исследовав представленные материалы дела, судом установлено, что исковые требования  подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

По своей правовой природе, заключенный Контракт, является договором подряда на строительных работ, и регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) о договорах подряда и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно положениям статьи 763 ГК РФ, подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных и ли муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Как следует из положений статьи 766 ГК РФ, государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Присуждение к исполнению обязанности является одним из способов защиты гражданских прав, указанных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Неисполнение принятых на себя обязательств контрагента истца дает право истцу обратиться с требованием о присуждении к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.03.2000 N 3486/1999 и от 14.08.2001 N 9162/2000, при решении вопроса о применении указанного способа защиты суд обязан определить порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, выяснить возможность реального исполнения принятых им решений исходя из положений Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно пункту 1.1 Порядка осуществления мероприятий по компенсационному озеленению на территории г. Сочи, утвержденного постановлением главы г. Сочи от 01.08.2007 N 975 "Об утверждении формы и порядка выдачи разрешений на вырубку (пересадку) зеленых насаждений на территории г. Сочи", компенсационное озеленение может осуществляться только при наличии проекта озеленения (посадочного чертежа), который разрабатывает исполнитель и согласовывает его с департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации и управлением по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Требования статьи 766 ГК РФ при заключении муниципального контракта от 29.06.2015г. № 0318100007015000130-0007272-01 соблюдены.

Ответчик в акте указывает на то, что их причиной стало не проведение им надлежащего комплекса работ, которые должны были обеспечить качественный результат ремонта. 

Судом установлено, что доводы ответчика в акте на то, что эти работы не были осуществлены по причине их отсутствия в сметной документации, не может рассматриваться как отсутствие вины Ответчика, так как он был обязан обеспечить надлежащее качество ремонта любыми средствами, в первую очередь в виде своевременного информирования Истца о возникающих трудностях в ходе выполнения работ, и вплоть до приостановления или даже одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.

Согласно ч. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, судом установлено, что согласно п. 6.1.14. в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Данное право также вытекает из ч. 1 ст. 723, ст. 397 Гражданского кодекса РФ и п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Также судом принято во внимание то, учитывая, что в нарушение положений ст. 9, 65 АПК РФ ответчиком не представлено доказательств того, что недостатки в результате работ, выполненных им по контракту, возникли вследствие иных причин, нежели некачественное исполнение подрядчиком принятых на себя обязательств, ходатайство о проведении судебной экспертизы ответчиком не заявлялось, суд приходит к  выводу о необходимости удовлетворения заявленных исковых требований об обязании устранить недостатки.

На основании изложенного, требование об обязании ООО «Строительная компания «ПромСтройМонтаж» выполнить работы на объекте по адресу: 

<

...> по устранению выявленных недостатков на общую сумму 637 097 (шестьсот тридцать семь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, подлежат удовлетворению.

Как пояснил истец, в связи с отсутствием со стороны Ответчика каких-либо действий, направленных на урегулирование возникшей ситуации, в помещениях здания литер «А», расположенных по адресу: 

<

...>, в которых проводились работы, в декабре 2016 года были проведены частичные ремонтные работы, направленные на устранение выявленных ранее скрытых недостатков, силами наемной подрядной организации на основании заключенного государственного контракта.

О намерении проводить ремонт с привлечением третьих лиц, Ответчику было направлено соответствующее уведомление, за исх. № 699 от 25.11.2016.

На производство данных ремонтных работ университетом в лице филиала был заключен государственный контракт № 27 от 19.12.2016 года с обществом с ограниченной ответственностью «ДАНИЛА МАСТЕР».

Предметом Контракта № 27 является выполнение работ по текущему ремонту   душевых   здания   (Литер   А)   Крымского   филиала   Краснодарского университета МВД России, расположенного по адресу: 

<

...>.

Цена договора, согласно техническому заданию и локального сметного расчета составила 141 342 (сто сорок одна тысяча триста сорок два) рубля 84 копейки.

Работы были выполнены в полном объеме, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 20.12.2016 года. Оплата произведенных работ также осуществлена в полном объеме, что подтверждается материалами дела.

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Судом установлено, что затраты на проведение ремонтных работ являются убытками Истца, в связи с чем требование о взыскании понесенных расходов в размере 141 342, 84 руб. подлежат удовлетворению.

Статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

 При этом суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указанная норма права направлена на защиту прав кредитора по неденежному обязательству в натуре путем присуждения ему судом денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства. 

Согласно абзацу 2 пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Согласно 32  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Разумной суд считает денежную компенсацию в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Руководствуясь ст. 102-110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>) в течение 50 календарных дней со дня вступления решения в законную силу  выполнить работы на объекте по адресу: 

<

...> по устранению выявленных недостатков на общую сумму 637 097 (шестьсот тридцать семь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, а именно: 

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обоснование

1

2

3

4

5

Раздел 1. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №303

1

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,1414 / 100

ТЕРр57-3-1

2

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,116711,67 / 100

ТЕРр57-2-7

3

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,116711,67 / 100

ТЕР11-01-011-01

4

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,116711,67 / 100

ТЕР11-01-034-04

5

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,1414 / 100

ТЕР11-01-040-03

6

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,07157,15 / 100

ТЕР15-02-019-03

7

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,7150,1*7,15

ТССЦ-101-4163

8

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,357935,79 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 2. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №304

9

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,2323 / 100

ТЕРр57-3-1

10

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,302530,25 / 100

ТЕРр57-2-7

11

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,302530,25 / 100

ТЕР11-01-011-01

12

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,302530,25 / 100

ТЕР11-01-034-04

13

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,2323 / 100

ТЕР11-01-040-03

14

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,114611,46 / 100

ТЕР15-02-019-03

15

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

1,1460,1*11,46

ТССЦ-101-4163

16

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,573457,34 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 3. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №305

17

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,1919 / 100

ТЕРр57-3-1

18

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,106810,68 / 100

ТЕРр57-2-7

19

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,106810,68 / 100

ТЕР11-01-011-01

20

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,106810,68 / 100

ТЕР11-01-034-04

21

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,1919 / 100

ТЕР11-01-040-03

22

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,05145,14 / 100

ТЕР15-02-019-03

23

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,5140,1*5,14

ТССЦ-101-4163

24

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,342934,29 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 4. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №306

25

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,18518,5 / 100

ТЕРр57-3-1

26

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,09119,11 / 100

ТЕРр57-2-7

27

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,09119,11 / 100

ТЕР11-01-011-01

28

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,09119,11 / 100

ТЕР11-01-034-04

29

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,18518,5 / 100

ТЕР11-01-040-03

Раздел 5. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №307

30

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,1414 / 100

ТЕРр57-3-1

31

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,110611,06 / 100

ТЕРр57-2-7

32

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,110611,06 / 100

ТЕР11-01-011-01

33

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,110611,06 / 100

ТЕР11-01-034-04

34

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,1414 / 100

ТЕР11-01-040-03

35

Укладка металлического накладного профиля (порога)

100 м профиля

0,0080,8 / 100

ТЕР11-01-049-01

36

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м

шт.

1

ФССЦ-206-1366

Раздел 6. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №308

37

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,09559,55 / 100

ТЕРр57-3-1

38

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,1111 / 100

ТЕРр57-2-7

39

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,1111 / 100

ТЕР11-01-011-01

40

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,1111 / 100

ТЕР11-01-034-04

41

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,09559,55 / 100

ТЕР11-01-040-03

Раздел 7. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №309

42

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,216121,61 / 100

ТЕРр57-3-1

43

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,291529,15 / 100

ТЕРр57-2-7

44

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,291529,15 / 100

ТЕР11-01-011-01

45

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,291529,15 / 100

ТЕР11-01-034-04

46

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,216121,61 / 100

ТЕР11-01-040-03

47

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,114511,45 / 100

ТЕР15-02-019-03

48

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

1,1450,1*11,45

ТССЦ-101-4163

49

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,572957,29 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 8. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №310

50

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,13413,4 / 100

ТЕРр57-3-1

51

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,109610,96 / 100

ТЕРр57-2-7

52

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,109610,96 / 100

ТЕР11-01-011-01

53

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,109610,96 / 100

ТЕР11-01-034-04

54

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,13413,4 / 100

ТЕР11-01-040-03

Раздел 9. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №311

55

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,125412,54 / 100

ТЕРр57-3-1

56

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,09659,65 / 100

ТЕРр57-2-7

57

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,09659,65 / 100

ТЕР11-01-011-01

58

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,09659,65 / 100

ТЕР11-01-034-04

59

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,125412,54 / 100

ТЕР11-01-040-03

60

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,04744,74 / 100

ТЕР15-02-019-03

61

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,4740,1*4,74

ТССЦ-101-4163

62

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,471447,14 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 10. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №312

63

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,156815,68 / 100

ТЕРр57-3-1

64

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,138513,85 / 100

ТЕРр57-2-7

65

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,138513,85 / 100

ТЕР11-01-011-01

66

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,138513,85 / 100

ТЕР11-01-034-04

67

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,156815,68 / 100

ТЕР11-01-040-03

Раздел 11. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №313

68

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,124812,48 / 100

ТЕРр57-3-1

69

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,09589,58 / 100

ТЕРр57-2-7

70

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,09589,58 / 100

ТЕР11-01-011-01

71

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,09589,58 / 100

ТЕР11-01-034-04

72

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,124812,48 / 100

ТЕР11-01-040-03

73

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0323,2 / 100

ТЕР15-02-019-03

74

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,320,1*3,2

ТССЦ-101-4163

75

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,313531,35 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 12. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №314

76

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,159215,92 / 100

ТЕРр57-3-1

77

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,143714,37 / 100

ТЕРр57-2-7

78

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,143714,37 / 100

ТЕР11-01-011-01

79

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,143714,37 / 100

ТЕР11-01-034-04

80

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,159215,92 / 100

ТЕР11-01-040-03

81

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0424,2 / 100

ТЕР15-02-019-03

82

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,420,1*4,2

ТССЦ-101-4163

83

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,415341,53 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 13. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №315

84

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,132213,22 / 100

ТЕРр57-3-1

85

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,1818 / 100

ТЕРр57-2-7

86

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,1818 / 100

ТЕР11-01-011-01

87

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,1818 / 100

ТЕР11-01-034-04

88

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,132213,22 / 100

ТЕР11-01-040-03

89

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0555,5 / 100

ТЕР15-02-019-03

90

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,550,1*5,5

ТССЦ-101-4163

91

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,271427,14 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 14. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №316

92

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,104610,46 / 100

ТЕРр57-3-1

93

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,09599,59 / 100

ТЕРр57-2-7

94

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,09599,59 / 100

ТЕР11-01-011-01

95

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,09599,59 / 100

ТЕР11-01-034-04

96

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,104610,46 / 100

ТЕР11-01-040-03

97

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0383,8 / 100

ТЕР15-02-019-03

98

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,380,1*3,8

ТССЦ-101-4163

99

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,251725,17 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 15. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №317

100

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,132813,28 / 100

ТЕРр57-3-1

101

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,109610,96 / 100

ТЕРр57-2-7

102

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,109610,96 / 100

ТЕР11-01-011-01

103

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,109610,96 / 100

ТЕР11-01-034-04

104

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,132813,28 / 100

ТЕР11-01-040-03

105

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0848,4 / 100

ТЕР15-02-019-03

106

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,840,1*8,4

ТССЦ-101-4163

107

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,333933,39 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 16. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №318 (1)

108

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,158415,84 / 100

ТЕРр57-3-1

109

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,145714,57 / 100

ТЕРр57-2-7

110

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,145714,57 / 100

ТЕР11-01-011-01

111

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,145714,57 / 100

ТЕР11-01-034-04

112

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,158415,84 / 100

ТЕР11-01-040-03

113

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,044 / 100

ТЕР15-02-019-03

114

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,40,1*4

ТССЦ-101-4163

115

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,388338,83 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 17. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №318 (2)

116

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,15915,9 / 100

ТЕРр57-3-1

117

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,146414,64 / 100

ТЕРр57-2-7

118

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,146414,64 / 100

ТЕР11-01-011-01

119

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,146414,64 / 100

ТЕР11-01-034-04

120

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,15915,9 / 100

ТЕР11-01-040-03

121

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0414,1 / 100

ТЕР15-02-019-03

122

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,410,1*4,1

ТССЦ-101-4163

123

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,406440,64 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 18. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №319

124

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,126812,68 / 100

ТЕРр57-3-1

125

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,09919,91 / 100

ТЕРр57-2-7

126

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,09919,91 / 100

ТЕР11-01-011-01

127

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,09919,91 / 100

ТЕР11-01-034-04

128

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,126812,68 / 100

ТЕР11-01-040-03

129

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0323,2 / 100

ТЕР15-02-019-03

130

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,320,1*3,2

ТССЦ-101-4163

131

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,318631,86 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 19. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №320

132

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,128212,82 / 100

ТЕРр57-3-1

133

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,101510,15 / 100

ТЕРр57-2-7

134

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,101510,15 / 100

ТЕР11-01-011-01

135

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,101510,15 / 100

ТЕР11-01-034-04

136

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,128212,82 / 100

ТЕР11-01-040-03

137

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,022 / 100

ТЕР15-02-019-03

138

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,20,1*2

ТССЦ-101-4163

139

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,355935,59 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 20. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №321

140

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,12912,9 / 100

ТЕРр57-3-1

141

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,102910,29 / 100

ТЕРр57-2-7

142

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,102910,29 / 100

ТЕР11-01-011-01

143

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,102910,29 / 100

ТЕР11-01-034-04

144

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,12912,9 / 100

ТЕР11-01-040-03

145

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,033 / 100

ТЕР15-02-019-03

146

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,30,1*3

ТССЦ-101-4163

147

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,326232,62 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 21. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №322 (1)

148

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,158215,82 / 100

ТЕРр57-3-1

149

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,110211,02 / 100

ТЕРр57-2-7

150

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,110211,02 / 100

ТЕР11-01-011-01

151

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,110211,02 / 100

ТЕР11-01-034-04

152

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,158215,82 / 100

ТЕР11-01-040-03

153

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,044 / 100

ТЕР15-02-019-03

154

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,40,1*4

ТССЦ-101-4163

155

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,377737,77 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 22. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №322 (сан. узел)

156

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,194319,43 / 100

ТЕР11-01-007-01

157

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,0509

ТССЦ-408-0122

158

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,0097150,05*19,43/100

ТССЦ-402-0071

159

Установка смесителей

10 шт.

0,11 / 10

ТЕР17-01-002-03

160

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм

шт.

2

ТССЦ-301-1520

161

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,01611,61 / 100

ТЕР10-01-047-01

162

Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)

м2

-1,61

ТССЦ-203-8084

Раздел 23. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №322 (2)

163

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,158815,88 / 100

ТЕРр57-3-1

164

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,146114,61 / 100

ТЕРр57-2-7

165

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,146114,61 / 100

ТЕР11-01-011-01

166

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,146114,61 / 100

ТЕР11-01-034-04

167

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,159915,99 / 100

ТЕР11-01-040-03

168

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0454,5 / 100

ТЕР15-02-019-03

169

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,450,1*4,5

ТССЦ-101-4163

170

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,41141,1 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 24. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №323

171

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,13113,1 / 100

ТЕРр57-3-1

172

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,106410,64 / 100

ТЕРр57-2-7

173

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,106410,64 / 100

ТЕР11-01-011-01

174

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,106410,64 / 100

ТЕР11-01-034-04

175

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,13113,1 / 100

ТЕР11-01-040-03

176

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,055 / 100

ТЕР15-02-019-03

177

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,50,1*5

ТССЦ-101-4163

178

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,328132,81 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 25. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №324

179

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,129212,92 / 100

ТЕРр57-3-1

180

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,101410,14 / 100

ТЕРр57-2-7

181

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,101410,14 / 100

ТЕР11-01-011-01

182

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,101410,14 / 100

ТЕР11-01-034-04

183

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,129212,92 / 100

ТЕР11-01-040-03

184

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0353,5 / 100

ТЕР15-02-019-03

185

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,350,1*3,5

ТССЦ-101-4163

186

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,321632,16 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 26. Здание лит "А", Третий этаж. Комната №325

187

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,129812,98 / 100

ТЕРр57-3-1

188

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,104210,42 / 100

ТЕРр57-2-7

189

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,104210,42 / 100

ТЕР11-01-011-01

190

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,104210,42 / 100

ТЕР11-01-034-04

191

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,129812,98 / 100

ТЕР11-01-040-03

192

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,0313,1 / 100

ТЕР15-02-019-03

193

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,310,1*3,1

ТССЦ-101-4163

194

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,322932,29 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 27. Здание лит "А", Третий этаж. Туалет мужской

195

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм

шт.

4

ФССЦ-301-5601

196

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,322932,29 / 100

ТЕР11-01-007-01

197

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,0846

ТССЦ-408-0122

198

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,0161450,05*32,29/100

ТССЦ-402-0071

199

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки

0,01021,02 / 100

ТЕРр63-7-5

200

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0,01021,02 / 100

ТЕР15-01-019-05

201

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые

м2

-1,02

ТССЦ-101-0256

202

Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм

м2

1,02

ФССЦ-101-4485

Раздел 28. Здание лит "А", Третий этаж. Душевая мужская

203

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,0535,3 / 100

ТЕР11-01-007-01

204

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,0139

ТССЦ-408-0122

205

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,002650,05*5,3/100

ТССЦ-402-0071

206

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки

0,01031,03 / 100

ТЕРр63-7-5

207

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0,01031,03 / 100

ТЕР15-01-019-05

208

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые

м2

-1,03

ТССЦ-101-0256

209

Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм

м2

1,03

ФССЦ-101-4485

Раздел 29. Здание лит "А", Третий этаж. Коридор

210

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,8383 / 100

ТЕР15-02-019-03

211

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

8,30,1*83

ТССЦ-101-4163

212

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

2,7948279,48 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 30. Здание лит "А", Подвал

213

Усиление сварных швов (наплавкой)

1 м шва

1

ТЕР46-01-013-01

Раздел 31. Здание лит "А", Первый этаж. Варочный цех

214

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,859785,97 / 100

ТЕР11-01-007-01

215

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,2252

ТССЦ-408-0122

216

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,0429850,05*85,97/100

ТССЦ-402-0071

Раздел 32. Здание лит "А", Первый этаж. Варочный цех. Туалет

217

Разборка подшивки потолков: из пластика

100 м2 подшивки

0,00940,94 / 100

ТЕРр54-3-1

218

Устройство: потолков реечных алюминиевых

100 м2 поверхности облицовки

0,00940,94 / 100

ТЕР15-01-047-16

Раздел 33. Здание лит "А", Первый этаж. Варочный цех. Душевая

219

Смена смесителей: с душевой сеткой

100 шт.

0,011 / 100

ТЕРр65-5-6

220

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм

шт.

2

ТССЦ-301-1520

Раздел 34. Здание лит "А", Первый этаж. Кабинет №101. Комендант

221

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,330933,09 / 100

ТЕР15-02-019-03

222

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

3,3090,1*33,09

ТССЦ-101-4163

223

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,330933,09 / 100

ТЕР15-04-005-01

224

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе

100 м2 покрытия

0,00180,18 / 100

ТЕР46-04-011-02

225

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов

100 м2 покрытия

0,00180,18 / 100

ТЕР15-04-006-03

226

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,02340,13*0,18

ТССЦ-101-4163

227

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 покрытия

0,00180,18 / 100

ТЕР11-01-027-06

228

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2

-0,1836

ТССЦ-101-0287

229

Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм

м2

0,1836

ТССЦ-101-4484

Раздел 35. Здание лит "В", КПП

230

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,044 / 100

ТЕР15-02-019-03

231

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,40,1*4

ТССЦ-101-4163

232

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,549554,95 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 36. Здание лит "В", Комендантское отделение

233

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,1919 / 100

ТЕР15-02-019-03

234

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

1,90,1*19

ТССЦ-101-4163

235

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,627862,78 / 100

ТЕР15-04-005-01

236

Укладка металлического накладного профиля (порога)

100 м профиля

0,0080,8 / 100

ТЕР11-01-049-01

237

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м

шт.

1

ФССЦ-206-1366

Раздел 37. Здание лит "В", Первый этаж. Сан. узел

238

Смена дверных приборов: ручки-кнопки

100 шт. приборов

0,011 / 100

ТЕРр56-12-4

239

Смена дверных приборов: замки врезные

100 шт. приборов

0,011 / 100

ТЕРр56-12-5

Раздел 38. Здание лит "В", Первый этаж. Кабинет №11

240

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,272627,26 / 100

ТЕР11-01-007-01

241

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,0714

ТССЦ-408-0122

242

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,013630,05*27,26/100

ТССЦ-402-0071

Раздел 39. Здание лит "В", Первый этаж. Лестница

243

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,06146,14 / 100

ТЕР11-01-007-01

244

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,0161

ТССЦ-408-0122

245

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,003070,05*6,14/100

ТССЦ-402-0071

Раздел 40. Здание лит "В", Второй этаж. Сан.узел

246

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,0848,4 / 100

ТЕР11-01-007-01

247

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,022

ТССЦ-408-0122

248

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,00420,05*8,4/100

ТССЦ-402-0071

Раздел 41. Здание лит "В", Второй этаж. Кабинет начальника факультета

249

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,088 / 100

ТЕР15-02-019-03

250

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

кг

0,80,1*8

ТССЦ-101-4163

251

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,088 / 100

ТЕР15-04-005-01

Раздел 42. Здание лит "В", Второй этаж. Кабинет начальника факультета. Сан. узел

252

Затирка поверхности

100 м2 затирки

0,02842,84 / 100

ТЕР11-01-007-01

253

Песок природный для строительных работ средний

м3

-0,0074

ТССЦ-408-0122

254

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая

т

0,001420,05*2,84/100

ТССЦ-402-0071

Раздел 43. Здание лит "В", Второй этаж. Кабинет заместителя начальника факультета

255

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтуса

0,128212,82 / 100

ТЕРр57-3-1

256

Разборка покрытий полов: из ламината

100 м2 покрытия

0,09939,93 / 100

ТЕРр57-2-7

257

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,09939,93 / 100

ТЕР11-01-011-01

258

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0,09939,93 / 100

ТЕР11-01-034-04

259

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

0,128212,82 / 100

ТЕР11-01-040-03

Раздел 44. Прочие работы

260

Очистка помещений от строительного мусора

100 т мусора

0,022923(0,7346+2,2897-0,732) / 100

ТЕРр69-9-1

261

Затаривание строительного мусора в мешки

1 т

3,02430,7346+2,2897

ТЕРр69-15-1

262

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

2,29230,7346+2,2897-0,732

ТССЦпг01-01-01-041

263

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза

1 т груза

2,29230,7346+2,2897-0,732

ТССЦпг03-21-01-020

Качество материалов и выполненных работ должно соответствовать следующим нормативно-правовым актам и стандартам:

1. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

3. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы".

4. СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

5. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

6. СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных".

7. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

8. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае неисполнения ответчиком обязательства по устранению выявленных дефектов в сроки, установленные судом, взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>)  в пользу Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН 

<

***>)  общую сумму в размере 637 097, 30 руб. за работы по устранению выявленных недостатков.

2. В целях побуждения к своевременному исполнению пункта 1 настоящего решения и компенсации за ожидание соответствующего исполнения присудить Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Краснодарский университет МВД»,  г. Краснодар (ОГРН 

<

***>) с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>)  денежную компенсацию в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта до полного исполнения судебного акта либо до начала осуществления истцом соответствующих действий по устранению недостатков за счет ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород,   в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>)  в пользу Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет МВД», г. Краснодар (ОГРН 

<

***>) понесенных расходов в размере 141 342, 84 руб.

4. Взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж», г. Белгород (ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 240 руб.

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший решение.

      Судья                                                                                                   К.Н. Кондратов