28/2019-37519(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-47597/2018

г. Новосибирск

25 февраля 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Доволенская  средняя общеобразовательная школа № 2 имени С.И.Лазарева (ОГРН  

<

***>), с. Довольное Новосибирской области  

к обществу с ограниченной ответственностью "Аккорд" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

об обязании устранить недостатки или взыскании 507 743 рублей,  при участии:  

от истца: не явился, извещен; от ответчика: ФИО1 (паспорт, доверенность от 10.01.2019), 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Аккорд" в срок до  01.04.2019 устранить недостатки работ, выполненных в рамках  муниципального контракта № Ф.2017.333728 от 07.08.2017, а именно:  

1. Недостаточно укреплены 4 дверные блока в каменных стенах  (требуется усилить дополнительными нагелями дверные коробки).  

2. Устранить не схождение дверных полотен двух створчатой двери входа  в спортивный зал.  

3. Заменить вышедшей из строя дверной замок с ключевиной. 

4. Заделать отверстия между дверными коробками и кирпичной стеной  монтажной пеной.  

5. Выполнить отделочные работы по периметру дверных коробок и  откосов.  

6. Заменить вышедшие из строя деревянные плинтуса в спортивном зале  в объеме 12 метров.  

7. Устранить разрушения в штрабе по низу стены за отопительной  трубой. Выполнить все отделочные работы с подбором колера около 4 м.  

8. Устранить вздутия (подъем основания) под спортивном линолеумом в  5 местах с закреплением саморезами и нагелями.  

9. Исправить и заменить вышедшею из строя плитку керамогранит в  коридоре прохода в спортивный зал.  

10. Восстановить облицовку стен глазурованной керамической плиткой  14,8 м" с частичной заменой вышедшей из строя плитки (около 4.5 м").  

11. Произвести усиление обрешетки элементов ограждения отопления в  спортзале с добавлением деревянных брусков 20x30-40 мм 20 метров.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аккорд" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 6 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья О.В. Суворова