Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

03 июня 2019 годаДело № А56-38552/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» (190000, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 76, ОГРН:  1027810227686)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Северо-Запад» (199004, Санкт-Петербург, линия 1-я В.О., д. 38, лит. Б, пом. 1Н, ОГРН:  1107847082254)

о взыскании 112 646 руб. 25 коп. неустойки за период с 11.12.2017 по 29.12.2017 на основании контракта от 20.09.2017 № 24/ЗП-17, 

ответчик представил отзыв на исковое заявление, однако отзыв и документы, приложенные к отзыву, относятся к контракту № 13/ЗП-17, в то время как предметом настоящего спора является контракт № 24/ЗП-17,

оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства с учетом отсутствия доводов, касающегося исполнения контракта  № 24/ЗП-17, нет,

суд учитывает, в акте обследования от 29.12.2017, на который ссылается истец в обоснование расчета неустойки, указано, что визуальный осмотр земельного участка с фиксацией отсутствия нежилого здания произведен 27.12.2017,

поэтому суд считает, что неустойка подлежит начислению только до 27.12.2017,

по расчету суда размер неустойки за период с 11.12.2017 по 27.12.2017 составляет 100 788 руб. 75 коп.,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Северо-Запад» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» 100788 руб. 75 коп. неустойки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Северо-Запад» в доход федерального бюджета 3918 руб. государственной пошлины.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Рагузина П.Н.