АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 Дело № А43-7067/2025 

г.Нижний Новгород 18 июля 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-132), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шишкиным А.В.,   

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о понуждении исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии от истца: ФИО2 (доверенность от 20.03.2023 со сроком действия 3 года), 

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 03.03.2025 со сроком действия до 31.12.2026),  

от третьего лица: ФИО3 (доверенность от 03.03.2025 со сроком действия до 31.12.2026),  

в судебном заседании 07.07.2025 объявлялся перерыв в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ до 16.07.2025, до 18.07.2025,  

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (далее - ответчик):  

- об обязании исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № Н-5-7619/Л от 04.04.2024 - в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу,  

- о взыскании 30 924 руб. 36 коп. договорной неустойки за период с 18.08.2024 по 10.03.2025 и далее по день фактического исполнения обязательства,  

- о взыскании судебной неустойки; 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (привлечено к участию в деле в порядке части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ 16.07.2025).  

В свою очередь, ответчик пояснил, что задержка в исполнении обязательств по договору вызвана определенными организационными сложностями, в настоящее время  

им и подрядной организацией предпринимаются все возможные меры для исполнения обязательств по договору в кратчайшие сроки, в том числе, по согласованию проектной документации сети газопотребления, представленной заявителем 05.05.2025, т.е. в пределах срока подключения (технологического присоединения), установленного в технических условиях (с учетом изменения) – июнь 2025 года. Также ответчик, с учетом заявления истца о продлении срока действия технических условий, поданного 24.12.2024, т.е. по истечении срока, указанного в пункте 3 договора, полагает требование истца об уплате договорной неустойки необоснованным – поскольку срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), несмотря на не подписание истцом дополнительного соглашения к договору, также продлен до июня 2025 года.  

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Между истцом (заявитель), ответчиком (исполнитель) и ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) заключен договор № Н-5-7619/Л от 04.04.2024, в соответствии с которым исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства (нежилое здание) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, кадастровый номер 52:18:0070052:968, и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации обязуется обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.  

Согласно пункту 11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 67 674 руб. 11 коп. Этим же пунктом установлен порядок оплаты (поэтапно); первый платеж (50%) - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора.  

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 135 дней, т.е. до 19.08.2024 (включительно) – с учетом абзаца 2 пункта 3 договора, статей 191, 193 Гражданского кодекса РФ.  

Согласно пункту 4 договора исполнитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения (технологического присоединения); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, установленного пунктом 3 договора; осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).  

Пунктом 11 технических условий № Н-5-7619/2024/Л от 25.03.2024, являющихся неотъемлемой частью договора и действующих 135 дней со дня заключения договора (пункт 2 договора, пункт 14 технических условий), предусмотрены следующие обязательства исполнителя: проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения (с указанием количественных и  

качественных характеристик) до точки подключения – на границе земельного участка по адресу: 

<

...> (с указанием количественных и качественных характеристик).  

Согласно пункту 16 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

Согласно пункту 17 договора в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) нарушившая сторона обязуется уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения договора, и платы за подключение (технологическое присоединение) за каждый день просрочки.  

Согласно пункту 19 договора стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

Согласно пункту 32 договора заявитель вправе при нарушении исполнителем установленного договором срока подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

Согласно пункту 33 договора исполнитель вправе при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), за исключением мероприятий по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

Любые изменения, вносимые в договор, действительны лишь при условии их оформления в письменной форме – в виде дополнительного соглашения к договору, подписанного сторонами (пункт 34 договора). Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, по решению суда либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством (пункт 35 договора).  

Во исполнение условий договора истец произвел оплату за подключение (технологическое присоединение) в сумме 33 837 руб. 06 коп. (платежное поручение № 229 от 26.04.2024).  

Поскольку в установленный договором срок мероприятия по подключению (технологическому присоединению) ответчиком выполнены не были, истцом в адрес ответчика была направлена соответствующая претензия от 06.02.2025, в том числе с требованием об уплате неустойки, которая оставлена последним без удовлетворения (ответ на претензию от 26.02.2025).  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с данным исковым заявлением.  

Изучив материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд приходит к следующим выводам.  

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.  

Согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.  

Как разъяснено в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума № 7), согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или  

договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.  

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.  

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.  

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.  

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения, установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила подключения (технологического присоединения)).  

Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, заключаемого между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. Указанный договор является публичным.  

По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения; заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.  

Согласно пункту 71 Правил подключения (технологического присоединения) мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).  

Согласно пункту 61 Правил подключения (технологического присоединения) мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 данных Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 данных Правил).  

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Факт оплаты за подключение (технологическое присоединение) истцом доказан.  

Доказательств выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) до точки подключения, предусмотренных пунктом 11 технических условий № Н-5-7619/2024/Л от 25.03.2024, ответчиком не представлено – согласно пояснениям ответчика, данным в ходе судебного разбирательства, проектно-изыскательские работы и необходимые согласования выполнены подрядчиками ответчика 09.06.2025 (акт приема-передачи № А36), к выполнению строительно-монтажных работ (строительство (реконструкция) сети газораспределения до точки подключения) подрядчик ответчика приступил 09.07.2025, ориентировочный срок выполнения работ – 2 месяца.  

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по выполнению обязательств, предусмотренных договором о подключении (технологическом присоединении).  

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума № 7, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).  

Согласно подпункту «и» пункта 52 Правил подключения (технологического присоединения) договор о подключении должен содержать условие об обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.  

Как следует из материалов дела, мероприятия по подключению (технологическому присоединению), указанные в технических условиях, должны были быть выполнены сторонами и пуск газа должен был быть осуществлен в срок до 19.08.2024.  

В связи с тем, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению), входящие в зону ответственности ответчика, последним к указанному сроку выполнены не были (заявка на выполнение проектно-изыскательских работ в адрес ООО «СтройТех» от 08.04.2024, письмо ООО «ГрандТехноСтрой» о необходимости дополнительных согласований от 10.07.2024, получение дополнительного согласования от 26.08.2024), а истец не утратил интерес к исполнению договора, 24.12.2024 истец обратился к ответчику с заявлением о продлении срока действия технических условий, которые ответчиком были продлены до июня 2025 года (изменения к техническим условиям № Н-5-7619/2024/Л от 25.03.2024); в этой связи ответчиком в адрес истца было направлено дополнительное соглашение к договору № Н- 

5-7619/Л от 04.04.2024 о продлении срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуска газа до июня 2025 года, которое истцом получено – 06.02.2025 (согласно информации с официального сайта Почты России), но не подписано.  

Согласно пункту 53 Правил подключения (технологического присоединения) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 данных Правил) 135 дней - для заявителей первой категории.  

Согласно пункту 54 Правил подключения (технологического присоединения) если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории предусматривают особенности, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на: 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории может быть продлен не более чем на 70 дней.  

В случае если указанные в данном пункте обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору о подключении об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).  

С инициативой заключения дополнительного соглашения к договору об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) ответчик ранее, до получения заявления истца от 24.12.2024, не обращался.  

Согласно пункту 56 Правил подключения (технологического присоединения) при невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце 1 пункта 69 данных Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.  

Согласно пункту 58 Правил подключения (технологического присоединения) в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 данных Правил).  

Для продления указанного срока заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).  

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного предложения направляет заявителю подписанный со стороны исполнителя проект дополнительного соглашения к договору о подключении, которым продлевается срок осуществления  

мероприятий по подключению (технологическому присоединению), осуществляемых исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 61 данных Правил.  

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать 6 месяцев - для заявителей первой категории.  

Заявитель в случае направления исполнителем предусмотренного абзацем 3 данного пункта проекта дополнительного соглашения к договору о подключении на бумажном носителе подписывает 3 экземпляра такого проекта дополнительного соглашения в течение 10 рабочих дней со дня его получения от исполнителя и направляет в указанный срок 2 экземпляра исполнителю.  

Предусмотренное данным пунктом продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не является нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленного пунктом 53 данных Правил, если предусмотренный данным пунктом порядок такого продления соблюден заявителем.  

Анализ вышеуказанных и иных нормативных положений позволяет прийти к выводу о том, что Правила подключения (технологического присоединения) разграничивают понятия «срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению)» (пункт 3 договора) и «срок действия технических условий» (пункт 14 технических условий, пункт 7 договора).  

24.12.2024, т.е. спустя 4 месяца после истечения срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленного договором, истец обратился с заявлением о продлении срока действия технических условий – в отсутствие доказательств надлежащего выполнения ответчиком своей части мероприятий по подключению (технологическому присоединению), которое ответчиком одобрено. С инициативой продления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанного в договоре, заявитель не обращался; дополнительное соглашение к договору № Н-5-7619/Л от 04.04.2024, инициированное ответчиком, истцом не подписано.  

Из Правил подключения (технологического присоединения) не следует возможность продления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в одностороннем порядке – по инициативе исполнителя, нарушившего срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) (пункт 35 договора).  

Факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком (нарушение установленного пунктом 3 договора срока – 19.08.2024) судом установлен; следовательно, начисление договорной неустойки и требование о ее взыскании, в том числе по день фактического исполнения обязательства (пункт 65 Постановления Пленума № 7), является правомерным.  

По расчету суда, неустойка за период с 20.08.2024 по 10.03.2025 составляет 30 772 руб. 77 коп.  

Истцом также заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 3 000 руб. за первый день неисполнения решения суда с ежедневным увеличением на 100 руб. за каждый последующий день неисполнения решения суда.  

В свою очередь, ответчик полагает данный размер неустойки завышенным. 

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).  

Как разъяснено в пункте 31 Постановления Пленума № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).  

Как разъяснено в пункте 32 Постановления Пленума № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.  

Суд полагает разумным установить дифференцированный размер судебной неустойки, соразмерный последствиям предполагаемого нарушения обязательства и не противоречащий обычно устанавливаемому судом по такого рода требованиям.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны; в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

Судебные расходы, понесенные истцом и состоящие из государственной пошлины, относятся на ответчика частично.  

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № Н-5-7619/Л от 04.04.2024, заключенный с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), в частности: осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения; обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 30 772 руб. 77 коп. неустойки, неустойку за период с 11.03.2025 по день фактического исполнения обязательства – рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, равной 16%, и платы в размере 67 674 руб. 11 коп., 24 950 руб. государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

В случае неисполнения решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в следующем размере:  

- с 1 по 30 день неисполнения судебного акта – 1 000 руб. за каждый день просрочки,  

- начиная с 31 дня неисполнения судебного акта - 3 000 руб. за каждый день просрочки.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение Арбитражного суда Нижегородской области может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Решение Арбитражного суда Нижегородской области может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба, кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Нижегородской области.  

Судья Е.В.Белянина