Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-5421/2021

г. Рязань

30 мая 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 23 мая 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 30 мая 2022 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Ушаковой И.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (г.Рязань, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к муниципальному предприятию "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани (г.Рязань, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки по договору №РТС262А180159 от 31.01.2019 в сумме 748917,39руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 12.01.2022;

от ответчика: ФИО3 - представитель по доверенности от 16.08.2021;

установил:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с муниципального предприятия "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани неустойки по договору №РТС262А180159 от 31.01.2019 в сумме 748917,39руб. 

Определением суда от 15.07.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

В материалы дела от ответчика 31.08.2021 поступило заявление об уменьшении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, до 100000 руб. 

Определением суда от 01.09.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В материалы дела 19.05.2022 от ответчика поступило заявление о признании исковых требований, в соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в сумме 618822 руб. 64 коп., исходя из представленного истцом перерасчета неустойки  с учетом уточненных дат представления ответчиком актов выполненных работ (т.3л.д.32) и исключением  расчета неустойки по строке №23 на сумму 6269,10руб. согласно представленным в дело уведомлениям об окончании работ (т.2л.д.49). По указанному расчету (т.3л.д.32) с учетом  уведомлений об окончании работ (т.2л.д.49) у сторон спора нет.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика поддержал поступившее в материалы дела заявление о признании исковых требований в части неустойки в размере 618822 руб. 64 коп. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (Заказчик) и муниципальным предприятием "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани (Подрядчик) 31.01.2019 заключен договор №РТС262А180159 (Д) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (т.1, л.д. 62-66, далее - договор), по условиям которого в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и средствами, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее - объекты) по адресам и видам работ, указанным в Приложении №1 (п. 1.1 договора).   

Пунктом 2.1 договора установлено, что общая стоимость услуг и (или) работ по договору определяется сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 92538243 руб. 70 коп. с учетом НДС по ставке, установленной п.3 ст. 164 НК РФ. 

Стоимость по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме указана в приложениях № 1 и № 2.

Пунктом 3.1 договора установлено, что датой начала выполнения работ является дата, указанная в письменном уведомлении Заказчика. Дата окончания выполнения работ: не позднее 01 августа 2019 года.

01.08.2019 сторонами подписано дополнительное соглашение №7 (№РТС262А180159 (Д-7) к договору (т.1, л.д. 79), согласно которому стороны пришли к соглашению о продлении сроков выполнения работ: не позднее 01 декабря 2019 года (по выборочным адресам согласно Приложению №1 к дополнительному соглашению, т.3, л.д. 25-26) в связи с приостановкой выполнения работ по капитальному ремонту, связанной с недопуском собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации.

 06.12.2019, 10.12.2019, 20.12.2019, 29.12.2019, 30.12.2019 сторонами подписаны дополнительные соглашения №№ 36, 38, 40, 41, 42  к договору, согласно которым стороны пришли к соглашению об изменении локальных смет на капитальный ремонт системы ХВС дома по адресу: 

<

...>; на капитальный ремонт системы электроснабжения дома по адресу: 

<

...>. 

В графике оказания услуг и (или) выполнения работ установлены сроки этапов услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме (Приложение № 3 к договору).

Пунктом 5.1.18 договора установлено, что подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором в соответствии со сметной документацией, и сдать объект рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Пунктом 9.2 договора предусмотрено, что в случае каждого нарушения сроков отдельных этапов услуг и (или) работ, указанных в графике оказания услуг и (или) выполнения работ (Приложение № 3), подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту (указанной в приложении №1) того объекта, по которому нарушены сроки оказания услуг и (или) выполнения работ. Неустойка уплачивается в указанном размере за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства.

Как указал истец, ответчиком с нарушением установленного срока выполнены следующие работы: 

1) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 10.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 131 день (с 02.08.2019 по 10.12.2019);

2) по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 06.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 5 дней (с. 02.12.2019 по 06.12.2019);

3) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 06.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 5 дней (с 02.12.2019 по 06.12.2019);

4) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 06.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 5 дней (с 02.12.2019 по 06.12.2019);

5)  по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 6, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 70 дней (с 09.10.2019 по 17.12.2019);

6) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 16 дней (с 02.12.2019 по 17.12.2019);

7) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 16 дней (с 02.12.2019 по 17.12.2019);

8) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 16 дней (с 02.12.2019 по 17.12.2019);

9) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 138 дней (с 02.08.2019 по 17.12.2019);

10) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 138 дней (с 02.08.2019 по 17.12.2019);

11) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 20.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 141 день (с 02.08.2019 по 20.12.2019);

12) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 20.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 141 день (с 02.08.2019 по 20.12.2019);

13) по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 17.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 5 дней (с 02.08.2019 по 17.12.2019);

14) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 29.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 28 дней (с 02.12.2019 по 29.12.2019);

15) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 29.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 28 дней (с 02.12.2019 по 29.12.2019);

16) по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 30.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 29 дней (с 02.12.2019 по 30.12.2019);

17) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 30.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 29 дней (с 02.12.2019 по 30.12.2019);

18) по пуско-наладочным работам автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 30.12.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 29 дней (с 02.12.2019 по 30.12.2019);

19) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 19.08.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 19 дней (с 02.08.2019 по 19.08.2019);

20) по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 19.10.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 3 дня (с 09.10.2019 по 11.10.2019);

21) по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 11.10.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 3 дня (с 09.10.2019 по 11.10.2019);

22) по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 15.10.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 7 дней (с 09.10.2019 по 15.10.2019);

23) по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 16.10.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 8 дней (с 09.10.2019 по 16.10.2019);

24) по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 1 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 16.10.2019, нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 8 дней (с 09.10.2019 по 16.10.2019);

25) по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 29.10.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 21 день (с 09.10.2019 по 29.10.2019);

26) по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 01.11.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 24 дня (с 09.10.2019 по 01.11.2019);

27) по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, акт о приемке выполненных работ подписан 12.11.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 35 дней (с 09.10.2019 по 12.11.2019);

28) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: г, Рязань, ул. Горького, д. 18 к. 1, акт о приемке выполненных работ подписан 13.11.2019, нарушение сроков выполнения работ составило 104 дня (с 02.08.2019 по 13.11.2019).

Претензии истца о добровольной уплате неустойки в общей сумме 748917 руб. 39 коп. за просрочку выполнения работ оставлены ответчиком без удовлетворения (т.1, л.д. 18-61).

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования частично, арбитражный суд исходит из следующего.

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Из материалов дела следует, что обязательства сторон возникли из договора №РТС262А180159 (Д) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 31.01.2019, который является договором подряда, правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 ГК РФ, а также общими нормами об обязательственных отношениях и договорах.

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 740 ГК РФ предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (статьей 753 ГК РФ).

Из содержания статьи 708 ГК РФ следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 9.2 договора предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в виде уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту того объекта, по которому нарушены сроки оказания услуг и (или) выполнения работ, за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства. 

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно условиям договора работы должны быть выполнены в сроки, установленные в Приложении № 3 к договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ ответчиком не оспаривается.

Не соглашаясь с расчетом неустойки, ответчик полагает неправомерным начисление неустойки по день официального подписания актов выполненных работ, указывая на необоснованное затягивание истцом периода принятия работ.

Согласно пункту 1 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 6.2.2 договора, по завершении работ, предусмотренных техническим заданием, проектной (при ее наличии), сметной документацией и договором подрядчик нарочно, с сопроводительным письмом, не позднее чем за 15 календарных дней до предусмотренного договором срока окончания оказания услуг и (или) выполнения работ, предоставляет на проверку заказчику акты о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны в 5-ти экземплярах, с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. 

Заказчик в течение 15 календарных дней проверяет соответствие объемов работ, указанных в актах о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) фактически выполненным объемам, требованиям технического задания, проектной (при ее наличии) сметной документации, а также правильность применения сметных нормативов при определении стоимости выполненных работ. 

В случае отсутствия замечаний, лицо уполномоченное заказчиком, ставит отметку о проверке и возвращает подрядчику четыре экземпляра для согласования актов о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма № КС-2) с органами местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений. 

При наличии несоответствий подрядчику направляется уведомление с указанием замечаний и сроков их устранения. 

После устранения замечаний в сроки, указанные в уведомлении заказчика, подрядчик нарочно, с сопроводительным письмом, повторно предоставляет заказчику акты о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по каждому виду услуг и (или) работ в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны в 5 экземплярах, с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. 

Устранение замечаний, выявленных заказчиком в документации и на объекте при проверке акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (форма №КС-2), не является основанием для продления срока оказания услуг и (или) выполнения работ, указанного в пункте 3.1 договора.

При этом, как разъяснил Верховый Суд Российской Федерации в определении от 15.10.2019 по делу №305-ЭС19-12786 условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств по отдельным этапам как дату подписания заказчиком акта сдачи выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ.

Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного контрактом срока после поступления отчетной документации не отменяет право головного исполнителя выполнить работу в течение предусмотренного ведомостью исполнения срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на приемку работ.

Таким образом, при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

Учитывая изложенное, при определении периода просрочки, следует принимать во внимание даты получения истцом уведомлений ответчика об окончании проведения работ с приложением актов формы КС-2, справок формы КС-3, локальных смет, актов уточненных видов и объемов работ:

1) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 03.12.2019;

2) по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 22.11.2019 (нет просрочки);

3) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 22.11.2019 (нет просрочки);

4) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 22.11.2019 (нет просрочки);

5)  по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 6 - 05.12.2019;

6) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 09.12.2019;

7) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 10.12.2019;

8) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 10.12.2019;

9) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 06.12.2019;

10) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 06.12.2019;

11) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> 12.12.2019;

12) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 12.12.2019;

13) по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 06.12.2019;

14) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 26.12.2019;

15) по установке коллективного прибора учета потребления холодной воды многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 26.12.2019;

16) по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 26.12.2019;

17) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 26.12.2019;

18) по пуско-наладочным работам автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 27.12.2019;

19) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 19.08.2019;

20) по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 04.10.2019 (нет просрочки);

21) по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 07.10.2019 (нет просрочки);

22) по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 11.10.2019;

23) по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - нет просрочки с учетом уведомления  от 03.10.2019 (т.2л.д.49,59);

24) по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 1 

<

...> - 10.10.2019;

25) по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 11.10.2019;

26) по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 30.10.2019;

27) по капитальному ремонту подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - 07.11.2019;

28) по капитальному ремонту системы ХВС многоквартирного дома, расположенного по адресу: г, Рязань, ул. Горького, д. 18 к. 1 - 07.11.2019.

Как указал ответчик, ссылаясь на сложившиеся между сторонами деловые отношения, данные документы представляются подрядчиком без проставления даты их составления, которая в последующем проставляется Фондом после проверки данных, содержащихся в актах. Указанное обстоятельство истцом в ходе рассмотрения дела не оспорено. 

При изложенных обстоятельствах суд считает, что датой окончания работ является дата передачи ответчиком истцу актов о приемке выполненных работ с исполнительной документацией.

Данная позиция суда согласуется с судебной практикой Двадцатого арбитражного апелляционного суда по делам №А54-5423/2021, №А54-2932/2018, № А54-2125/2018, № А54-201/2019, № А54-2393/2018 по аналогичным спорам.

Таким образом, расчет неустойки следует производить со следующего дня после дня окончания выполнения работ, установленного договором, по день передачи ответчиком истцу актов о приемке выполненных работ и исполнительной документации.

Согласно альтернативному арифметическому расчету (составлен истцом без изменения размера исковых требований), общий размер неустойки, рассчитанной по день передачи ответчиком истцу актов о приемке выполненных работ и исполнительной документации составил 625091 руб. 74 коп. (т. 3, л.д. 32-33), с учетом уведомления  от 03.10.2019 (т.2л.д.49,59) - 618822,64руб.

 Ответчик в ходе рассмотрения дела, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), признал исковые требования в общем размере 618822 руб. 64 коп., исходя из представленного истцом альтернативного расчета неустойки (за исключением суммы неустойки, начисленной за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>).

Согласно части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 

В соответствии с частью 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Рассмотрев заявление ответчика, арбитражный суд принимает признание иска, исходя из того, что признание иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Представленный истцом альтернативный расчет неустойки проверен судом и признан выполненным арифметически верно, за исключением расчета неустойки, необоснованно произведенного за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> - с 09.10.2019 по 11.10.2019, поскольку представленным в материалы дела письмом ответчика о направлении в адрес истца документов по капитальному ремонту указанного объекта подтверждается их получение последним 03.10.2019. Таким образом, просрочка выполнения работ по указанному объекту отсутствует. Обоснованный размер неустойки составляет 618822 руб. 64 коп.

Ответчиком заявление о применении статьи 333 ГК РФ и снижении размера неустойки не поддержано.

Таким образом, исковые требования о взыскании неустойки являются обоснованными и подлежат удовлетворению в признанной ответчиком сумме 618822 руб. 64 коп. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. На основании пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

С учетом вышеуказанных положений, частичного удовлетворения исковых требований и признания ответчиком неустойки в обоснованном размере, расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в размере 4456 руб.; истцу из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина сумме 10399 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

                                                РЕШИЛ:

1. Взыскать с муниципального предприятия "Ремонтно строительное управление №1" города Рязани (ОГРН 

<

***>, 390026, 

<

...>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) неустойку в сумме 618822 руб. 64 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4456 руб.

В остальной части заявленного требования отказать. 

2. Возвратить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10399 руб., уплаченную по платежному поручению №6520 от 09.06.2021. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Судья И.А. Ушакова