АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А82-2793/2021

г. Ярославль

06 августа 2021 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат "Смоленский" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   3934199.00  руб.,

при участии:

от истца - не явился

от ответчика - не явился

от третьего лица – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат "Смоленский" о взыскании   3934199.00  руб.

Определением арбитражного суда Ярославской области от 10.06.2021 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТК" Белогорский".

Истец в заседание не явился, извещен.

Ответчик в заседание не явился, извещен, направил ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствии представителя, в ходе судебного рассмотрения спора направил отзыв на иск, против удовлетворения иска возражал, указав, что между обществом с ограниченной ответственностью ТК «СМОЛЕНСКИЙ» и обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ АГРОТИП» договор строительного подряда №29/18 от 28.09.2018. Заказчик принял без замечаний выполненные Подрядчиком работы. Дополнительным соглашением к Договору строительного подряда №29/18 от 28.09.2018 г. ООО ТК «Смоленский» и ООО «ПКФ АГРОТИП» пришли к соглашению о зачете сумм встречных однородных требований, срок которых наступил в размере 1111 712,00 (Один миллион сто одиннадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. После проведения зачета: задолженность по Договору строительного подряда №29/18 от 28.09.2018 г. ООО ТК «Смоленский» перед ООО «ПКФ АГРОТИП» погашена полностью; задолженность по договору генерального строительного подряда №50/17 от 12.02.2018 г. и Договора цессии от 25.10.2018 г. ООО «ПКФ АГРОТИП» перед ООО ТК «Смоленский» погашена частично и составляет 5 265 499,00 рублей. Также между сторонами был заключен Договор строительного подряда №30/18 от 28.09.2018. Заказчик  принял без замечаний выполненные Подрядчиком работы. Дополнительным соглашением к Договору строительного подряда №30/18 от 28.09.2018 г. ООО ТК «Смоленский» и ООО «ПКФ АГРОТИП» пришли к соглашению о зачете сумм встречных однородных требований, срок которых наступил в размере 2 834 199 (Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. После проведения зачета: задолженность по Договору строительного подряда №30/18 от 28.09.2018 г.) ООО ТК «Смоленский» перед ООО «ПКФ АГРОТИП» погашена полностью; задолженность по договору генерального строительного подряда №50/17 от 12.02.2018 г. и Договора цессии от 25.10.2018 г. ООО «ПКФ АГРОТИП» перед ООО ТК «Смоленский» погашена частично и составляет 2 431 300,00 рублей. Таким образом, указал, что общая сумма заложенности по договору генерального строительного подряда №50/17 от 12.02.2018 г. (с учетом заключенного Договора цессии от 25.10.2018 г.), ООО «ПКФ АГРОТИП» перед ООО ТК «Смоленский» составляет 2 431 300,00 рублей.

Третье лицо в заседание не явилось, извещено.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

28.09.2018 г. между обществом с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат "Смоленский" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" /Подрядчик/ заключен договор строительного подряда № 29/18, согласно п.п. 1.1, 5.1, 5.1, 6.1 которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок с использованием материалов Подрядчика выполнить строительные работы: на монтаж внешних электросетей к вспомогательным сооружениям № 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7 по ГП при Строительстве Тепличного комбината «Смоленский» по адресу: Смоленская область, г. Рославль, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену. Срок начала выполнения работ – в течение 3 рабочих дней с даты выполнения Заказчиком перед Подрядчиком следующих обязательств: перечисление авансового платежа, предусмотренного п.п. 6.3.1 настоящего договора и выполнение п. 3.1.11 настоящего договора. В случае неодновременного исполнения обязательств Заказчиком, дата начала выполнения работ будет считаться наиболее поздняя дата исполнения из указанных обязательств Заказчика. Срок окончания выполнения работ – не позднее 60 календарных дней с даты начала выполнения работ, предусмотренной п. 5.1 настоящего договора. Стороны согласовали общую стоимость выполнения работ в размере 1 111 712 руб., в том числе НДС 18%.

26.10.2018 г. стороны подписали дополнительное соглашение к договору согласно п. 1 которого пункт 6.3 договора изложен в следующей редакции: «Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на условиях 100% предоплаты, оплата должна быть осуществлена в срок до 04.10.2018 г. Стороны пришли к соглашению произвести оплату по Договору путем зачета взаимных требований по Договору строительного подряда № 29/18 от 28.09.2018 г.) ООО "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" является кредитором, ООО ТК «Смоленский» является должником. Сумма задолженности составляет 1 111 712 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

28.09.2018 г. между обществом с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат "Смоленский" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" /Подрядчик/ заключен договор строительного подряда № 30/18, согласно п.п. 1.1, 5.1, 5.1, 6.1 которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок с использованием материалов Подрядчика выполнить строительные работы: работы по строительству наружных сетей водопровода и канализации на объекте Тепличный комплекс «Смоленский» по адресу: Смоленская область, г. Рославль, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену. Срок начала выполнения работ – в течение 3 рабочих дней с даты выполнения Заказчиком перед Подрядчиком следующих обязательств: перечисление авансового платежа, предусмотренного п.п. 6.3.1 настоящего договора и выполнение п. 3.1.11 настоящего договора. В случае неодновременного исполнения обязательств Заказчиком, дата начала выполнения работ будет считаться наиболее поздняя дата исполнения из указанных обязательств Заказчика. Срок окончания выполнения работ – не позднее 60 календарных дней с даты начала выполнения работ, предусмотренной п. 5.1 настоящего договора. Стороны согласовали общую стоимость выполнения работ в размере 2 834 199 руб., в том числе НДС 18%.

27.10.2018 г. стороны подписали дополнительное соглашение к договору согласно п. 1 которого пункт 6.3 договора изложен в следующей редакции: «Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на условиях 100% предоплаты, оплата должна быть осуществлена в срок до 04.10.2018 г. Стороны пришли к соглашению произвести оплату по Договору путем зачета взаимных требований по Договору строительного подряда № 30/18 от 28.09.2018 г.) ООО "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" является кредитором, ООО ТК «Смоленский» является должником. Сумма задолженности составляет 2 834 199 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

Во исполнение условий заключенных договоров истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность по договору строительного подряда № 29/18 от 28.09.2018 г. в размере 1 100 000 руб., по договору строительного подряда № 30/18 от 28.09.2018 г. в размере 2 834 199 руб.

Указывая на отсутствие оплаты выполненных работ, истец направил в адрес ответчика претензию № П646/19 от 08.11.2019 г., в которой потребовал оплатить задолженность.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Исходя из положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу ч.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

По смыслу приведенной нормы зачет взаимных требований - форма безналичных взаиморасчетов предприятий, организаций, при которой взаимные обязательства и требования должников и кредиторов погашаются в равновесных суммах, а оплачивается лишь разница.

Как следует из правовой позиции, изложенной в пунктах 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» гражданское законодательство не предусматривает возможности восстановления правомерно и обоснованно прекращенных зачетом обязательств при отказе от сделанного стороной заявления о зачете. В то же время зачет как односторонняя сделка может быть признан судом недействительным по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Как указывает ответчик, после проведения зачета: задолженность по Договору строительного подряда №29/18 от 28.09.2018 г. ООО ТК «Смоленский» перед ООО «ПКФ АГРОТИП» погашена полностью; задолженность по договору генерального строительного подряда №50/17 от 12.02.2018 г. и Договора цессии от 25.10.2018 г. ООО «ПКФ АГРОТИП» перед ООО ТК «Смоленский» погашена частично и составляет 5 265 499,00 рублей. Договор строительного подряда №30/18 от 28.09.2018 (далее - Договор №30/18). Сумма зазадолженности по договору генерального строительного подряда №50/17 от 12.02.2018 г. (с учетом заключенного Договора цессии от 25.10.2018 г.), ООО «ПКФ АГРОТИП» перед ООО ТК «Смоленский» составляет 2 431 300,00 рублей.

Таким образом, учитывая, что одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (статья 2 АПК РФ), а в рассматриваемом случае истец, избрав способ защиты права в виде взыскания стоимости выполненных работ, не доказал факта нарушения со стороны ответчика своих прав и законных интересов, суд не находит правовых и фактических оснований для удовлетворения настоящего иска о взыскании задолженность по договору строительного подряда № 29/18 от 28.09.2018 г. в размере 1 100 000 руб., по договору строительного подряда № 30/18 от 28.09.2018 г. в размере 2 834 199 руб.

В силу ст. 110 АПК РФ госпошлина подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма АГРОТИП" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 42 671,00 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Лапочкина И.М.