900109550_33849376 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-178817/22-134-997

г. Москва

15 ноября 2022 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г.  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:  

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМТЕК» (117556,  ГОРОД МОСКВА, ФРУКТОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, ОФИС 5, ОГРН: 1047797013373,  Дата присвоения ОГРН: 22.12.2004, ИНН: 7710568658)  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АА  СИСТЕМЫ» (603057, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД,  НАРТОВА ПЕРЕУЛОК, ДОМ 2Г, ОФИС 10, ОГРН: 1155260006285, Дата присвоения  ОГРН: 06.05.2015, ИНН: 5260409482)  

о взыскании неотработанного аванса в размере 1 000 000 руб., неустойки согласно п.  11.11 Договора субподряда № 25-10/21 от 25.10.2021 по состоянию на 10.11.2022 в  размере 75 205,48 рублей; неустойки за период с 11.11.2022 по день фактической  уплаты неотработанного аванса истцу в размере двойной ключевой ставки,  установленной Банком России на день выплаты аванса (7,50% годовых), от суммы  неотработанного аванса.  

о взыскании неустойки за нарушение начального срока выполнения работ по  состоянию на 16.11.2021 согласно п. 11.3 Договора субподряда № 25-10/21 от  25.10.2021 в размере 420 000 рублей 00 копеек.  

о взыскании суммы неустойки в виде штрафов за нарушение срока назначения  ответственного представителя за исполнение Договора, а также срока предоставления  оригинала доверенности или надлежащим образом заверенной копии (п. 7.1.1., 11.5  Договора) в общем размере 100 000 рублей 00 копеек.  

о взыскании суммы неустойки за нарушение срока разработки и предоставления  Генеральному подрядчику на утверждение детального графика выполнения Работ (п.  6.1 Приложения № 3 к Договору «Требования к графикам и отчетности») в размере 582  000 рублей 00 копеек.  

о взыскании суммы неустойки в виде штрафа за заключение договора с  несогласованным Генподрядчиком третьим лицом (пп. «в» п. 8 приложения № 4 к  Договору) в размере 100 000 рублей 00 копеек, с учетом уточнений принятых в порядке  ст. 49 АПК РФ  

при участии в судебном заседании:  

от истца: Миткалева Е.И. (паспорт, доверенность № б/н от 07.09.2022 г., диплом);  от ответчика: не явился, извещен;  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АА Системы» (ИНН:  5260409482) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Амтек» (ИНН:  7710568658) неотработанный аванс в размере 1 000 000 руб., неустойку в размере  75 205, 48 руб., неустойку, начисленную на сумму неотработанного аванса (1 000 000  руб.), начиная с 11.11.2022 до фактического исполнения обязательства, исходя из  двойной ключевой ставки Банка России, неустойку за нарушение начального срока  выполнения работ в размере 420 000 руб., штраф в размере 100 000 руб., неустойку в  размере 582 000 руб., штраф в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 34 386 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Амтек» (ИНН:  7710568658) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 201 руб.,  уплаченную по платежному поручению № 1509 от 18.08.2022 г.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е.В. Титова