АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

06 сентября 2017 года

Дело № А33-478/2017

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 04.09.2017.

В полном объёме решение изготовлено 06.09.2017.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сысоевой О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строй групп" (ИНН 7727611728, ОГРН 5077746703623, дата государственной регистрации - 23.04.2007, место нахождения: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, этаж 3, комната 11, офис В) к обществу с ограниченной ответственностью "МИРПГС" (ИНН 2464058004, ОГРН 1042402524757, дата государственной регистрации -11.11.2004, место нахождения: 660079,  г. Красноярск, ул. Затонская. д. 32, офис 417) 

о взыскании неосновательного обогащения, процентов,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "МИРПГС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации -11.11.2004, место нахождения: 660079, 

<

...>, офис 417) к обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строй групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации - 23.04.2007, место нахождения: 107564, 

<

...>, этаж 3, комната 11, офис В) 

о взыскании упущенной выгоды, 

при участии: от истца (по первоначальному иску): ФИО1 - представителя по доверенности от 10.08.2017, от ответчика (по первоначальному иску): ФИО2, представителя по доверенности от 01.01.2017, ФИО3, представителя по доверенности от 20.02.2017,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Львович О.Б.,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Строй групп" (далее – истец, ООО СК «Строй Групп») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МИРПГС" (далее – ответчик, ООО «МИРПГС») о взыскании основного долга в размере 703 645,36 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 100 951,54 руб.

Определением от 11.10.2016 заявление принято к производству Арбитражного суда города Москвы, делу присвоен № А40-201384/16-12-1275. Определением от 28.11.2016 дело № А40-201384/16-12-1275 передано по подсудности в Арбитражный суд Красноярского края. Определением от 16.01.2017 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Красноярского края. 

25.01.2017 от общества с ограниченной ответственностью "МИРПГС" поступило встречное исковое заявление о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строй групп" 40 310 335,79 рублей упущенной выгоды. Определением от 26.01.2017 встречное исковое заявление оставлено без движения до 20.02.2017. Определением суда от 21.02.2017 встречное исковое заявление принято к производству суда.

Представитель истца по первоначальному иску в судебном заседании 04.09.2017 заявил об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МИРПГС" 703 645,36 руб. основного долга, 105 001,45 руб. процентов, начисленных в соответствии со ст.ст. 317.1, 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ по день фактической оплаты основного долга, расходы по уплате государственной пошлины. Представители ответчика против принятия уточнений не возражали. Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточненные требования. Дело рассматривается с учетом принятого уточнения.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО СК «Строй Групп» и ООО «МИРПГС» заключен контракт от 01.10.2015 № СП-2.150.7738/9 на выполнение работ на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение механо-сборочного и корпусного производства. Этап 2» (в редакции дополнительного соглашения от 29.02.2016 № 1), на основании пункта 2.1. которого подрядчик обязуется выполнить работы на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение механо-сборочного и корпусного производства. Этап 2.» в соответствии с локальными сметными расчетами № 1-14 (Приложение № 1 к Контракту), в установленный контрактом срок, а генподрядчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Место выполнения работ: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 (пункт 2.2. контракта).

На основании пункта 4.2. контракта оплата  за  выполненные  работы  на  объекте  осуществляется  путем  перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика с расчетного счета генподрядчика. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета генподрядчика.

Согласно пункту 4.3. контракта генподрядчик выплачивает подрядчику аванс в следующем порядке: 10% от стоимости контракта в течение 3-х (трех) банковских дней с даты подписания отчета о мобилизации (Приложение № 4) на основании графика мобилизации (Приложение № 3); 20% от стоимости контракта в адрес организаций-поставщиков, по распорядительным письмам подрядчика с приложением счетов от организаций-поставщиков материалов и оборудования.

Оплата в адрес организации-поставщика производится  на основании письменной заявки подрядчика следующего содержания:  «Прошу оплатить счет №___от___, выставленный ООО (ОАО)___на приобретение оборудования или материалов. Указанную сумму, перечисленную в адрес организации-поставщика   прошу   считать   в   качестве   авансового   платежа   по   контракту   № ___от___» (т.е. по настоящему контракту). При оплате материалов или оборудования за третье лицо генподрядчик в платежном поручении указывает сведения:

- номер и дату счета, выставленного организацией-поставщиком;

- оплата производится за подрядчика по заявке №от___.

Определение стоимости выполненных работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту) будет производиться сторонами на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (пункт 4.4. контракта).

В соответствии с пунктом 4.6. контракта оплату за выполненные работы генподрядчик проводит в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставления счета, счета-фактуры, оформленной в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ при условии принятия работ и что работы выполнены надлежащим   образом,   с   соответствующим   качеством   и   в   срок,   согласованный   с генподрядчиком. Счета выставляются за вычетом стоимости выплаченных авансовых платежей, предусмотренных п. 4.3. настоящего контракта в размере 30 (тридцати) % от стоимости выполненных работ.

На основании пунктов 4.7.-4.9. контракта оплата выполненных подрядчиком работ производится генподрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом контракта до предела, не превышающего 95 (девяносто пять)% от цены контракта. Оставшаяся часть в размере 5% от цены контракта является обеспечительным взносом и выплачивается подрядчику при окончании сроков гарантий качества, предусмотренных разделом 12 контракта. Окончательный расчет по контракту производится в течение 45 (сорока пяти) дней с момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.7. контракта и выставления подрядчиком счета и счета-фактуры. Документы на оплату выполненных работ передаются подрядчиком генподрядчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются подрядчику заказным письмом.

Срок окончания выполнения работ - 25 июня 2016 г. 

Согласно пункту 6.1.2. контракта генподрядчик обязался передать до начала производства работ подрядчику в установленном порядке, на период строительства объектов, строительную площадку по акту передачи строительной площадки, площадку для складирования мусора, проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу в электронном виде, рабочую документацию (в электронном виде), геодезическую разбивочную основу с закрепленными на местности знаками этой основы (в случае необходимости), порубочный билет (в случае необходимости).

Стороны согласовали в пунктах 7.3.2.-7.3.3 контракта, что подрядчик вправе в соответствии с п. 6.1.2 запрашивать недостающую проектную документацию, связанную с непосредственным исполнением обязательств по контракту. В случае если генподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней, не предоставляет недостающую проектную документацию, подрядчик вправе остановить работы на участке с отсутствием запрашиваемой документации. 

Подрядчик обязан до приобретения оборудования, необходимого подрядчику для выполнения работ по контракту, согласовать с генподрядчиком номенклатуру, технические характеристики и стоимость его приобретения (пункт 7.4.6. контракта). 

Подрядчик обязан по требованию генподрядчика представить информацию о стоимости используемых при выполнении работ материалов и оборудования и информацию о соответствии их качества требованиям, установленным в проектной и/или рабочей документации. Выполнить своими силами в пределах проектной и рабочей документации, указанной в контракте, на территории строительной площадки все временные здания и сооружения и временные инженерные коммуникации, необходимые для выполнения работ по контракту (пункт 7.4.11. контракта).

На основании пункта 8.1. контракта подрядчик в рамках цены контракта разрабатывает и согласовывает с генподрядчиком план производства работ в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта. Очередность выполнения работ должна быть соблюдена в соответствии с проектом организации строительства. После согласования плана производства работ подрядчик передает один его экземпляр генподрядчику.

Согласно пункту 10.3. контракта работы, выполненные подрядчиком с нарушением требований СНиП, с отступлением от требований проектной документации, действующих строительных норм и правил, в справку формы КС-3 и в акт формы КС-2 не включаются и генподрядчиком не принимаются.

На основании пункта 14.1. контракта стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с гражданским и иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

В случае не соблюдения подрядчиком условий пункта 7.4.6. контракта, генподрядчик вправе не принимать приобретенное оборудование и требовать закупки согласованного оборудования, при этом расходы на приобретение такого оборудования подрядчику не компенсируются (пункт 14.4. контракта).

Согласно пункту 14.17. контракта генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по контракту в случае, если подрядчик отстает от сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней.

Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств (пункт 16.2. контракта).

На основании пунктов 16.4.-16.5. контракта при расторжении контракта до завершения работ подрядчик возвращает генподрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства и  незавершенный строительством объект и представляет генподрядчику документы, подтверждающие стоимость выполненных работе а также освобождает строительную площадку и предаёт генподрядчику проектную, рабочую и исполнительную документацию. Оплата работ, выполненных подрядчиком после вручения подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также возмещение убытков генподрядчиком не производятся.

В случае если до даты одностороннего расторжения контракта подрядчик непередал генподрядчику выполненные объемы работ по контракту, рабочую иисполнительную документацию, материалы и оборудование, генподрядчик вправесамостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ и услуг (пункт 16.6. контракта).

Согласно пункту 19.1. контракта срок его действия – до 25.08.2016.

01.10.2015 сторонами подписан акт о передаче-получении проектной документации по контракту, акт приема-передачи строительной площадки.

Истец платежным поручением № 66 от 20.11.2015 перечислил аванс по договору в размере 1000 000 рублей ответчику.

Сторонами подписаны акты выполненных работ от 15.06.2016 № 1-2 на сумму 216 859,22 рублей, № 1-3 на сумму 46 726,82 рублей, № 1-1 на сумму 32 768,6 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.06.2016 на сумму 296 354,64 рублей.  

Уведомлением от 22.07.2016 № 611 истец сообщил ответчику о расторжении договора и заявил требование возвратить аванс в размере 703 645,36 рублей в течение 10 календарных дней в связи с просрочкой выполнения работ. Уведомление получено 09.08.2016.

В связи с тем, что аванс не возвращен ответчиком, работы не выполнены, истец обратился в суд с настоящим иском требованием взыскать неосновательное обогащение, проценты. 

Ответчик по первоначальному иску обратился в суд с уточненным встречным иском с требованием о взыскании 35 156 633,99 рублей упущенной выгоды, исходя из сметной стоимости контракта (41 373 422,79 руб.) минус стоимость оборудования (5 873 531 руб.) и средства на оплату труда (343 257,80 руб.).

Ответчик ссылается на то, что, несмотря на неоднократное обращение с требованием предоставить проектную документацию, рабочую документацию, внести изменения в локально-сметный расчет, предупреждения о том, что работы будут приостановлены, генподрядчик на письма не отвечал и затягивал выполнение контракта. Ответчик также указал, что за время действия контракта ООО «МИРПГС» несмотря на приостановку работ было вынуждено платить заработную плату своим работникам, все сотрудники были вынуждены являться на объект.

Ответчик также указал, что согласно отчета об использовании полученных средств от 11.02.2016 авансовый платеж был реализован в размере 1 428 508,37 руб., ООО «МИРПГС» понес затраты из собственных средств в размере 428 508.37 РУБ.

Ответчик представил в материалы дела переписку сторон, из которой следует следующее.

19.11.2015 письмом № 67 подрядчик обратился к заказчику о том, что для выполнения работ необходима информация – план существующих инженерных сетей, согласованные точки врезок для организации временных сетей, план демонтажных работ, аксонометрические схемы проектируемых сетей.

Копии чертежей на существующие инженерные сети  корпуса № 80 переданы подрядчику по акту приема-передач 02.12.2015.

23.11.2015 письмом № 69 подрядчик обратился к заказчику с просьбой оплатить счет № 00000014794 от 20.11.2015 на приобретение материалов и указанную сумму считать в качестве авансового платежа по контракту.

07.12.2015 подрядчик обратился к заказчику письмом № 71 о том, что подрядчик вынужден приостановить выполнение строительно-монтажных работ с 07.12.2015 ввиду отсутствия согласованного с отделом № 106 (заводоуправление) плана демонтажных труб существующих инженерных сетей, отсутствия оплаты счета №  00000014794 от 23.11.2015.

Письмом от 24.12.2015 № 75 подрядчик обратился к заказчику с просьбой согласовать замену холодильной машины.

03.02.2016 подрядчик обратился к заказчику письмом № 8 с перечнем вопросов по проектно-сметной документации.

Письмом № 9 от 03.02.2016 подрядчик обратился к заказчику с просьбой оплатить счет № Ц000-002501 от 03.02.2016, выставленный ООО «Промснаб» на приобретение материалов, указанную сумму в счете считать в качестве авансового платежа по контракту.

Письмом от 12.02.2016 № 11 подрядчик направил заказчику дополнительное соглашение от 01.10.2015 с локально сметным расчетом № ДС2 с просьбой подписать и вернуть в течение 10 дней. 

Письмом от 29.02.2016 № 16/1 подрядчик обратился к заказчику с просьбой оплатить счет № 092 от 02.02.2016, выставленный ООО ТД «КДМ» на приобретение материалов, и сумму считать авансовым платежом по контракту.

 Письмом от 09.03.2016 исх. № 20 подрядчик обратился к заказчику о том, что подрядчик вынужден приостановить выполнение строительно-монтажных работ с 18.02.2016 ввиду отсутствия технических решений и согласований на вопросы указанные в письмах № 67 от 19.11.2015 и № 8 от 03.02.2016.

Письмом № 21 от 09.03.2016 подрядчик направил заказчику на подпись акты выполненных работ  от 09.03.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 09.03.2016, счет-фактуру № 00000003 от 09.03.2016, дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.10.2015, сметный расчёт № ДС1.

Письмом от 17.03.2016 № 22 подрядчик обратился к заказчику с просьбой согласовать замену безнапорных труб ливневой канализации К2 находящиеся вше отметки 0,000.

Письмом № 23 от 21.03.2016 подрядчик направил заказчику акты освидетельствования скрытых работ, реестр исполнительной документации за март 2016 года.

Письмом № 29 от 06.04.2016 подрядчик направил заказчику дополнительные соглашения № 4,5 к договору с локальными сметными расчетами.

Письмом № 30 от 06.04.2016 подрядчик направил заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат от 01.04.2016, акты о приемке выполненных работ от 01.04.2016 № 1,2,3, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 05.04.2016, акты о приемке выполненных работ от 05.04.2016 № 5,6,7,8. 

Заказчик в ответ на письмо № 30 от 06.04.2016 сообщил, что документы не могут быть рассмотрены, так как в них указаны работы, не предусмотренные сметной документацией, согласно условиям контракта. 

07.04.2016 подрядчик письмом № 31 направил заказчику акт освидетельствования скрытых работ и реестр исполнительной документации за апрель 2016 года.

Письмом от 11.04.2016 № 32 подрядчик обратился к заказчику с предложением внести изменения в проект № 7738-РТП.2/2015-ВК.1.

18.04.2016 письмом № 35 подрядчик направил заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат от 01.04.2016, от 05.04.2016, акт о приемке выполненных работ от 01.04.2016, от 05.04.2016.

26.04.2016 письмом № 42 подрядчик направил заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат от 26.04.2016, акт о приемке выполненных работ от 26.04.2016, акт освидетельствования скрытых работ и реестр исполнительной документации по системе водоотведения. 

Письмом от 06.05.2016 № 240-КР заказчик представил ответ на письма подрядчика от 26.04.2016 № 42, 18.04.2016 № 35 о том, что представленные в актах объемы не соответствуют фактически выполненным работам и исполнительным схемам, фактически работы по отдельным позициям не выполнены, не представлены документы, указаны недостатки работ по актам выполненных работ.

19.07.2016 заказчик направил подрядчику письмо № 402-КР о том, что подрядчиком нарушены требования контракта, просил выполнить мероприятия, предусмотренные контрактом.

  22.07.2016 письмом № 611 заказчик в связи с просрочкой выполнения работ по контракту на 57 дней, уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, требовал возвратить 703 645,36 рублей аванса. 

Истец по первоначальному иску представил отзыв на встречное исковое заявление, согласно которому возражает против удовлетворения встречных исковых требований на основании следующего:

- обязанность генподрядчика передать план демонтажных работ контрактом не предусмотрена;

- подрядчик приостановил работы письмом от 07.12.2016 необоснованно так, как предоставление заказчиком плана демонтажных работ не предусмотрено контрактом;

- подрядчик не отчитался надлежащим образом об использовании предоставленного аванса и документально не обосновал и не подтвердил расходы в связи с исполнением контракта;

- в акте сверки от 30.06.2016 стороны зафиксировали задолженность подрядчика в сумме 703 645,36 руб.;

- подрядчик не подтвердил использование аванса на выплату заработной платы, не подтвердил, что соответствующее количество работников присутствовало и выполняло работы на строительной площадке в период с октября 2015 по май 2016;

- подрядчик не подтвердил довод о том, что им было завезено оборудование и инструменты на сумму 936 360 руб.;

- подрядчик не обосновал необходимость изменения условий контракта, локально-сметного расчета и продолжил исполнять контракт после уведомления о приостановлении работ по контракту без согласия генподрядчика внести изменения. Причиной неполучения дохода по контракту является ненадлежащее исполнение обязательств по контракту самого подрядчика;

- подрядчик не представил соответствующих доказательств получения писем генеральным подрядчиком, а также доказательств отправки писем почтой.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Между истцом и ответчиком заключен контракт, являющийся по своей правовой природе договором подряда.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. При этом обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

Истец платежным поручением № 66 от 20.11.2015 перечислил аванс по договору в размере 1000 000 рублей ответчику.

Материалами дела подтверждается, что работы выполнены на сумму 296 354,64 рублей. Сторонами подписаны акты выполненных работ от 15.06.2016 на сумму 216 859,22 рублей, 46 726,82 рублей, 32 768,6 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.06.2016 на сумму 296 354,64 рублей.  

 22.07.2016 письмом № 611 заказчик в связи с просрочкой выполнения работ по контракту на 57 дней, уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, требовал возвратить 703 645,36 рублей аванса.

Согласно пункту 14.17. контракта генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по контракту в случае, если подрядчик отстает от сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней.

Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств (пункт 16.2. контракта).

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации. если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Контрактом от 01.10.2015 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 29.02.2016) срок окончания выполнения работ 25.06.2016.

Доказательств, подтверждающих, что к указанному сроку работы выполнены подрядчиком в полном объеме, не представлено.

Ссылка ООО «МИРПГС» на то, что работы приостанавливались судом отклоняется.

Как следует из представленной ответчиком переписки, 07.12.2015 подрядчик обратился к заказчику письмом № 71 о том, что подрядчик вынужден приостановить выполнение строительно-монтажных работ с 07.12.2015 ввиду отсутствия согласованного с отделом № 106 (заводоуправление) плана демонтажных труб существующих инженерных сетей, отсутствия оплаты счета №  00000014794 от 23.11.2015.

В то же время, доказательств, подтверждающих, что генеральный подрядчик сообщал подрядчику о необходимости продолжения работ не представлено. Из представленной переписки следует, что работы подрядчиком были фактически продолжены.

Кроме того, согласно пункту 6.1.2. контракта генподрядчик обязался передать до начала производства работ подрядчику в установленном порядке, на период строительства объектов, строительную площадку по акту передачи строительной площадки, площадку для складирования мусора, проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу в электронном виде, рабочую документацию (в электронном виде), геодезическую разбивочную основу с закрепленными на местности знаками этой основы (в случае необходимости), порубочный билет (в случае необходимости).

Пункты 7.3.2., 7.3.3. предоставляют подрядчику право приостановки работ в случае отсутствия необходимой проектной документации, однако не указывают на возможность приостановления работ в связи с отсутствием плана демонтажных работ. При этом согласно пункту 8.1. контракта обязанность по разработке и согласованию с генподрядчиком плана производства работ возложена на субподрядчика.

Пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

На основании абзаца 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Истец обоснованно квалифицировал заявленную к взысканию с ответчика сумму, со ссылкой на нормы статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве неосновательного обогащения.

По правилам части 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что истец предъявил ответчику требование о возврате денежных средств, в отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок, у ответчика в настоящее время основания для удержания спорной суммы отсутствуют. 

В данной ситуации, в силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, у ответчика возникло обязательство по возврату полученных средств истцу.

Ответчик заявил довод о том, что авансовый платеж был использован на покупку оборудования на сумму 936 360 рублей, на выплату заработной платы на сумму 3 490 500 рублей.

Согласно представленного отчета об использовании полученных средств от 11.02.2016,  расходы составили: 152543,37 руб. – НДС, 60000 руб.-мобилизационные мероприятия, 30734 руб. накладные расходы, ФОТ - 943200 руб., остаток средств на конец отчетного периода:      - 428 508,37 рублей.

В то же время ООО «МИРПГС» не представлены первичные документы, подтверждающие факт несения указанные расходов в указанном размере (платежные поручения и т.д.) и их обоснованность.

Возражения ООО СК «Строй Групп» об отсутствии документального подтверждения сведений, указанных в отчете  об использовании полученных средств от 11.02.2016,  в том числе доводов о фактическом количестве работников и их присутствии на объекте, о выплате заработной платы, проведении мобилизационных мероприятий, расходов на покупку оборудования, признаются судом обоснованными.

Определениями от 07.04.2017, 10.05.2017, 31.05.2017, 13.06.2017, 09.08.2017 суд предлагал ответчику, представить дополнительные доказательства, в том числе, документы, подтверждающие расходы, отраженные в отчете об использовании полученных средств. Указанные доказательства не представлены.

Кроме того, условиями контракта установлено, что подрядчик обязан до приобретения оборудования, необходимого подрядчику для выполнения работ по контракту, согласовать с генподрядчиком номенклатуру, технические характеристики и стоимость его приобретения (пункт 7.4.6. контракта). 

В случае не соблюдения подрядчиком условий пункта 7.4.6. контракта, генподрядчик вправе не принимать приобретенное оборудование и требовать закупки согласованного оборудования, при этом расходы на приобретение такого оборудования подрядчику не компенсируются (пункт 14.4. контракта).

Ответчик не представил доказательств согласования с заказчиком номенклатуры, технических характеристик и стоимости приобретения оборудования.

Пунктом 4.3. контракта установлен порядок выплаты генподрядчиком подрядчику аванса, предусматривающий, в том числе, оплату в адрес организаций-поставщиков по распорядительным письмам подрядчика с приложением счетов от организаций-поставщиков материалов и оборудования. Распорядительные письма в дело не представлены.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ответчиком не представлено надлежащих доказательств использования и расходования денежных средств, полученных в качестве аванса.

Кроме того, контрактом установлено, что при расторжении контракта до завершения работ подрядчик возвращает генподрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства и незавершенный строительством объект и представляет генподрядчику документы, подтверждающие стоимость выполненных работе а также освобождает строительную площадку и предаёт генподрядчику проектную, рабочую и исполнительную документацию. Оплата работ, выполненных подрядчиком после вручения подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также возмещение убытков генподрядчиком не производятся (пункты 16.4.-16.5. контракта).

На основании вышеизложенного, учитывая, что ответчик не представил доказательств исполнения обязательств по договору или доказательств возврата полученных от истца денежных средств, а также доказательств, подтверждающих расходование аванса в соответствии с условиями договора, суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика 703 645,36 руб. неосновательного обогащения. 

Истец также просит суд взыскать с ответчика 105 001,45 руб. процентов, начисленных в соответствии со ст.ст. 317.1, 395 ГК РФ (54 374,38 рублей процентов, начисленных в соответствии со 395 ГК РФ за период с 20.08.2016 по 30.05.2017, 50 627,07 рублей процентов, начисленных в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ за период с 24.11.2015 по 31.07.2016), проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ по день фактической оплаты основного долга. Ответчик контррасчет не представил, расчет не оспорил.

На основании пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии  с пунктом  1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 31.05.2015,  за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Согласно Указанию Центрального банка Российской Федерации от 13.09.2012 № 2873-У действующей ставкой являлась ставка 8,25 процентов.

В силу  положений  пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса  Российской Федерации в редакции, действующей с 01.06.2015, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению по существующим в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованным Банком России и имевшим место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Согласно сведениям Центрального банка Российской Федерации  о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц по Сибирскому федеральному округу  в  период с 01.06.2015 действовали следующие ставки: с 01.06. 2015 - 10,89 %, с 15.06.2015- 10,81 %, с 15.07.2015 - 9,89 %, с 17.08.2015 - 9,75%, с 15.09.2015 - 9,21 %, с 15.10.2015 - 9,02 %, с 17.11.2015 - 9%, с 15.12.2015 - 7,18%, с 01.01.2016 - 7,18%, с 25.01.2016 - 7,81%, с 19.02.2016 - 9%, с 17.03.2016 - 8,81%, с 15.04.2016 -8,01%, с 19.05.2016 - 7,71%, с 16.06.2016 - 7,93%, %, с 15.07.2016 – 7,22%. 

В соответствии  с пунктом  1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей после 01.08.2016, в  случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно информации Центрального банка Российской Федерации ключевая ставка Банка России составляет с 14.06.2016 – 10,5 % годовых, с 19.09.2016 – 10% годовых, с 27.03.2017 – 9,75% годовых, с 02.05.2017 – 9,25% годовых, с 19.06.2017 – 9% годовых.

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, суд установил, что расчет произведен в соответствии с изложенными выше правилами, с учетом фактических обстоятельств дела, арифметически верен.

Истец на основании положений статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации начислил ответчику 50 627,07 руб. процентов за период с 23.11.2015 по 31.07.2016.

Проценты за период пользования денежными средствами, начисленные на основании статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, представляют собой плату, взимаемую с должника по правилам об уплате долга. Соотношение статей 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации выступает как соотношение основного обязательства (ст. 317.1) и ответственности за неисполнение денежного обязательства (ст. 395), что допускает возможность их совместного применения. Норма статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации введена в действие с 01.06.2015 (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 42-ФЗ). Правоотношения сторон возникли из контракта, заключенного 01.10.2015. 

Следовательно, к спорным правоотношениям подлежит применение положений статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что в отличие от процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не являются мерой ответственности, а представляют собой плату за пользование денежными средствами.

Истец просит взыскать проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 23.11.2015 по 31.07.2016.

В соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на дату заключения контракта, из которого возникли правоотношения сторон), если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (законные проценты).

Учитывая, что материалами дела подтвержден факт пользования денежными средствами истца, применяя во внимание, что контракт от 01.10.2015 не исключает начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ, требование истца о взыскании с ответчика процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации является обоснованным. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с 31.05.2017 по день фактической уплаты долга истцу. 

В пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем.

Поскольку денежное обязательство до вынесения решения по настоящему делу не исполнено, требования о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму всю долга, начиная с 31.05.2017, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга подлежат удовлетворению.

С учётом изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном истцом размере.

Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения встречных исковых требований на основании следующего.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами, в том числе, путем возмещения убытков.

В соответствии с положениями статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из положения статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер убытков. Кроме того, такое лицо должно доказать, что принимало все зависящие от него меры для предотвращения (уменьшения) убытков. Недоказанность одного из названных условий влечет за собой отказ суда в удовлетворении требования о взыскании убытков.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

В обоснование поданного встречного иска, истец ссылается на то, что подрядчик не смог выполнить условия контракта в полном объеме по вине заказчика, ссылаясь в подтверждение своих доводов на переписку сторон.

Согласно пункту 6.1.2. контракта генподрядчик обязался передать до начала производства работ подрядчику в установленном порядке, на период строительства объектов, строительную площадку по акту передачи строительной площадки, площадку для складирования мусора, проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу в электронном виде, рабочую документацию (в электронном виде), геодезическую разбивочную основу с закрепленными на местности знаками этой основы (в случае необходимости), порубочный билет (в случае необходимости).

Стороны согласовали в пунктах 7.3.2.-7.3.3 контракта, что подрядчик вправе в соответствии с п. 6.1.2 запрашивать недостающую проектную документацию, связанную с непосредственным исполнением обязательств по контракту. В случае если генподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней, не предоставляет недостающую проектную документацию, подрядчик вправе остановить работы на участке с отсутствием запрашиваемой документации. 

Пунктом 16.5. контракта стороны согласовали, что оплата работ, выполненных подрядчиком после вручения подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также возмещение убытков генподрядчиком не производятся.

На основании статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Истец по встречному иску ссылается на то, что заказчиком не передана необходимая информация для работ по контракту, ссылаясь на письмо от 19.11.2015 № 67, согласно которому подрядчик обратился к заказчику о том, что для выполнения работ необходима информация – план существующих инженерных сетей, согласованные точки врезок для организации временных сетей, план демонтажных работ, аксонометрические схемы проектируемых сетей. Копии чертежей на существующие инженерные сети  корпуса № 80 переданы подрядчику по акту приема-передач 02.12.2015.

В то же время, заключенным контрактом не предусмотрена передача заказчиком документации, указанной в письме от 19.11.2015 № 67.

07.12.2015 подрядчик обратился к заказчику письмом № 71 с сообщением о том, что подрядчик вынужден приостановить выполнение строительно-монтажных работ с 07.12.2015 ввиду отсутствия согласованного с отделом № 103 (заводоуправление) плана демонтажных труб существующих инженерных сетей, отсутствия оплаты счета №  00000014794 от 23.11.2015.

Однако в материалы дела представлены письма, содержания которых опровергают факт приостановления работ. Письмом от 24.12.2015 № 75 подрядчик обратился к заказчику с просьбой согласовать замену холодильной машины. 03.02.2016 подрядчик обратился к заказчику письмом № 8 с перечнем вопросов по проектно-сметной документации. Письмом № 9 от 03.02.2016 подрядчик обратился к заказчику с просьбой оплатить счет № Ц000-002501 от 03.02.2016, выставленный ООО «Промснаб» на приобретение материалов, указанную сумму в счете считать в качестве авансового платежа по контракту. Письмом от 12.02.2016 № 11 подрядчик направил заказчику дополнительное соглашение от 01.10.2015 с локально сметным расчетом № ДС2 с просьбой подписать и вернуть в течение 10 дней.  Письмом от 29.02.2016 № 16/1 подрядчик обратился к заказчику с просьбой оплатить счет № 092 от 02.02.2016, выставленный ООО ТД «КДМ» и сумму считать авансовым платежом по контракту.

Из писем следует, что подрядчик продолжил выполнение работ по контракту, не получив указаний заказчика о продолжении работ. Таким образом, подрядчик не доказал наличие препятствий, затрудняющих выполнение работ, и послуживших причиной нарушения сроков выполнения работ.

Кроме того, письмом от 09.03.2016 исх. № 20 подрядчик вновь обратился к заказчику о том, что подрядчик вынужден приостановить выполнение строительно-монтажных работ с 18.02.2016 ввиду отсутствия технических решений и согласований на вопросы указанные в письмах № 67 от 19.11.2015 и № 8 от 03.02.2016.

В то же время, письмом от 17.03.2016 № 22 подрядчик обратился к заказчику с просьбой согласовать замену безнапорных труб ливневой канализации К2 находящиеся вше отметки 0,000. 

Дальнейшая переписка сторон также опровергает приостановление работ по контракту, что свидетельствует о принятии подрядчиком на себя всех рисков невозможности завершения работ в установленный срок. 

Подрядчик не обосновал и не представил доказательств, подтверждающих необходимость внесения изменений в условия контракта, локально-сметного расчета. Представленные письма подрядчика не являются доказательством фактического возникновения препятствий, затрудняющих выполнение работ. 

Суд приходит к выводу, что подрядчик не доказал наличие прямой причинно-следственной связи между действиями (бездействием) генерального подрядчика и нарушением сроков выполнения работ, по причине которых контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик не доказал, что нарушение сроков работ вызвано исключительно действиями (бездействием) генерального подрядчика, а не упущениями самого подрядчика, выразившимися, в том числе, в продолжении работ после заявления о их приостановке. Подрядчик не доказал, что выполнение работ в установленный срок было невозможным по причине непредставления указанной подрядчиком документации. Кроме того, подрядчик не доказал, что исполнение контракта в полном объеме со стороны подрядчика было возможным в случае продолжения действия контракта, а также не доказал, что его исполнение позволило бы подрядчику получить выгоду в заявленном размере, учитывая планируемые расходы на исполнение контракта, на уплату обязательных платежей и т.д.

В силу пункта 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении упущенной выгоды подлежат учету предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.  Таким образом, для удовлетворения иска о возмещении убытков в виде упущенной выгоды еще одним обязательным условием является доказанность совершения истцом всех необходимых действий для получения соответствующей выгоды и неполучения этой выгоды исключительно в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств. В пункте 3  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.

 В материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие, что подрядчиком совершены все необходимые с его стороны действия для исполнения договора в полном объеме, а также доказательства того, что единственным необходимым и достаточным препятствием, не позволившим подрядчику получить соответствующую выгоду, являлись действия (бездействие) генерального подрядчика. На основании изложенного, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении встречного иска. 

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина за рассмотрение первоначального искового заявления с учетом уточнения исковых требований составляет 19 173 руб. Истец уплатил 19 092 руб. платежным поручением от 19.09.2016 № 2699. С учетом результата рассмотрения первоначального иска  расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 092 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, 81 руб. (19173-19092) государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет.

Государственная пошлина за рассмотрение встречного иска с учетом уточнения требований о взыскании упущенной выгоды в размере 35 156 633,99 руб. составляет 198 783 руб. 

Согласно пункту 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Истцу по встречному иску при принятии встречного искового заявления к производству  была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. Следовательно, исходя из результатов рассмотрения дела, государственная пошлина подлежит взысканию с истца по встречному иску  в доход федерального бюджета. Всего с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 198 864 руб. (198783 +81) государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МИРПГС» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Строй Групп» (ОГРН 

<

***>) 703 645,36 руб. основного долга, 54 374,38 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.08.2016 по 30.05.2017, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 31.05.2017 по день фактического исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, 50 627,07 руб. процентов по статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 19 092 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска отказать

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МИРПГС» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 198 864 руб. государственной пошлины.

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.В. Сысоева