Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«13» апреля 2023 года Дело № А12-12509/2022  Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрел в судебном заседании дело по иску комитета транспорта и дорожного  хозяйства Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) о понуждении устранить дефекты.  

 Руководствуясь ст.ст. 110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  решил:  

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги» в  течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить принятые на  себя гарантийные обязательства по Государственному контракту № 164-19 от 03.06.2019  капитальный ремонт автомобильной дороги «Червленое-Калач-на-Дону» (до  автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский») км 52+000-км55+895 в  Калачевском районе по устранению выявленных дефектов, а именно:  

1. Устранить просадки а/б покрытия проезжей части - 58 м2;  

2. Устранить поперечные и продольные трещины ва/б покрытии проезжей части40 п.м.;  

3. Устранить просадки прикромочного водоотводного лотка - 124 п.м.; 4. Устранить просадки обочины и откосной части земляного полотна – 593 п.м.; 

5. Устранить просадки металлического барьерного ограждения - 333п.м.;  

6. Устранить просадки телескопических лотков на откосе земляного полотна55п.м.;  

7. Устранить просадки гасителя телескопического лотка в канаве - 10 м2;  8. Устранить просадки бетона водоотводной канавы - 20 м2;  

9. Восстановить омоноличивание бетоном георешетки на обочине в местах  выкрашивания (25 м2) и образования трещин (72 п.м.);  

10. Восстановить деформированный лестничный сход. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мосты и Дороги»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину в доход  федерального бюджета в размере 6 000 руб.  

 Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней с момента  принятия резолютивной части.  

 Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления  в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Волгоградской области.  

 Судья Попова Т.В.  Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.02.2023 11:19:00Кому выдана Попова Татьяна Владимировна