РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-12048/2018

г. Краснодар

16 января 2020 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Непранова Г.Г., 

руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Обязать Общество с ограниченной ответственностью строительная компания  "КУБАНЬПРОМСТРОЙ" в течение одного месяца со дня вступления в законную силу  настоящего решения устранить следующие дефекты работ, выполненных подрядчиком по  государственному контракту № 14-12 от 09.06.2012 на объекте «Универсальный спортивный  комплекс по ул. Орджоникидзе, 158Б в ст. Староминская»:  

1. Дефекты в виде течи оконных проемов в узлах примыкания оконных рам к  металлическому стеновому фахверку большого и малого спортивных залов и в виде течи  потолка в узлах примыкания оконных витражных рам к его поверхности в помещениях  вестибюля и коридоров, на объекте «Универсальный спортивный комплекс по  ул. Орджоникидзе, 158Б в ст. Староминская». Данные работы должны быть выполнены в  соответствии с требованиями п. 5.1.5., 5.1.10, А.1.6., А.3.4., Г.2.2., ГОСТа 30971-2012 «Швы  монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические  условия» при производстве монтажных работ.  

2. Дефекты в виде нарушения герметизации узлов примыкания вентиляционных  установок и конструктивных элементов крыши на объекте «Универсальный спортивный  комплекс по ул. Орджоникидзе, 158Б в ст. Староминская». Данные работы должны быть  выполнены в соответствии с требованиями п.6.4.21 СП 17.13330.2011 «Кровли» при  производстве работ по устройству кровли здания.  

3. Дефекты, в виде неправильно установленного уклона слива в душевых комнатах на  объекте «Универсальный спортивный комплекс по ул. Орджоникидзе, 158Б в  ст. Староминская». Данные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями  п.8.1., 8.4.4. СП 29.13330.2011 «Полы» в части отсутствия уклона полов при устройстве  стяжки, а также завышения установленных канализационных трапов относительно уровня  пола.  

4. Дефекты в виде отсутствия уклонов на поверхностях входных крылец здания на  объекте «Универсальный спортивный комплекс по ул. Орджоникидзе, 158Б в  ст. Староминская». Данные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями  п.6.5. СП 1 18.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». При этом, в соответствии с  требованиями п. 6.1.4. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для  маломобильных групп населения», в целях устранения выявленного дефекта достаточно  выполнить работы по устройству водоотвода талых и дождевых вод с поверхностей крылец  здания.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "КУБАНЬПРОМСТРОЙ" в пользу Администрации муниципального образования  Староминский район 156 700 руб. компенсации расходов на оплату судебной экспертизы.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "КУБАНЬПРОМСТРОЙ" в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края на  расчетный счет ООО "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>, КПП: 231101001) из средств поступивших по платежному поручению №  176 от 27.12.2018 сумму в размере 156 700 руб. в качестве оплаты за проведение судебной  экспертизы № 220/16.1 от 11.02.2019 по следующим реквизитам:  

р/с 

<

***> в ПАО «Сбербанк», г. Краснодар; к/с 30101810100000000602; БИК 040349602. 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня вынесения.  

Судья Непранов Г.Г.