Р Е Ш Е Н И Е

       Именем Российской Федерации

Дело № А40-42925/18-68-311

г. Москва

20 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 20 сентября 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе 

Судьи Абрамовой Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление по делу по иску ООО "ДОМ МАСТЕРА" (ИНН: 

<

***>, 620146, 

<

...>, оф 113)

к ООО "СК "УС-620" (ИНН: 

<

***>, 115054, 

<

...>, оф 2)

третье лицо: ЗАО СМУ-9 «Метрострой» (196233, 

<

...>)

о взыскании денежных средств

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 25.01.2018 №03/2018

от ответчика: ФИО3 по дов.  15.02.2018 №18-28/СК 

от третьего лица: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДОМ МАСТЕРА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "СК "УС-620" о взыскании задолженности по договору подряда № 22/7705/1 от 13.09.2016 в размере 10.631.342 руб. 60 коп., пени в размере 800.983 руб. 07 коп.

В качестве третьего лица, не заявившего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО СМУ-9 «Метрострой».

В судебном заседании представитель заявленные требования поддержал и просил удовлетворить в полном объеме. 

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал. Возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам отзыва.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

При указанных обстоятельствах дело рассмотрено в отсутствие третьего лица на основании ст. 156 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, отзыв и возражение на него, суд пришёл к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, между истцом - ООО «Дом Мастера» и ответчиком - ООО «СК «Управление строительства-620» был заключен договор строительного подряда № 22/7705/1 от 13.09.2016, согласно условиям которого истец обязался выполнить комплекс электромонтажных работ на Объекте: «работы по завершению строительства футбольного стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25».

В обоснование иска истец сослался на то, что в соответствие с п. 3.1. и п. 3.2. Договора цена работ определена расчетом цены Договора и должна быть откорректирована Подрядчиком после получения от Заказчика рабочей документации «в производство работ». Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением.

В соответствии с Приложением № 1 к Договору предварительная стоимость работ составляла 31 279 270 рублей.

Окончательная стоимость выполненных ООО «Дом Мастера» работ составила 14 581 342,6 руб.

24.11.2017 истец направил ответчику письмо исх. № 029 с предложением согласовать и подписать локальные сметные расчеты № 1, № 2, № 3 и № 4. от 23.01.2017 и Дополнительное соглашение №. 2 к Договору от 23.01.2017, в которых была указана окончательная стоимость работ, а также журнал учета выполненных работ (форма КС-6А). Данные документы ответчиком не подписаны.

Письмом исх. № 007-СПБ от 17.04.2017 истцом ответчику была передана исполнительная документация на выполненные работы.

Письмом исх. № 008-СПБ от 24.04.2017 ответчику были направлены для согласования и подписания Акты о приемке выполненных работ № 1, № 2, № 3, № 4 (форма КС-2) от 23.01.2017. и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (форма КС-3) от 23.01.2017. на общую сумму 14.581.342 руб. 60 коп. Данные документы ответчиком до настоящего времени не подписаны.

В соответствии с п. 3.7. Договора оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

Таким образом, обязанность по оплате выполненных работ у ответчика наступила 06.06.2017г.

Ответчиком был выплачен аванс истцу в размере 3 950 000 руб.

Согласно информации с сайта «Почта России» вышеуказанные Акты о приемке выполненных работ № 1, № 2, № 3, № 4 (форма КС-2) от 23.01.2017 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (форма КС-3) от 23.01.2017 получены ответчиком 05.05.2017.

В соответствии с п. 4.2. Договора Подрядчик обязан рассмотреть и подписать акты выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента их получения от Субподрядчика.

Согласно п. 5.10. Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается равным одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

На основании изложенного истец полагает, что он принятые на себя обязательства по договору выполнил в полном объеме  и работы произвел. Однако, ответчик в нарушении принятых на себя обязательств по договору оплату произвел частично, в связи с чем на стороне ответчика образовалась задолженность в заявленном размере. Кроме того, в соответствии с  п.5.10 договора истец произвел начисление пени в размере 800.983 руб. 07 коп. за период с 07.06.2017 по 01.03.2018.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик, ссылаясь на условия договора, указал на то, что выполнение работ было поручено истцу во исполнение государственного контракта от 19.08.2016 № 45/ЗП-16, заключенного между ответчиком и третьим лицом-  ЗАО СМУ-9 «Метрострой».

Между тем, поскольку работы истцом фактически не были выполнены в рамках договора № 22/7705/1 от 13.09.2016 и сорван срок сдачи работ, ЗАО СМУ-9 «Метрострой» обратилось к ООО «СК «Управление строительства-620» за расторжением договора (уведомление от 17.03.2017). В связи с этим, работы были выполнены самим ответчиком, и в настоящий момент он сдаче их 3-ему лицу.  

   Ответчиком в материалах дела представлен письменный отказ ООО «СК «УС-620» исх. №1261/СК от 23.05.2017 от подписания направленных документов ООО «Дом Мастера» таких как, справка о стоимости выполненных работ (КС-3 №1), акт о приемке выполненных работ №1 (КС-2 №1 по проекту ш. 15/137/12-ЭО1, отм. +20.250) акт о приемке выполненных работ №2 (КС-2 №2 по проекту ш.15/137/12-ЭМ.КК, отм. +10.200), акт о приемке выполненных работ №3 (КС-2 №3 по проекту ш.15/137/12-ЭМ, отм.+ 10.200), акт о приемке выполненных работ №4 (КС-2 №4 по проекту ш.15/137/12-Э01, отм, +10.200 в связи с ненадлежащим оформлением, не соответствием условиям договора и не подтверждением объема выполненных работ, а также почтовая опись и почтовая квитанция с почтовым идентификатором №117186060465225. 

В соответствии с п.2.4.2. Договора, Субподрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы согласно п. 1.2. Договора, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные договором, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

В соответствии с п.2.4.4. Договора, Субподрядчик обязан расходовать перечисленные Субподрядчику денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Подрядчику в соответствии с условиями Договора и по его письменному запросу отчет о целевом использовании полученных средств.

Во исполнение п.2.4.4. Договора Субподрядчиком не представлено Подрядчику отчет о расходовании полученных денежных средств, исполнительная документация, акты, отчеты, справки и д.р. подтверждающие объем выполненных работ и их целевое расходование.

В соответствии с п.3.10. Договора, Подрядчик по письменному запросу Субподрядчика, на основании счета, выставленного Субподрядчиком, вправе производить авансирование работ. Сумма погашения авансового платежа подлежит отражению отдельной строкой в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Погашение выданного аванса осуществляется в размере не менее 30 (тридцати) процентов от стоимости подлежащих оплате выполненных работ. В том числе материалов и оборудования путем удержания денежных средств из стоимости выполненных работ в отчетном периоде, подтвержденных актами по форме №КС-2 и справками по форме №КС-3. С отражением суммы погашаемого аванса отдельной строкой в справке по форме КС-3.

В соответствии с п.2.4.12. Договора, Субподрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ № КС-6а и своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствованных конструкций и акты на скрытые работы, извещения Заказчика, Генподрядчика и Подрядчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

В соответствии с п. 2.4.16. Договора, Субподрядчик обязан сдать весь объем работ, выполненный Субподрядчиком по настоящему Договору Подрядчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

Исполнительная документация, относящаяся к выполненным работам в адрес Подрядчика, не поступала. Соответствующих доказательств в подтверждение направления такой документации в материалы дела не представлено.

В соответствии с п. 2.4.20. Договора Субподрядчик обязан в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме направить Подрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

Субподрядчик не исполнил свое обязательство по уведомлению Подрядчика о готовности к завершению работ на объекте, в связи с чем, оснований для создания комиссии по приемке работ и оснований у Субподрядчика для составления односторонних актов по выполнению работ не возникло.

В соответствии с п.2.4.21. Договора, Субподрядчик обязался обеспечить своевременное ведение исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

В соответствии с п.2.4.22. передать Подрядчику полный комплект документов в шести экземплярах и в двух экземплярах в электронном виде в формате pdf, на выполненные объемы работ, не позднее 30 дней с момента завершения Работ.

Документов на выполненные объемы работ с момента завершения ни в адрес Подрядчика, ни в адрес Генподрядчика не поступало.

В соответствии с п.2.4.37. Договора, представлять Генподрядчику отчет по движению денежных средств на отдельном счете, открытом для осуществления расчетов по Договору за соответствующий отчетный период в течение 10 календарных дней после окончания отчетного периода.

В соответствии с п.2.5. Договора, одновременно с предоставлением Субподрядчиком работ для их приемки Подрядчиком, Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику всю исполнительную документацию.

Исполнительная документация в адрес Подрядчика не поступала, доказательств направления такой документации в материалы дела не представлено.

Представленные истцом в подтверждение этому письма не содержат указание на должностное лицо, принявшее такие документы.  

В соответствии с п. 3.1. Договора, цена работ по договору определяется Расчетом цены договора, приведенном в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью договора.

Согласно приложению №1 к Договору цена договора составляет 31 279 270 рублей.

В соответствии с абз.2 п.3.2. Договора, цена работ по договору будет откорректирована Подрядчиком после получения от Заказчика рабочей документации «в производств работ» в полном объеме. Субподрядчик обязуется в случае изменения объектных расчетов и локальных смет по принятым работам. Внести соответствующие изменения в акты формы №КС-2 и справки №КС-3 и оплатить Подрядчику разницу в цене, если таковая возникнет.

Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением.

При уменьшении предусмотренных договором объема работ Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены работы.

В соответствии с п.3.4. Договора, оплата выполненных работ осуществляется, согласно документам, указанным в п.3.6. договора поэтапно, за фактически выполненные субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы при условии соблюдения положений настоящего пункта, а также п.п.3.7., 3.8. договора.

В соответствии с п.3.6. Договора, основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. договора выполненных Субподрядчиком за истекший месяц и предусмотренных настоящим договором строительных работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с реестром актов о приемке выполненных работ и затрат по форме № КС-2, акт приема-передачи оборудования в монтаж (форма № КС-15), акт сдачи-приемки выполненных работ по прочим затратам, счет, счет-фактура.

По затратам, входящим в состав предусмотренных сметной документацией «прочих затрат», основанием для оплаты являются следующие документы - копия договора с приложениями и дополнительными соглашениями между Субподрядчиком и организацией- исполнителем данных работ. Копия счета и счет-фактуры, копия акта выполненных работ, подписанные Субподрядчиком и организацией-исполнителем работ, копия платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего затраты, во всех документах обязательно указание наименования Объекта.

Разделом 4 Договора предусмотрен порядок и срок применения выполненных работ в части соответствия их объема требованиям, установленным договорам, а также порядок и срок оформления результатов такой приемки.

В соответствии с п.4.1. Договора, приемка работ по настоящему договору обеспечивается Подрядчиком и Инженерной организацией, указанной в п.9.2 договора.

В соответствии с п.9.2. Договора, инженерная организация СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» осуществляет совместно с Генподрядчиком и Подрядчиком по поручению Заказчика контроль, надзор и обеспечивает приемку выполненных Субподрядчиком работ по настоящему договору, дает обязательные указания Субподрядчику, а также осуществляет от имени Заказчика иные действия в пределах предоставленных Заказчиком полномочий.

В соответствии с п.4.2. Договора, по завершении в установленные сроки отдельных этапов работ по строительству Объекта, Субподрядчик в срок до 5 (пятого) числа текущего месяца предъявляет выполненные работы для приемки Генподрядчику, Подрядчику и Инженерной организации с сопроводительным письмом:

акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в соответствии со сметной документацией на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах с приложением реестра Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

справки о стоимости работ и затрат (форма №КС-3) на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах;

копии журналов учета выполненных работ (Форма КС-6А), заверенных в установленном порядке;

исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128, в бумажном виде в 6 (шести) экземплярах и в 2(двух) экземплярах на электронном носителе.

В нарушение условий приемки п. 4.2 не представлена исполнительная документация, подтверждающая объем выполненных работ.

В соответствии с абз.2 п.4.2. Договора, подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет добросовестность сведений о выполненных работах, отраженных в документах (в том числе, объемы работ и затрат, соответствие этих объемов «Календарному плану выполнения работ»), подписывает их и передает 2 (два) экземпляра формы №КС-3 и 2 (два) экземпляра формы №КС-2 Субподрядчику.

В соответствии с п.4.3. Договора, по завершении всех работ по настоящему договору Субподрядчик письменно извещает Подрядчика о готовности к сдаче в выполненных работ в целом.

В соответствии с п.4.4. Договора, Подрядчик, получивший сообщение Субподрядчика, указанное в п.4.3. договора, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней создает рабочую комиссию и приступает к приемке выполненных работ.

Субподрядчик не извещал Подрядчика о готовности к сдаче работ.

Отказывая истцу в подписании актов, ответчик сослался также на  то, что в составленных актах расчет стоимости работ произведен не в соответствии с п.п.3.12.1. п.3.12. договора.

В материалы дела истцом представлено письмо о продлении сроков действия договора от 26.12.2016 за исх.№005, которое не имеет надлежащей отметки о получении такого письма ООО «СК «УС-620».

Копия ведомости смонтированного оборудования №1/5, в которой отсутствуют подписи всех членов приемной комиссии, не содержит даты составления.

Представленные в материалы дела истцом документы такие как копия ведомости смонтированного электрооборудования, копии актов передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ, не имеют даты, всех подписей членов комиссии, рабочая комиссия Подрядчиком не создавалась в виду отсутствия оснований для начала приемки работ. К ведомости не приложен Акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2), в соответствии с требованиями п. 2.7. Инструкции. В копиях актов указано приложение №1 Дефектовочная ведомость без указания количества листов и ее приложения к таким актам.

Истцом не представлена исполнительная документация в подтверждение объема выполненных работ. Отдельные копии документов без надлежащим образом оформленных актов, справок, журналов не могут свидетельствовать об исполнении Субподрядчиком своих обязательств в рамках Договора.

Кроме того, по условиям договора, истец должен был передавать истцу результаты выполненных работ ежемесячно, тогда как представленные истцом односторонние акты содержат период выполнения работ: с сентября 2016 года по январь 2017.   

Таким образом, истец в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих выполнение им работ в заявленном размере, передачи их результата ответчику в соответствии с условиями договора, при наличии его мотивированного отказа от подписания актов, в связи с чем, оснований для возложения на истца обязанности по оплате таких работ не имеется. В удовлетворении иска суд отказывает. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст.110 АПК РФ и относится на истца.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 702, 711, 753 ГК РФ, ст.ст. 65, 71, 110, 123, 156, 167 - 171, 176, 177 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "ДОМ МАСТЕРА" в доход федерального бюджета Ф государственную пошлину в сумме 80.162 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Судья: Е.А. Абрамова