Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-7845/2024

«30»

августа

2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«26» 

августа

2024 года

Решение изготовлено в полном объеме   

 «30»

  августа

2024 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2

при участии в заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности

от ответчика: ФИО4 по доверенности

установил. 

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТКЕНИГСТРОЙ» обратилось в суд с иском к Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» о взыскании пени в сумме 6547,57 рублей.

В судебном заседании 26.08.2024 года истец уточнил требования. Просил взыскать пени в сумме  7366,02 рублей. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен контракт от 06.07.2022 года № 0135300003822000240. 

По условиям контракта ООО  «БАЛТКЕНИГСТРОЙ» (подрядчик) обязалось выполнить работы по ремонту водопроводных сетей по ул. Носова и ул. Игошева в пос. Дунаевка Зеленоградского района, а  Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»  (заказчик) обязалась работы принять и  оплатить.

В соответствии с пунктом 2.2 контракта срок выполнения работ 15.08.2022 года.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена согласована 2 094 085,39 рублей.

В соответствии с пунктом 3.5 контракта оплата работ производится заказчиком по факту их выполнения в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта. 

Имущественная ответственность сторон согласована сторонами в разделе 8 контракта.  

Дополнительным соглашением от 09.12.2022 года № 2 к контракту стороны определили стоимость работ в сумме 1 364 077 рублей.

По актам формы КС-2 от 09.12.2022 года заказчик принял работы на сумму 1 364 077 рублей.    

 По платежному поручению от 29.12.2022 года заказчик оплатил работы в сумме 1 364 077 рублей.

По настоящему делу подрядчик просил взыскать пени за нарушение срока оплаты работ по положениям пункта 8.5.1 контракта за период с 21.12.2022 года по 29.12.2022 года в сумме 7366,02 рублей.

Расчет пени проверен судом.

Требования подрядчика подлежат удовлетворению в заявленной сумме на основании статей 310, 312, 330 ГК РФ, положений контракта.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «БАЛТКЕНИГСТРОЙ» пени в сумме 7366,02 рублей, расходы по госпошлине в сумме 2000 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко