АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-6247/2016

г. Южно-Сахалинск

26 мая 2017 года.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Труд-Сахалин» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков  выполненных по государственному контракту от 13.06.2007 № 39/07 работ,  

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 13.02.2017 года, 

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от  28.02.2017 года, директор ФИО4,  

от третьих лиц – представитель ГКУ «Центр дорожного  мониторинга Сахалинской области» ФИО5 по доверенности от  12.04.2017 года, представитель ООО «ПКФ «Южно-Курильский  рыбокомбинат» ФИО6,  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Труд-Сахалин» в течение 2 месяцев с момента  вступления настоящего решения в законную силу выполнить и передать  Государственному казенному учреждению «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» по акту приема-передачи следующие  работы по объекту государственного контракта № 39/01 от 13 июня 2007  года - «Строительство причального комплекса в п. Южно-Курильск, о.  Кунашир. 1-ый пусковой комплекс - причальный комплекс»:  

1. Ремонт разрушенной нижней части оголовка (подпорной стенки)  Глубоководного причала на участке 49-51 (с целью устранения причины  вымывания грунта) методом подводного бетонирования, а также зоны  контакта бетона оголовка со шпунтом:  

Состав работ: 

-очистка поверхностей шпунта и бетона от продуктов коррозии,  биологического обрастания, слабого бетона;  

- установка опалубки; 

-бетонирование методом ВПТ (бетон на сульфатостойком  портландцементе класса В30 9М400) F 300 W8);  

2. Ремонт верхнего покрытия Глубоководного причала на участке  ПК 49- 51:  

Состав работ: -разборка бетона покрытия; 

-заполнение пустот скальным грунтом с образованием  контрфильтра и послойным уплотнением;  

 -восстановление покрытия (бетон класса В22,5 (М300 F200 W6). 

Взыскать с ООО «Труд-Сахалин» в пользу Государственного  казенного учреждения «Дирекция по реализации Федеральной программы  социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской  

области» 6 000 рублей судебных расходов по оплате государственной  пошлины.  

Выдать ООО «Труд-Сахалин» с депозита суда 300 000 рублей,  уплаченных по платежному поручению № 564 от 17.05.2017 года за  экспертизу (встречное обеспечение) по делу № А59-6247/2016.  

Перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей  осуществить на счет ООО «Труд-Сахалин» по следующим реквизитам:  Новосибирский филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Новосибирск, БИК  045004839, Корреспондентский счет № 3010180550040000839, № счета  40702810100120000206, Получатель ООО «Труд-Сахалин».  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова